16_6800371  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ  

(резолютивная часть)

Дело № А41-8584/18

21 февраля 2018 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Досовой М.В.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества  «Московская Инженерно-Строительная Компания» к государственному казенному  учреждению Московской области «Дирекция дорожного строительства» о внесении  изменений в государственный контракт,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Внести изменения в государственный контракт от 03.06.2016 № 1/2016-21 в части  сроков выполнения работ по объекту «Реконструкция паромной переправы через р. Ока у  н.п. Ловцы на автомобильной дороге Белоомут-Ловцы в Луховицком районе Московской  области», изложив в следующей редакции:  

«пункт 3.2. Общая продолжительность работ по строительству и вводу в эксплуатацию  Объекта с учетом испытательных, пусконаладочных и иных работ, выполнение которых  необходимо для ввода в эксплуатацию Объекта составляет 24,5 месяца;  

пункт 3.4. Работы по Контракту должны быть завершены не позднее 24,5 месяцев с  момента начала выполнения работ;  

пункт 17.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами  и действует до 31.12.2018 года».  

Взыскать с государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция  дорожного строительства» в пользу открытого акционерного общества «Московская  Инженерно-Строительная Компания» 6 000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по оплате  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня принятия.  

Судья М.В. Досова