171_19319708  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17  

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-24197/18-171-176

г. Москва

28 июня 2018 г.

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Р.Т. Абрекова (единолично)  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Л.А. Соколовой  Рассмотрел в открытом судебном заседании дело  

по исковому заявлению АО "РУСАТОМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 109507, 

<

...>, дата регистрации: 28.07.2015г.  

к ответчику ООО "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ЧЕБОКСАРСКОГО  ЭЛЕКТРОАППАРАТНОГО ЗАВОДА" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  119435, 

<

...>, дата регистрации:  28.07.2003г.  

о взыскании задолженности в размере 644 999 руб. 35 коп. по договору поставки от  21.12.2016г. № РЗА-017/2016  

по встречному исковому заявлению о взыскании неустойки за просрочку оплаты  авансового и окончательного платежей в размере 245 361 руб. 60 коп.,  

при участии: от истца – ФИО1 по дов. № 670 от 06.02.2018; ФИО2 по  дов. № 498 от 12.12.2017  

от ответчика – ФИО3 по дов. № 84 от 09.04.2018 

РЕШИЛ:

По первоначальному иску взыскать с ООО "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТАМИ ЧЕБОКСАРСКОГО ЭЛЕКТРОАППАРАТНОГО ЗАВОДА" в пользу  

АО "РУСАТОМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ" 162 645  рублей неустойки за нарушение срока поставки Оборудования по договору, 464 700  рублей за нарушение срока предоставления обеспечения возврата аванса и обеспечения  исполнения договора, 17 654 рубля 35 копеек процентов за нарушение срока передачи  предварительно оплаченного товара, 15 900 руб. расходов по уплате государственной  пошлины при подаче настоящего искового заявления.  

По встречному иску взыскать с АО "РУСАТОМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ  СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ" в пользу ООО "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ  ЧЕБОКСАРСКОГО ЭЛЕКТРОАППАРАТНОГО ЗАВОДА" пени в размере 22 305,60  руб., расходы по государственной пошлине в размере 718,82 руб.  

В остальной части встречного иска отказать. 

В результате зачета требований взыскать с ООО "ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ  ПРОЕКТАМИ ЧЕБОКСАРСКОГО ЭЛЕКТРОАППАРАТНОГО ЗАВОДА" в пользу  

АО "РУСАТОМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ" 622 693,75  руб., расходы по государственной пошлине в размере 15 181,18 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: Р.Т. Абреков