АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-15006/2023

Нижний Новгород                                                                                                                                    02 августа 2023 года

Резолютивная часть объявлена 24.07.2023

Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Окутина С.Г. (шифр дела 20-406) 

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания 

секретарем судебного заседания ФИО1

 

при участии представителей сторон:

от истца: до перерыва – ФИО2 (доверенность, онлайн), после перерыва- не явились

от ответчика: не явились

рассмотрел в судебном заседании дело

по иску общества с ограниченной ответственностью "Форест" 

(ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Строй-Райт" 

(ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 12 675 227 руб.,

 

и   у с т а н о в и л:

иск заявлен о взыскании 9 211 334 руб. 18 коп. неосновательного обогащения, 3 409 002 руб. 51 коп. неустойки за  нарушение сроков исполнения работ за период с 01.02.2023 по 01.03.2023 по договору подряда от 17.08.2022 №59/ВР, с 16.11.2022 по 16.12.2022 по договору подряда от 06.09.2022 №69/ВР, 54 889 руб. 46 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.04.2023 по 18.05.2023 и далее по день фактической оплаты долга в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

Исковые требования основаны на статьях 309, 310, 330, 395, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) и  мотивированы  ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по возврату аванса ввиду не выполнения работ, предусмотренных договорами подряда от 17.08.2022 №59/ВР, от 06.09.2022 №69/ВР.

Согласно части 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если в предварительном судебном заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия и ими не были заявлены возражения относительно рассмотрения дела в их отсутствие, суд вправе завершить предварительное судебное заседание и открыть судебное заседание в первой инстанции. 

Руководствуясь указанными правилами, суд счел возможным завершить предварительное судебное заседание и продолжить рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

В судебном заседании 24.07.2023 объявлен перерыв до 10 час. 35 мин.

После перерыва судебное заседание продолжено.

Истец и ответчик явку своих представителей в судебное заседание  после перерыва не обеспечили.

Дело рассмотрено без участия представителей истца и ответчика по правилам статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик исковые требования не  оспорил, отзыв не представил.

Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы истца до перерыва, суд установил следующее.

Между ООО «Форест» (далее – заказчик ) и ООО «Строй-Райт» (далее – подрядчик)  заключен договор подряда от 17.08.2022 №59/ВР,  по условиям которого заказчик поручает подрядчику выполнение отделочных работ мест общего пользовании (МОП) Жилой квартал 5 в объеме, в порядке, на условиях и в сроки, установленные настоящим договором и приложениями к нему, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы на свой риск, своими силами и силами привлекаемых им субподрядчиков и передать заказчику надлежащий результат выполнения работ по договору, указанный в пункте 2.2. настоящего договора, в порядке и в сроки, установленные договором. Работы выполняются на объекте капитального строительства: «Третий этап комплексной жилой застройки по адресу: 

<

...>, внутригородское муниципальное образование «Москворечье- Сабурово» (ЮАО). Жилой квартал 4. Жилой квартал 5», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0005003:6463 по адресу: 2-й Котляковский переулок, вл. 1/1.

06.09.2022 между сторонами заключен договор подряда №69/ВР, по условиям которого заказчик поручает подрядчику выполнение отделочных работ паркинга Жилой квартал 5 в объеме, в порядке, на условиях и в сроки, установленные настоящим Договором и приложениями к нему, а подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы на свой риск, своими силами и силами привлекаемых им субподрядчиков и передать заказчику надлежащий результат выполнения работ по договору, указанный в пункте 2.2. настоящего договора, в порядке и в сроки, установленные договором. Работы выполняются на объекте капитального строительства: ««Третий этап комплексной жилой застройки по адресу: 

<

...>, внутригородское муниципальное образование «Москворечье- Сабурово» (ЮАО). Жилой квартал 4. Жилой квартал 5», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 77:05:0005003:6463 по адресу: 2-й Котляковский переулок, вл. 1/1.

Согласно пункту 2.3 договоров подряда от 17.08.2022 №59/ВР, от 06.09.2022 №69/ВР работы считаются выполненными подрядчиком в полном объеме и надлежащим образом при условии сдачи заказчику результата работ, указанного в пункте 2.2 договора с даты подписания сторонами окончательного акта сдачи- приемки работ.

Согласно пункту 3.1.16 подрядчик гарантирует соблюдение всех сроков выполнения работ, указанных в календарном графике производства работ, составляющим приложение №2 к договору, обязуется прилагать все возможные усилия к предотвращению задержек сроков производства работ, предусмотренных календарным графиком производства работ, и обязан незамедлительно и за свой счет устранять любые отступления от календарного графика производства работ, которые могут привести к нарушениям промежуточных сроков выполнения работ или повлечь нарушение срока завершения работ по настоящему договору.

Цена договора в соответствии со сметой (приложение №1) по договору №59/ВР составляет 25 597 971  руб.50 коп., по договору №69/ВР - 31 037 421 руб. 90 коп.

В соответствии с пунктом 18.2 договоров подряда заказчик на основании письменного обращения подрядчика вправе производить авансовые платежи.

В порядке исполнения обязательств по оплате аванса истцом перечислены ответчику денежные средства в адрес в сумме 6 970 572 руб. по  договору №59/ВР, 5 360 932 руб. 18 коп.  по договору №69/ВР.

Сроки выполнения работ являются существенным условием и определены в графике производства работ (пункт 7.1 договора).

Однако в нарушение обязательств, предусмотренных договорами подряда, подрядчик работ в полном объеме не выполнил. Какой-либо информации о невозможности выполнения работ по договорам подряда, отказе от исполнения договоров со стороны подрядчика не направлялось.

Стороны пришли к соглашению о том, что любое нарушение (не исполнение) подрядчиком заявлений и гарантий подрядчика, предусмотренных настоящим разделом договора, является существенным нарушением подрядчиком своих обязательств по настоящему договору и является безусловным основанием для расторжения настоящего договора заказчиком в одностороннем внесудебном порядке по вине подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 3.6 договора).

Договор также может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке в случаях и в порядке, определенных настоящим договором (21.3 договора).

В соответствии с пунктом 21.4 заказчик вправе в любое время (до сдачи подрядчиком заказчику надлежащего результата работ) в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору как по своему усмотрению (данное право Заказчика является безусловным), так и в случае следующих нарушений подрядчиком своих обязательств по договору.

Пунктом 21.4.3 договора в случае однократного нарушения более чем на 10 (десять) календарных дней любого срока выполнения работ, включая промежуточные, установленного Графиком производства работ.

В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора заказчик обязан направить, либо вручить подрядчику письменное уведомление об отказе от исполнения обязательств по настоящему договору. Уведомление направляется заказчиком подрядчику не позднее, чем за 15 календарных дней до даты расторжения договора по месту нахождения подрядчика, указанному в ЕГРЮЛ, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо вручается подрядчику нарочным (по выбору заказчика). Подрядчик несет все риски, связанные с неполучением уведомления заказчика в связи с отсутствием по адресу своего места нахождения. В случае отсутствия подрядчика по адресу места нахождения, подрядчик считается получившим уведомление заказчика с даты прибытия такого уведомления в почтовое отделение, осуществляющее обслуживание адреса места нахождения подрядчика. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении заказчика (пункт 21.5).

В силу пункта 21.9 расторжение или истечение срока действия договора не влечет прекращение обязательств сторон по проведению взаиморасчетов по настоящему договору и предоставлению отчетных и иных документов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также тех обязательств сторон, для которых в договоре предусмотрен особый срок действия.

В связи с невыполнением обязательств по договорам подряда, истцом в адрес ответчика направлены уведомления от 10.04.2023 № ЦО/06-43/23, ЦО/06-42/23  о расторжении договоров подряда и требованием вернуть суммы перечисленного аванса, однако, требование о возврате неотработанного аванса ответчиком не удовлетворено. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в Арбитражный суд Нижегородской области с исковым заявлением.

Оценив фактические обстоятельства дела и представленные доказательства, в силу статьи 71 АПК РФ суд находит заявленные исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в части в силу следующего.

В соответствии с положениями статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Нормой статьи 717 ГК РФ предусмотрено право заказчика в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В силу положений пункта 2 статьи 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Согласно положениям статьи 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

В соответствии с нормами статьи 450.1 ГК РФ предоставленное гражданским законодательством или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено законодательством или договором.

Как следует из материалов дела, истец заявил отказ от исполнения договора, таким образом, прекратив договорные отношения.

Материалами дела подтверждено, ответчиком не оспорено то обстоятельство, что сумма денежных средств, уплаченных в пользу ответчика составляет 12 331 504 руб. 18 коп. Сведений о выполнении работ ответчиком в полном объеме в рамках договорных отношений у суда не имеется.

 Задолженность (размер неотработанного аванса) на день предъявления иска составила 9 211 334 руб. 18 коп.

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Таким образом, установив указанные обстоятельства, руководствуясь положениями статей 309, 715, 1102 ГК РФ, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных требований ввиду возникновения на стороне ответчика неосновательного обогащения в виде неосвоенного аванса по договору и отсутствия оснований для удержания подрядчиком перечисленных денежных средств.

В соответствии с положениями статей 64, 65 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законодательством порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Ответчик, возражений по сумме выплаченного аванса в ходе рассмотрения дела не заявил, доказательств исполнения обязательств по договорам подряда в полном объеме не представил.

Суд предлагал ответчику представить мотивированный отзыв по делу, в том числе доказательства выполнения работ, а также разъяснял последствия непредставления доказательств надлежащего исполнения обязательств, однако ответчик вопреки статье 65 АПК РФ каких-либо доказательств, опровергающих доводы истца, не представил.

Часть 3.1 статьи 70 АПК РФ предусматривает, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (статья 9 АПК РФ).

Учитывая вышеизложенное, суд находит исковые требования о взыскании 1 000 000,00 руб. предъявленным правомерно и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Также истец заявил требование о взыскании с ответчика 3 409 002 руб. 51 коп. неустойки за  нарушение сроков исполнения работ за период с 01.02.2023 по 01.03.2023 по договору подряда от 17.08.2022 №59/ВР, с 16.11.2022 по 16.12.2022 по договору подряда от 06.09.2022 №69/ВР, 54 889 руб. 46 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 20.04.2023 по 18.05.2023 и далее по день фактической оплаты долга в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

На основании пункта 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

За просрочку (нарушение) любого из сроков выполнения работ по настоящему договору, предусмотренных графиком производства работ, а также в случае нарушения подрядчиком срока исполнения любого из своих обязательств, установленного настоящим договором, подрядчик обязан по требованию заказчика выплатить заказчику неустойку в размере 0,2 процента от цены договора за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства, если иные меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства не предусмотрены настоящим договором (п.20.6 договоров подряда от 17.08.2022 №59/ВР, от 06.09.2022 №69/ВР ).

В соответствии со статьей 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Пунктом 65 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» предусмотрено, что по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства.

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.

Расчет неустойки, начисленной за нарушение сроков исполнения обязательств по договорам подряда, и расчет процентов за пользование чужими денежными средствами судом проверен и признан верным. Истец заявил неустойку в меньшем размере, чем предусмотрено по условиям договоров, что не нарушает прав должника.

Доказательств своевременного исполнения обязательств по договорам подряда от 17.08.2022 №59/ВР, от 06.09.2022 №69/ВР ответчик не представил, расчет неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами не спорил.

При указанных обстоятельствах требования о взыскании неустойки и процентов за пользование чужими денежными подлежат удовлетворению.

Расходы по государственной пошлине  в порядке части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строй-Райт"  (ИНН: 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Форест"  (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) 9 211 334 руб. 18 коп. неосновательного обогащения, 3 409 002 руб. 51 коп. неустойки, 54 889 руб. 46 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также проценты с 19.05.2023 по день фактической оплаты долга на основании статьи 395 ГК РФ,  86 376 руб. расходов по оплате  государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения. 

 

Судья                                                                                                                                                                   С.Г. Окутин