Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-19651/16-51-171

город Москва

24 января 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 17 января 2018 года

Решение в полном объеме изготовлено 24 января 2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Козленковой О.В., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙТАЙМ» (ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Атлас-Логистик» (ОГРН 

<

***>) 

о взыскании по договору строительного подряда № 1/17-02 от 17 февраля 2015 года неустойки в размере 370 765 руб. 92 коп., по договору строительного подряда № 2/20-05 от 20 мая 2015 года долга в размере 1 210 829 руб. 85 коп., неустойки в размере 1 252 327 руб., по договору строительного подряда № 3/01-06 от 01 июня 2016 года долга в размере 2 053 561 руб. 60 коп., неустойки в размере 2 012 490 руб.,

при участии:

от истца – ФИО2, по дов. № б/н от 31 марта 2017 года;

от ответчика – ФИО3, по дов. № б/н от 21 августа 2017 года;

У С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Карлсон» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением, с учетом принятого в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) изменения размера исковых требований, к обществу с ограниченной ответственностью «Атлас-Логистик» (далее – ответчик) о взыскании по договору строительного подряда № 2/20-05 от 20 мая 2015 года долга в размере 1 077 855 руб., неустойки в размере 1 252 327 руб., по договору строительного подряда № 3/01-06 от 01 июня 2016 года долга в размере 2 053 561 руб. 60 коп., неустойки в размере 2 012 490 руб.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 08 июня 2017 года удовлетворено заявление о процессуальном правопреемстве. По делу № А40-19651/16-51-171 произведена замена истца, общества с ограниченной ответственностью «Карлсон», на правопреемника, общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТАЙМ» (далее – истец).

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражает по доводам, изложенным в письменном отзыве.

Рассмотрев заявленные требования, выслушав представителей сторон, исследовав и оценив в материалах дела доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Как следует из материалов дела, 17 февраля 2015 года между истцом (генеральным подрядчиком) и ответчиком (заказчиком) был заключен договор строительного подряда № 1/17-02 на выполнение комплекса работ по обеспыливанию плиты пола площадью 17 000 м2 полиуретановым праймером, с последующим нанесением однокомпонентного матового цветного полиуретанового покрытия (т. 6 л.д. 84–101).

Цена договора составила 13 090 000 руб. (приложение № 1 к договору).

Сроки выполнения – с 23 февраля по 15 марта 2015 года (приложение № 3 к договору).

15 марта 2015 года между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение дополнительных работ стоимостью 280 000 руб. (т. 7 л.д. 01). Сроки выполнения – с 15 марта по 15 апреля 2015 года (приложение № 2 к дополнительному соглашению № 1 (т. 7 л.д. 03)).

Факт выполнения работ по договору и дополнительному соглашению № 1 к договору подтверждается подписанными обеими сторонами формами КС-2, КС-3 № 1 от 31.03.2015 на сумму 5 654 880 руб., № 2 от 15.04.2015 на сумму 7 435 120 руб., № 3 от 15.04.2015 на сумму 104 720 руб.

Графиком финансирования (приложение № 4 к договору) установлен следующий порядок оплаты: оплата авансового платежа в сумме 10 200 000 руб. – 18.02.2015; оплата в соответствии с КС-2, КС-3 окончательного выполнения работ в сумме 2 890 000 руб. – 16.03.2015.

В обоснование заявленных требований (с учетом ходатайства об изменении размера – т. 8 л.д. 102-103) истец указал, что задолженность по договору составляет 0 руб.

20 мая 2015 года между истцом (генеральным подрядчиком) и ответчиком (заказчиком) был заключен договор строительного подряда № 2/20-05 на выполнение комплекса работ по изготовлению и бетонированию монолитной дороги для пожарных машин вдоль складов №№ 1-9; комплекса отделочных работ здания АБК 2 этаж; комплекса работ по изготовлению и бетонированию монолитного пандуса без навеса на складе № 1 (т. 7 л.д. 04-28).

Цена договора составила 2 000 000 руб. (приложение № 1 к договору).

Сроки выполнения – с 25 мая по 15 июля 2015 года (приложение № 3 к договору).

15 июня 2015 года между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение дополнительных работ стоимостью 63 750 руб., сроки выполнения – с 15 июня по 15 июля 2015 года (т. 7 л.д. 29-32).

15 июля 2015 года между сторонами заключено дополнительное соглашение № 2 к договору на выполнение дополнительных работ стоимостью 195 762 руб., сроки выполнения – с 15 по 31 июля 2015 года (т. 7 л.д. 33-36).

Факт выполнения работ по договору и дополнительным соглашениям №№ 1, 2 к договору подтверждается подписанными обеими сторонами формами КС-2, КС-3 № 1 от 30.06.2015 на сумму 1 035 895 руб., № 2 от 15.07.2015 на сумму 964 105 руб., № 3 от 15.07.2015 на сумму 63 750 руб., № 4 от 31.07.2015 на сумму 195 762 руб. (т. 6 л.д. 111-125).

Графиком финансирования (приложение № 4 к договору) установлен следующий порядок оплаты: оплата авансового платежа в сумме 600 000 руб. – 22.05.2015; оплата в соответствии с КС-2, КС-3 окончательного выполнения работ в сумме 700 000 руб. – 20.06.2015, в сумме 700 000 руб. – 15.07.2015.

В обоснование заявленных требований (с учетом ходатайства об изменении размера – т. 8 л.д. 102-103) истец указал, что задолженность по договору составляет 1 077 855 руб.

01 июня 2015 года между истцом (генеральным подрядчиком) и ответчиком (заказчиком) был заключен договор строительного подряда № 3/01-06 на выполнение комплекса работ по обеспыливанию плиты пола площадью 21 168 м2 полиуретановым праймером, с последующим нанесением однокомпонентного матового цветного полиуретанового покрытия (т. 6 л.д. 133-155).

Цена договора составила 16 299 360 руб. (приложение № 1 к договору).

Сроки выполнения – с 15 июня по 30 июля 2015 года (приложение № 3 к договору).

04 августа 2015 года между сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к договору на выполнение дополнительных работ стоимостью 280 000 руб. Сроки выполнения – с 04 по 20 августа 2015 года (т. 7 л.д. 37-39).

Факт выполнения работ по договору и дополнительному соглашению № 1 к договору подтверждается подписанными обеими сторонами формами КС-2, КС-3 № 1 от 30.06.2015 на сумму 7 345 030 руб., № 1 от 20.08.2015 на сумму 280 000 руб., № 2 от 20.08.2015 на сумму 8 954 330 руб. (т. 6 л.д. 105-106, 108-109, 121-122).

Графиком финансирования (приложение № 4 к договору) установлен следующий порядок оплаты: оплата авансового платежа в сумме 13 695 696 руб. – 10.06.2015; оплата в соответствии с КС-2, КС-3 окончательного выполнения работ в сумме 2 603 664 руб. – 30.07.2015.

В обоснование заявленных требований (с учетом ходатайства об изменении размера – т. 8 л.д. 102-103) истец указал, что задолженность по договору составляет 2 053 561 руб. 60 коп.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статьей 746 ГК РФ установлено, что оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

 В соответствии с положениями статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В силу пункта 1 статьи 754 ГК РФ подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства.

В соответствии со статьями 724, 756 ГК РФ если иное не установлено законом или договором подряда, заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, при условии, что оно выявлено в сроки, установленные статьей 724 ГК РФ, при этом предельный срок обнаружения недостатков строительных работ составляет пять лет.

Согласно пунктам 1, 3 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику; заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть выявлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

Ответчик в представленном отзыве заявил о том, что в выполненных истцом работах имелись скрытые недостатки, которые не могли быть выявлены при приемке работ.

В соответствии с частью 2 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Для разрешения вопросов, требующих специальных познаний, судом, по ходатайству ответчика, в порядке ст. 82 АПК РФ было назначено производство судебной экспертизы, проведение которой было поручено экспертам ООО «Агентство «Независимость» ФИО4, имеющему высшее образование по специальности «Гидромелиорация» с присвоением квалификации инженера-гидротехника с 22 июня 1985 года, ФИО5, имеющему высшее образование по специальности «Металловедение, оборудование и технология термической обработки» с присвоением квалификации инженера-механика с 28 июня 1983 года, ФИО6, имеющему высшее образование по специальности «Репрография» с присвоением квалификации инженера-репрографа с 15 февраля 1989 года, ФИО7, имеющему высшее образование по специальности «Радиоэлектронные устройства» с присвоением квалификации радиоинженера с 18 сентября 1976 года.

На разрешение экспертов судом были поставлены следующие вопросы: 

- соответствует ли качество работ, выполненных по договорам строительного подряда, условиям договоров, требованиям законодательства Российской Федерации, действующим строительным нормам и правилам?

- имеются ли дефекты в результатах работ и какие? 

- в случае выявления дефектов определить причину их возникновения - являются ли они следствием ненадлежащего выполнения работ или следствием эксплуатации объекта?

- определить объем и стоимость фактически выполненных ООО «Карлсон» работ, соответствующих условиям договоров строительного подряда и требованиям законодательства Российской Федерации, действующим строительным нормам и правилам.

Экспертами в материалы дела было представлено заключение (т. 6 л.д. 3-83), в котором были даны ответы на поставленные судом вопросы.

При ответе на первый вопрос эксперты установили, что произведенные работы, выполненные по договорам строительного подряда, на момент осмотра, условиям договора, требованиям законодательства Российской Федерации, в целом соответствуют, но вместе с тем, имеют недостатки, и в части действующим строительным нормам и правилам не соответствуют.

При ответе на второй вопрос эксперты установили, что при проведении обследования объекта в результатах экспертизой зафиксированы следующие дефекты: продольные и поперечные трещины бетонного полотна дороги; перепад полотна дороги на 2 см; обнажения арматуры; истертость полимерного однокомпонентного цветного покрытия бетонного пола в результате механического воздействия; частичное отслоение полимерного однокомпонентного цветного покрытия от пола.

При ответе на третий вопрос эксперты установили, что дефекты монолитной дороги для пожарных машин вдоль складов №№ 1-9 образовались в результате эксплуатации и просадки разуплотненного грунта, находящегося ниже слоя, уплотненного подрядчиком при устройстве дороги. 

Истертость монолитного полимерного однокомпонентного цветного покрытия пола образовалась в результате эксплуатации. Отслоение полимерного однокомпонентного цветного покрытия от пола (3 %) – является следствием ненадлежащего выполнения работ.

При ответе на четвертый вопрос эксперты установили, что общая стоимость выполненных подрядчиком работ и принятых заказчиком составляет 32 033 592 руб., что полностью совпадает со стоимостью работ, указанной в представленных договорах. Стоимость работ по обеспыливанию и нанесению однокомпонентного матового цветного полиуретанового покрытия (договоры № 1/17-02 от 17.02.2015; № 3/01-06 от 01.06.2015, дополнительное соглашение № 1 к договору № 1/17-02) составляет 29 494 080 руб. Исходя из стоимости работ по устройству покрытия пола, к вычету за некачественно выполненные работы предполагается (3 %) или 884 822 руб. 40 коп., с учетом НДС 18 %. Общая стоимость работ, за вычетом стоимости некачественно выполненных работ составляет 31 148 769 руб. с учетом НДС 18 %.

Правовой статус заключения судебной экспертизы определен законом в качестве доказательства, которое не имеет заранее установленной силы, не носит обязательного характера.

В силу части 1 статьи 64, статей 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Заключение эксперта является одним из доказательств по делу и исследуется наряду с другими доказательствами (статей 64, 71, 82, 86 АПК РФ).

Оценивая заключение экспертов, суд приходит к выводу о его достоверности и допустимости, его анализ позволяет полагать, что оно оформлено в соответствии с требованиями статей 82, 83, 86 АПК РФ, в нем отражены все предусмотренные частью 2 статьи 86 АПК РФ.

Заключение экспертов основано на материалах дела, является ясным. В выводах экспертов содержится полные ответы на поставленные судом вопросы, противоречия в выводах отсутствуют. В материалах дела отсутствуют доказательства того, что избранная экспертами методика не соответствует требованиям законодательства, и привела к некорректному результату.

Таким образом, данное заключение экспертизы в силу статей 64, 67, 68, 71, 82, 86 АПК РФ принимается судом в качестве надлежащего доказательства по делу.

Сведения, содержащиеся в экспертном заключении, документально сторонами не опровергнуты (статья 65 АПК РФ).

Несогласие ответчика с экспертным заключением, выраженное, в том числе, в форме представленной ответчиком рецензии, не свидетельствует о неправомерности и необоснованности сделанных экспертами выводов, и не является основанием для непринятия экспертного заключения в качестве надлежащего доказательства по делу.

Приведенные ответчиком доводы о несоответствии заключения эксперта имеющимся методикам исследования суд отклоняет, так как на основании абзаца 1 статьи 7 Федерального закона № 73-ФЗ от 31.05.2001 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» выбор способов и методов исследования входит в компетенцию эксперта.

Законодательство не содержит дополнительного требования к эксперту в виде членства в СРО. Вместе с тем, деятельность эксперта обеспечивается более высокой степенью его индивидуальной ответственности под страхом уголовного наказания.

Учитывая изложенное, суд полагает ошибочным довод ответчика о невозможности использования экспертного заключения, проведенного экспертами в связи с отсутствием их членства в СРО.

Довод ответчика о том, что на момент осмотра объекта температура воздуха была отрицательной и составляла -12 С, - 14 С (msk.nuipogoda.ru), в связи с чем экспертами были нарушены требования ГОСТ 22690-88, судом отклоняется, поскольку ответчиком не представлено соответствующих доказательств, учитывая, что данный сайт посвящен погоде в Москве, а объект находится в Московской области. 

Допрошенный судом по ходатайству ответчика, эксперт ФИО4 подтвердил выводы, изложенные в приведенном выше заключении.

Протокольным определением от 17 января 2018 года в удовлетворении ходатайства ответчика о назначении повторной экспертизы отказано, поскольку назначение повторной экспертизы относится к праву арбитражного суда, которое он может реализовать в случае, если с учетом всех обстоятельств дела придет к выводу о необходимости осуществления такого процессуального действия для правильного разрешения спора. В настоящем деле такая необходимость отсутствует. Несогласие ответчика с результатом экспертизы само по себе не влечет необходимости в проведении повторной экспертизы.

Оценив представленные в материалы дела доказательства с учетом требований статьи 71 АПК РФ, суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению требования истца о взыскании по договору строительного подряда № 2/20-05 от 20 мая 2015 года долга в размере 1 210 829 руб. 85 коп., по договору строительного подряда № 3/01-06 от 01 июня 2016 года долга в размере 2 053 561 руб. 60 коп. (согласно уточнению истца - за вычетом произведенной ответчиком частичной оплаты и стоимости некачественно выполненных работ), поскольку материалами дела подтвержден факт выполнения работ на данную сумму.

Истец также просит суд взыскать с ответчика по состоянию на 19.06.2017 по договору строительного подряда № 2/20-05 от 20 мая 2015 года неустойку в размере 1 252 327 руб., по договору строительного подряда № 3/01-06 от 01 июня 2016 года неустойку в размере 2 012 490 руб.

Пунктом 9.2.1. договоров установлена ответственность заказчика за просрочку оплаты в виде пеней в размере 0,15 % от размера подлежащих перечислению денежных средств за каждый день просрочки.

В силу пункта 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пенями) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Контррасчета неустойки ответчик не представил, о снижении не заявил. 

Указанный расчет судом проверен и признан математически и методологически верным. 

Учитывая изложенное, неустойка подлежит взысканию с ответчика в заявленном размере в соответствии с пунктом 9.2.1. договоров, ст. 330 ГК РФ.

Поскольку истцу предоставлялась отсрочка уплаты госпошлины, исковые требования удовлетворены в полном объеме, госпошлина подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Расходы ответчика по оплате судебной экспертизы в соответствии со ст. 110 АПК РФ возлагаются на ответчика.

Руководствуясь ст.ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167-170 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Атлас-Логистик» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙТАЙМ» по договору строительного подряда № 1/17-02 от 17 февраля 2015 года неустойку в размере 370 765 руб. 92 коп., по договору строительного подряда № 2/20-05 от 20 мая 2015 года долг в размере 1 210 829 руб. 85 коп., неустойку в размере 1 252 327 руб., по договору строительного подряда № 3/01-06 от 01 июня 2016 года долг в размере 2 053 561 руб. 60 коп., неустойку в размере 2 012 490 руб. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Атлас-Логистик» в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину в размере 57 500 руб. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: О.В. Козленкова