68_9705374  

Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации 

 РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть)

Дело № А41-106656/19

09 июня 2020 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе: судьи Быковских И. В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску АО "ПО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" к Федеральному  агентству воздушного транспорта о внесении изменений в государственный контракт, третье  лицо – ФГУП "АГА",  

при участии: 

от АО "ПО "ВОЗРОЖДЕНИЕ"– ФИО2 по дов. № 50 от 18.05.2020 г.,  от Федерального агентства воздушного транспорта  

от ФГУП "АГА" 

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 110 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

РЕШИЛ:

Внести изменения в государственный контракт № ГК-25-14 от 29.04.2019 г. в части  сроков выполнения работ по объекту: «Реконструкция и развитие аэропорта «Домодедово».  Объекты федеральной собственности (I и II очередей строительства), II этап реализации» (2  этап), изложив пункт 12.1 контракта в части сроков работ в следующей редакции:  

«Начальный и конечный сроки выполнения работ по контракту, а также  промежуточные сроки выполнения этапов работ определяются Календарным графиком  производства работ на объекте (Приложение № 2 к контракту в новой редакции согласно  приложению № 1 к исковому заявлению). Срок выполнения работ по контракту установить  до 02.07.2020».  

Взыскать с Федерального агентства воздушного транспорта в пользу АО "ПО  "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 6000 руб. 00 коп. в возмещение расходов по уплате государственной  пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в  месячный срок со дня его принятия.  

Судья И. В. Быковских