Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-84444/2023

15 апреля 2024 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе судьи  Бутова Р.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Прониным М.А.  

рассмотрев 14.03.2024 в судебном заседании дело по иску:

государственного казенного учреждения Ленинградской области "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (адрес:  Россия 190103, Рижский  проспект, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>);

к обществу с ограниченной ответственностью "ВОЗДУШНАЯ ГЕОДЕЗИЯ" (адрес:  Россия 160009, Г ВОЛОГДА, УЛ МАЛЬЦЕВА, 52, 506, Вологодская область, ГОРОД ВОЛОГДА,, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании 8 940, 67 руб. неустойки за период с 11.11.2022 по 22.12.2022 за нарушение сроков выполнения работ по этапу 1 Контракта, 20 238, 69 руб. неустойки за период с 23.11.2022 по 16.08.2023 за нарушение сроков выполнения работ по этапу 2 Контракта с ее последующим начислением до момента фактического исполнения работ по этапу 2, 2 933 руб. неустойки за период с 01.12.2022 по 16.08.2023 за нарушение сроков выполнения работ по этапу 3 Контракта с ее последующим начислением до даты фактического исполнения работ по этапу 3

при участии: от истца – ФИО1, доверенность от 19.09.2023, от ответчика – не явился, извещен

установил:

государственное казенное учреждение Ленинградской области "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" (далее – истец, Учреждение) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, к обществу с ограниченной ответственностью "ВОЗДУШНАЯ ГЕОДЕЗИЯ" (далее – ответчик, Общество) о взыскании 1 889, 69 руб. неустойки за период с 12.09.2023 по 04.10.2023 за нарушение сроков выполнения работ по этапу 2 Контракта с ее последующим начислением до момента фактического исполнения работ по этапу 2, 282, 16 руб. неустойки за период с 12.09.2023 по 04.10.2023 за нарушение сроков выполнения работ по этапу 3 Контракта с ее последующим начислением до даты фактического исполнения работ по этапу 3. Уточнение принято судом.

Определением суда от 08.09.2023 иск принят к рассмотрению в порядке упрощенного производства, определением суда от 06.12.2023 суд перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства, истцу предложено проверить поступившие оплаты, провести сверку расчетов, ответчику предложено представить отзыв.

 Занесенным в протокол судебного заседания определением, суд в соответствии с пунктом 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации завершил предварительное судебное заседание и открыл судебное заседание в первой инстанции.

В судебное заседание ответчик, извещенный надлежащим образом, явку своего представителя не обеспечил, что в соответствии со статьей 156 АПК РФ не является препятствием к рассмотрении дела по существу по имеющимся в деле доказательствам. В материалы дела представлен отзыв, согласно доводам которого задолженность ответчика по оплате штрафных санкции оплачена платежным поручением № 366 от 27.09.2023.

Представитель истца заявленные требования поддержал.

Выслушав представителя истца, исследовав представленные в материалы дела доказательства, суд установил следующее.

Как усматривается из материалов дела и указывает Истец в обоснование иска, между Истцом и Ответчиком заключен государственный контракт от 10.10.2022 № 0210 на выполнение кадастровых работ по разделу автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Паша - Свирица - Загубье» с целью образования двух самостоятельных автомобильных дорог в Волховском районе Ленинградской области и приведения ее в соответствие с распоряжением Правительства Ленинградской области от 19.04.2022 № 242-р (далее - Контракт).

В соответствии с пунктами 1.2., 1.3. Контракта Исполнитель обязался выполнить кадастровые работы по разделу автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Паша - Свирица - Загубье» (далее - Работы), а Заказчик обязался принять надлежащим образом выполненные работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. Работы выполняются в соответствии с Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), Расчетом стоимости (Приложение № 2 к Контракту), Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту), условиями Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации, установленными для данного вида Услуг.

Согласно п. 1.4. Контракта существенными условиями являются цена, сроки, качество, надлежащее обеспечение исполнения обязательств по Контракту в период действия Контракта.

Пунктом 2.1. Контракта предусмотрена обязанность Исполнителя по выполнению работ в следующие сроки: 1 этап - с даты заключения Контракта - до 10.11.2022; 2 этап - с даты заключения Контракта - до 22.11.2022; 3 этап – с даты заключения Контракта – до 30.11.2022.

В соответствии с п. 3.1. цена Контракта составляет 750 000 руб. 

В соответствии с п. 6.2.1. Контракта, выполнить Работы в сроки, предусмотренные Описанием объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту) и условиями Контракта.

Согласно Описанию объекта закупки (Приложение № 1 к Контракту), Календарному графику выполнения Работ (Приложение № 3 к Контракту), 1 этап работ включает в себя формирование технического плана на раздел сооружения с кадастровым номером 47:10:0000000:23596; 2 этап – уточнение местоположения полос отвода вновь образованных автомобильных дорог; 3 этап – проведение кадастрового учета земельных участков и сопровождение.

Пунктами 8.1., 8.2. Контракта установлена поэтапная сдача и приемка результатов работ по Контракту. 

Как следует из п. 8.2 Контракта после выполнения работ в полном объеме по каждому этапу в соответствии с Календарным графиком выполнения Работ (Приложение № 3 к Контракту), Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке по соответствующей стадии. К документу о приемке прилагаются, подписанные Исполнителем счет, счет-фактура3, Акт о приемке выполненных Работ.

В соответствии пунктом 8.4 Контракта, работы по каждой стадии считаются принятыми с момента подписания Заказчиком документа о приемке по соответствующей стадии.

Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу № 1 подписан 22.12.2022.

Работы по этапам 2 и 3 выполнены 15.12.2023 г., что подтверждается актами по форме КС-2, КС-3 № 2 от 15.12.2023.

Согласно пункту 10.1 Контракта стороны несут полную ответственность за свою деятельность по настоящему Контракту, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а в случае если возникшие обстоятельства не урегулированы условиями Контракта, то в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пп. 10.2.1., 10.2.2. в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе обязательств по замене банковской гарантии (в случае отзыва лицензии у Банка), предусмотренных Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельной стадии исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующей стадии исполнения контракта) и фактически исполненных Исполнителем.

Нормами статей 309, 310 ГК РФ установлено, что  обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств, требованиями закона и иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В материалы дела ответчиком представлены доказательства удовлетворения исковых требований истца в полном объеме, что истцом в ходе судебного заседания не оспорено. Арбитражный суд проверил сведения о дате сдачи работ (представления актов формы КС-2), с учетом чего считает, что обязательства ответчиком исполнены.

На основании изложенного в иске надлежит отказать.

Вопрос о распределении судебных расходов по оплате госпошлины судом не рассматривался, поскольку в соответствии со статьей 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, в качестве истцов или ответчиков, освобождены от уплаты государственной пошлины.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

решил:

в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                           Бутова Р.А.