АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102

http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А28-9495/2019

г. Киров

12 сентября 2019 года

Резолютивная часть решения объявлена 06 сентября 2019 года 

В полном объеме решение изготовлено 12 сентября 2019 года  

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Прозоровой Е.Ю.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев дело по исковому заявлению

администрации Вахрушевского городского поселения Слободского района Кировской области (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 613111, Кировская область, Слободской район, пгт. Вахруши, ул. Горького, д. 1)

к обществу с ограниченной ответственностью «3 А» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, юридический адрес: 610017, Россия, 

<

...>)

об устранении недостатков работ,

при участии в судебном заседании:

истца - ФИО2, по доверенности от 11.04.2019,

установил:

администрация Вахрушевского городского поселения Слободского района Кировской области (далее – истец) обратилась в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к обществу с ограниченной ответственностью «3 А» (далее – ответчик) об устранении недостатков работ, выполненных по муниципальным контрактам от 29.05.2017 №0340200003317000813-0174631-01, от 18.06.2018 №0340200003318004066-0174631-01, от 18.06.2018 №0340200003318004068-0174631-01, от 25.06.2018 №0340200003318004312-0174631-01, от 26.06.2018 №0340200003318004313-0174631-01, от 26.06.2018 №0340200003318004310-0174631-01: недостатков асфальтового покрытия дворовой территории у д.67 по ул. Кирова пгт Вахруши, дворовой территории д.5 по ул. Горького пгт Вахруши, придомовой территории д.2в по ул. Ленина пгт Впахруши, тротуара по ул. Горького, тротуара по ул. Рабочая от ул. Ленина до ул. Труда пгт Вахруши, щебеночного проезда от ул. Ленина до д.20,22,24 по ул. Октябрьская пгт Вахруши в течение одного месяца.

Исковые требования основаны на положениях статей 721, 722, 724, 755 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком гарантийных обязательств по муниципальным контрактам.

В судебном заседании истец настаивает на удовлетворении заявленных исковых требований с учетом уточнения.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, явку представителей в судебное заседание не обеспечил, отзыв на исковое заявление суду не представил. На основании положений статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие ответчика по имеющимся в деле доказательствам.

Заслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд установил следующие фактические обстоятельства.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подписан муниципальный контракт от 29.05.2017 №0340200003317000813-0174631-01 (далее-контракт 1), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту тротуара по ул. Рабочая от ул. Ленина до ул. Труда, пгт Вахруши в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к муниципальному контракту) и сдать их в законченном виде, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (пункт 1.1 контракта 1).

Место выполнения работ: Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, тротуар по четной стороне ул. Рабочая от ул. Ленина до ул. Труда (пункт 1.3 контракта 1).

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 30.07.2017. Допускается досрочное выполнение работ (пункт 1.4 контракта 1).

Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ заказчиком или его уполномоченным представителем (пункт 1.5 контракта 1).

Подрядчик обязан выполнить работы, указанные в пункте 1.1, с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать работу заказчику с оформлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости (форма КС-3) (пункт 2.1.1 контракта 1).

Цена контракта составляет – 767 780 рублей 90 копеек (пункт 3.1. контракта 1).

Согласно пункту 4.2 контракта 1 ответственные представители заказчика и организации осуществляющей технический надзор (строительный контроль) за ходом выполнения работ на объекте совместно с ответственным представителем подрядчика осуществляют приемку фактически выполненных работ.

По результатам приемки работ стороны подписывают акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости (форма КС-3) (пункт 4.3 контракта 1).

Датой приемки конечного результата работ в полном объеме считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ в полном объеме (пункт 4.6 контракта 1).

Гарантийный срок начинается с даты подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия качества на выполненные работы 4 года. После завершения выполнения всех работ подрядчик должен предоставить заказчику информацию о сроке предоставления гарантии качества выполненных подрядчиком работ, который стороны фиксируют в акте приемки выполненных работ (пункт 5.2 контракта 1).

Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки (дефекты), не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продляется соответственно на период устранения дефектов, возникающих по вине подрядчика. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока, производится подрядчиком за его счет в срок, согласованный с заказчиком, на основании акта выявленных недостатков, составляемого заказчиком (пункт 5.3 контракта 1).

По результатам выполнения работ сторонами подписан акт о приемке выполненных работ от 30.07.2017 №1, согласно которому выполнены работы по  ремонту тротуара по ул. Рабочая от ул. Ленина до ул. Труда, пгт Вахруши стоимостью 767 780 рублей 90 копеек.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подписан муниципальный контракт от 18.06.2018 №0340200003318004066-0174631-01 (далее-контракт 2), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту проезда от ул. Ленина до 

<

...> по ул. Октябрьская, пгт Вахруши в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к муниципальному контракту) и сдать их в законченном виде, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (пункт 1.1 контракта 2).

Место выполнения работ: Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, проезда от ул. Ленина до 

<

...> по ул. Октябрьская (пункт 1.3 контракта 2).

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31.07.2018. Допускается досрочное выполнение работ (пункт 1.4 контракта 2).

Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости (форма КС-3) заказчиком или его уполномоченным представителем. Датой акта приемки выполненных работ является дата подписания его последней стороной  (пункт 1.5 контракта 2).

Подрядчик обязан выполнить работы, указанные в пункте 1.1, с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать работу заказчику с оформлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости (форма КС-3) (пункт 2.1.1 контракта 2).

Цена контракта составляет –506 165 рублей 30 копеек (пункт 3.1. контракта 2).

Прием результата выполненных работ производится заказчиком или его уполномоченным представителем и подрядчиком (пункт 4.1 контракта 2).

При завершении работ подрядчик обязан письменно уведомить заказчика (его уполномоченного представителя) о выполнении работ и готовности объекта к сдаче и представить в течение 3 рабочих дней со дня окончания работ на объекте представителю заказчика акт приемки в эксплуатацию (по форме приложения №2), акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) (пункт 4.2 контракта 2).  

Согласно пункту 4.3 контракта 2 в течение 20 рабочих дней ответственные представители заказчика и организации осуществляющей технический надзор (строительный контроль) за ходом выполнения работ на объекте совместно с ответственным представителем подрядчика осуществляют осмотр и при надлежащем исполнении обязанностей подрядчика заказчик обязан принять выполненный результат работ путем подписания акта приемки в эксплуатацию либо при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, своевременно письменно сообщить об этом подрядчику.

При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ заказчик учитывает сведения, отраженные в акте приемки в эксплуатацию и в заключении экспертизы, в том числе предложения экспертов (экспертных организаций), привлеченных для ее проведения. На основании подписанного акта приемки в эксплуатацию и экспертного заключения в срок до 25.12.2018 заказчик (его уполномоченный представитель) обязан подписать акт выполненных работ (форма КС-2) при надлежащем исполнении обязанностей подрядчика, либо при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, незамедлительно заявить об этом подрядчику (пункт 4.7 контракта 2).

Датой приемки конечного результата работ в полном объеме считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ в полном объеме (пункт 4.11 контракта 2).

Гарантийный срок начинается с даты подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия качества на выполненные работы 2 года. После завершения выполнения всех работ подрядчик должен предоставить заказчику информацию о сроке предоставления гарантии качества выполненных подрядчиком работ, который стороны фиксируют в акте приемки выполненных работ (пункт 5.2 контракта 2).

Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки (дефекты), не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продляется соответственно на период устранения дефектов, возникающих по вине подрядчика. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока, производится подрядчиком за его счет в срок, согласованный с заказчиком, на основании акта выявленных недостатков, составляемого заказчиком (пункт 5.3 контракта 2).

По результатам выполнения работ сторонами подписан акт о приемке выполненных работ от 25.12.2018 №1, согласно которому выполнены работы по  ремонту проезда от ул. Ленина до 

<

...> по ул. Октябрьская, пгт Вахруши стоимостью 506 165 рублей 30 копеек.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подписан муниципальный контракт от 18.06.2018 №0340200003318004068-0174631-01 (далее-контракт 3), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту тротуара по ул. Горького, пгт Вахруши в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к муниципальному контракту) и сдать их в законченном виде, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (пункт 1.1 контракта 3).

Место выполнения работ: Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, тротуар по ул. Горького (пункт 1.3 контракта 3).

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31.07.2018. Допускается досрочное выполнение работ (пункт 1.4 контракта 3).

Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости (форма КС-3) заказчиком или его уполномоченным представителем. Датой акта приемки выполненных работ является дата подписания его последней стороной  (пункт 1.5 контракта 3).

Подрядчик обязан выполнить работы, указанные в пункте 1.1, с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать работу заказчику с оформлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости (форма КС-3) (пункт 2.1.1 контракта 3).

Цена контракта составляет – 706 307 рублей 40 копеек (пункт 3.1. контракта 3).

Прием результата выполненных работ производится заказчиком или его уполномоченным представителем и подрядчиком (пункт 4.1 контракта 3).

При завершении работ подрядчик обязан письменно уведомить заказчика (его уполномоченного представителя) о выполнении работ и готовности объекта к сдаче и представить в течение 3 рабочих дней со дня окончания работ на объекте представителю заказчика акт приемки в эксплуатацию (по форме приложения №2), акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) (пункт 4.2 контракта 3).  

Согласно пункту 4.3 контракта 3 в течение 20 рабочих дней ответственные представители заказчика и организации осуществляющей технический надзор (строительный контроль) за ходом выполнения работ на объекте совместно с ответственным представителем подрядчика осуществляют осмотр и при надлежащем исполнении обязанностей подрядчика заказчик обязан принять выполненный результат работ путем подписания акта приемки в эксплуатацию либо при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, своевременно письменно сообщить об этом подрядчику.

При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ заказчик учитывает сведения, отраженные в акте приемки в эксплуатацию и в заключении экспертизы, в том числе предложения экспертов (экспертных организаций), привлеченных для ее проведения. На основании подписанного акта приемки в эксплуатацию и экспертного заключения в срок до 25.12.2018 заказчик (его уполномоченный представитель) обязан подписать акт выполненных работ (форма КС-2) при надлежащем исполнении обязанностей подрядчика, либо при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, незамедлительно заявить об этом подрядчику (пункт 4.7 контракта 3).

Датой приемки конечного результата работ в полном объеме считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ в полном объеме (пункт 4.11 контракта 3).

Гарантийный срок начинается с даты подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия качества на выполненные работы 4 года. После завершения выполнения всех работ подрядчик должен предоставить заказчику информацию о сроке предоставления гарантии качества выполненных подрядчиком работ, который стороны фиксируют в акте приемки выполненных работ (пункт 5.2 контракта 3).

Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки (дефекты), не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продляется соответственно на период устранения дефектов, возникающих по вине подрядчика. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока, производится подрядчиком за его счет в срок, согласованный с заказчиком, на основании акта выявленных недостатков, составляемого заказчиком (пункт 5.3 контракта 3).

По результатам выполнения работ сторонами подписан акт о приемке выполненных работ от 25.12.2018 №1, согласно которому выполнены работы по  ремонту тротуара по ул. Горького, пгт Вахруши стоимостью 706 307 рублей 40 копеек.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подписан муниципальный контракт от 25.06.2018 №0340200003318004312-0174631-01 (далее-контракт 4), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту придомовой территории 

<

...> пгт Вахруши в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к муниципальному контракту) и сдать их в законченном виде, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (пункт 1.1 контракта 4).

Место выполнения работ: Кировская область, Слободской район, пгт Вахруши, тротуар по ул. Ленина, д. 2 (пункт 1.3 контракта 4).

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.07.2018. Допускается досрочное выполнение работ (пункт 1.4 контракта 4).

Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости (форма КС-3) заказчиком или его уполномоченным представителем. Датой акта приемки выполненных работ является дата подписания его последней стороной  (пункт 1.5 контракта 4).

Подрядчик обязан выполнить работы, указанные в пункте 1.1, с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать работу заказчику с оформлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости (форма КС-3) (пункт 2.1.1 контракта 4).

Цена контракта составляет – 601 211 рублей 59 копеек (пункт 3.1. контракта 4).

Прием результата выполненных работ производится заказчиком или его уполномоченным представителем и подрядчиком (пункт 4.1 контракта 4).

При завершении работ подрядчик обязан письменно уведомить заказчика (его уполномоченного представителя) о выполнении работ и готовности объекта к сдаче и представить в течение 3 рабочих дней со дня окончания работ на объекте представителю заказчика акт приемки в эксплуатацию (по форме приложения №2), акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3) (пункт 4.2 контракта 4).  

Согласно пункту 4.3 контракта 4 в течение 20 рабочих дней ответственные представители заказчика и организации осуществляющей технический надзор (строительный контроль) за ходом выполнения работ на объекте совместно с ответственным представителем подрядчика осуществляют осмотр и при надлежащем исполнении обязанностей подрядчика заказчик обязан принять выполненный результат работ путем подписания акта приемки в эксплуатацию либо при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, своевременно письменно сообщить об этом подрядчику.

При принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов выполненных работ заказчик учитывает сведения, отраженные в акте приемки в эксплуатацию и в заключении экспертизы, в том числе предложения экспертов (экспертных организаций), привлеченных для ее проведения. На основании подписанного акта приемки в эксплуатацию и экспертного заключения в срок до 25.12.2018 заказчик (его уполномоченный представитель) обязан подписать акт выполненных работ (форма КС-2) при надлежащем исполнении обязанностей подрядчика, либо при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, незамедлительно заявить об этом подрядчику (пункт 4.7 контракта 4).

Датой приемки конечного результата работ в полном объеме считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ в полном объеме (пункт 4.11 контракта 4).

Гарантийный срок начинается с даты подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия качества на выполненные работы 4 года. После завершения выполнения всех работ подрядчик должен предоставить заказчику информацию о сроке предоставления гарантии качества выполненных подрядчиком работ, который стороны фиксируют в акте приемки выполненных работ (пункт 5.2 контракта 4).

Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки (дефекты), не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продляется соответственно на период устранения дефектов, возникающих по вине подрядчика. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока, производится подрядчиком за его счет в срок, согласованный с заказчиком, на основании акта выявленных недостатков, составляемого заказчиком (пункт 5.3 контракта 4).

По результатам выполнения работ сторонами подписан акт о приемке выполненных работ от 25.12.2018 №2, согласно которому выполнены работы по  ремонту придомовой территории 

<

...> пгт Вахруши стоимостью 601 211 рублей 59 копеек.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подписан муниципальный контракт от 26.06.2018 №0340200003318004313-0174631-01 (далее-контракт 5), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту и благоустройству дворовой территории 

<

...> пгт Вахруши в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к муниципальному контракту) и сдать их в законченном виде, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (пункт 1.1 контракта 5).

Место выполнения работ: 

<

...> (пункт 1.3 контракта 5).

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.07.2018. Допускается досрочное выполнение работ (пункт 1.4 контракта 5).

Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости (форма КС-3) заказчиком или его уполномоченным представителем. Датой акта приемки выполненных работ является дата подписания его последней стороной  (пункт 1.5 контракта 5).

Подрядчик обязан выполнить работы, указанные в пункте 1.1, с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать работу заказчику с оформлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости (форма КС-3) (пункт 2.1.1 контракта 5).

Цена контракта составляет –159 498 рублей 04 копейки (пункт 3.1. контракта 5).

Согласно пункту 4.2 контракта 5 ответственные представители заказчика и организации осуществляющей технический надзор (строительный контроль) за ходом выполнения работ на объекте совместно с ответственным представителем подрядчика осуществляют приемку фактически выполненных работ.

По результатам приемки работ стороны подписывают акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости (форма КС-3) (пункт 4.3 контракта 5).

Датой приемки конечного результата работ в полном объеме считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ в полном объеме (пункт 4.6 контракта 5).

Гарантийный срок начинается с даты подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия качества на выполненные работы 4 года. После завершения выполнения всех работ подрядчик должен предоставить заказчику информацию о сроке предоставления гарантии качества выполненных подрядчиком работ, который стороны фиксируют в акте приемки выполненных работ (пункт 5.2 контракта 5).

Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки (дефекты), не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продляется соответственно на период устранения дефектов, возникающих по вине подрядчика. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока, производится подрядчиком за его счет в срок, согласованный с заказчиком, на основании акта выявленных недостатков, составляемого заказчиком (пункт 5.3 контракта 5).

По результатам выполнения работ сторонами подписан акт о приемке выполненных работ от 31.07.2018 №1, согласно которому выполнены работы по  ремонту и благоустройству дворовой территории 

<

...> пгт Вахруши стоимостью 159 498 рублей 04 копейки.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подписан муниципальный контракт от 26.06.2018 №0340200003318004310-0174631-01 (далее-контракт 6), по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту и благоустройству дворовой территории 

<

...> пгт Вахруши в соответствии с техническим заданием (приложение №1 к муниципальному контракту) и сдать их в законченном виде, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (пункт 1.1 контракта 5).

Место выполнения работ: 

<

...> (пункт 1.3 контракта 6).

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31.07.2018. Допускается досрочное выполнение работ (пункт 1.4 контракта 6).

Работа считается выполненной после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости (форма КС-3) заказчиком или его уполномоченным представителем. Датой акта приемки выполненных работ является дата подписания его последней стороной  (пункт 1.5 контракта 6).

Подрядчик обязан выполнить работы, указанные в пункте 1.1, с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать работу заказчику с оформлением акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости (форма КС-3) (пункт 2.1.1 контракта 6).

Цена контракта составляет – 481 936 рублей 77 копеек (пункт 3.1. контракта 5).

Согласно пункту 4.2 контракта 6 ответственные представители заказчика и организации осуществляющей технический надзор (строительный контроль) за ходом выполнения работ на объекте совместно с ответственным представителем подрядчика осуществляют приемку фактически выполненных работ.

По результатам приемки работ стороны подписывают акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости (форма КС-3) (пункт 4.3 контракта 6).

Датой приемки конечного результата работ в полном объеме считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ в полном объеме (пункт 4.6 контракта 6).

Гарантийный срок начинается с даты подписания акта приемки выполненных работ. Гарантия качества на выполненные работы 4 года. После завершения выполнения всех работ подрядчик должен предоставить заказчику информацию о сроке предоставления гарантии качества выполненных подрядчиком работ, который стороны фиксируют в акте приемки выполненных работ (пункт 5.2 контракта 6).

Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются недостатки (дефекты), не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продляется соответственно на период устранения дефектов, возникающих по вине подрядчика. Устранение дефектов, выявленных во время приемки работ, а также в период гарантийного срока, производится подрядчиком за его счет в срок, согласованный с заказчиком, на основании акта выявленных недостатков, составляемого заказчиком (пункт 5.3 контракта 6).

По результатам выполнения работ сторонами подписан акт о приемке выполненных работ от 31.07.2018 №1, согласно которому выполнены работы по  ремонту и благоустройству дворовой территории 

<

...> пгт Вахруши стоимостью 481 936 рублей 77 копеек.

Согласно представленным в материалы дела актам от 17.04.2019, представителями Вахрушевского городского поселения при осмотре в пгт Вахруши - тротуара по ул. Рабочая, проезда от ул. Ленина до 

<

...> по ул. Октябрьская, тротуара по ул. Горького, придомовой территории 

<

...> придомовой территории ул. Горького, д. 5, придомовой территории у 

<

...> были выявлены недостатки работ, выполненных подрядчиком по муниципальным контрактам.

В претензиях от 29.04.2019 №№ 500, 501, 502, 503, 504, 512 истец обратился к ответчику с предложением устранить недостатки, выявленные в ходе осмотра в пгт Вахруши - тротуара по ул. Рабочая, проезда от ул. Ленина до 

<

...> по ул. Октябрьская, тротуара по ул. Горького, придомовой территории 

<

...> придомовой территории ул. Горького, д. 5, придомовой территории у 

<

...> представителя Вахрушевского городского поселения.

Неисполнение ответчиком требования об устранении недостатков, выявленных в пределах гарантийного срока, послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные в дело доказательства, суд пришел к следующим выводам.

В данном случае взаимные права и обязанности возникли у сторон в соответствии с условиями муниципальных контрактов от 29.05.2017 №0340200003317000813-0174631-01, от 18.06.2018 №0340200003318004066-0174631-01, от 18.06.2018 №0340200003318004068-0174631-01, от 25.06.2018 №0340200003318004312-0174631-01, от 26.06.2018 №0340200003318004313-0174631-01, от 26.06.2018 №0340200003318004310-0174631-01.

Сложившиеся правоотношения сторон следует квалифицировать как отношения строительного подряда, которые регулируются нормами главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации и нормами Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии со статьей 763 Гражданского кодекса Российской Федерации по государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Факт выполнения ответчиком работ по контрактам подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривается.

Общие требования к качеству выполняемой работы установлены пунктом 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которому качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В статье 722 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплено, что в том случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены; 

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (пункт 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока.

Пунктом 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Указанные основания для освобождения подрядчика от ответственности за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, являются исчерпывающими.

Таким образом, из буквального толкования положений указанной нормы следует, что в пределах гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика в виде ответственности за недостатки (дефекты) выполненных работ.

В рассматриваемом случае недостатки выполненных работ обнаружены в пределах установленного контрактами гарантийного срока, что подтверждается актами осмотра от 17.04.2019.

Ответчик требования об устранении выявленных недостатков работ не исполнил, выявленные недостатки работ не устранил, следовательно, не исполнил гарантийные обязательства, принятые на себя в соответствии с условиями контракта.

Поскольку названные истцом недостатки работ были обнаружены в пределах гарантийного срока, на ответчика возлагается бремя доказывания причин их возникновения, исключающих ответственность подрядчика за дефекты.

В нарушение требований статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик не обосновал и не представил надлежащих доказательств, свидетельствующих о наличии обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Наличие недостатков, указанных истцом, а также необходимость и обязанность их безвозмездного устранения ответчиком, заявленные истцом необходимые способы по устранению недостатков и срок их устранения ответчиком не оспорены, доказательств, свидетельствующих о несогласии ответчика с этими обстоятельствами, суду не представлено, в связи с чем, в силу части 31 статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные обстоятельства считаются признанными ответчиком.

Таким образом, в силу приведенных правовых норм, условий контракта и установленных судом обстоятельств предъявленные истцом требования об устранении недостатков выполненных работ являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

В силу статьи 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины возлагаются на ответчика и подлежат взысканию с него в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «3 А» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) устранить недостатки асфальтового покрытия дворовой территории у д.67 по ул.Кирова пгт Вахруши, дворовой территории д.5 по ул.Горького пгт Вахруши, придомовой территории д.2в по ул.Ленина пгт Впахруши, тротуара по ул.Горького, тротуара по ул.Рабочая от ул.Ленина до ул.Труда пгт Вахруши, щебеночного проезда от ул.Ленина до д.20,22,24 по ул. Октябрьская пгт Вахруши в течение одного месяца.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «3 А» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 6 000 (шесть тысяч) рублей.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области.

Судья                                                                                             Е.Ю.Прозорова.