Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

Дело № А40-83559/17

31 августа 2017 г.

г. Москва

136-441 

Резолютивная часть решения объявлена 21 августа 2017 года

Полный текст решения изготовлен 31 августа 2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Петрухиной А.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению 

акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, адрес: 142700, МО, 

<

...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ТСТ Стройкомплекс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес: 127247, 

<

...>)

о взыскании 900 852 руб. 79 коп.,

при участии:

от истца – ФИО2, дов. от  03.04.2017;

от ответчиков – не явился, уведомлен;

установил:

Акционерное общество «Московская областная электросетевая компания» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «ТСТ Стройкомплекс» задолженности в размере 900 852 руб. 79 коп., в том числе суммы основного долга в размере 697 762 руб. 12 коп., неустойки в размере 203 090 руб. 65 коп. за период с 16.08.2016 по 24.04.2017.

Представитель ответчика в судебное заседание, состоявшееся 21.08.2017, не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, в порядке ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее- АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации на официальном сайте ВАС РФ http://kad.arbitr.ru/. Письменную правовую позицию по иску в порядке ст. 131 АПК РФ не представил. 

Дело рассмотрено в соответствии со ст. 156 АПК РФ в отсутствие представителя ответчика.

В заседании суда представитель истца заявленные требования поддержал в полном объеме.

Суд, рассмотрев материалы дела, в силу статей 67, 68, 71 АПК РФ исследовав и оценив представленные доказательства с позиций их относимости, допустимости, достоверности, достаточности и взаимной связи в их совокупности, считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Между акционерным обществом «Московская областная энергосетевая компания» (далее - сетевая организация, АО «Мособлэнерго») и обществом с ограниченной ответственностью «ТСТ Столица» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 кВт до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)), от 29.10.2014 № 143498 (далее - договор).

30 июня 2016 года АО «Мособлэнерго», ООО «ТСТ Столица» и общество   с   ограниченной   ответственностью   «ТСТ   Стройкомплекс» (ООО «ТСТ Стройкомплекс») заключили соглашение о замене стороны в договоре №143498 от 29.10.14 (далее - соглашение). 

В соответствии с п.2.1 соглашения все права и обязанности по договору №143498 от 29.10.2014г. переходят к ООО «ТСТ Стройкомплекс» (далее - заявитель).

В соответствии с п.1 договора и п. 10, 11 технических условий для присоединения к электрическим сетям АО «Мособлэнерго» № 143498-24101308Р (приложение к договору, далее - ТУ) сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные ТУ, и оплатить расходы на технологическое присоединение.

Согласно п. 10.1 договора размер платы за технологическое присоединение составляет 697 762 (шестьсот девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 14 копеек, в том числе НДС 106 438 (сто шесть тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 29 копеек.

Согласно п. 1.4 соглашения о замене стороны в договоре №143498 от 29.10.14г. п.11 Договора изложен в следующей редакции: внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

до 31.07.2016 оплата в размере 100 000,00 р.; 

до 31.08.2016 оплата в размере 100 000,00 р.; 

до 30.09.2016 оплата в размере 100 000,00 р.; 

до 31.10.2016 оплата в размере 100 000,00 р.; 

до 30.11.2016 оплата в размере 100 000,00 р.; 

до 31.12.2016 оплата в размере 197 762,14 р.

В соответствии с пунктом 12 вышеуказанного договора датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации.  

Как указывает истец, по состоянию на 24.04.2017 обязательство по внесению платежей в установленный срок не исполнено, указанные денежные средства на расчетный счет АО «Мособлэнерго» не поступили.

Нормы, регламентирующие договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих (теплопринимающих) устройств, не включены в раздел IV «Отдельные виды обязательств» Гражданского кодекса, однако эти нормы содержатся в специальных нормативных актах, закрепляющих правила подключения к системам тепло- и энергоснабжения.

Применительно к энергоснабжению такие нормы содержатся в статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее - Правила).

Все названные правила, среди прочего, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств (подключаемых объектов в сфере теплоснабжения) к электрическим сетям сетевой организации или системе теплоснабжения (далее - технологическое присоединение) и определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям или системе теплоснабжения (далее - договор технологического присоединения).

Пунктом 7 Правил установлена следующая процедура технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя.

Согласно пункту 16.3. Правил обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению распределяются следующим образом:

заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;

сетевая   организация   исполняет  указанные  обязательства  (в  том  числе  в  части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Согласно пункту 16 (а) Правил Договор ТП должен содержать следующие существенные условия: перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению.

Перечень мероприятий, выполняемых АО «Мособлэнерго» за счет средств платы за технологическое     присоединение     согласно     техническим     условиям     №143498-24101308Р от 29.10.2014 от  РУ-0.4 кВ ТП-265 до ВРУ объекта проложить КЛ-0,4 кВ. Трассу, марку и сечение KJI определить проектом; проектным решением определить необходимость реконструкции РУ-0,4 Кв ТП-265.

Заявителем в лице генерального директора ООО «Универсал» ФИО3 представлено в адрес сетевой организации нотариально удостоверенное Согласие от 06 февраля 2015г. серия 77 АБ № 5886524 на размещение трансформаторной подстанции мачтового типа (ТП-10 кВ) на основании технических условий №Ю8-14-202-19808(918877/102) от 19.12.2014г.

В соответствии с пунктом 5 договора ТП срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Из материалов дела следует, что сетевая организация (заказчик) во исполнение принятых договором № 143498 обязательств по технологическому присоединению к электрическим сетям заключила с ООО «Восток Регион» (исполнитель) договор подряда № 2 на оформление исходно-разрешительной документации от 01.07.2015.

Предметом договора является оформление исполнителем по заданию заказчика исходно-разрешительной документации по объекту «строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, МО, 

<

...>», ТУ № 143498-24101209Р от 29.10.2014, Т3 № 1420/14 от 18.11.2014.

Срок выполнения работ составляет 60 календарсных дней со дня подписания договора (пункт 2.2 договора).

Цена договора в соответствии с пунктом 3.1 определяется сводной сметой, которая составляет 101368,11 руб.

Договор подряда № 2 на оформление исходно-разрешительной документации от 01.07.2015 исполнен в полном объеме. Работы сданы в установленные сроки, что подтверждено актом сдачи- приемки выполненных работ № 1 от 20.11.2015, накладной сдачи- приемки исполнительной документации № 1 от 20.11.2015.

Также истцом (заказчик) 10.08.2015 заключен договор подряда № 2 на выполнение проектных работ с ООО «Проектный центр АРДИС» (исполнитель), предметом которого является выполнение по заданию заказчика проектных работ по объекту «строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, МО, 

<

...>», ТУ № 143498-24101209Р от 29.10.2014, Т3 № 1420/14 от 18.11.2014».

Срок завершения указанны работ определен в пункте 2.2. договора и составляет 2 месяца с даты подписания договора сторонами.

В соответствии с пунктом 3.1 цена договора определяется Сметой № 1 на проектные работы и составляет 114352,03 руб.

Договор подряда № 2 на выполнение проектных работ исполнен в полном объеме. Работы сданы в установленные сроки, что подтверждено актом сдачи- приемки выполненных работ № 1 от 15.04.2016, накладной сдачи- приемки исполнительной документации № 1 от 15.04.2016.

21.06.2016 АО «Мособлэнерго» (заказчик) заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ № 281/16-ДКС с ООО «МастерС» (подрядчик), по условиям которого подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объекту: «строительство КЛ-0.4 кВ от ТП-265 до ВРУ объекта по адресу: 142660, МО, 

<

...>», ТУ № 143498-24101209Р от 29.10.2014, Т3 № 1420/14 от 18.11.2014».

Стоимость работ согласно сводной ведомости составляет 860621,20 руб. Сроки выполнения два месяца со дня заключения договора (приложение № 1 к договору.)

В силу статьи 711 ГК РФ сдача результата работ заказчику является основанием для возникновения у него обязательства по оплате принятых работ.

В силу пункта 2 статьи 779 ГК РФ правила главы 39 применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг в силу статьи 781 ГК РФ.

Учитывая, что материалы дела содержат доказательства надлежащего выполнения истцом принятых на себя обязательств, а доказательства оплаты ответчиком не представлены, суд приходит к выводу о правомерности и обоснованности заявленных требований о взыскании задолженности в размере 697762,12 руб. за услуги по технологическому присоединению.

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (пункт 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п. 17 договора в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

В связи с нарушением ответчиком срока исполнения обязательств по осуществлению технологического присоединения, предусмотренных договором, истцом рассчитана неустойка в размере 203090 руб. 65 коп. в соответствии с п. 17 договора за период с 16.08.2016 по 24.04.2017.

Расчет неустойки признан судом соответствующим условиям договора и арифметически верным, ввиду чего требования истца в части ее взыскания также подлежат удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины относятся на ответчика в порядке ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 16, 17, 28, 102, 110, 167-171, 176, 318, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТСТ Стройкомплекс» в пользу акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» 900 852 руб. 79 коп., в том числе сумму основного долга в размере 697 762 руб. 12 коп., неустойку в размере 203 090 руб. 65 коп. за период с 16.08.2016 по 24.04.2017, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 21 017 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд города Москвы. 

Судья:

А.Н. Петрухина