АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А51-23177/2022

г. Владивосток

12 апреля 2023 года

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Бурова А.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску фонда Приморского края "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью "ЛЕГИОН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 157 156,65 руб.,

установил:

фонд Приморского края "ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ" обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ЛЕГИОН"  о взыскании 157 156,65 рублей неустойки за просрочку выполнения работ по договору от 23.04.2021 № РТС225А210010(Д).

Истец, ответчик, о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства уведомлены надлежащим образом.

Решение по настоящему делу принято арбитражным судом 06.03.2023 согласно части 1 статьи 229 АПК РФ путем подписания резолютивной части решения, разместив ее на официальном сайте арбитражного суда в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

От истца поступила апелляционная жалоба, в связи с чем, в соответствии с пунктом 39 Постановления пленума Верховного суда Российской Федерации от 18.04.2017 №10 «О некоторых вопросах применения судами положений гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве» судом изготовлено мотивированное решение.

Исковые требования мотивированы нарушением ответчиком срока выполнения работ, в связи с чем истцом  начислены штрафные санкции, предусмотренные договором.

Ответчик требования оспорил, по доводам, изложенным в отзыве; заявил о применении ст. 333 ГКРФ.

Оценив представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд установил следующее.

Между Фондом Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» (Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Легион» (Подрядчик) был заключен договор от 23.04.2021 № РТС225А210010(Д) на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества   многоквартирных    домов,    расположенных    на   территории Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района (далее - Договор), в соответствии с которым Подрядчик принял на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту, в том числе, крыши многоквартирного дома № 8 по ул. Кирова в г. Артеме (далее - объект), а Заказчик принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену (пункт 1.1. договора).

В Приложении № 3 к Договору установлен срок выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 8 по ул. Кирова в г. Артеме - до 01 ноября 2021 года.

Согласно пунктам 4.1, 4.4 Договора Подрядчик обязан выполнить работы в полном объеме согласно Техническому заданию и в сроки, указанные в пункте 1.2 Договора и сдать Заказчику выполненные работы по актам в порядке, установленном Договором.

В соответствии с пунктом 8.2 Договора работы считаются принятыми после подписания заказчиком форм КС-2 и КС-3, подписания членами приемочной комиссии и согласования в соответствии с требованиями Закона Приморского края от 7 августа 2013 года № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» акта приемки выполненных работ, подтвержденных исполнительной документацией и актами на скрытые работы.

Приемочной комиссией 10.02.2022 была проведена приемка выполненных работ, по итогам которой составлен Акт приемки выполненных работ (копия прилагается).

Поскольку работы были сданы с нарушением установленного срока (после 01.11.2021) Фондом 24.03.2022 в адрес ООО «Легион» была направлена претензия № 06-исп/02740-пд о начислении неустойки в размере 157 156 (сто пятьдесят семь тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 65 копеек за нарушение срока выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 8 по ул. Кирова в г. Артеме.

Период просрочки исполнения обязательств составляет 101 день – с 02.11.2021 по 10.02.2022.

В тоже время, с учетом анализа раздела 3 Общего журнала работ, представленного в составе исполнительной документации, а также период приостановки работ на объекте (с 25.11.2021 по 11.12.2021), Заказчик посчитал возможным сократить количество дней просрочки на 35 дней.

Таким образом, по расчету истца период просрочки выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома № 8 по ул. Кирова в г. Артеме, с учетом изложенных обстоятельств, составляет 66 дней. Размер неустойки составляет 157 156 (сто пятьдесят семь тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 65 копеек (3 641 776,30x66 днейх8,50%х1/130).

Поскольку претензионное требование об уплате штрафных санкций оставлено ответчиком без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

Оценив доводы сторон и представленные доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд отказал в удовлетворении требований на основании следующего.

Правоотношения сторон подлежат регулированию положениями главы 37 ГК РФ о подряде, а также общими нормами об исполнении обязательств.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работ. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой (статья 329 ГК РФ).

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пунктом 13.3. спорного договора предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик имеет право предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В пункте 13.4 Договора установлено, что пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, включая срок исполнения его этапа. Размер пени устанавливается в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от стоимости этапа работ, сроки по которому нарушены.

Возражая против удовлетворения исковых требований,  ответчик указал, что причиной просрочки  выполнения работ послужило отсутствие строительной готовности на объекте.

В силу пункта 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Согласно пункту 1 статьи 406 ГК РФ кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором либо вытекающих из обычаев или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

Согласно пункту 1 статьи 404 Гражданского кодекса Российской Федерации если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности должника; суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не принял разумных мер к их уменьшению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Исходя из пункта 1 статьи 719 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Из содержания пункта 1 статьи 718 ГК РФ следует, что заказчик обязан оказывать подрядчику содействие в выполнении работы, при неисполнении заказчиком этой обязанности подрядчик вправе требовать перенесения сроков исполнения работы.

Как установлено судом из материалов дела, причиной невозможности выполнения ремонтных работ послужило наличие мусора на объекте, а также электрических и телевизионных кабелей и оборудования.

Письмом от 26.04.2021 исх. № 174 ответчик просил управляющую организацию принять меры к устранению препятствия производства работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>.

Об указанных обстоятельствах Заказчик был уведомлен, что подтверждается письмом ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края» от 08.07.2021 № 04-псп/06137-пд. 

Препятствующие производству работ обстоятельства были устранены через 143 дня, о чем Подрядчика уведомила управляющая организация письмом от 14.09.2021.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд приходит к выводу о том, что вина в просрочке выполнения работ по договору лежит на Заказчике, который не обеспечил возможность выполнения работ на объекте, в связи с чем оснований для удовлетворения исковых требований о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ не имеется.

В силу статьи 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 АПК РФ, арбитражный суд

р е ш и л:

В иске отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение 15 дней со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд.

Судья                                                                          Буров А.В.