Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Москва

«16» января 2020 года                                                                                    Дело № А41-78015/19

Резолютивная часть решения объявлена «14» января 2020 года. Решение изготовлено в полном объеме «16» января 2020 года.

 

Арбитражный суд Московской области 

в составе: судьи Быковских И. В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску ООО "МК-СТРОЙ" к ООО "ВАШИ.ФАСАДЫ." о взыскании 5292751 руб. 22 коп.,

при участии:

от истца – ФИО2 по дов. от 28.08.2019 г.,

от ответчика,

установил:

ООО "МК-СТРОЙ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "ВАШИ.ФАСАДЫ." (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 5292751 руб. 22 коп. неотработанного аванса.

Исковые требования заявлены на основании ст. ст. 309, 310, 1102 ГК РФ и мотивированы доводами о ненадлежащем исполнением ответчиком обязательств по выполнению подрядных работ по договору подряда № 02/06-16 от 06.06.2016, в результате чего за ответчиком образовалась взыскиваемая задолженность в виде неотработанного аванса. При этом, ответчику было направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке.

В судебное заседание представитель ответчика, извещённый надлежащим образом о месте и времени его проведения, не явился. Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ в его отсутствие.

Представитель истца в заседании суда настаивал на доводах и требованиях искового заявления.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, рассмотрев доводы, изложенные в исковом заявлении, выслушав объяснения представителя истца, арбитражный суд приходит к выводу о том, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, 06.06.2016 между истцом (заказчиком) и ответчиком (подрядчиком) в редакции дополнительного соглашения был заключен договор подряда № 02/06-16, по условиям которого подрядчик принял на себя обязательства в соответствии с техническим заданием заказчика, проектной документацией, требованиями СНиП и других нормативно-правовых актов, собственными или привлеченными силами, в установленный договором срок, выполнить работы по объекту: многоэтажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями и подземным гаражом, расположенного по адресу: 

<

...>, а именно: выполнить комплекс работ по устройству навесного вентилируемого фасада и алюминиевых витражных конструкций и балконного остекления, а заказчик  принял на себя обязательства по приемке и оплате выполненных работ.

Общая стоимость работ по договору составляет 65438765 руб. 00 коп. (п. 2.1 договора).

Работы по договору должны быть выполнены в сроки, предусмотренные графиком производства работ (л.д. 13).

Согласно дополнительному соглашению № 1  от 14.09.2016 к договору подрядчик принял на себя обязательства по выполнению дополнительного объема работ, не предусмотренного договором, стоимость дополнительных работ составляет 956004 руб. 00 коп.

Пунктом 4 дополнительного соглашения к договору срок выполнения дополнительных работ по соглашению составляет 150 рабочих дней с момента подписания данного соглашения.

В соответствии с п. 2.3 договора заказчик в течение 10 дней после подписания договора перечисляет подрядчику аванс в размере 7000000 руб. 00 коп.

Оплата выполненных работ производится ежемесячно на основании актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанных заказчиком. Заказчик перечисляет подрядчику денежные средства в течение 10 рабочих дней с момента предоставления подрядчиком документов, указанных в п. 4.3 договора (п. 2.4 договора).

Согласно п. 2.5, 2.6 договора заказчик производит оплату выполненных работ в размере 95 % от их стоимости. Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется в течение 10 дней при условии подписания сторонами итогового акта приемки выполненных работ, подтверждающего передачу подрядчиком заказчику результата выполненных работ, выполнение всех обязательств, предусмотренных договором, за исключением гарантийных.

Пунктом 8.2.2 договора предусмотрено, что заказчик вправе во внесудебном порядке расторгнуть договор ввиду несоблюдения подрядчиком графика производства работ на срок, превышающий семь дней.

Истцом по договору в качестве оплаты работ было перечислено 30402000 руб. 00 коп. денежных средств, о чем свидетельствует представленные в материалы дела платежные поручения (л.д. 64-82), и ответчик данный факт не оспаривает (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ). 

Вместе с тем, работы по договору и дополнительному соглашению к нему ответчиком были выполнены только на сумму 25109248 руб. 78 коп., в связи с чем, неотработанный ответчиком аванс по расчетам истца составил 5292751 руб. 22 коп.

Таким образом, поскольку в установленные договором и дополнительным соглашением к нему сроки подрядчиком работы в полном объеме выполнены не были, истец 06.08.2019 в адрес ответчика направил уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 05.08.2019 исх. № 05-1/08 на основании пункта 2 статьи 405 ГК РФ, пункта 2 статьи 715 ГК РФ, п. 8.2.2 договора, содержащее требования о возврате неосвоенного аванса в размере 5292751 руб. 22 коп. (л.д. 36, 37).

В досудебном порядке разногласия по поводу возврата неотработанного аванса урегулированы не были, в связи с чем, ООО "МК-СТРОЙ" обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Спорные отношения, возникшие в связи с исполнением договора, по своей правовой природе являются подрядными, подлежат регулированию общими гражданско-правовыми нормами об обязательствах, специальными положениями главы 37 ГК РФ.

Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

На основании статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения принятых на себя обязательств не допускается.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 ГК РФ).

Право заказчика на отказ от исполнения договора подряда предусмотрено положениями статей 715, 717 ГК РФ.

В частности, в силу пункта 2 статьи 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии с п. 3 ст. 715 ГК РФ, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в установленный срок этого требования отказаться от договора подряда.

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным (п. 3 ст. 450 ГК РФ).

Из системного толкования положений п. 3 ст. 450 и п. 2 ст. 715 ГК РФ следует, что договор подряда считается прекращенным с момента получения подрядчиком отказа заказчика от его исполнения или момента, когда подрядчик мог его получить. 

Поскольку ответчик нарушил сроки выполнения работ, истец на основании ст. 715 ГК РФ, п. 8.2.2 договора отказался от исполнения договора, то есть расторг его в одностороннем порядке, и потребовал вернуть неотработанный аванс (уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке от 05.08.2019 исх. № 05-1/08).

На основании изложенного требование о взыскании неотработанного аванса подлежит удовлетворению в полном объеме.

Поскольку при подаче искового заявления истцу была предоставлена отсрочка уплаты  государственной пошлины, ее сумма подлежит взысканию с ответчика в доход федерального бюджета (ст. 110 АПК РФ).

Руководствуясь ст. ст. 167-171, 176, 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Московской области  

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ВАШИ.ФАСАДЫ." в пользу ООО "МК-СТРОЙ" 5292751 руб. 22 коп. неотработанного аванса.

Взыскать с ООО "ВАШИ.ФАСАДЫ." в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в сумме 49464 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья                                                                                                           И. В. Быковских