Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-106038/2024

09 апреля 2025 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Н. Мухортых, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

АО "СТРОЙТРАНСГАЗ" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ГКУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДДС" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о внесении изменений в государственный контракт.  

при участии в заседании: 

Истец: представитель – ФИО1, представлена доверенность № 01/Д-33 от 30.01.2025 г. Представлен диплом о высшем юридическом образовании.  

Ответчик: представитель – ФИО2, представлена доверенность № 13 от 13.01.2025 г. Представлен диплом о высшем юридическом образовании.   

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

 Внести в государственный контракт № 1/2019-14 от 29.05.2019 следующие изменения: 1) Пункт 3.4. Контракта изложить в следующей редакции:  

«3.4. Срок выполнения работ по Контракту 79 месяцев с даты начала выполнения работ, в соответствии с календарным графиком производства работ (Приложение № 6 к Контракту).».  

 2) Пункт 18.1 Контракта изложить в следующей редакции: 

«18.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами, и действует до 31.03.2026 года. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.»  

 3) Внести изменение в Приложение № 6 «График производства работ» к Контракту, увеличив сроки выполнения работ с 63 до 79 месяцев  

 4) Внести изменения в Приложение № 2 «Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты» к Контракту, увеличив сроки выполнения работ с 63 до 79 месяцев  

 Взыскать с Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция дорожного строительства» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу АО «Стройтрансгаз» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 50 000,00 руб.  

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.  

Судья Е.А. Морозова