16_1861834  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-11777/2017

г. Белгород

08 декабря 2017 года

Арбитражный суд Белгородской области  

в составе судьи Танделовой З.М. 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств  аудио- и видеозаписи помощником судьи Карнауховой И.П.  

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Фонда  содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  Белгородской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к ООО "СК  Эталонстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о понуждении к  исполнению гарантийных обязательств,  

третье лицо: Администрация муниципального района «Ровеньский район», 

При участии в судебном заседании: от истца: представитель ФИО1, доверенность от 09.11.2017; от ответчика: представитель не явился, извещен; 

от третьего лица: представитель не явился, извещен.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области (ИНН 3123231839, ОГРН  1123100001595) удовлетворить.  

Обязать ООО "СК Эталонстрой" устранить недостатки и дефекты  выполненных работ по договору подряда № 1 от 17.03.2016, указанные в акте  осмотра многоквартирного дома после проведенного капительного ремонта  общего имущества, расположенного по адресу: Белгородская область,  Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. имени мл. л-та ФИО2, д. 54, от  05.05.2017г., в течение 30 календарных дней с момента вступления в  законную силу решения по настоящему делу, а именно:  

- восстановить отмостку многоквартирного дома;  

- выполнить монтаж водосточной системы дома с уклоном желобов в  сторону водоприемных воронок;  

- выполнить герметизацию стыков водосточных желобов; - восстановить стяжку пола в подъезде; - выполнить герметизацию стыков оконных откосов с отливами; - закрепить верхний откос двери; - восстановить стяжку перекрытия чердачного помещения. 

Взыскать с ООО "СК Эталонстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) в пользу Фонда содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства Белгородской области (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) судебные расходы по государственной пошлине в размере 6  000 руб. и почтовые расходы в размере 91,50 руб.  

 Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской  области.  

Судья Танделова З. М.