РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-230707/22-1-1325

г. Москва

30 января 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 30 января 2023года

Полный текст решения изготовлен 30 января 2023 года

Арбитражный суд в составе судьи  Коноваловой Е.В. 

при ведении протокола секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску АО "ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЕНИСОВСКИЙ" (678960, РЕСПУБЛИКА САХА /ЯКУТИЯ/, НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН, НЕРЮНГРИ ГОРОД, СТРОЕНИЕ 1, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 19.11.2003, ИНН: 

<

***>) к ООО "ЗАВОД ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (117587, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО СЕВЕРНОЕ, ВАРШАВСКОЕ Ш., Д. 125, СТР. 1, ЭТАЖ 5, ПОМЕЩ. 2, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 17.04.2014, ИНН: 

<

***>) о взыскании предварительной оплаты в сумме 310000 руб. по договору поставки товара №С0100014307 от 30.08.2018 и неустойки за просрочку поставки товара в сумме 2605915 руб. 50 коп.

при участии представителя истца ФИО2 по дов. от 02.02.2022

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен о  взыскании предварительной оплаты в сумме 310000 руб. по договору поставки товара №С0100014307 от 30.08.2018 и неустойки за просрочку поставки товара в сумме 2605915 руб. 50 коп.  Требования заявлены со ссылками на ст.ст. 309-310, 330, 395, 421,  487 и основаны на том, что ответчиком (поставщиком) не в полном объеме поставлен предварительно оплаченный истцом товар.

В судебном заседании истец требования поддержал.  Извещенный ответчик не явился, в направленном суду отзыве сослался на то, что поставил товар 26.05.21, заявил о снижении неустойки.

Оценив представленные письменные доказательства в полном объеме по правилам ст. 71 АПК РФ, заслушав объяснения представителей, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении требований.

Из материалов дела следует, что «30» августа 2018 между Акционерным обществом «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский» (Покупатель/Истец/АО «ГОК «Денисовский») и ООО «Завод Емкостного Оборудования» (Поставщик/Ответчик/ООО «Завод Емкостного Оборудования») был заключен Договор поставки товара № С0100014307 от 30.08.2018 и Спецификация №1/ С0100014307 от 30.08.2018 к нему на поставку резервуаров для хранения флотореагентов на сумму 7 709 000 руб. 

В соответствии п. 1.1. Договора Поставщик обязуется поставлять Покупателю товар (далее Товар) в количестве, качестве, ассортименте и на условиях, определенных Сторонами в соответствующих спецификациях.

Пунктом 3.4. Договора предусмотрено, что срок поставки Товара согласовывается Сторонами в Спецификации.

Согласно с п.4 Спецификации Поставщик обязуется поставить Товар в течение 65 календарных дней, исчисляемых от даты внесения первой части предоплаты.

Покупателем 25.09.2018, согласно платежному поручению № 70320, произведена оплата в размере 50 %, следовательно, крайний срок поставки товара является 29.11.2019.

10.12.2018 платежным поручение № 81167 Покупателем внесена вторая часть предоплаты, а также компенсированы расходы Поставщика по доставке товара.

В период с 28.02.2019 по 18.02.2021, согласно товарным накладным (УПД № 2, №17, 183, 1, 4), Покупателю были поставлено Товара на общую сумму 5 390 000 рублей. Стоимость доставки Товара согласно УПД № 26 составила 1 988 000  рублей.

Согласно исковому заявлению  не поставлены следующие позиции, согласованные сторонами в Спецификации:

№ п/п

Наименование Товара

Ед. изм.

Кол-во

Цена за ед.

изм., без НДС (18%),

руб.

НДС (18%) на ед., руб.

Сумма с НДС 18%,

руб.

1.2

КИП оборудование:

 

1.2.3.

ПРУ(1)-150УХЛ                           шт.

1

21 186,44

3 813,56

25 000

1.2.9.

ЗП-150 УХЛ1 с эл. приводом

шт.

1

39 830,51

7 169,49

47 000

1.2.11.

генератор пены ГПСС-600

шт.

2

11 864,41

2 135,59

28000

1.2.12.

механизм управления хлопушками МУ-1 дляХП-80-250

шт.

1

12 711,86

2 288,14

15000

2.2

КИП оборудование:

 

2.2.4.

ПРУ(1)-150УХЛ

шт.

2

21 186,44

3 813,56

50000

2.2.7.

ЗП-150 УХЛ1 с эл.приводом

шт.

2

39 830,51

7 169,49

94000

2.2.10.

генератор пены ГПСС-600

шт.

3

11 864,41

2 135,59

42000

2.2.11.

механизм управления хлопушками МУ-1 для ХП-80-250

шт.

2

12 711,86

2 288,14

30000

 

310 000

 

Доводы ответчика о поставке указанного товара документально не подтверждены. Приложенные к отзыву фотоотчет и накладная на перевозку груза не подтверждают поставку товара по указанным в спецификации позициям.

За нарушение срока поставки пунктом 7.3 договора  предусмотрена неустойка в размере 0,05% от цены товара,  предусмотренной в Спецификации, за каждый день неисполнения обязательств до его полного исполнения.

Истцом неустойка рассчитана, исходя из стоимости подлежащего поставке товара: 

5 721000,0 рублей (стоимость Товар по Спецификации) * 911 (количество дней просрочки) * 0,05 (неустойка по п. 7.3 Договора) = 2 605 915,50 (Два миллиона шестьсот пять тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 50 копеек.

Кроме того, в соответствии с пунктом 10.4. Договора, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично (в части соответствующей Спецификации), при наступлении следующих случаев:

10.4.1. если невыполнение Поставщиком своих обязательств является существенным нарушением условий Договора (таким как: нарушение оговоренных сроков отгрузки Товара, сроков поставки Товара, несвоевременная замена неисправных запасных частей, деталей, узлов, предоставление неполного комплекта документации на Товар, др.).

Истцом 24 мая 2022 года Покупателем в адрес Поставщика направлена претензия, с уведомлением о расторжении Договора, возврате денежных средств за непоставленный Товар и уплаты пени за нарушение сроков поставки.

Вместе с тем, принимая во внимание, что неустойка начислена истцом, исходя из стоимости товара, в том числе поставленного, суд соглашается с доводом ответчика о чрезмерном характере неустойки в связи с чем снижает ее размер до суммы основного долга.

Расходы по госпошлине возмещаются истцу за счет ответчика в полном размере, поскольку частичный отказ в иске связан с применением ст. 333 ГК РФ.

Основания уменьшения размера госпошлины отсуствуют.

Основываясь на изложенном, руководствуясь ст.ст. 110, 167-171 АПК РФ, 

РЕШИЛ

Взыскать с ООО "ЗАВОД ЕМКОСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" (ИНН: 1215180250) в пользу АО "ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ДЕНИСОВСКИЙ" (ИНН: 1434028995)  310000 руб. долга, 310000 руб. неустойки и 37580 руб.  расходов по уплате госпошлины.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия  в порядке, установленном ст.ст.  257-260 АПК РФ.

Судья:

Е.В. Коновалова