42/2021-126636(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

29 апреля 2021 года Дело № А55-24259/2020 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Шехмаметьевой Е.В. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрев в судебном заседании 29 апреля 2021 года дело по иску  

Некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд  капитального ремонта"  

к Обществу с ограниченной ответственностью "Бизнес-Трейд" третьи лица: 

1.Общество с ограниченной ответственностью «Центр НаНоТехнологий»  2.Общество с ограниченной ответственностью «ФотрКомплект»  

3.Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис комфорт» об обязании устранить недостатки при участии в заседании от истца – ФИО2 по доверенности от 21.10.2020 от ответчика – ФИО3 по доверенности от 11.01.2021 

Руководствуясь ст. 110, 167-171, 173 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес-Трейд" в течение тридцати  календарных дней с момента вступления в законную силу настоящего решения устранить  недостатки капитального ремонта в многоквартирном жилом доме по адресу: 

<

...>:  

- по всему периметру кровли произвести плотное крепление друг к другу профилированного  настила, а также коньковых элементов с расположением шурупов в продольных стыках с  шагом, не превышающим 500 мм - 700 мм. В соответствии с п.7.23 МДС 12-33.2007, п. 2.46  

СНиП 3.04.01-87;  

- по всему периметру кровли произвести крепление в продольных стыках с шагом, не  превышающим 500 мм - 700 мм. В соответствии с п.5.1.3 Методического пособия по  применению профилированных стальных настилов в строительстве;  

- выполнить примыкания к вентшахтам с нахлестом с обеспечением герметичности по  всему периметру кровли в соответствии с п.10.4, п.10.5 СП 54.13330.2016;  

- по всему периметру кровли выполнить крепление воронок стандартным штырем с  обжимным хомутом в соответствии с п.6.3.15 «Кровли. Технические требования, правила  приемки, проектирование и строительство, методы испытаний (пособие)»;  

- соединение листовой карнизной части в районе угловой водоразборной воронки  выполнить с устройством фальцевых швов и соединить с картинами рядового покрытия  п.6.3.11 «Кровли. Технические требования, правила приемки, проектирование и строительство,  методы испытаний (пособие)»;  

- выполнить герметичное примыкание кровли в районе карнизов в местах их сопряжения  в соответствии с п.10.5 СП 54.13330.2016;  

- произвести герметичное примыкание металлического оцинкованного листа к  дымоходам, вентканалам и слуховым окнам в соответствии с п.9.20, 10.4, 10.5 СП  54.13330.2016.  

 В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Бизнес-Трейд" в пользу  Некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области "Фонд  капитального ремонта" 6 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.  

 Возвратить Некоммерческой организации "Региональный оператор Самарской области  "Фонд капитального ремонта" из федерального бюджета 565 руб. 50 коп. уплаченной  платежным поручением № 18534 от 27.11.2019 государственной пошлины.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,  г.Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / Е.В. Шехмаметьева  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 19.08.2020 12:42:22

Кому выдана Шехмаметьева Екатерина Викторовна