РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 

24.08.2017 года                                                           Дело № А40-98964/17-110-923

Резолютивная часть решения объявлена 17.08.2017 года 

Решение в полном объеме изготовлено 24.08.2017 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В. /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" (ОГРН 

<

***>, 429305,Чувашия Чувашская республика, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕРЫ" (ОГРН 

<

***>, 117342, 

<

...>, пом/ком XI/69)  о взыскании 3 314 916,40 рублей,

при участии:

от истца – ФИО2, гендиректор,

от ответчика - не явился, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" обратилось в Арбитражный суд города Москвы к обществу с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕРЫ" о взыскании задолженности в размере 2 991 784 руб. 50 коп., неустойки в размере 323 131 руб. 90 коп. на основании договора №09-26 от 26.09.2016г.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте проведения предварительного судебного заседания, а также о рассмотрении спора по существу в случае его неявки и в отсутствие заявленных возражений против завершения предварительного судебного заседания и открытия судебного заседания в I инстанции, в заседание не явился, возражений против открытия судебного заседания в I инстанции непосредственно после завершения предварительного судебного заседания не заявил. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд рассмотрел спор в его отсутствие на основании ст.ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, 26.09.2016г. между истцом (Подрядчик) и ответчиком (Заказчик) был заключен договор подряда №09-26.

По условиям п. 1.1, которого Подрядчик обязался выполнить по заданию Заказчика работы по кладке стен и перегородок с креплением, монтаж перемычек многоквартирного жилого дома №12 в северной части микрорайона №38, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, а Заказчик обязуется принять их и оплатить.

Порядок оплаты между сторонами согласован  в п. 2.2 договора, по условиям которого оплата производится поэтапно: 1. Сдача объемов 10 и 20 числа каждого месяца. 2. В течение десяти банковских дней с момента подписания без замечаний и в срок акта приемки выполненных работ по форме КС-2, на основании справки формы КС-3 с предоставлением актов скрытых работ и исполнительной документации.

Стоимость работ по условиям договора определяется в приложении №1 – Протокол, который является неотъемлемой частью договора (п. 2.1 Договора).

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ).

Во исполнение условий договора истец выполнил предусмотренные работы, в соответствии с КС-2 и КС-3 от 20.01.2017г. стоимость работ составляет 2 150 392 руб. 50 коп., с КС-2 и КС-3 от 10.02.2017г. - 640 212 руб. 00 коп, с КС-2 и КС-3 от 20.02.2017г. - 279 248 руб. 00 коп.

Ответчик  обязательства, предусмотренные п. 2.2 договора не исполнил, оплату работ в полном объеме не произвел.

Согласно представленным доказательствам по состоянию на последнюю дату оплаты 07 марта 2017г. платежным поручением № 35 от 07.03.2017г. в размере 100 000 руб. числится задолженность в размере 2 991 784 руб. 50 коп.

Согласно п. 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком строительных работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии названных указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со ст. 711 ГК РФ. 

Ответчик свои обязательства не исполнил, работы в срок в размере 2 991 784 руб. 50 коп. не оплатил, доказательств погашения задолженности не представил.

При указанных обстоятельствах иск в этой части подлежит удовлетворению.

Кроме того, в соответствии со ст. 330 ГК на основании п.7.1 договора с ответчика подлежат взысканию неустойка в размере 0,1% от стоимости не оплаченных в срок работ за каждый день просрочки оплаты, что по расчету истца, проверенному судом, составляет 323 131 руб. 90 коп. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕРЫ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "ВЕКТОР" 2 991 784 руб. задолженности, 323 131 руб. 90  коп. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕРЫ" в  федеральный бюджет госпошлину в размере 39 575 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В.Мищенко