АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011,

тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761

http://www.irkutsk.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

г. Иркутск                                                                                                Дело  № А19-15173/2024

25.10.2024

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 25.10.2024

Решение  в полном объеме изготовлено 28.10.2024

 

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Архипенко А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Доновской Н.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания индустриального технопарка «Усолье-Промтех» (адрес: 665460, Иркутская обл., Усолье-Сибирское г., Дзержинского ул., зд. 1П, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к Акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» (адрес: 664033, Иркутская обл., Иркутск г., ФИО1 ул., д. 257, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

об обязании осуществить технологическое присоединение, взыскании 244 746,82 руб.,

при участии в судебном заседании:

от истца - ФИО2 с.В. (доверенность от 10.01.2022 № 1С/22, удостоверение адвоката)

от ответчика - не явились, извещены,

в судебном заседании 22.10.2024 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 25.10.2024 до 12 час. 00 мин., после перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда при ведении протокола тем же секретарём при участии того же представителя истца,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания индустриального технопарка «Усолье-Промтех»  обратилось к открытому акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания»  с требованием обязать ответчика осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств в соответствии с условиями договора № 444/21-ЦЭС от 10.08.2021 и оформлением акта о выполнении технических условий со стороны сетевой организации в месячный срок со дня вступления в силу решения суда, а также взыскании неустойки в размере 220 673,36 руб.

Ответчик иск не признал.

 

Обстоятельства дела 

10.08.2021 между открытым акционерным обществом «Иркутская электросетевая компания» и обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания индустриального технопарка «Усолье-Промтех» (заявитель)  был заключен договор № 444/21-ЦЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по условиям которого сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя согласно приложенным к договору Техническим условиям от 05.08.2021,  в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств,  урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

 максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 9 100 кВт (увеличение отбора мощности с 3 500 кВт до 12 600 кВт); категория надежности III;  класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 6 кВ; максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 3 500 кВт (пункт 1 договора), в срок два года со дня заключения настоящего договора (пункт 5 договора).

 

Технологическое присоединение необходимо как указано в пункте 2 договора для электроснабжения:  КЛ-6кВ,  расположенных на земельном участке (площадь 141022+/-137 кв.м.) с кадастровым номером 38:31:000051:1316 (см.Выписку из единого государственного реестра недвижимости от 04.03.2021) по адресу: 

<

...> з/у 1).

Отношения  по технологическому присоединении урегулированы  Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ  27.12.2004  № 861.

В частности, пунктами 4, 6 Правил установлено, что любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами, а заключение договора является обязательным для сетевой организации. 

В пунктах 1.1-1.3 технических условий сторонами согласованы обязанности по выполнению предусмотренных данным договором мероприятий применительно к каждому из участников сделки.

Предусмотренная пунктами 10-12 договора оплата за технологическое присоединение произведена заявителем в сумме 267 482,87 рублей согласно платежному  поручению № 544 от 09.08.2021.

В соответствии с пунктом 6.2 договора № 444/21-ЦЭС сетевая организация обязана в течение 10 дней со дня уведомления заявителем о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения ТУ заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя.

По утверждению заявителя, им  выполнены предусмотренные техническими условиями мероприятия ( в модернизацию сетей вложено порядка 25 млн.руб.)  о чем  22.11.2021 сообщено сетевой организации.

Письмом № 54 от 26.01.2022 сетевая организация уведомила заявителя о проведении проверка, в ходе которой установлено, что мероприятия, предусмотренные пунктом 4.1 Технических условий № 444/21-ЦЭС, со стороны заявителя не выполнены - проектная документация в полном объеме не согласована с филиалом ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

В связи с необоснованностью данного отказа в адрес сетевой организации 28.01.2022 заявителем было направлено письмо с просьбой разъяснения позиции ОАО «ИЭСК», поскольку все предусмотренные ТУ согласования  произведены.

Сетевая организация от ответа уклонилась,  поэтому заявитель обратился с жалобой на нарушение Правил 861 в Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области.

По обращению в отношении сетевой организации было возбуждено дело №038/04/9.21-1365/2022 об административном правонарушении и составлен протокол об административном правонарушении №038/273/22 от 25.10.2022.

По результатам рассмотрения постановлением Управления  ФАС по Иркутской области от 26.01.2023 дело об административном правонарушении в отношении ООО «ИЭСК» было прекращено в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения (статья 2.9. КоАП РФ).

Предусмотренный договором срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объектов электросетевого хозяйства заявителя, установленный пунктом 5 договора № 444/21-ЦЭС истек 10.08.2023.

07.11.2023 сетевая организация во исполнение пункта 4.6 договора подтвердила полное выполнение заявителем предусмотренных ТУ мероприятий, подписав Акт о выполнении технических условий.

В силу требований статей 309-310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов,  односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Однако сетевая организация своих обязанностей, установленных пунктом 6.4 договора,  по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, составлению Акта   об осуществлении технологического присоединения не исполнила.

Истец посчитал свои права нарушенными.

Одним из способов защиты гражданских прав является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

В этой связи, истец обратился в суд с настоящим иском.

Пунктом 17 договора № 444/21-ЦЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям предусмотрена ответственность за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению, виновная сторона обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0.25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. 

Истцом за период просрочки 11.08.2023 - 15.08.2024 = 366 дней исполнения сетевой организацией своих обязательств по договору  начислена неустойка из расчета: 267 482,87 х 0,25 х 366 : 100 = 244 746,82 руб., которую также требует взыскать с ответчика.

В судебном заседании истец уточнил предмет требований, как-то: просил обязать сетевую организацию выполнить предусмотренные условиями договора   № 444/21-ЦЭС от 10.08.2021 и техническими условиями № 444/21-ЦЭС мероприятия по технологическому присоединению (увеличению мощности) объектов электросетевого хозяйства заявителя  с оформлением акта об осуществлении технологического присоединения в месячный срок со дня вступления в силу решения суда. Уточнение судом принято.

 

Ответчик иск не признал, пояснив следующее.

Действующее законодательство по технологическому присоединению в электроэнергетике различает технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих устройств потребителей. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» под энергопринимающей установкой,  энергопринимающим устройством понимаются аппарат, агрегат, оборудование либо объединенная электрической связью их совокупность, которые предназначены для преобразования электрической энергии в другой вид энергии для ее потребления и функционируют совместно с другими объектами электроэнергетики в составе электроэнергетической системы,  в то время как в соответствии с Приложением № 1 к Методическим рекомендациям, утвержденным  Приказом Ростехнадзора от 23.07.2019 № 291, подпунктами 2.4.2, 2.5.2 Правил устройства электроустановок, утвержденных  Приказом Минэнерго России от 20.05.2003 № 187  кабельная линия электропередачи - это линия для передачи электроэнергии или отдельных ее импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, представляющая собой объект электросетевого хозяйства.

Таким образом, кабельные линии, являются самостоятельными объектами электросетевого хозяйства, а не энергопринимающим устройством.

Из этих посылок ответчик заключает, что условия договора на технологическое присоединение предметом которого является объект электросетевого хозяйства отличны от договора на технологическое присоединение предметом   которого является энергопринимающее устройством (непосредственно потребляющую энергию).

В соответствии с пунктом 2 типовых форм договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, и пунктом 2 типовых технических условий, утвержденных приложениями 8 - 12 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861,  в проекте договора подлежит указанию «наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя.

Предметом заключенного 10.08.2021 между сторонами договора № 444/21-ЦЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям является присоединение не энергопринимающих устройств, а объекта электросетевого хозяйства -  КЛ-6кВ,  расположенных на земельном участке (площадь 141022+/-137 кв.м.) с кадастровым номером 38:31:000051:1316 (см.Выписку из единого государственного реестра недвижимости от 04.03.2021) по адресу: 

<

...> з/у 1) в целях увеличение отбора мощности с 3 500 кВт до 12 600 кВт, что также предусмотрено и Техническими условиями, где отражено, что сетевая организация обеспечивает технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства заявителя: существующие КЛ-6 кВ от ячейки №8 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ ЗГО до ТП-2 6 кВ  и от ячейки №16 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ ЗГО до ТП-4 6 кВ с увеличением максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к электрическим сетям на 9,1 МВт (увеличение максимальной мощности с 3,5 МВт до 12,6 МВт) к электрическим сетям ОАО «ИЭСК».

Представитель сетевой организации в судебном заседании обратил внимание суда на то, что технологическое присоединение объекта электросетевого хозяйства КЛ-6 кВ с максимальной мощностью  с 3,5 МВт было осуществлено сторона по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 2018 года.

Понятие увеличение мощности относится исключительно для энергопринимающих устройств потребителей, опосредованно присоединенных к сетям сетевой организации через электрические сети.

В этой связи, заключенный между сторонами 10.08.2021 договор № 444/21-ЦЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям не соответствует закону и либо незаключен либо недействителен. 

Ответчик также просил уменьшить по правилам статьи 333 Гражданского кодекса РФ размер отыскиваемой неустойки.

 

Суд определением по делу  предложил ответчику (сетевой организации) внимательно ознакомиться с содержанием пункта 1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, где технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей и объектов электросетевого хозяйства отнесено законодателем к одному виду электрических устройств - энергопринимающим устройствам, технологическое присоединение которых осуществляется по единым правилам.

Ответчик соответствующих пояснений не представил.

Истец в судебное заседание  представил договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 2018 года, представил  заявку на договор 2021 года со всеми приложениями предусмотренными Правилами 861 (план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации, однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам и т.д.) ;  дал пояснения относительно предмета и цели заключения договора, представил  однолинейную схему электроснабжения 6 кВ (электрической сети заявителя), присоединяемой  к электрическим сетям сетевой организации, перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам; обоснование со ссылкой на нормы права, позволяющими уклоняться от исполнения публичного договора. Акт разграничения границ по договору 2018 года. 

Суд с учетом  ходатайство ответчика об отложении объявлял перерыв в рассмотрении дела.

 

Исследовав материалы дела и выслушав доводы истца, суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

 

Как видно из материалов дела и не оспаривается сторонами ОАО «Иркутская электросетевая компания» является собственником объектов электросетевого хозяйства (сетевой организаций), к которым присоединены объекты электросетевого хозяйства общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания индустриального технопарка Усолье-Промтех», в частности, объект электросетевого хозяйства -  КЛ-6кВ,  расположенный на земельном участке (площадь 141022+/-137 кв.м.) с кадастровым номером 38:31:000051:1316 (см.Выписку из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 04.03.2021г.; вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 38:31:000051:1316-38/115/2019-1 от 04.03.2021г; доля в праве полная по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципальное образование "город Усолье- Сибирское", 

<

...> з/у 1)_.

Указанный объект электросетевого хозяйства  был технологически присоединен к сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания», что подтверждается выданным 06.11.2018 АО «ИЭСК» Актом  об осуществлении технологического присоединении №836/18-ЦЭС  с мощностью 3,5 Мвт.

В состав территории индустриального парка «Усолье-Промтех» (расположена на территории бывшего АО «ПО Усольмаш»)  входит 4 земельных участка общей площадью 27 га, на которых расположены 18 объектов капитального строительства общей площадью 43 026,4 кв.м., принадлежащих ООО «УКИТ Усолье-Промтех» и находятся 22 действующих резидента (конечных потребителя электроэнергии) производственных и торговых предприятий, а также объекты самого ООО УКИТ «Усолье-Промтех»: офисные и складские помещения и гаражные боксы, металлоцех и цех металлообработки. 

В перспективе открытие двух перспективных заводов: совместного российско-китайского предприятия по выпуску высокотехнологичного электротранспорта (проект курируется межправительственной российско-китайской комиссией по инвестиционному сотрудничеству) и завода по производству БПЛА) каждому из которых требуется от 3 МВт электроэнергии.

Посредством объекта электросетевого хозяйства КЛ-6кВ ООО «УКИТ Усолье-Промтех»  обеспечивает снабжение электрической энергией, расположенных на принадлежащих ему земельных участках,  производственных  и иных объектов. 

В связи чем, после технологического присоединения в 2018 году, 01.11.2018 между ООО «Иркутская энергосбытовая компания»  (гарантирующий поставщик) и ООО «УКИТ Усолье-Промтех» (потребитель )   был заключен договора энергоснабжения № КС00 00002011 с учетом дополнительных соглашений № 1 от 14.11.2018 и № 2 от 17.05.2019.

За период с января 2023 года по сентябрь 2024 потребление электроэнергии составило 113 846 375 кВт/ч на общую сумму 398 883 619,58 руб., что подтверждается выставленными ООО «Иркутскэнергосбыт» за указанный период счет-фактурами.

 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется в соответствии с требованиями статьи 26 Закона об электроэнергетике, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила недискриминационного доступа), Правил технологического присоединения.

По смыслу статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, осуществляется в порядке, установленном Правилами технологического присоединения и носит однократный характер, причем в силу прямого указания пункта 4 Правил недискриминационного доступа любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

В случае необходимости в увеличение максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств по заявлению собственника либо иного законного владельца объекта электросетевого хозяйства  заключается новый договор на технологическое присоединение (пункт 2 Правила недискриминационного доступа)  в соответствии с данными Правилами).

19.05.2021 ООО «Управляющая компания индустриального технопарка Усолье-Промтех»  с учетом имеющихся и перспективных потребителей электрической энергии в  АО «ИЭСК» была подана заявка (по установленной Правилами форме)  на увеличение мощности объекта электросетевого хозяйства - КЛ-6 кВ, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 38:31:000051:1316 с 3.5 до 12.6 МВт, в соответствии с которой сетевая организация разработала Технические условия на технологическое присоединение (увеличение мощности) к электрическим сетям ОАО «ИЭСК» объектов электросетевого хозяйства заявителя и  10.08.2021 между сторонами был заключен договор № 444/21-ЦЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта электросетевого хозяйства заявителя  -  КЛ-6кВ  в целях увеличение отбора мощности с 3 500 кВт до 12 600 кВт.

По условиям договора и Технических условий сетевая организация обеспечивает технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства заявителя: существующие КЛ-6 кВ от ячейки №8 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ ЗГО до ТП-2 6 кВ  и от ячейки №16 ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ ЗГО до ТП-4 6 кВ с увеличением максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к электрическим сетям на 9,1 МВт (увеличение максимальной мощности с 3,5 МВт до 12,6 МВт) к электрическим сетям ОАО «ИЭСК» в срок два года со дня заключения настоящего договора (пункт 5 договора).

ООО «УКИТ Усолье-Промтех»  своевременно и полностью выполнило свои обязательства по вышеуказанному договору ( в модернизацию сетей вложено порядка 25 млн.руб.).  

Так, платежным поручением № 544 от 09.08.2021 на сумму  267 482,87 руб. произведена оплата услуг, письмом от  07.11.2023 заявитель сообщил АО «ИЭСК» о полном выполнении  предусмотренных Техническими условиями мероприятий.

 В соответствии с пунктом 6.2 договора № 444/21-ЦЭС сетевая организация обязана в течение 10            дней со дня уведомления заявителем о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения ТУ заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя.

Письмом № 54 от 26.01.2022 сетевая организация уведомила заявителя о проведении проверка, в ходе которой установлено, что мероприятия, предусмотренные пунктом 4.1 Технических условий № 444/21-ЦЭС, со стороны заявителя не выполнены - проектная документация в полном объеме не согласована с филиалом ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

В связи с необоснованностью данного отказа в адрес сетевой организации 28.01.2022 заявителем было направлено письмо с просьбой разъяснения позиции ОАО «ИЭСК», поскольку все предусмотренные ТУ согласования  произведены.

Сетевая организация от ответа уклонилась,  поэтому заявитель обратился с жалобой на нарушение сетевой организацией Правил технологического присоединения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области.

По обращению в отношении сетевой организации было возбуждено дело №038/04/9.21-1365/2022 об административном правонарушении и составлен протокол об административном правонарушении №038/273/22 от 25.10.2022.

По результатам рассмотрения постановлением Управления  ФАС по Иркутской области от 26.01.2023 дело об административном правонарушении в отношении ООО «ИЭСК» было прекращено в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения (статья 2.9. КоАП РФ).

Предусмотренный договором срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению объектов электросетевого хозяйства заявителя, установленный пунктом 5 договора № 444/21-ЦЭС истек 10.08.2023.

07.11.2023 сетевая организация во исполнение пункта 4.6 договора и пункта 4.5 технических условий подтвердила полное выполнение заявителем предусмотренных ТУ мероприятий, подписав Акт о выполнении технических условий.

Доказательств выполнения предусмотренных пунктом 1.3 Технических условий мероприятий и пунктом 6.4 договора действий по фактическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, составлению Акта   об осуществлении технологического присоединения ответчик суду не назвал и не представил.

В силу требований статей 309-310 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов,  односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Одним из способов защиты гражданских прав, предусмотренных статьей 12 Гражданского кодекса РФ, является присуждения к исполнению обязанности в натуре.

В этой связи, требования истца о присуждении ответчика  к исполнению в натуре обязанности предусмотренной пунктом 6.4 договора № 444/21-ЦЭС от 10.08.2021, а именно: обязании ответчика осуществить фактическое  технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца в соответствии с условиями договора № 444/21-ЦЭС от 10.08.2021 к сетям электрическим сетям с оформлением акта об осуществлении технологического присоединения, суд  считает законными и обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Пунктом 17 договора № 444/21-ЦЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям предусмотрена ответственность сторон за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в форме уплаты виновной стороной неустойки равной 0,25 процента от общего размера платы за каждый день просрочки, при этом период начисления неустойки ограничен сроком в один год.

Период просрочки,  за который отыскивается неустойка, согласно расчету истца составляет с  11.08.2023 - 15.08.2024 = 366 дней (в феврале 2024 года – 29 дней).

Размер оплаты за технологическое присоединение согласно пункту 10 договора - 267 482,87 руб., сумма неустойки определенная истцом в размере  267 482,87 х 0,25 х 366 : 100 = 244 746,82 руб., судом проверена и является верной, а значит подлежащей удовлетворению.

 

Доводы ответчика о том, что заключенный между сторонами 10.08.2021 договор № 444/21-ЦЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям не соответствует закону и либо незаключен либо недействителен, мотивированный отсутствием у истца энергопринимающего устройства, ошибочны и носят надуманный характер.

Действие Правил технологического присоединения как указано в пункте 2 Правил распространяется на случаи увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

При этом, под энергопринимающими устройствами потребителей электрической энергии подразумеваются как собственно устройства потребляющие э/э, так объекты электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (пункт 1 Правил технологического присоединения).

Согласно пункту 4 Правил технологического присоединения любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

Более того, в Правилах  технологического присоединения особенностям  технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства посвящена отдельно выделанная глава V. Особенности технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства.

О чем ответчика как профессиональная организация в сфере технологического  присоединения должна знать и учитывать в своей деятельности.

По существу выявленное судом бездействие ответчика в условия доминирования  на рынке и незнание им законодательство об электроэнергетике свидетельствуют о злоупотреблении правом со стороны последнего, что в силу положений статьи 10 Гражданского кодекса РФ недопустимо.

Ответчик также просил уменьшить по правилам статьи 333 Гражданского кодекса РФ,  размер отыскиваемой неустойки.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 73 постановления Пленума Верховного Суда РФ  от 24.03.2016 № 7, бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика. Несоразмерность и необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки.

Следовательно, для применения правил указанной статьи ответчик должен доказать явную несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства.

Ответчик каких-либо доказательств в подтверждение явной несоразмерности начисленной неустойки последствиям нарушения им обязательств не представил. 

Размер ответственности, установленный сторонами в договоре, соответствует пункту 17 типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (приложение № 8 к Правилам технологического присоединения), и  ответственность, установленная спорными договорами на случай нарушения сроков исполнения обязательств, является равной для обеих сторон договора, и соразмерна характеру нарушения.

Оснований для снижения размера неустойки, предусмотренных положениями статей 333 Гражданского кодекса РФ, суд не усмотрел. 

Расходы по оплате государственной пошлины в силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ  относятся на ответчика.

Размер государственной пошлины при сумме удовлетворенных требований – 244 746,82 руб. составляет 13 495 руб., истцом при обращении в суд уплачена государственная пошлина в размере 13 413 руб.  которая подлежит взысканию в пользу истца, а в оставшейся части – в доход федерального бюджета.

На основании изложенного руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

решил:

Обязать акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (адрес: 664033, Иркутская обл., Иркутск г., ФИО1 ул., д. 257, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОООО «Управляющая компания индустриального технопарка «Усолье-Промтех» в соответствии с условиями договора № 444/21-ЦЭС от 10.08.2021 и оформлением со стороны сетевой организации Акта об осуществлении технологического присоединения  в месячный срок со дня вступления в силу решения суда.

Взыскать с акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (адрес: 664033, Иркутская обл., Иркутск г., ФИО1 ул., д. 257, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания индустриального технопарка «Усолье-Промтех» (адрес: 665460, Иркутская обл., Усолье-Сибирское г., Дзержинского ул., зд. 1П, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 244 746,82 руб., неустойки за период с 11.08.2023 по 15.08.2024, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 13 413 руб. 

Взыскать с акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (адрес: 664033, Иркутская обл., Иркутск г., ФИО1 ул., д. 257, ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 82 руб.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия, и по истечении этого срока вступает в законную силу.

Судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

 

Судья                                                                                                         А.А. Архипенко