Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

14 июня 2019 годаДело № А56-44987/2019

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Нефедовой А.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец общество с ограниченной ответственностью  "РедутПроект" (199034, Санкт-Петербург, линия 14-я В.О., дом 1/25, литер А, помещение 4Н; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

ответчик общество с ограниченной ответственностью "Геопроект" (353185, Краснодарский край, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 348 284 руб. 28 коп., в т.ч. 122 500 руб. неосновательного обогащения в виде  неотработанного аванса по договору № ВГ-2-1-17-29 от 07.02.2017 на разработку и согласование проектной документации, 219 520 руб. неустойки за просрочку выполнения работ за период с 07.05.2017 по 28.07.2018, 6 264 руб. 28 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 29.07.2018 по 01.04.2019 с последующим их начислением, начиная со 02.04.2019 и по дату фактического исполнения решения суда, а также 9 966 руб. расходов по уплате государственной пошлины

изучив представленные в дело документы, суд пришел к выводу об обоснованности требований истца, изложенных в исковом заявлении и возражениях на отзыв, при этом  доводы ответчика признал необоснованными и подлежащими отклонению;  руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Геопроект" в пользу общества с ограниченной ответственностью "РедутПроект" 348 284 руб. 28 коп., в т.ч. 122 500 руб. неосновательного обогащения в виде  неотработанного аванса по договору № ВГ-2-1-17-29 от 07.02.2017 на разработку и согласование проектной документации, 219 520 руб. неустойки за просрочку выполнения работ за период с 07.05.2017 по 28.07.2018, 6 264 руб. 28 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 29.07.2018 по 01.04.2019 с последующим их начислением, начиная со 02.04.2019 и по дату фактического исполнения решения суда, а также 9 966 руб. расходов по уплате государственной пошлины

Решение

 подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Нефедова А.В.