Арбитражный суд Республики Саха (Якутия)

ул. Курашова, д. 28, бокс 8, г. Якутск, 677980 

тел: +7 (4112) 34-05-80, https://yakutsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А58-9698/2024

04 марта 2025 года

город Якутск

Резолютивная часть решения объявлена 04.03.2025

Мотивированное решение изготовлено 04.03.2025

Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) в составе судьи Семёновой У. Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания Еремеевой Л.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) "Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от 05.11.2024 г. № б/н к обществу с ограниченной ответственностью "ЭкоСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании исполнить государственные контракты №0816500000623007454 от 15.05.2023, №0816500000623007355 от 15.05.2023, №0816500000623007396 от 15.05.2023, №0816500000623007354 от 15.05.2023, №0816500000623007393 от 15.05.2023, №0816500000623007353 от 15.05.2023, №0816500000623007392 от 15.05.2023, №0816500000623007351 от 15.05.2023, №0816500000623007372 от 15.05.2023, №0816500000623007350 от 15.05.2023, №0816500000623007369 от 15.05.2023, №0816500000623007349 от 15.05.2023, №0816500000623007366 от 15.05.2023, №0816500000623007345 от 15.05.2023, №0816500000623007363 от 15.05.2023, №0816500000623007342 от 15.05.2023, №0816500000623007357 от 15.05.2023, №0816500000623007341 от 15.05.2023, №0816500000623007356 от 15.05.2023, №0816500000623007338 от 15.05.2023, №0816500000623007336 от 15.05.2023, №0816500000623007329 от 15.05.2023, №0816500000623007334 от 15.05.2023, №0816500000623007324 от 15.05.2023, №0816500000623007332 от 15.05.2023, №0816500000623007322 от 15.05.2023, №0816500000623007331 от 15.05.2023, №0816500000623008880 от 30.05.2023, №0816500000623018249 от 07.11.2023, в течении 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу. 

с участием в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора  администрации муниципального образования "Амгинский наслег" Амгинского района Республики Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>).

На судебное заседание явились представители: 

от истца: ФИО1 по доверенности № 2 от 09.01.2025, срок действия до 31.12.2025 (паспорт, диплом);

от ответчика, третьего лица не явились, извещены.

УСТАНОВИЛ:

государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия) "Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым заявлением от 05.11.2024 г. № б/н к обществу с ограниченной ответственностью "ЭкоСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании исполнить государственные контракты №0816500000623007454 от 15.05.2023, №0816500000623007355 от 15.05.2023, №0816500000623007396 от 15.05.2023, №0816500000623007354 от 15.05.2023, №0816500000623007393 от 15.05.2023, №0816500000623007353 от 15.05.2023, №0816500000623007392 от 15.05.2023, №0816500000623007351 от 15.05.2023, №0816500000623007372 от 15.05.2023, №0816500000623007350 от 15.05.2023, №0816500000623007369 от 15.05.2023, №0816500000623007349 от 15.05.2023, №0816500000623007366 от 15.05.2023, №0816500000623007345 от 15.05.2023, №0816500000623007363 от 15.05.2023, №0816500000623007342 от 15.05.2023, №0816500000623007357 от 15.05.2023, №0816500000623007341 от 15.05.2023, №0816500000623007356 от 15.05.2023, №0816500000623007338 от 15.05.2023, №0816500000623007336 от 15.05.2023, №0816500000623007329 от 15.05.2023, №0816500000623007334 от 15.05.2023, №0816500000623007324 от 15.05.2023, №0816500000623007332 от 15.05.2023, №0816500000623007322 от 15.05.2023, №0816500000623007331 от 15.05.2023, №0816500000623008880 от 30.05.2023, №0816500000623018249 от 07.11.2023, в части передачи жилых помещений (муниципальных квартир) в муниципальную собственность муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия).

Определением суда от 11.02.2025 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора  привлечена администрация муниципального образования "Амгинский наслег" Амгинского района Республики Саха (Якутия) (ИНН 

<

***>).

Определением суда от 11.02.2025 принято уточнение истцом исковых требований об обязании исполнить государственные контракты №0816500000623007454 от 15.05.2023, №0816500000623007355 от 15.05.2023, №0816500000623007396 от 15.05.2023, №0816500000623007354 от 15.05.2023, №0816500000623007393 от 15.05.2023, №0816500000623007353 от 15.05.2023, №0816500000623007392 от 15.05.2023, №0816500000623007351 от 15.05.2023, №0816500000623007372 от 15.05.2023, №0816500000623007350 от 15.05.2023, №0816500000623007369 от 15.05.2023, №0816500000623007349 от 15.05.2023, №0816500000623007366 от 15.05.2023, №0816500000623007345 от 15.05.2023, №0816500000623007363 от 15.05.2023, №0816500000623007342 от 15.05.2023, №0816500000623007357 от 15.05.2023, №0816500000623007341 от 15.05.2023, №0816500000623007356 от 15.05.2023, №0816500000623007338 от 15.05.2023, №0816500000623007336 от 15.05.2023, №0816500000623007329 от 15.05.2023, №0816500000623007334 от 15.05.2023, №0816500000623007324 от 15.05.2023, №0816500000623007332 от 15.05.2023, №0816500000623007322 от 15.05.2023, №0816500000623007331 от 15.05.2023, №0816500000623008880 от 30.05.2023, №0816500000623018249 от 07.11.2023, в течении 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу. 

Суд руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил рассмотреть дело в судебном заседании в отсутствие представителей ответчика, третьего лица извещенных о времени и месте проведения судебного заседания.

В суд поступили: 25.02.2025 от третьего лица отзыв на исковое заявление, 03.03.2025 от истца ходатайство о приобщении документов с доказательством направления копии иска третьему лицу.

Представитель истца выступила с пояснениями, ответила на вопросы. Исковые требования поддержала в полном объеме.

Поступившие документы приобщены к материалам дела в порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Судом установлены следующие обстоятельства.

Между истцом (заказчик) и ответчиком (застройщик) заключены государственные контракты:

- №0816500000623007454 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...>, общей площадью – 144,48 кв.м., а Заказчик обязплся оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 15 323 115,36 рублей  (пункт 2.1 Контракта);

- №0816500000623007355 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия). 

<

...>, общей площадью – 136,66 кв. м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 14 493 749 (четырнадцать миллионов четыреста девяносто три тысячи семьсот сорок девять) рублей 62 копеек (пункт 2.1 Контракта);

- №0816500000623007396 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 3 жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 3 жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...>, общей площадью – 185,11 кв. м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 19 632 211,27 рублей (пункт 2.1 Контракта);

- №0816500000623007354 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 3 (трех) жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 3 (трех) жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, общей площадью - 181,59 кв. м (далее – Квартиры), а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 19 258 890,63  рублей (пункт 2.1 Контракта);

- №0816500000623007393 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 3 жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 3 жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия). 

<

...>, общей площадью – 181,59 кв.м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 19 258 890,63 рублей  (пункт 2.1 Контракта);

- №0816500000623007353 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 2 (двух) жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) 2 (двухжилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, общей площадью - 136,66 кв.м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта);

Цена Контракта составляет 14 493 749,62 рублей (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623007392 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...>, общей площадью – 133,77 кв. м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 14 187 244,89 рубля (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623007351 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, общей площадью – 138,59 кв.м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 14 698 439,63 рублей (пункт 2.1 Контракта);

 - №0816500000623007372 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 3 жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 3 жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...>, общей площадью – 180,93 кв. м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 19 188 893,01 рубля (пункт 2.1 Контракта);

- №0816500000623007350 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 2 (двух) жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) 2 (двух) жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, общей площадью - 133,35 кв.м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 14 142 700,95 рублей (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623007369 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 3 жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По  Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 3 жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...>, общей площадью – 164,44 кв.м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 17 440 013,08 рублей (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623007349 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 2 жилых помещения (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) 2 (два) жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, общей площадью - 127,07 кв.м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 13 476 662,99 рубля (пункт 2.1 Контракта);

- №0816500000623007366 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...>, общей площадью – 127,76 кв. м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 13 549 842,32 рубля (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623007345 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия). 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По  Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия). 

<

...>, общей площадью – 179,04 кв.м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 18 988 445,28 рублей (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623007363 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 3 жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По  Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 3 жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...>, общей площадью – 149,78 кв. м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 15 885 217,40 рублей (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623007342 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 3 (трех) жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) 3 (трех) жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, общей площадью - 143,95 кв.м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 15 266 905,15 рублей (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623007357 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...>, общей площадью – 134,93 кв. м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 14 310 271,01 рубль (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623007341 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 4 (четырех) жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) 4 (четырех) жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, общей площадью-182,89 кв.м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 19 396 764,73  рубля (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623007356 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По  Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...>, общей площадью – 125,91 кв. м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 13 353 636,87 рублей (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623007338 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 2 (двух) жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) 2 (двух) жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, общей площадью - 140,31 кв.м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 14 880 857,67 рублей (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623007336 от 15.05.2023, предметом является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 3 (трех) жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) 3 (три) жилых помещения (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, общей площадью - 164,53 кв.м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 17 449 558,21 рублей (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623007329 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 2 (два) жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) 2 (два) жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, общей площадью - 125,31 кв.м.,  а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 13 290 002,67 рубля (пункт 2.1 Контракта).

-№0816500000623007334 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия). 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия). 

<

...>, общей площадью – 140,72 кв.м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 14 924 341,04 рубль (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623007324 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 3 (трех) жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) 3 (трех) жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, общей площадью - 147,82 кв.м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 15 677 345,74 рублей (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623007332 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По  Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, общей площадью – 139,56 кв.м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункта 1.1 Контракта).

  Цена Контракта составляет 14 801 314,92 рублей (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623007322 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 3 (трех) жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» Амгинского района Республики Саха (Якутия) 3 (три) жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, общей площадью - 182,25 кв.м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 19 328 888,25 рублей (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623007331 от 15.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По  Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, общей площадью – 144,38 кв.м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 15 312 509,66 рублей (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623008880 от 30.05.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...> у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По  Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, 

<

...>, общей площадью – 131,48 кв.м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 13 944 374,36 рубля (пункт 2.1 Контракта);

-№0816500000623018249 от 07.11.2023, предметом Контракта является приобретение Заказчиком с согласия (в пользу) Муниципального образования «Амгинский наслег» (Приложение № 1 к настоящему Контракту) 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) в строящемся жилом доме по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, у Застройщика для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». По Контракту Застройщик обязался передать в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» 2 жилых помещений (благоустроенных квартир) для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, которые будут расположены в строящемся многоквартирном доме, проектная документация которого имеет положительное заключение государственной экспертизы, в случаях установленных статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, по адресу: Республика Саха (Якутия), 

<

...>, общей площадью - 79,29 кв. м., а Заказчик обязался оплатить за них цену в соответствии с условиями Контракта (пункт 1.1 Контракта).

Цена Контракта составляет 8 409 259,53 рублей (пункт 2.1 Контракта).

Ответчиком обязательства по передаче вышеуказанных жилых помещений не исполнены.

Ответчиком обязанность по передаче квартир в муниципальную собственность третьего лица по рассматриваемым государственным контрактам не исполнена.

Истец направил в адрес ответчика претензионное письмо от 24.07.2024 №530/1040, которое оставлено без ответа и удовлетворения.

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием обращения ситца в суд с настоящим иском.

Суд исследовав материалы дела приходит к следующим выводам.

Между сторонами сложились правоотношения в сфере купли-продажи в рамках контрактной системы, урегулированные гражданским законодательством.

Как указано в пп. 8 п. 1 ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон № 44-ФЗ) государственный контракт, муниципальный контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд.

Согласно части 2 статьи 94 Закона № 44-ФЗ поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей. 

Суд квалифицирует государственные контракты как договоры купли-продажи недвижимого имущества.

В п. 4.1. государственных контрактов указано, что передача квартир производится по актам приема-передачи квартир в срок, указанный в пункте 4.1 настоящего контракта, но не ранее осуществления государственной регистрации права собственности застройщика на жилые помещения (квартиры).

Таким образом, исходя из условия государственных контрактов, ответчик после завершения строительства должен оформить право собственности в отношении квартир на себя и только затем передать их третьему лицу.

Застройщик обязался передать Квартиры в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» не позднее 01.12.2024, при этом застройщик оставляет за собой право передачи квартир досрочно (пункты 1.2, 4.1 Контрактов).

Согласно пункту 1 статьи 549 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи недвижимого имущества (договору продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество. 

До настоящего времени передача квартир не осуществлена.

В силу абзаца 8 статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Согласно части 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

В пунктах 23, 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" указано, что по смыслу пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору, либо правомерного принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления акта, которому будет противоречить такое исполнение обязательства. В случае, если исполнение обязательства в натуре возможно, кредитор по своему усмотрению вправе либо требовать по суду такого исполнения, либо отказаться от принятия исполнения (пункт 2 статьи 405 ГК РФ) и взамен исполнения обязательства в натуре обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных неисполнением обязательства (пункты 1 и 3 статьи 396 ГК РФ). Предъявление требования об исполнении обязательства в натуре не лишает его права потребовать возмещения убытков, неустойки за просрочку исполнения обязательства.

Поскольку в материалы дела не представлены доказательства того, что исполнение обязательства в натуре (передача квартир) объективно невозможно, суд удовлетворяет требования истца об обязании ответчика исполнить государственные контракты                    №0816500000623007454 от 15.05.2023, №0816500000623007355 от 15.05.2023, №0816500000623007396 от 15.05.2023, №0816500000623007354 от 15.05.2023, №0816500000623007393 от 15.05.2023, №0816500000623007353 от 15.05.2023, №0816500000623007392 от 15.05.2023, №0816500000623007351 от 15.05.2023, №0816500000623007372 от 15.05.2023, №0816500000623007350 от 15.05.2023, №0816500000623007369 от 15.05.2023, №0816500000623007349 от 15.05.2023, №0816500000623007366 от 15.05.2023, №0816500000623007345 от 15.05.2023, №0816500000623007363 от 15.05.2023, №0816500000623007342 от 15.05.2023, №0816500000623007357 от 15.05.2023, №0816500000623007341 от 15.05.2023, №0816500000623007356 от 15.05.2023, №0816500000623007338 от 15.05.2023, №0816500000623007336 от 15.05.2023, №0816500000623007329 от 15.05.2023, №0816500000623007334 от 15.05.2023, №0816500000623007324 от 15.05.2023, №0816500000623007332 от 15.05.2023, №0816500000623007322 от 15.05.2023, №0816500000623007331 от 15.05.2023, №0816500000623008880 от 30.05.2023, №0816500000623018249 от 07.11.2023 в части передачи готовых жилых помещений в муниципальную собственность Муниципального образования «Амгинский наслег» в течении 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу. 

Истец в силу статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины.

Согласно пункту 3 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации  государственная пошлина, от уплаты которой в установленном порядке истец был освобожден, взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований, если ответчик не освобожден от уплаты государственной пошлины.

В силу пункта 22 Постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах", если в заявлении, поданном в арбитражный суд, объединено несколько взаимосвязанных требований неимущественного характера, то по смыслу подпункта 1 пункта 1 статьи 333.22 НК РФ уплачивается государственная пошлина за каждое самостоятельное требование. 

В связи с указанным размер государственной пошлины по настоящему делу составляет 1 450 000 рублей (12 неимущественных требований х 50 000 рублей).

С учетом результатов рассмотрения дела с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере в размере 1 450 000 рублей.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Лица, участвующие в деле, могут получить информацию о движении дела в общедоступной базе данных «Картотека арбитражных дел» по электронному адресу: www.kad.arbitr.ru.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить полностью.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) исполнить государственные контракты №0816500000623007454 от 15.05.2023, №0816500000623007355 от 15.05.2023, №0816500000623007396 от 15.05.2023, №0816500000623007354 от 15.05.2023, №0816500000623007393 от 15.05.2023, №0816500000623007353 от 15.05.2023, №0816500000623007392 от 15.05.2023, №0816500000623007351 от 15.05.2023, №0816500000623007372 от 15.05.2023, №0816500000623007350 от 15.05.2023, №0816500000623007369 от 15.05.2023, №0816500000623007349 от 15.05.2023, №0816500000623007366 от 15.05.2023, №0816500000623007345 от 15.05.2023, №0816500000623007363 от 15.05.2023, №0816500000623007342 от 15.05.2023, №0816500000623007357 от 15.05.2023, №0816500000623007341 от 15.05.2023, №0816500000623007356 от 15.05.2023, №0816500000623007338 от 15.05.2023, №0816500000623007336 от 15.05.2023, №0816500000623007329 от 15.05.2023, №0816500000623007334 от 15.05.2023, №0816500000623007324 от 15.05.2023, №0816500000623007332 от 15.05.2023, №0816500000623007322 от 15.05.2023, №0816500000623007331 от 15.05.2023, №0816500000623008880 от 30.05.2023, №0816500000623018249 от 07.11.2023, в течении 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЭкоСтрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 1 450 000 рублей государственной пошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Четвертый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://yakutsk.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда – http://4aas.arbitr.ru.

Судья

Семёнова У. Н.