АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28  http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть объявлена 29.07.2024 г.)

Дело № А82-20814/2023

г. Ярославль

02 августа 2024 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи  Бессоновой И.Ю. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Дыбцыной Е.А.

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Акционерного общества финансовая группа "Эверест" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Пирамида" (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>)

о   взыскании   40367737.99  руб.

при участии:                                                                        

от истца – не явились

от ответчика – не явились

установил:

Акционерное общество финансовая группа "Эверест" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Пирамида" о взыскании 45 338 292 руб. 60 коп. 

В ходе судебного рассмотрения спора истец в порядке ст. 49 АПК РФ изменял исковые требования, просил взыскать с ответчика 9 193 893 руб. 38 коп. неотработанный аванс, 30 673 051 руб. 40 коп. неустойка за нарушение сроков выполнения работ, 170 793 руб. 21 коп неустойка за просрочку возврата аванса, 330 000 руб. штрафы, продолжить начисление неустойки на сумму задолженности до момента фактического исполнения обязательства. 

Истец в судебное заседание не явился, извещен, направил ходатайство о проведении судебного заседания в отсутствие представителя.

Ответчик в судебное заседание не явился, определение суда о принятии иска к производству, направленное по юридическому адресу ответчика, определение об отложении рассмотрения дела, направленное по юридическому адресу ответчика, иному адресу, имеющему в материалах дела, возвращено отделением почтовой связи без вручения с отметкой «истек срок хранения». Ответчик извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в порядке ст. 123 АПК РФ, письменный отзыв на иск не направил. 

В судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 29.07.2024 г. до 09 час. 30 мин.

Информация о перерыве размещена на официальном сайте суда.

После перерыва судебное заседание продолжено без участия представителей сторон.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

26.10.2022 г. между Акционерным обществом финансовая группа "Эверест" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Пирамида" /Подрядчик/ заключен договор подряда № 82-10-АС-0001, согласно п.п. 2.1, 3.1, 4.1, 12.2, 12.4, 12.21 которого Подрядчик обязуется, в соответствии с Приложением № 1, в установленный Договором срок, выполнить по заданию Заказчика, своими и/или привлеченными силами, из собственных материалов (за исключением материалов и оборудования, обеспечение которыми возложено по Договору на Заказчика) комплекс работ по штукатурке, по устройству кирпичных перегородок и оштукатуриванию вентиляционных и технологических ниш под ГВС и ХВС, монолитных работ по устройству крылец и подпорной стены вдоль корпуса А (далее по тексту - «Работы»), определенный в Приложении № 1 к Договору, на объекте: «На базе государственного учреждения Тульской области «Красивский дом для пожилых «Забота» (далее по тексту - «Объект»), расположенного по адресу: Тульская область, Чернский район, МО Липецкое, д. Красивка, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на предусмотренных Договором условиях. Договорная цена работ является твердой, и, в соответствии с Приложением № 1 к Договору, составляет 7 315 991 (Семь миллионов триста пятнадцать тысяч девятьсот девяносто один) рубль 00 копеек, в том числе, НДС 20% - 1 219 331 (Один миллион двести девятнадцать тысяч триста тридцать один) рубль 83 копейки. Заказчик, в течение 10 (Десяти) рабочих дней после подписания Договора, оплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере 2 926 396 (Два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч триста девяносто шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% - 487 732 (Четыреста восемьдесят семь тысяч семьсот тридцать два) рубля 73 копейки, что составляет 40 % (Сорок процентов) от Договорной цены, указанной в п. 3.1 Договора, после предоставления Заказчику счета на оплату аванса. За нарушение (начальных, промежуточных, конечных) сроков производства Работ/этапов Работ, предусмотренных п. 5.1 Договора, а также Приложением № 3 к Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от Договорной цены Работ за каждый день просрочки. За задержку сроков устранения недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком Работах (в том числе, в гарантийный период), указанных в Акте обнаружения недостатков, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от Договорной цены Работ за каждый день просрочки. За несвоевременный возврат суммы неотработанного (непогашенного) авансового платежа Подрядчик выплачивает штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы неотработанного (непогашенного) аванса, за каждый календарный день просрочки до даты фактического исполнения обязательств.

Истец перечислил ответчику в счет оплаты выполненных работ денежные средства в размере 1 806 716 руб. 40 коп., что подтверждается платежными поручениями № 869 от 29.11.2022 г., № 826 от 11.11.2022 г., № 811 от 09.11.2022.

01.12.2022 г. между Акционерным обществом финансовая группа "Эверест" /Заказчик/ и обществом с ограниченной ответственностью "Пирамида" /Подрядчик/ заключен договор подряда № 89-12-АС-0001, согласно п.п. 2.1, 3.1, 5.1, 12.2, 12.21 которого Подрядчик обязуется, в соответствии с Приложением № 1, в установленный Договором срок, выполнить по заданию Заказчика, своими и/или привлеченными силами, из собственных материалов (за исключением материалов и оборудования, обеспечение которыми возложено по Договору на Заказчика) комплекс работ по монтажу внутренних систем водопровода и канализации (без оконечных устройств) (далее по тексту - «Работы»), определенный в Приложении № 1 к Договору, на объекте: «На базе государственного учреждения Тульской области «Красивский дом для пожилых «Забота» (далее по тексту - «Объект»), расположенного по адресу: Тульская область, Чернский район, МО Липецкое, д. Красивка, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на предусмотренных Договором условиях. Договорная цена работ является твердой, и, в соответствии с Приложением № 1 к Договору, составляет 7 551 423 (Семь миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста двадцать три) рубля 91 копейка, в том числе, НДС 20 % - 1 258 570 (Один миллион двести пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей 65 копеек. Подрядчик обязан выполнить Работы в следующие сроки: Начало Работ -«01» декабря 2022 г. Окончание работ - «28» февраля 2023 г. За нарушение (начальных, промежуточных, конечных) сроков производства Работ/этапов Работ, предусмотренных п. 5.1 Договора, а также Приложением № 3 к Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых процента) от Договорной цены Работ за каждый день просрочки. За несвоевременный возврат суммы неотработанного (непогашенного) авансового платежа Подрядчик выплачивает штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы неотработанного (непогашенного) аванса, за каждый календарный день просрочки до даты фактического исполнения обязательств.

11.12.2022 г. стороны подписали дополнительное соглашение к договору, согласно которому Подрядчик обязуется, по заданию Заказчика, в соответствии с рабочей документацией и Приложением № 1 к Соглашению, своими или привлеченными силами, из собственных материалов, выполнить комплекс работ по монтажу внутренней системы водопровода и канализации (без оконечных устройств) (далее - «Работы»), на объекте «Строительство корпуса на базе ГУ Тульской области «Красивский дом для пожилых «Забота», расположенного по адресу: Тульская область, Чернский район, МО Липицкое, д. Красивка, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его на предусмотренных Договором условиях. Стоимость Работ, в соответствии с Приложением № 1 к Соглашению, составляет 13 059 760 (Тринадцать миллионов пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 45 копеек, в том числе, НДС 20% - 2 176 626 (Два миллиона сто семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 74 копейки. Окончательная стоимость Работ по Соглашению определяется из фактически выполненного объема Работ, в соответствии с Актами по форме КС-2 и справками по форме КС-3, согласованными обеими Сторонами. Заказчик оплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере 5 876 892 (Пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто два) рубля 20 копеек, в том числе, НДС 20% - 979 482 (Девятьсот семьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят два) рубля 03 копейки, что составляет 45 % (Сорок пять процентов) от стоимости Работ по Соглашению, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Соглашения и предоставления Подрядчиком счета на аванс.

Истец перечислил ответчику в счет оплаты выполненных работ денежные средства в размере 7 387 176 руб. 98 коп., что подтверждается платежными поручениями № 869 от 29.11.2022 г., № 826 от 11.11.2022 г., № 811 от 09.11.2022, № 136 от 22.02.2023 г., № 129 от 22.02.2023 г., № 125 от 21.02.2023 г., № 120 от 17.02.2023 г., № 116 от 16.02.2023 г., № 112 от 15.02.2023 г., № 107 от 14.02.2023 г., № 101 от 13.02.2023 г., № 51 от 26.01.2023 г., № 52 от 26.01.2023 г., № 50 от 25.01.2023 г.

Указывая на то, что ответчик не приступил к выполнению работ, не выполнил работы  на сумму авансов, истец направил в адрес ответчика уведомление № Э/03-Ю-866 от 22.09.2023 г., указав на прекращение договоров, просил вернуть сумму неотработанного аванса. 

Указывая на неисполнение ответчиком обязанности по возврату денежных средств, истец обратился в суд с настоящим исковым заявлением. 

Изучив материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Исходя из положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно п.1, 2 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

Согласно ст.715 ГК РФ заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Из материалов дела следует, что в связи с невыполнением работ заказчик отказался от исполнения договоров, 22.09.2023 г. истец направил в адрес ответчика претензию № Э/03-Ю-866 от 22.09.2023. 

В силу ст. 715 ГК РФ договора между сторонами является прекращенными.

В соответствии с п. 1 Информационного письма ВАС РФ от 11.01.2000г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении» сторона вправе истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его предоставить отпала.   

В соответствии со ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 

Факт перечисления денежных средств ответчику подтвержден материалами дела (платежными поручениями).

Доказательств выполнения работ на сумму перечисленных денежных средств, возврата денежных средств в полном объеме либо представления иного встречного исполнения, ответчиком суду не представлено. 

Возражения по существу спора ответчиком не заявлены, письменный отзыв на иск не направил.

Учитывая, что требования истца основаны на законе, подтверждены материалами дела, доказательств, опровергающих доводы истца, ответчиком не представлено, требования подлежат удовлетворению в полном объеме, в сумме 9 193 893 руб. 38 коп.

Истцом заявлено требование о взыскании договорной неустойки за просрочку выполнения работ.

Согласно ст.ст. 330, 331 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Факт просрочки исполнения договорного обязательства подтверждается материалами дела.

При наличии просрочки исполнения договорного обязательства требование о взыскании неустойки, является обоснованным, соответствует ст. 330 ГК РФ, п. 12.2 Договоров.

По расчету истца сумма неустойки за период с 01.03.2023 по 08.01.2024 составляет в размере 20 503 823,91 рублей. (договор подряда № 89-12-АС-0001 от 01 декабря 2022 года), 10 169 227,49 рублей за период с 01.02.2023 г. по 05.11.2023 г. (Договор подряда № 82-10-AC-0001 от 26.10.2022 г.).

Расчет неустойки ответчиком не оспорен, контррасчет не представлен.

В заявленном размере неустойка подлежит взысканию с ответчика.

Оснований для уменьшения неустойки у суда не имеется, соответствующее ходатайство ответчиком не заявлено, доказательств несоразмерности неустойки последствиям неисполнения обязательства не представлено.

Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за просрочку возврата аванса.

Согласно п. 12.21 договоров за несвоевременный возврат суммы неотработанного (непогашенного) авансового платежа Подрядчик выплачивает штраф в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы неотработанного (непогашенного) аванса, за каждый календарный день просрочки до даты фактического исполнения обязательств.

По расчету истца сумма неустойки составляет 44 323,06 руб. по состоянию на 14.01.20024 г. (договор подряда № 89-12-АС-0001 от 01 декабря 2022 года), 126 470,15 рублей по состоянию на 14.01.2024 г. (Договор подряда № 82-10-AC-0001 от 26.10.2022 г.).

Расчет неустойки ответчиком не оспорен, контррасчет не представлен.

В заявленном истцом размере неустойка подлежит взысканию с ответчика.

Требование о продолжении начисления неустойки является обоснованным, соответствует ст. 330 ГК РФ, подлежит удовлетворению. 

Истцом заявлено требование о взыскании штрафа в размере 330 000 руб.

Из материалов дела следует, что Заказчиком установлены нарушения обязательств по обеспечению правил безопасности строительства (Договор № 82-10-АС-0001), 06.02.2023г., 18.04.2023г., 20.04.2023г.,  выданы соответствующие предписания.  

Претензиями от 27.02.2023г., 26.04.2023г. истец требовал оплаты штрафа за нарушение правил безопасности в размере 330 000 руб. в соответствие с п.п. 1.2, 1.5, 1.8, 1.10, 5.1 раздела 1 Приложения 4 к Договору № 82-10-АС-0001 от 26.10.2022г.

Факт нарушения обязательств подтвержден представленными предписаниями, фотографическими снимками, претензиями, ответчиком не оспорен.

При наличии установленных фактов нарушений требование истца о взыскании штрафа соответствует Разделу 2 Приложения 4 к Договору, является обоснованным.  

Размер штрафа ответчиком не оспорен. В заявленном размере штрафы подлежат взысканию с ответчика.

Оснований для применения ст. 333 ГК РФ у суда не имеется: соответствующее ходатайство ответчиком не заявлено, доказательства чрезмерности неустойки, штрафа последствиям неисполнения обязательства не представлено.

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы истца по оплате госпошлины подлежат взысканию с ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Пирамида" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  Акционерного общества финансовая группа "Эверест"  (ИНН  

<

***>, ОГРН  

<

***>) 9 193 893 руб. 38 коп. долга, 30 673 051 руб. 40 коп. неустойка за нарушение сроков выполнения работ, 170 793 руб. 21 коп неустойка за просрочку возврата аванса, 330 000 руб. штрафы, 200 000 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины.

Продолжить начисление неустойки на сумму задолженности в размере  9 193 893 руб. 38 коп. с 14.01.2024г. до момента фактического исполнения обязательства с применением  ставки 0,1% за каждый день просрочки. 

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме). Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронного  документа, - через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья

И.Ю. Бессонова