Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-420/2023

19 апреля 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  17 апреля 2023 года.

Полный текст решения изготовлен  19 апреля 2023 года.

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Михайлова П.Л.,

 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "СЕВЗАПДОР" (адрес: Россия 191144, Санкт-Петербург, ул. Старорусская д./5/3, ОГРН: 

<

***> );

ответчик: акционерная компания «ИДЖА АСТАЛДИ-ИДЖ ИЧТАШ ВХСД ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (адрес: Россия 196158, Санкт-Петербург, пр. Дунайский д.13, 1, ИНН: 

<

***>);

о взыскании задолженности 

 

при участии

- от истца: ФИО2 доверенность о 15.03.2023,

- от ответчика: не явился (извещен), 

 

установил:

общество с ограниченной ответственностью "СЕВЗАПДОР" (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к АО «ИДЖА АСТАЛДИ-ИДЖ ИЧТАШ ВХСД ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (далее – ответчик) о взыскании задолженности и неустойки: 

1). Договору подряда № WHSD-DR-SC-1254 от 20.09.2016 г. – 7 845 563,55 рублей, из которых 6 900 932,80 рублей основного долга и 944 630,75 рублей неустойки 

2) Договору подряда № WHSD-DR-SC-1291 от 17.10.2016 г. - 693 924,50 рублей основного долга 

3) Договору подряда № WHSD-DR-SC-1327 от 21.11.2016 г. - 34 728,96 рублей основного долга 

4) Договору подряда № WHSD-DR-SC-1419 от 19.05.2017 г. - 6 029 403,22 рублей основного долга 

5) Договору подряда № WHSD-DR-SC-1514 от 22.05.2018 г. - 1 187 374,86 рублей основного долга 

6) Договору подряда № WHSD-DR-SC-1553 от 28.08.2019 г. - 398 415,11 рублей основного долга.

Всего – 16 189 410,20 рублей. 

Истец в заседание явился, исковые требования поддержал в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв не представил, уведомлен надлежащим образом, дело рассмотрено в его отсутствие в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Исследовав материалы дела, заслушав и оценив доводы лиц, участвующих в деле и представленные ими доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 02.02.2021 по делу № А56-81721/2020 ООО «СевЗапДор» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника сроком на 6 месяцев.

Конкурсным управляющим утвержден ФИО3 (ИНН 

<

***>, СНИЛС 

<

***>, регистрационный номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 15033), член НП АУ "ОРИОН" (ИНН 

<

***>, адрес: 191028, 

<

...>, лит. А, пом. 6Н).

Согласно исковому заявлению у Акционерной компании «ИДЖА АСТАЛДИ - ИДЖ ИЧТАШ ВХСД ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» (Филиал Акционерной компании ИДЖА АСТАЛДИ - ИДЖ ИЧТАШ ВХСД ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ в г. Санкт-Петербурге) имеются неисполненные обязательства перед ООО «СевЗапДор», возникшие на основании следующих договоров подряда, заключенных между сторонами:

1.      Договор подряда № WHSD-DR-SC-1254 от 20.09.2016 г.

2.      Договор подряда № WHSD-DR-SC-1291 от 17.10.2016 г.

3.      Договор подряда № WHSD-DR-SC-1327 от 21.11.2016 г.

4.      Договор подряда № WHSD-DR-SC-1419 от 19.05.2017 г.

5.      Договор подряда № WHSD-DR-SC-1514 от 22.05.2018 г. 

6.      Договор подряда № WHSD-DR-SC-1553 от 28.08.2019 г.

а именно:

1. Задолженность по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1254 от 20.09.2016 г.

По Договору подряда № WHSD-DR-SC-1254 от 20.09.2016 г. ООО «СевЗапДор», выступая как субподрядчик, выполнял комплекс работ по установке габионов на опоре IVc-9 на Секции 04 в рамках четвертой очереди строительства ЗСД, во исполнение условий Договора Генподряда без номера от 20.12.2012 года между, заключенного между Ответчиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Истец привлечен к реализации проекта в качестве субподрядчика по договору, заключенному с генеральным подрядчиком, которого привлек ООО «МСС».

Стоимость выполнения работы Истцом была согласована сторонами в пункте 5.1. Договора и формировалась на основании сметы, а также актов КС-2 и КС-3, подписываемых Сторонами ежемесячно. Оплата также происходила ежемесячно с удержанием 5 % гарантийных удержаний.

Истцом были выполнены работы по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1254 от 20.09.2016 г. на общую сумму в 41 480 000,00 рублей, о чем сторонами подписаны акты КС-2, КС-3 от 03.07.2017 г. На сумму в 14 518 000,00 рублей был произведен зачет аванса.

Сумма в размере 2 074 000,00 рублей была удержана в качестве гарантийного удержания. Ответчиком была произведена оплата на сумму в 20 061 067,20 рублей.

Таким образом, Ответчик не выполнил в полном объеме свои обязательства, оставив непогашенной сумму задолженности в размере 4 826 932,80 рублей.

 

Стороны подписали Дополнительное соглашение № 3 от 23.05.2019 г., согласно которому Договор подряда № WHSD-DR-SC-1254 от 20.09.2016 г. действует в части взаиморасчетов до 31.12.2019 года.

Согласно пункту 6.3.2. Договора подряда от 20.09.2016 г., при осуществлении ежемесячных платежей за частично выполненные работы Подрядчик удерживает 5 % от каждой причитающейся Субподрядчику суммы в качестве Гарантийного удержания.

Сумма гарантийного удержания должна быть оплачена Подрядчиком Субподрядчику в течение 1 (одного) месяца с даты выдачи Подрядчиком Субподрядчику Итогового Свидетельства об Исполнении.

Согласно главе 1 Договора подряда от 20.09.2016, Итоговое Свидетельство об Исполнении - акт, выданный Субподрядчику, с указанием даты, в которую Субподрядчик выполнил свои обязательства по Договору. Подрядчик обязуется выдать Итоговое Свидетельство об Исполнении в течение 1 (одного) месяца после истечения Гарантийного Периода.

Гарантийный Период - означает период времени, который начинается со дня подписания Акта о Приемке выполненных Работ Сторонами и заканчивается через 24 (двадцать четыре) месяца с даты выдачи Сертификата о Приемке Подрядчиком и МСС по Договору Генподряда, но не позднее, чем 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Акта о Приемке Выполненных Работ.

Акт о приемке выполненных работ - это акты по форме КС-2 от 03.07.2017 г.

Истец не получал от Ответчика уведомлений о наступлении гарантийного случая в Гарантийный период.

Согласно информации из открытых источников, ЗСД введено в эксплуатацию и используется в настоящий момент. Следовательно, Ответчиком и ООО «МСС» подписан Сертификат о Приемке работ. Данный Сертификат был подписан в 2019 году, следовательно, гарантийный период для Истца истек в 2021 году. Между тем, Ответчик не выдал Истцу Итоговое Свидетельство об Исполнении, не ответив на соответствующую претензию.

Таким образом, сумма гарантийных удержаний в размере 2 074 000,00 рублей также подлежит перечислению Истцу.

Кроме того, на сумму задолженности в размере 4 826 932,80 рублей по неоплаченным работам по КС-2, КС-3 Истец начислил неустойку за просрочку исполнения в соответствии с пунктом 14.1 договора в размере 0,01 % от стоимости Работ, подлежащих оплате, за каждый день просрочки.

В соответствии с пунктом 6.3.1. Подрядчик выплачивает денежные средства Субподрядчику в течение 35 рабочих дней с даты выставления счета (или наступления иного события). Счет был выставлен 03.07.2017 г., 35 рабочих дней с этой даты оканчиваются на 21.08.2017 г., то есть с 22.08.2017 г. начинается просрочка исполнения.

Сумма неустойки за период с 22.08.2017 по 30.12.2022 равна 944 630,75 рублей.

Таким образом, задолженность по данному договору - 6 900 932,80 рублей задолженности и 944 630,75 рублей неустойки, а всего - 7 845 563,55 рублей

2) Задолженность по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1291 от 17.10.2016 г. 

По Договору подряда № WHSD-DR-SC-1291 от 17.10.2016 г. ООО «СевЗапДор», выступая как субподрядчик, выполнял комплекс работ по асфальтированию в рамках четвертой очереди строительства ЗСД, во исполнение условий Договора Генподряда без номера от 20.12.2012 года между, заключенного между Ответчиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Истец привлечен к реализации проекта в качестве субподрядчика по договору, заключенному с генеральным подрядчиком, которого привлек ООО «МСС».

 

Стоимость выполнения работы Истцом была согласована сторонами в пункте 5.1. Договора и формировалась на основании сметы, а также актов КС-2 и КС-3, подписываемых Сторонами ежемесячно. Оплата также происходила ежемесячно с удержанием 5 % гарантийных удержаний.

Истцом были выполнены работы по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1291 от 17.10.2016 г. на общую сумму в 13 878 490,07 рублей, о чем сторонами подписаны акты КС-2, КС-3 № 1 от 03.04.2017 г., № 2 от 03.04.2017 г., № 3 от 03.04.2017 г., № 4 от 13.09.2017 г.

Сумма в размере 693 924,50 рублей была удержана в качестве гарантийного удержания.

Согласно пункту 6.3.2. Договора подряда от 17.10.2016 г., при осуществлении и ежемесячных платежей за частично выполненные работы Подрядчик удерживает 5 % от каждой причитающейся Субподрядчику суммы в качестве Гарантийного удержания.

Сумма Гарантийного Удержания должна быть оплачена Подрядчиком Субподрядчику в течение 1 (одного) месяца с даты выдачи Подрядчиком Субподрядчику Итогового Свидетельства об Исполнении.

Согласно главе 1 Договора подряда от 17.10.2016, Итоговое Свидетельство об Исполнении - акт, выданный Субподрядчику, с указанием даты, в которую Субподрядчик выполнил свои обязательства по Договору. Подрядчик обязуется выдать Итоговое Свидетельство об Исполнении в течение 1 (одного) месяца после истечения Гарантийного Периода.

Гарантийный Период - означает период времени, который начинается со дня подписания Акта о Приемке выполненных Работ Сторонами и заканчивается через 24 (двадцать четыре) месяца с даты выдачи Сертификата о Приемке Подрядчиком и МСС по Договору Генподряда, но не позднее, чем 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Акта о Приемке Выполненных Работ.

Акт о приемке выполненных работ - это акты по форме КС-2 от КС-2, КС-3 № 1 от 03.04.2017 г., № 2 от 03.04.2017 г., № 3 от 03.04.2017 г., № 4 от 13.09.2017 г.

Истец не получал от Ответчика уведомлений о наступлении гарантийного случая в Гарантийный период.

Согласно информации из открытых источников, ЗСД введено в эксплуатацию и используется в настоящий момент. Следовательно, Ответчиком и ООО «МСС» подписан Сертификат о Приемке работ. Данный Сертификат был подписан в 2019 году, следовательно, гарантийный период для Истца истек в 2021 году. Между тем, Ответчик не выдал Истцу Итоговое Свидетельство об Исполнении, не ответив на соответствующую претензию.

В связи с этим сумма гарантийных удержаний в размере 693 924,50 рублей подлежит перечислению Истцу.

Всего задолженность по данному договору - 693 924,50 рублей

3) Задолженность по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1327 от 21.11.2016 г.

По Договору подряда № WHSD-DR-SC-1327 от 21.11.2016 г. ООО «СевЗапДор», выступая как субподрядчик, выполнял комплекс работ по установке габионов на опоре IVc-9 на Секции 04 в рамках четвертой очереди строительства ЗСД, во исполнение условий Договора Генподряда без номера от 20.12.2012 года между, заключенного между Ответчиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Истец привлечен к реализации проекта в качестве субподрядчика по договору, заключенному с генеральным подрядчиком, которого привлек ООО «МСС».

Стоимость выполнения работы Истцом была согласована сторонами в пункте 5.1. Договора и формировалась на основании сметы, а также актов КС-2 и КС-3, подписываемых Сторонами ежемесячно. Оплата также происходила ежемесячно с удержанием 5 % гарантийных удержаний.

 

Истцом были выполнены работы по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1327 от 21.11.2016 г. на общую сумму в 694 579,20 рублей, о чем сторонами подписаны акты КС-2, КС-3 от 12.02.2018 г. Сумма в размере 34 728,96 рублей была удержана в качестве гарантийного удержания.

Согласно пункту 6.3.2. Договора подряда от 21.11.2016 г., при осуществлении ежемесячных платежей за частично выполненные работы Подрядчик удерживает 5 % от каждой причитающейся Субподрядчику суммы в качестве Гарантийного удержания.

Сумма Гарантийного Удержания должна быть оплачена Подрядчиком Субподрядчику в течение 1 (одного) месяца с даты выдачи Подрядчиком Субподрядчику Итогового Свидетельства об Исполнении.

Согласно главе 1 Договора подряда от 21.11.2016, Итоговое Свидетельство об Исполнении - акт, выданный Субподрядчику, с указанием даты, в которую Субподрядчик выполнил свои обязательства по Договору. Подрядчик обязуется выдать Итоговое Свидетельство об Исполнении в течение 1 (одного) месяца после истечения Гарантийного Периода.

Гарантийный Период - означает период времени, который начинается со дня подписания Акта о Приемке выполненных Работ Сторонами и заканчивается через 24 (двадцать четыре) месяца с даты выдачи Сертификата о Приемке Подрядчиком и МСС по Договору Генподряда, но не позднее, чем 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Акта о Приемке Выполненных Работ.

Акт о приемке выполненных работ это акты по форме КС-2 от 12.02.2018 г.

Истец не получал от Ответчика уведомлений о наступлении гарантийного случая в Гарантийный период.

Согласно информации из открытых источников, ЗСД введено в эксплуатацию и используется в настоящий момент. Следовательно, Ответчиком и ООО «МСС» подписан Сертификат о Приемке работ. Данный Сертификат был подписан в 2019 году, следовательно, гарантийный период для Истца истек в 2021 году. Между тем, Ответчик не выдал Истцу Итоговое Свидетельство об Исполнении, не ответив на соответствующую претензию.

Таким образом, сумма гарантийных удержаний в размере 34 728,96 рублей также подлежит перечислению Истцу.

Всего задолженность по данному договору составляет 34 728,96 рублей.

4)      Задолженность по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1419 от 19.05.2017 г.

По Договору подряда № WHSD-DR-SC-1419 от 19.05.2017 г. ООО «СевЗапДор», выступая как субподрядчик, выполнял комплекс работ по благоустройству на Секциях 06 и 07, а также проводил дорожные и земляные работы в рамках пятой очереди строительства ЗСД, во исполнение условий Договора Генподряда без номера от 20.12.2012 года между, заключенного между Ответчиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Истец привлечен к реализации проекта в качестве субподрядчика по договору, заключенному с генеральным подрядчиком, которого привлек ООО «МСС».

Стоимость выполнения работы Истцом была согласована сторонами в пункте 5.1. Договора и формировалась на основании сметы, а также актов КС-2 и КС-3, подписываемых Сторонами ежемесячно. Оплата также происходила ежемесячно с удержанием 5 % гарантийных удержаний.

Истцом были выполнены следующие работы по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1419 от 19.05.2017г. на общую сумму в 120 588 064,23 рублей, о чем сторонами подписаны акты КС-2, КС-3 № 1от 15.01.2018, № 2 от 14.06.2018 г. и № 3 от 14.06.2018.

Сумма в размере 6 029 403,22 рублей была удержана в качестве гарантийного удержания (по всем актам КС).

Согласно пункту 6.3.2. Договора подряда от 19.05.2017 г., при осуществлении ежемесячных платежей за частично выполненные работы Подрядчик удерживает 5 % от каждой причитающейся Субподрядчику суммы в качестве Гарантийного удержания.

Сумма Гарантийного Удержания должна быть оплачена Подрядчиком Субподрядчику в течение 1 (одного) месяца с даты выдачи Подрядчиком Субподрядчику Итогового Свидетельства об Исполнении.

Согласно главе 1 Договора подряда от 19.05.2017, Итоговое Свидетельство об Исполнении - акт, выданный Субподрядчику, с указанием даты, в которую Субподрядчик выполнил свои обязательства по Договору. Подрядчик обязуется выдать Итоговое Свидетельство об Исполнении в течение 1 (одного) месяца после истечения Гарантийного Периода.

Гарантийный Период - означает период времени, который начинается со дня подписания Акта о Приемке выполненных Работ Сторонами и заканчивается через 24 (двадцать четыре) месяца с даты выдачи Сертификата о Приемке Подрядчиком и МСС по Договору Генподряда, но не позднее, чем 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Акта о Приемке Выполненных Работ.

Акт о приемке выполненных работ это акты по форме КС-2 № 1 от 15.01.2018, № 2 от 14.06.2018 и № 3 от 14.06.2018 г.

Истец не получал от Ответчика уведомлений о наступлении гарантийного случая в Гарантийный период.

Согласно информации из открытых источников, ЗСД введено в эксплуатацию и используется в настоящий момент. Следовательно, Ответчиком и ООО «МСС» подписан Сертификат о Приемке работ. Данный Сертификат был подписан в 2019 году, следовательно, гарантийный период для Истца истек в 2021 году. Между тем, Ответчик не выдал Истцу Итоговое Свидетельство об Исполнении, не ответив на соответствующую претензию.

Таким образом, сумма гарантийных удержаний в размере 34 728,96 рублей также подлежит перечислению Истцу.

Всего задолженность по данному договору составляет 34 728,96 рублей.

4)      Задолженность по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1419 от 19.05.2017 г.

По Договору подряда № WHSD-DR-SC-1419 от 19.05.2017 г. ООО «СевЗапДор», выступая как субподрядчик, выполнял комплекс работ по благоустройству на Секциях 06 и 07, а также проводил дорожные и земляные работы в рамках пятой очереди строительства ЗСД, во исполнение условий Договора Генподряда без номера от 20.12.2012 года между, заключенного между Ответчиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Истец привлечен к реализации проекта в качестве субподрядчика по договору, заключенному с генеральным подрядчиком, которого привлек ООО «МСС».

Стоимость выполнения работы Истцом была согласована сторонами в пункте 5.1. Договора и формировалась на основании сметы, а также актов КС-2 и КС-3, подписываемых Сторонами ежемесячно. Оплата также происходила ежемесячно с удержанием 5 % гарантийных удержаний.

Истцом были выполнены следующие работы по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1419 от 19.05.2017 на общую сумму в 120 588 064,23 рублей, о чем сторонами подписаны акты КС-2, КС-3 № 1от 15.01.2018, № 2 от 14.06.2018 г. и № 3 от 14.06.2018.

Сумма в размере 6 029 403,22 рублей была удержана в качестве гарантийного удержания (по всем актам КС).

 

Согласно пункту 6.3.2. Договора подряда от 19.05.2017 г., при осуществлении ежемесячных платежей за частично выполненные работы Подрядчик удерживает 5 % от каждой причитающейся Субподрядчику суммы в качестве Гарантийного удержания.

Сумма Гарантийного Удержания должна быть оплачена Подрядчиком Субподрядчику в течение 1 (одного) месяца с даты выдачи Подрядчиком Субподрядчику Итогового Свидетельства об Исполнении.

Согласно главе 1 Договора подряда от 19.05.2017, Итоговое Свидетельство об Исполнении - акт, выданный Субподрядчику, с указанием даты, в которую Субподрядчик выполнил свои обязательства по Договору. Подрядчик обязуется выдать Итоговое Свидетельство об Исполнении в течение 1 (одного) месяца после истечения Гарантийного Периода.

Гарантийный Период - означает период времени, который начинается со дня подписания Акта о Приемке выполненных Работ Сторонами и заканчивается через 24 (двадцать четыре) месяца с даты выдачи Сертификата о Приемке Подрядчиком и МСС по Договору Генподряда, но не позднее, чем 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Акта о Приемке Выполненных Работ.

Акт о приемке выполненных работ это акты по форме КС-2 № 1 от 15.01.2018, № 2 от 14.06.2018 и № 3 от 14.06.2018 г.

Истец не получал от Ответчика уведомлений о наступлении гарантийного случая в Гарантийный период.

Согласно информации из открытых источников, ЗСД введено в эксплуатацию и используется в настоящий момент. Следовательно, Ответчиком и ООО «МСС» подписан Сертификат о Приемке работ. Данный Сертификат был подписан в 2019 году, следовательно, гарантийный период для Истца истек в 2021 году. Между тем, Ответчик не выдал Истцу Итоговое Свидетельство об Исполнении, не ответив на соответствующую претензию.

В связи с этим сумма гарантийных удержаний в размере 6 029 403,22 рублей подлежит перечислению Истцу.

Всего задолженность по данному договору - 6 029 403,22 рублей.

5) Задолженность по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1514 от 22.05.2018 г.

По Договору подряда № WHSD-DR-SC-1514 от 22.05.2018 г. ООО «СевЗапДор», выступая как субподрядчик, выполнял комплекс работ по благоустройству территории в районе Морского порта (участок от ПК94+90 до ПК99+14 основного хода ЗСД) на Секции 2, в том числе дорожные работы, земляные работы и работы по установке бордюров, в рамках Четвертой очереди строительства ЗСД, во исполнение условий Договора Генподряда без номера от 20.12.2012 года между, заключенного между Ответчиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Истец привлечен к реализации проекта в качестве субподрядчика по договору, заключенному с генеральным подрядчиком, которого привлек ООО «МСС».

Стоимость выполнения работы Истцом была согласована сторонами в пункте 5.1. Договора и формировалась на основании сметы, а также актов КС-2 и КС-3, подписываемых Сторонами ежемесячно. Оплата также происходила ежемесячно с удержанием 5 % гарантийных удержаний.

Истцом были выполнены следующие работы по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1514 от 22.05.2018 г. на общую сумму в 23 747 497,25 рублей, о чем сторонами подписаны акты КС-2, КС-3 № 1 от 29.12.2018, № 2 от 29.12.2018.

Сумма в размере 1 187 374,86 рублей была удержана в качестве гарантийного удержания (по всем актам КС).

Согласно пункту 6.3.2. Договора подряда от 22.05.2018 г., при осуществление ежемесячных платежей за частично выполненные работы Подрядчик удерживает 5 % от каждой причитающейся Субподрядчику суммы в качестве Гарантийного удержания.

Сумма Гарантийного Удержания должна быть оплачена Подрядчиком Субподрядчику в течение 1 (одного) месяца с даты выдачи Подрядчиком Субподрядчику Итогового Свидетельства об Исполнении.

Согласно главе 1 Договора подряда от 22.05.2018, Итоговое Свидетельство об Исполнении - акт, выданный Субподрядчику, с указанием даты, в которую Субподрядчик выполнил свои обязательства по Договору. Подрядчик обязуется выдать Итоговое Свидетельство об Исполнении в течение 1 (одного) месяца после истечения Гарантийного Периода.

Гарантийный Период - означает период времени, который начинается со дня подписания Акта о Приемке выполненных Работ Сторонами и заканчивается через 24 (двадцать четыре) месяца с даты выдачи Сертификата о Приемке Подрядчиком и МСС по Договору Генподряда, но не позднее, чем 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Акта о Приемке Выполненных Работ.

Акт о приемке выполненных работ это акты по форме КС-2 от 29.12.2018 г.

Истец не получал от Ответчика уведомлений о наступлении гарантийного случая в Гарантийный период.

Согласно информации из открытых источников, ЗСД введено в эксплуатацию и используется в настоящий момент. Следовательно, Ответчиком и ООО «МСС» подписан Сертификат о Приемке работ. Данный Сертификат был подписан в 2019 году, следовательно, гарантийный период для Истца истек в 2021 году. Между тем, Ответчик не выдал Истцу Итоговое Свидетельство об Исполнении, не ответив на соответствующую претензию.

В связи с этим сумма гарантийных удержаний в размере 1 187 374,86 рублей подлежит перечислению Истцу.

Всего задолженность по данному договору - 1 187 374,86 рублей.

6) Задолженность по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1553 от 28.08.2019 г.

По Договору подряда № WHSD-DR-SC-1553 от 28.08.2019 г. ООО «СевЗапДор», выступая как субподрядчик, выполнял комплекс работ по переустройству дорожных швов, в рамках строительства ЗСД, во исполнение условий Договора Генподряда без номера от 20.12.2012 года между, заключенного между Ответчиком и Обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль северной столицы» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

Истец привлечен к реализации проекта в качестве субподрядчика по договору, заключенному с генеральным подрядчиком, которого привлек ООО «МСС».

Стоимость выполнения работы Истцом была согласована сторонами в пункте 2.1. Договора и формировалась на основании сметы, а также актов КС-2 и КС-3, подписываемых Сторонами ежемесячно. Оплата также происходила ежемесячно с удержанием 5 % гарантийных удержаний.

Истцом были выполнены следующие работы по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1553 от 28.08.2019 г. на общую сумму в 7 968 302,14 рублей, о чем сторонами подписаны акты КС-2, КС-3 от 30.05.2020.

На сумму в 7 569 887,03 рублей был произведен зачет аванса.

Сумма в размере 398 415,11 рублей была удержана в качестве гарантийного удержания (по всем актам КС).

Согласно пункту 2.7. Договора подряда от 28.08.2019 г., при осуществление ежемесячных платежей за частично выполненные работы Подрядчик удерживает 5 % от каждой причитающейся Субподрядчику суммы в качестве Гарантийного удержания.

Сумма Гарантийного Удержания должна быть оплачена Подрядчиком Субподрядчику в течение 10 дней с даты истечения Гарантийного Периода, который, в соответствии с пунктом 4.2.8 Договора, равен 24 месяцам с даты подписания итогового акта.

Акт о приемке выполненных работ это акты по форме КС-2 от 30.05.2020 г.

 

Истец не получал от Ответчика уведомлений о наступлении гарантийного случая в Гарантийный период.

В связи с этим сумма гарантийных удержаний в размере 398 415,11 рублей также подлежит перечислению Истцу.

Всего задолженность по данному договору составляет 398 415,11 рублей.

09.06.2022 истец направил в адрес ответчика претензионное письмо с требованием уплаты задолженности и процентов. Требования истца оставлены без удовлетворения, что послужило основанием для обращения истца в суд с исковым заявлением.

Суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению частично по следующим основаниям.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Статья 746 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливает обязанность заказчика оплатить выполненные подрядчиком работы в сроки, установленные законом или договором подряда. 

Согласно ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Истец выполнил работы для ответчика, результат выполненных работ ответчиком принят, в связи с чем, у него возникла обязанность по оплате принятого результата работ. 

Гарантийное удержание представляет собой договорное условие о возможности удержания заказчиком части стоимости работ для покрытия возможных расходов, вызванных ненадлежащим выполнением подрядчиком обязательств в отношении качества работ. Поскольку гарантийное удержание законодательством не предусмотрено, то стороны при включении данного условия в договор должны согласовать размер, порядок удержания при оплате работ, а также порядок и срок возврата гарантийного удержания. 

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. При этом суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Ответчик не представил мотивированных возражений и доказательств уплаты задолженности. 

На основании статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение договорных обязательств истец вправе взыскать с ответчика предусмотренную договором неустойку.

Представленный истцом расчет неустойки судом проверен и признан обоснованным частично.

28.03.2022 Постановлением Правительства Российской Федерации №497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" (далее - Постановление №497) введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Из пункта 2 указанного Постановления следует, что оно не применяется в отношении должников, являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в единый реестр проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего постановления. 

Из совокупного содержания положений подпункта 2 пункта 3 статьи 9.1 и абзаца десятого пункта 1 статьи 63 Закона №127-ФЗ следует, что на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, заключающиеся, в том числе в неначислении неустойки и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей. 

Согласно Обзору по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) №2, утвержденному Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.04.2020 (вопрос 10), одним из последствий введения моратория является прекращение начисления неустоек (штрафов и пеней) и иных финансовых санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежных обязательств и обязательных платежей по требованиям, возникшим до введения моратория (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона №127-ФЗ). 

В силу пункта 3 Постановления №497 оно вступило в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев. 

Постановление N 497 опубликовано 01.04.2022, в связи с чем, с этой даты и в течение 6 месяцев, то есть по 01.10.2022, невозможно начисление каких-либо финансовых санкций в отношении лиц, указанных в постановлении. 

Согласно расчету суда сумма неустойки по договору подряда № WHSD-DR-SC-1254 от 20.09.2016 г. за период с 22.08.2017 по 31.03.2022 составит 812 372,79 рубля, с 02.10.2022 по 30.12.2022 – 43442,40 рублей. Всего на сумму 855 815,19 рублей.

Ответчик не представил доказательств оплаты задолженности и неустойки.

В соответствии с ч. 1 ст. 177 АПК РФ (в редакции, вступившей в законную силу с 01.01.2017) решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

 

решил:

Взыскать с Акционерной компании «ИДЖА АСТАЛДИ-ИДЖ ИЧТАШ ВХСД ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ» в пользу общества с ограниченной ответственностью "СЕВЗАПДОР":

- по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1254 от 20.09.2016 г. – 6 900 932,80 рублей основного долга и 855 815,19 рублей неустойки;

- по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1291 от 17.10.2016 г. - 693 924,50 рублей основного долг;

- по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1327 от 21.11.2016 г. - 34 728,96 рублей основного долга;

- по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1419 от 19.05.2017 г. - 6 029 403,22 рублей основного долга;

- по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1514 от 22.05.2018 г. - 1 187 374,86 рублей основного долга;

- по Договору подряда № WHSD-DR-SC-1553 от 28.08.2019 г. - 398 415,11 рублей основного долга.

Взыскать с Акционерной компании «ИДЖА АСТАЛДИ-ИДЖ ИЧТАШ ВХСД ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ»  в пользу общества с ограниченной ответственностью "СЕВЗАПДОР" расходы по уплате государственной пошлины в размере 103 377 рублей.

В удовлетворении оставшейся части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

 

Судья                                                                            Михайлов П.Л.