АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ) 

г. Воронеж Дело № А14-16629/2019  «15» сентября 2020г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Сидоровой О.И.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

Муниципального отдела по культуре и межнациональным вопросам  Администрации Павловского муниципального района Воронежской  области, г. Павловск Воронежской области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью  «Воронежстройреконструкция», г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

об обязании безвозмездно устранить недостатки выполненных работ третьи лица: 

1. казенное предприятие Воронежской области «Единая дирекция  капитального строительства и газификации», г. Воронеж,  

2. бюджетное учреждение Воронежской области «Нормативно-проектный  центр», г. Воронеж.  

Руководствуясь статьями 109, 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью  «Воронежстройреконструкция» безвозмездно в течение 90 (девяноста)  календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу  устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств по  муниципальному контракту от 10.12.2013 года № 13 на выполнение  подрядных работ для муниципальных нужд по строительству объекта  «Корректировка. Дворец культуры в г. Павловске Воронежской области»  по адресу: 

<

...>  отраженные в акте осмотра от 27.04.2018 № 4:  

1). Оси 5-11, подвал: 

1.1. В помещении № 8 (электрощитовая) выполнить обработку  поверхностей бетонных блоков изнутри помещений составами  проникающего действия с уплотнением пористой структуры бетона  кристаллизующимися новообразованиями (согласно п. 5.1.2, СП  28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от  коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) в соответствии с  разделом 4 локального сметного расчета № 1 (приложение к заключению  судебного эксперта № 234/6-3 от 25.05.2020 года).  

1.2. В помещении № 7 (подсобное помещение) выполнить  обработку поверхностей бетонных блоков изнутри помещений, составами  проникающего действия с уплотнением пористой структуры бетона  кристаллизующимися новообразованиями (согласно п. 5.1.2, СП  28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от  коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) в соответствии с  разделом 5 локального сметного расчета № 1 (приложение к заключению  судебного эксперта № 234/6-3 от 25.05.2020 года).  

1.3. В помещении № 1 (теплопункт № 2) выполнить обработку  поверхностей бетонных блоков изнутри помещений, составами  проникающего действия с уплотнением пористой структуры бетона  кристаллизующимися новообразованиями (согласно п. 5.1.2, СП  28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от  коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) в соответствии с  разделом 6 локального сметного расчета № 1 (приложение к заключению  судебного эксперта № 234/6-3 от 25.05.2020 года).  

1.4. В помещении № 2 (венткамера) выполнить обработку  поверхностей бетонных блоков изнутри помещений, составами  проникающего действия с уплотнением пористой  структуры бетона кристаллизующимися новообразованиями (согласно п.  5.1.2, СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций  от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) в  соответствии с разделом 7 локального сметного расчета № 1 (приложение  к заключению судебного эксперта № 234/6-3 от 25.05.2020 года).  

2). Оси 15-23, подвал: 

2.1. В помещении № 12 (теплопункт № 1) выполнить обработку  поверхностей бетонных блоков изнутри помещений, составами  проникающего действия с уплотнением пористой структуры бетона  кристаллизующимися новообразованиями (согласно п. 5.1.2, СП  28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от  коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) в соответствии с  разделом 3 локального сметного расчета № 1 (приложение к заключению  судебного эксперта № 234/6-3 от 25.05.2020 года).  

2.2. В помещении № 11 (подсобное помещение) выполнить  обработку поверхностей бетонных блоков изнутри помещений, составами  проникающего действия с уплотнением пористой структуры бетона  кристаллизующимися новообразованиями (согласно п. 5.1.2, СП  

28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от  коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) в соответствии с  разделом 2 локального сметного расчета № 1 (приложение к заключению  судебного эксперта № 234/6-3 от 25.05.2020 года).  

3). Оси 20-22, подвал: в помещении № 15 (венткамера) выполнить  обработку поверхностей бетонных блоков изнутри помещений, составами  проникающего действия с уплотнением пористой структуры бетона  кристаллизующимися новообразованиями (согласно п. 5.1.2. СП  28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от  коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) в соответствии с  разделом 1 локального сметного расчета № 1 (приложение к заключению  судебного эксперта № 234/6-3 от 25.05.2020 года), с очисткой внутренней  поверхности стены подвального помещения от штукатурки и их  восстановлением после выполнения работ. Выполнить обработку  поверхности внутренней стены на лестничном спуске в помещение № 15  (венткамера) согласно разделу 1 локального сметного расчета № 1  (приложение к заключению судебного эксперта № 234/6-3 от 25.05.2020  года), с очисткой внутренней поверхности стены подвального помещения  от штукатурки и их восстановлением после выполнения работ.  

Восстановить облицовочную плитку на ступенях спуска в подвал. 

При неисполнении решения суда в течение 90 дней после  вступления решения в законную силу взыскать с общества с ограниченной  ответственностью «Воронежстройреконструкция» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) в пользу муниципального отдела по культуре и  межнациональным вопросам администрации Павловского муниципального  района (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 200 000 руб. судебной  неустойки.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью  «Воронежстройреконструкция» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  в доход федерального бюджета 6 000руб. государственной пошлины.  

Перечислить федеральному бюджетному учреждению  «Воронежский региональный центр судебной экспертизы Министерства  юстиции Российской Федерации» 71 950руб. стоимости проведения  судебной экспертизы из денежных средств, внесенных на депозитный счет  суда обществом с ограниченной ответственностью  «Воронежстройреконструкция» платежным поручением № 319 от  25.12.2019.  

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый Арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через  Арбитражный суд Воронежской области.  

Судья О.И. Сидорова