Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-20832/2020

31 августа 2020 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  28 августа 2020 года.

Полный текст решения изготовлен  31 августа 2020 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Пономаревой О.С.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Общество с ограниченной ответственностью «Блочные котельные технологии» (ОГРН: 

<

***>)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «СК «Северо-Запад» (ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 

при участии

- от истца: ФИО2 по доверенности от 09.01.2020;

- от ответчика: ФИО3 по доверенности от 18.02.2019.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Блочные котельные технологии» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «СК «Северо-Запад» (далее – ответчик) 9.146.615 руб. 16 коп. неосновательного обогащения в размере стоимости работ по устройству мазутной насосной станции на объекте «Склад продовольственных и непродовольственных товаров, расположенный по адресу: Российская Федерация, Мурманская область, МО ГП Кильдинстрой Кольского района, н.п.Зверосовхоз, участок с.х.н. «Основной».

Стороны направили в судебное заседание своих представителей. Истец полностью поддержал исковые требования. Ответчик против удовлетворения иска возражал.

Исследовав и оценив материалы дела, заслушав представителей сторон, суд установил следующие обстоятельства:

12.05.2016 между сторонами заключен договор № 1205-2016/Мрм (далее – Договор), согласно условиям которого истец принял на себя обязательства выполнить:

- проектные работы блочно-модульной котельной (далее – БМК) с фермой и дымовыми трубами (включая предоставление паспорта на БМК и проектирование теплопровода от БМК до склада хранения дизельного топлива);

- проектные работы тарированного откалиброванного склада хранения дизельного топлива;

- монтажные работы БМК с аварийной емкостью 2 м3 с доборными элементами (включая стоимость БМК, доставки и разгрузки БМК со всеми комплектующими и аварийной емкостью 2 м3 с доборными элементами на объекте Заказчика);

- монтажные работы тарированного откалиброванного склада хранения дизельного топлива (включая стоимость склада, его доставку и разгрузку на объекте Заказчика);

- пусконаладочные работы БМК на дизельном топливе и на мазуте (включая сдачу отчета о ПНР в Ростехнадзор и получения разрешения на ввод в эксплуатацию БМК, стоимость дизельного топлива и мазута, необходимого для проведения всего комплекса ПНР и последующего заполнения расходной емкости внутри БМК) на объекте: «Склад продовольственных и непродовольственных товаров, расположенный по адресу: Российская Федерация, Мурманская область, МО Г.П. Кильдинстрой Кольского района, н.п. Зверосовхоз, участок с.х.н. «Основной», в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Соглашению).

Как указывает в исковом заявлении общество с ограниченной ответственностью «Блочные котельные технологии», в ходе выполнения работ по Договору было принято решение по выполнению дополнительных работ, стоимость которых составила 9.146.615 руб. 16 коп.

07.02.2020 истец направил ответчику для подписания акт о приемке выполненных работ формы КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 от 31.12.2017.

Поскольку ответчик направил истцу отказ от подписания вышеуказанных документов, оплату работ не произвел, истец, посчитав свои права нарушенными, обратился в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.  

В соответствии со ст.740 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Статьей 309 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства.

В соответствии с п.1 и 3 ст.709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения; цена работы может быть определена путем составления сметы; в случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

Пунктом 5 статьи 709 ГК РФ определено, что если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика; заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора; в этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы.

В силу ст.743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.

Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.

Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.

При неполучении от заказчика ответа на свое сообщение в течение десяти дней, если законом или договором строительного подряда не предусмотрен для этого иной срок, подрядчик обязан приостановить соответствующие работы с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

Подрядчик, не выполнивший вышеуказанной обязанности лишается права требовать от заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах заказчика, в частности в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению объекта строительства (пункт 4 статьи 743 ГК РФ).

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 10 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда», подрядчик, не сообщивший заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в технической документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда такие работы были включены в акт приемки, подписанный представителем заказчика.

Из положений статей 709, 743 ГК РФ следует, именно на подрядчика возложена обязанность по соблюдению процедуры согласования дополнительных объемов работ.

Таким образом, основанием для оплаты дополнительных работ является их предварительное согласование.

Доказательства согласования с ответчиком выполнения дополнительных работ в материалы дела не представлены. Ответчик факт поручения выполнения истцу спорных работ оспаривал.

Ответчик не является итоговым заказчиком работ по Договору, в связи с чем потребительская ценность в результате работ для общества с ограниченной ответственностью «СК «Северо-Запад» отсутствует.

На основании вышеизложенного в удовлетворении требования о взыскании задолженности надлежит отказать.

Судебные расходы относятся на истца в соответствии со ст.110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

решил:

В иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Пономарева О.С.