АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, 

<

...>; тел./факс 

<

***> / 53-02-05, http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-10675/2025

29 декабря 2025 года

город Омск

 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 16 декабря 2025 года.

Полный текст решения изготовлен 29 декабря 2025 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи Уховой Л.Д., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Савельевым М.В., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Департамента строительства Администрации города Омска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к акционерному обществу «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании задолженности, признании договора расторгнутым; по встречному исковому заявлению акционерного общества «Омскэлектро» к Департаменту строительства Администрации города Омска о взыскании неустойки

При участии в заседании:

от истца - ФИО1 (доверенность от 08.12.2025);

от ответчика - ФИО2 (доверенность от 10.10.2025);

УСТАНОВИЛ:

Иск заявлен Департаментом строительства Администрации города Омска к акционерному обществу «Омскэлектро» о взыскании 2 639 184, 77 руб. неосновательного обогащения, 356 448, 97 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика 2 489 518, 27 руб. неосновательного обогащения, 336 166, 78 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

Акционерное общество «Омскэлектро» обратилось со встречным исковым заявлением к Департаменту строительства Администрации города Омска о взыскании 175 945 руб. 65 коп. неустойки, начисленной за период с 01.10.2024 по 16.10.2024.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме, встречный иск не признал.

Ответчик иск признал в части 2 010 817 руб. 23 коп. неосновательного обогащения, 234 661 руб. 43 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными за период с 19.11.2024 по 09.06.2025. Встречные исковые требования поддержал в полном объеме.

Рассмотрев материалы дела суд установил следующее.

24.09.2021 между департаментом строительства Администрации города Омска (далее - Департамент, Заявитель) и акционерным обществом «Омскэлектро» (далее - Сетевая организация, Общество) был заключен договор № 1040/21 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор № 1040/21), по условиям которого Сетевая организация обязалась осуществить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя - ВРУ (объект: «Строительство детского сада по ул. А. Нейбута в Центральном административном округе г.. Омска», расположенный на земельном участке с кадастровым номером 55:36:090105:3903, местоположение установлено в 90 м восточнее относительно здания по адресу: г. Омск, ЦАО, ул. Арнольда Нейбута, д. 4 (далее - Объект)), а Заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора № 1040/21 (пункты 1-2 договора № 1040/21).

В пункте 4 договора № 1040/21 указано, что технические условия являются неотъемлемой частью договора № 1040/21 и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора №1040/21.

Техническими условиями № ТУ 41040/21 от 06.09.2021 (далее -ТУ 1040/21) предусмотрено, что Сетевая организация (пункт 10 ТУ 1040/21) осуществляет:

- строительство ЛЭП-0,4 кВ соответствующих марки и сечения: от 1 и 2 с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-4194 до границы участка Заявителя, которая является границей балансовой принадлежности энергопринимающих устройств и эксплуатационной ответственности сторон;

- в РУ-0,4 кВ ТП-4194 на 1 и 2 с.ш, установку АВ соответствующего номинала, ошиновать;

- установку средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) - 2 шт.

Пунктом 11 ТУ 1040/21 предусмотрено, что Заявитель осуществляет:

- строительство ЛЭП-0,4 кВ соответствующих марки и сечения от вновь сооружаемых ЛЭП-0,4 кВ (в соответствии с пунктом 10 ТУ 1040/21) до ВРУ объекта;

- на вводе установить приборы, ограничивающие максимальную мощность. Срок действия ТУ 1040/21 составляет 5 лет со дня заключения договора

№ 1040/21 (пункт 12 ТУ 1040/21). В данном случае срок действия ТУ 1040/21 с 24.09.2021 по 24.09.2026.

Таким образом, на момент подачи настоящего иска срок действия ТУ 1040/21 не истек.

Согласно пункту 5 договора № 1040/21 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев со дня заключения договора № 1040/21.

Дополнительным соглашением от 18.08.2022 к договору № 1040/21 срок выполнения поименованных мероприятий продлен до 22.09.2023.

Дополнительным соглашением № 2 от 01.11.2023 к договору № 1040/21 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению продлен до 30.09.2024.

В пункте 6 договора № 1040/21 предусмотрено, что Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнять обязательства по договору № 1040/21, в том числе по выполнению возложенных на Сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, указанные в технических условиях.

Пунктом 10 договора № 1040/21 установлено, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии по Омской области от 24.12.2020 № 567/91 и составляет 4 398 641,28 руб. (в том числе НДС 20 % -733 106,88 руб.).

- Из условий договора № 1040/21 следует, что внесение платы за технологическое присоединение осуществляется Заявителем в следующем порядке (пункт 11 договора № 1042/21):

- 10 % платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора № 1040/21, что составляет 366 553,44 руб., кроме того НДС по ставке 20 % в сумме 73 310,69 руб.

Всего с НДС 439 864,13 руб.;

- 30 % платы за технологическое присоединение вносится в течение 60 дней со дня заключения договора № 1040/21, что составляет 1 099 660,32 руб., кроме того НДС по ставке 20 % в сумме 219 932,06 руб. Всего с НДС 1319 592,38 руб.;

- 20 % платы за технологическое присоединение вносится в течение Л 80 дней со дня заключения договора № 1040/21, что составляет 733 106,88 руб., кроме того НДС по ставке 20 % в сумме 146 621,38 руб. Всего с НДС 879 728,26 руб.;

- 30 % платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня фактического присоединения, что составляет 1 099 660,32 руб., кроме того НДС по ставке 20 % в сумме 219 932,06 руб.

Всего с НДС 1 319 592,38 руб.;

- 10 % платы за технологическое присоединение вносится в течение 10 дней со дня подписания акта о технологическом присоединении, что составляет 366 553,44 руб., кроме того НДС по ставке 20 % в сумме 73 310,69 руб. Всего с НДС 439 864,13 руб.

Датой исполнения обязательства Заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения им денежных средств в кассу или на расчетный счет Сетевой организации (пункт 12 договора № 1040/21).

До наступления этого момента технологического присоединения не существует.

На основании договора № 1040/21 Департаментом на расчетный счет Общества внесены денежные средства на общую сумму 2 639 184,77 руб. (19.10.2021 - 439 864,13 руб., 15.12.2021 – 1 319 592,38 руб., 13.10.2022 - 879 728,26 руб.).

В период действия договора возникли обстоятельства, не предусмотренные договором № 1040/21. Так, в силу обстоятельств, реализация рассматриваемого технологического присоединения объекта оказалось не возможным и явилось, по сути, причиной отказа от возведения объекта строительства.

На основании изложенного, истец просит взыскать с ответчика 2 489 518, 27 руб. неосновательного обогащения (с учетом уточнений).

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьёй 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность сторон доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Оценив представленные доказательства, доводы истца, суд полагает уточненные исковые требования подлежащими частичному удовлетворению.

В силу пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права. и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу пункта 1 статьи 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Согласно пункту 1 статьи 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в ГК (пункт 2 статья 307 ГК РФ).

К обязательствам, возникшим из договора (договорным обязательствам), общие положения об обязательствах (настоящий подраздел) применяются, если иное не предусмотрено правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в ГК и иных законах, а при отсутствии таких специальных правил - общими положениями о договоре (подраздел 2 раздела III) (пункт 1 статья 307.1 ГК РФ).

В соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Федеральный закон № 35-ФЗ), пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства,- заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Федерального закона № 35-ФЗ и пункты 16,17 Правил № 861).

Договор № 1040/21 по всем своим существенным условиям соответствует договору о возмездном оказании услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Необходимо учитывать, что подпункт «г» пункта 7 Правил № 861 устанавливает, что технологическое присоединение энергопринимающего устройства к электрическим сетям может считаться выполненным только после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объекта Заявителя к электрическим сетям и включения коммутационного аппарата.

Как указывалось выше, Департаментом строительства Администрации города Омска по договору оплачено 2 639 184,77 руб.

При этом, в результате исполнения договора сетевой организацией понесены расходы в размере 628 367,54 руб., которые в силу норм действующего законодательства подлежат возмещению истцом ответчику.

Договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 ГК РФ, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Кодекса) (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 06.09.2021 № 305-ЭС21-8682 по делу № А40-32523/2018).

В соответствии с пунктом 1 статьи 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

Следовательно сумма требований не может превышать 2 010 817,23 руб.

В силу пункта 1 статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.

Кроме того, в силу п. 1 ст. 1107 ГК РФ лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

Таким образом, взысканию подлежит 2 010 817,23 руб. предварительной оплаты.

Согласно пункту 2 ст. 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими средствами (статья 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

На основании пункта 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

17.10.2024 в адрес АО «Омскэлектро» поступило уведомление от Департамента строительства Администрации города Омска о расторжении договора, в связи с отсутствием в потребности строительства данного объекта.

Приложением к уведомлению о расторжении договора являлось соглашение о расторжении договора.

Следует отметить, что в пункте 2 соглашения о расторжении договора Истец указал, что АО «Омскэлектро» в течение 30 календарных дней со дня подписания Соглашения производит возврат уплаченной Истцом суммы в размере — 2 639 184,77 руб.

Таким образом, Истец указал срок исполнения обязательства — срок возврата аванса.

В силу статьи 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало (ст. 191 ГК РФ).

Таким образом, предельный срок возврата аванса согласно уведомления о расторжении договора — 16.11.2024г.

16.11.2024 был выходным днем.

Согласно ст. 193 ГК РФ если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Следовательно, предельный срок возврата аванса согласно уведомления о расторжении договора — 18.11.2024г., а проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат начислению с 19.11.2024.

В расчете неверно рассчитаны проценты за 09.06.2025 по ставке 21%, в то время как на 09.06.2025 действовала ключевая ставка 20%.

Таким образом, сумма процентов за пользование чужими денежными средствами, подлежащая взыскания с АО «Омскэлектро», рассчитанная за период с 19.11.2024 по 09.06.2025 на сумму долга в размере 2 010 817,23 руб. составляет 234 661,43 руб.

В соответствии с частью 3 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично.

В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения ими процессуальных действий.

Арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований, признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (часть 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В части 2 статьи 169 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в решении должны быть указаны мотивы его принятия. В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом (абзац третий пункта 3 части 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Таким образом, если признание иска выражает волю ответчика, не противоречит закону и не нарушает права и интересы других лиц, оно принимается судом, а стороны освобождаются от доказывания фактических обстоятельств. В таком случае законодатель ограничил деятельность суда при признании иска ответчиком только проверкой того, соответствует ли это признание закону и не нарушает права других лиц, а также наличия у лица, подписавшего признание иска, соответствующих полномочий, и освободил суд от необходимости обоснования решения, которым иск, признанный ответчиком, удовлетворяется.

Материалы дела свидетельствуют о том, что признание исковых требований совершено от уполномоченного представителя ответчика.

Доказательств того, что признание иска противоречит закону либо нарушает права или законные интересы других лиц, в материалах дела не имеется.

Судом признание иска ответчиком принято.

Акционерное общество «Омскэлектро» обратилось со встречным исковым заявлением к Департаменту строительства Администрации города Омска о взыскании 175 945 руб. 65 коп. неустойки, начисленной за период с 01.10.2024 по 16.10.2024.

Согласно п. 1 Договора № 1040/21, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее - технологическое присоединение) ВРУ в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 180 кВт категория надежности вторая

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 0 кВт

Исходя из содержания п. 2 Договора, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта — «Строительство детского сада по ул. А. Нейбута в Центральном административном округе г. Омска», расположенное на земельном участке в кадастровым номером: 55:36:090105:3903, местоположение установлено в 90 м восточнее относительно здания по адресу: г.Омск, ЦАО, ул. Арнольда Нейбута, 4.

Пункты 4 и 5 Договора указывают, на тот факт, что технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора (с 06.09.2021 по 05.09.2026. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев дней со дня заключения настоящего договора.

Дополнительным соглашение от 30.09.2022 к договору срок действия выполнения мероприятий по технологическому присоединению был продлен до 22.09.2023, дополнительным соглашением № 2 от 01.11.2023 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению был продлен до 30.09.2024.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением Региональной энергетической комиссии по Омской области от 24.12.2020 № 567/91 составляет 4 398 641,28 руб. в том числе НДС 733 106,88 руб.

Уведомлений о выполнении мероприятий со стороны заявителя не поступало.

17.10.2024 в адрес АО «Омскэлектро» поступило уведомление о расторжении договора технологического присоединения.

С учетом положений п. 17 Договора (определяющего, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящем абзаце порядке за год просрочки) содержание Претензии указывало на необходимость оплаты предусмотренной Договором неустойки.

На основании изложенного АО «Омскэлектро», просит взыскать с Департамента строительства Администрации города Омска договорную неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению рассчитанную с 01.10.2024 по 16.10.2024 в размере 175 945,65 руб.

Встречные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон № 35-ФЗ), пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Таким образом, деятельность по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации в силу прямого указания закона является деятельностью по реализации мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона № 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил № 861).

В силу статей 8, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства возникают из договоров, сделок и из иных оснований, указанных в Гражданском кодексе Российской Федерации. В силу возникшего обязательства кредитор вправе требовать от должника исполнения его обязанности.

По правилам статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Нормы, изложенные в Правилах № 861, являются обязательными для применения всеми субъектами, заключающими договор об осуществлении технологического присоединения (статья 422 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно п. 17 Договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящем абзаце порядке за год просрочки.

Ввиду включения законодателем в условия Договора санкции за просрочку срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, АО «Омскэлектро» произвел расчет данной неустойки.

Согласно расчету, сумма договорной неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению рассчитанная с 01.10.2024 по 16.10.2024, составляет 175 945,65 руб.

Расчет неустойки судом проверен, признан обоснованным.

Руководствуясь статьями 49, 104, 110, 123, 156, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Департамента строительства Администрации города Омска удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Департамента строительства Администрации города Омска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2 010 817 руб. 23 коп. неосновательного обогащения, 234 661 руб. 43 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными за период с 19.11.2024 по 09.06.2025.

В остальной части требований отказать.

Встречные требования акционерного общества «Омскэлектро» удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с Департамента строительства Администрации города Омска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 175 945 руб. 65 коп. неустойки, начисленной за период с 01.10.2024 по 16.10.2024, а также 13 797 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

По результату зачета встречных требований взыскать с акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Департамента строительства Администрации города Омска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2 010 817 руб. 23 коп. неосновательного обогащения, 58 715 руб. 78 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, производить дальнейшее начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму долга в размере 2 010 817 руб. 23 коп. с 10.06.2025 по день фактического исполнения решения суда.

Взыскать с Департамента строительства Администрации города Омска (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу акционерного общества «Омскэлектро» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 13 797 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в этот же срок путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Информация о движении дела может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья Л.Д.Ухова