И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А40-88659/20-151-669

23 ноября 2020 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена 29 сентября 2020 года 

Решение в полном объеме изготовлено 23 ноября 2020 года

Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В. 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании дело 

по исковому заявлению АО «ГУОВ» (ОГРН: 

<

***>) 

к ответчику ООО «Мастер текстиль»  (ОГРН: 

<

***>)

о взыскании 834 632,07 рублей 

при участии

от истца: ФИО2 по доверенности от 11.12.2019

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 13.07.2020

У С Т А Н О В И Л:

АО «ГУОВ» обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ответчику ООО «Мастер текстиль»  о взыскании неустойки и процентов за пользование коммерческим кредитом в сумме 834 632, 07 руб. 

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу. 

Представитель истца настаивал на удовлетворении заявленных требований, представитель ответчика против удовлетворения заявленных требований возразил по доводам, изложенным в отзыве. 

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы истца и ответчика, суд пришел к следующим выводам.  

АО «ГУОВ» (Генподрядчик) и ООО «Мастер текстиль»  (Подрядчик) 10.08.2018 заключили договор № 2018/2-3285 на выполнение работ по ремонту зданий и сооружений военных городков Министерства обороны и иных фондов, используемых в интересах Министерства обороны (шифр объекта ЗВО/ТУФКП-2018-6, ЗВО/ТУФКП-2018-10, ЗВО/ТУФКП-2018-11 – далее договор). Договором предусмотрена стоимость – 9 140 000, 00 руб. и сроки выполнения работ – 01.05.2019 (п. 3.1 и 5.1 договора). Дополнительным соглашением №4 от 17.05.2019 цена работ увеличена до 17 453 926, 78 руб. 

Истец указывает, что в предусмотренный договором срок ответчик работы не выполнил. 

В случае нарушения подрядчиком сроков окончания работ, подрядчик уплачивает генподрядчику неустойку в размере: - за первые 90 дней просрочки – 0.05% от цены договора за каждый день просрочки до даты фактического завершения выполнения работ (п. 15.4.1 договора); - начиная с 91 дня просрочки, пени начисляются в размере 0.1% от цены договора за каждый день просрочки до даты фактического завершения выполнения работ (п. 15.4.2 договора).

Истцом рассчитана неустойка: 

-  по объекту ЗВО/ТУФКП-2018-6 за период с 01.05.2019 по 28.06.2019 в размере 261 830, 00 руб. 

- по объекту ЗВО/ТУФКП-2018-10 за период с 17.05.2019 по 26.07.2019 в размере 213 000, 00 руб.

Итого 474 830, 00 руб. 

В случае нарушения подрядчиком сроков, установленных п. 5.1 договора более чем на 5 рабочих дней, он лишается права на экономическое стимулирование (бесплатное пользование авансом) и к авансу (или к его соответствующей части) применяются правила статьи 823 ГК РФ о коммерческом кредите. 

Проценты за пользование коммерческим кредитом в виде аванса начисляются начиная со дня, следующего после дня получения аванса по день фактического исполнения обязательств. Плата за пользование коммерческим кредитом устанавливается в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты процентов, от суммы выданного аванса за каждый день пользования авансом, как коммерческим кредитом (п. 4.14 договора). 

Истцом произведен расчет процентов за пользование коммерческим кредитом за период с 09.11.2018 по 28.06.2019 в размере 120 342, 70 руб. по объекту ЗВО/ТУФКП-2018-6 и за период с 09.11.2018 по 26.07.2019 в размере 239 460, 00 руб. по объекту ЗВО/ТУФКП-2018-10.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия. Требования претензии ответчиком не исполнены. 

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд. 

Отказывая в удовлетворении требований, суд принимает во внимание следующее. 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702 ГК РФ).

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ст. 708 ГК РФ).

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса (ст. 709 ГК РФ).

Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства (ст. 716 ГК РФ).

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (ст. 720 ГК РФ).

Возражая против удовлетворения требований ответчик указывает на следующее. 

По объекту под шифром ЗВО/ТУФКП-2018-6 Подрядчик передал, а Генподрядчик принял работы на общую сумму 8 399 684,27 руб., что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 17.07.2019 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 17.07.2019.

Генподрядчик, в соответствии с п. 4.8. Договора по объекту под шифром ЗВО/ТУФКП-2018-6 в качестве авансовых платежей п/п № 77892 от 06.11.2018 перечислил денежные средства на общую сумму 2 022 000 руб. которые были зачтены Подрядчиком в счет оплаты выполненных работ.

17.07.2019 по объекту ЗВО/ТУФКП-2018-6 между Истцом и Ответчиком был подписан Итоговый акт приемки выполненных работ, в п. 2 которых Стороны констатировали, что Подрядчиком в соответствии Договором выполнены все принятые на себя обязательства (за исключением гарантийных).

По объекту под шифром ЗВО/ТУФКП-2018-10 Подрядчик передал, а Генподрядчик принял работы на общую сумму 5 376 097,18 руб., что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 19.08.2019 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 19.08.2019.

Дата начала работ 17.05.2019 была обусловлена тем, что только Генподрядчик, в соответствии с п. 4.8. Договора по объекту под шифром ЗВО/ТУФКП-2018-10 в качестве авансовых платежей п/п № 77893 от 06.11.2018 перечислил денежные средства на общую сумму 3 600 000 руб. которые были зачтены Подрядчиком в счет оплаты выполненных работ.

19.08.2019 по объекту ЗВО/ТУФКП-2018-10 между Истцом и Ответчиком был подписан Итоговый акт приемки выполненных работ, в п. 2 которых Стороны констатировали, что Подрядчиком в соответствии Договором выполнены все принятые на себя обязательства (за исключением гарантийных).

По объекту под шифром ЗВО/ТУФКП-2018-11 Подрядчик передал, а Генподрядчик принял работы на общую сумму 1 713926,78 руб., что подтверждается Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 19.08.2019 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 19.08.2019.

Генподрядчик, в соответствии с п. 4.8. Договора по объекту под шифром ЗВО/ТУФКП-2018-11 в качестве авансовых платежей и/и № 64805 от 17.09.2018 перечислил денежные средства на общую сумму 720 ООО руб. которые были зачтены Подрядчиком в счет оплаты выполненных работ.

25.12.2018 по объекту ЗВО/ТУФКП-2018-11 между Истцом и Ответчиком был подписан Итоговый акт приемки выполненных работ, в п. 2 которых Стороны констатировали, что Подрядчиком в соответствии Договором выполнены все принятые на себя обязательства (за исключением гарантийных).

В соответствии с п. 6.3.6. Договора, до начала производства работ Генподрядчик обязан передать Подрядчику в установленном порядке на период выполнения Работ Объект по соответствующему Акту приема-передачи.

Согласно подписанных между Генподрядчиком и Подрядчиком актов входа-допуска на объект, Генподрядчик предоставил нижеуказанные объекты в следующие сроки: 

Шифр объекта

Дата фактического представления объекта

Период выполнения работ, указанный в акте входа-допуска на объект

Срок от даты заключения Договора

ЗВО/ТУФКП-2018-6

20.03.2019

20.03.2019

28.06.2019

222 дня

ЗВО/ТУФКП-2018-10

17.05.2019

17.05.2019

26.07.2019

270 дней

ЗВО/ТУФКП-2018-11

19.09.2018

19.09.2018

30.10.2018

40 дней

Согласно ст. 719 ГК РФ, подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (ст. 328 ГК РФ).

Следовательно, до передачи Генподрядчиком объектов по актам входа-допуска на объект. Подрядчик не мог приступить к выполнению своих обязательств по проведению ремонтных работ.

Учитывая вышеизложенное, нарушения установленного срока выполнения работ, в т.ч., были вызваны несвоевременной передачей Истцом объектов на период выполнения Работ.

Кроме того, согласно п. 6.2.1. Генподрядчик обязан обеспечить финансирование Работ по Договору в соответствии с условиями Договора. В соответствии с п. 6.2.2. Договора Генподрядчик обязан произвести окончательный расчет за выполненные по Договору Работы в установленном настоящим Договором порядке.

Пунктом 4.4. Договора определено, что оплата выполненных Подрядчиком работ производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Генподрядчиком оформленных Подрядчиком Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, оригиналов счета и счета-фактуры.

Способы оплаты выполненных работ определены вп.4.3.и4.17 Договора, которыми предусмотрена оплата как путем перечисления денежных средств с расчетного счета, так и путем взаимозачета в счет оплаты за генподрядные услуги.

Согласно п. 4.6. Договора, окончательный расчет по Договору производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Итогового акта приемки выполненных работ.

По мнению ответчика, со стороны Генподрядчика были допущены нарушения своих обязательств в части своевременной оплаты выполненных работ.

Согласно п. 11.1.1 – 11.1.3 Договора, сдача-приемка выполненных работ за текущий (отчетный) месяц осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2) по каждому объекту, справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Приемка результата выполненных работ осуществляется в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства, а также в соответствии с нормативными требованиями иных документов. Подрядчик представляет Генподрядчику Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в 3 (трех) экземплярах, первичные учетные документы (заверенные копии счетов-фактур на оборудование и материалы, заверенные копии договоров по прочим затратам), оформленные должным образом, с сопроводительным письмом в срок не позднее 25 (двадцать пятого) числа текущего (отчетного) месяца.

Согласно п. 11.1.4. Договора, Генподрядчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их, после чего согласовывает с представителем Государственного заказчика и при отсутствии замечаний подписывает их со своей Стороны или дает мотивированные замечания с перечнем необходимых к устранению Недостатков и сроков их устранения. Пунктом 11.1.6. Договора предусмотрено, что, Генподрядчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и сроков их устранения. Из пункта 11.2. Договора следует, что Генподрядчик приступает к приемке законченного ремонтом Объекта не позднее чем через 10 (десять) дней после получения письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ. Согласно п. 15.4. Договора, в случае нарушения Подрядчиком сроков окончания Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере: 15.4.1.За первые 90 (девяносто) дней просрочки - 0,05% от Цены Договора за каждый день просрочки до даты фактического завершения выполнения Работ. 15.4.2. Начиная с 91 (девяносто первого) дня просрочки, пени начисляются в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки до даты фактического завершения выполнения Работ.

Поскольку п. 3.1. Договора, Цена Договора разбивалась по отдельным объектам, авансовые платежи оплачивались по отдельным объектам, работы Генподрядчик также принимал по отдельным объектам, то и штрафные санкции следует применять (при наличии соответствующих условий) также по отдельным объектам.

Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство. Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (ст. 401 ГК РФ).

Договорами, исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками, может предусматриваться предоставление кредита, в том числе в виде аванса, предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг (коммерческий кредит), если иное не установлено законом (ст. 823 ГК РФ).

Из указанного следует, что истцом также допущены нарушения своих обязательств в рамках договора, в связи с чем, суд признает обоснованными доводы возражений ответчика. 

В силу пункта 3 статьи 405 ГК РФ должник не считается просрочившим, пока обязательство не может быть исполнено вследствие просрочки кредитора.

Согласно правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.03.2011 N 14344/10, пунктом 3 статьи 405 ГК РФ должник освобожден от ответственности перед кредитором за нарушение срока исполнения обязательства только в случае, если должник по зависящим не от него, а от кредитора причинам не может исполнить обязательство в срок.

Доказательств своевременного и надлежащего исполнения своих обязательств, предусмотренных контрактом, в нарушении ст. 65 АПК РФ в материалы дела истцом не представлено. 

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, отказывает в удовлетворении заявленных требований. 

Расходы по госпошлине распределены на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 10, 309, 310, 330, 401, 405, 702, 708, 716, 717, 747, 823 ГК РФ, статьями 167-171 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья             К.В. Вольская