АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 

г. Томск Дело № А67- 1460/2024 29.03.2024 г. 

Арбитражный суд Томской области в составе судьи Соколова Д. А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению областного  государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог Томской  области» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной  ответственностью «ТрансПроект» (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>) о взыскании  2 073 507,51 руб.,  

при участии в заседании: от истца – без участия; от ответчика – без участия; 

У С Т А Н О В И Л:

Областное государственное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог  Томской области» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной  ответственностью «ТрансПроект» о взыскании в доход бюджета Томской области неустойки  по государственному контракту № 3-с20 от 27.11.2019 в размере 2 073 507,51 руб., в том  числе: штраф в размере 5000 руб. за неисполнение контракта и 2 068 507,51 руб. пени за  просрочку исполнения контракта.  

 Ко дню судебного заседания поступили пояснения ответчика, в которых ответчик  отзывает все свои предыдущие возражения и просит применить ст. 333 ГК РФ; считает  соразмерным неустойку в размере 285 000 руб.  

 Изучив материалы дела, суд считает требования истца подлежащими удовлетворению  частично.  

 Между областным государственным казенным учреждением «Управление  автомобильных дорог Томской области» (далее – ОГКУ «Томскавтодор», Заказчик, истец),  и обществом с ограниченной ответственностью «ТрансПроект» (далее – ООО  «ТрансПроект», Подрядчик) заключен 27.11.2019 государственный контракт № 3-с20,  согласно которому подрядчик обязуется выполнить работы по инженерным изысканиям и  разработке проектной и рабочей документации на строительство мостового перехода через р.  Ларьеган на км 19+600 автомобильной дороги Александровское-35 км в Александровском  районе Томской области (далее - работы) в соответствии с заданием (приложение 1 к  контракту) и сдать результат работ заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить  выполненные работы в размере и в порядке, которые установлены контрактом.  

Данным договором предусмотрено, что цена, согласно п. 2.1 Контракта, составляет  7 487 810, 00 руб.; сроки начала работ: с даты заключения контракта, сроки завершения  работ: 01.11.2020 (п. 4.1); подрядчик обязан выполнить все работы в объеме и в сроки,  предусмотренные контрактом и приложениями к нему, и сдать результат выполненных работ  Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ (п. 3.4.1); пеня начисляется за каждый  день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом,  начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока  исполнения такого обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой  действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской  Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему  обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за  исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной  порядок начисления пени (п. 6.3.1).  

В нарушение вышеуказанных обязательств, на 23.06.2023 результат работ  подрядчиком не представлен, вследствие чего заказчик принял решение об одностороннем  отказе от исполнения контракта, о чем уведомил ООО «ТрансПроект», направив решение за  исх. № 1672.  

В связи с нарушением сроков выполнения работ истцом исчислена неустойка за  период с 02.11.2020 по 04.07.2023 в размере 2 068 507,51 (975 * 1/300 * 8,5% * 7 487 810,00).  

Расчет неустойки судом проверен и не принят; истцом не обоснованно включен в  период расчета мораторий с 01.04.2022 до 01.10.2022.  

По расчету суда размер неустойки составит 1 461 994,90 руб. 

Ответчик заявил о применении ст. 333 ГК РФ. Суд считает возможным применить ст.  333 ГК РФ и снизить размер неустойки до 285 000 руб.; при этом судом приняты во  внимание последствия нарушения ответчиком обязательств по контракту; учтен баланс  интересов сторон.  

Государственная пошлина по правилам ст. 110 АПК РФ относится на ответчика и  подлежит взысканию в доход федерального бюджета.  

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТрансПроект» (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***>) в пользу областного государственного казенного  учреждения «Управление автомобильных дорог Томской области» (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) неустойку в размере 285 000 руб.  

В остальной части отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТрансПроект» (ИНН  

<

***> ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в размере 27 620 руб.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Томской области.  

Судья Д.А. Соколов