Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

город Пермь        

18.08.2023 года                                                             Дело № А50-22756/22

Резолютивная часть решения объявлена 11.08.2023 года. 

Полный текст решения изготовлен 18.08.2023 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Маркеевой О.Н. ,  при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гричанниковой Е.Г. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению  общества с ограниченной ответственностью «Орсо Констракшн»  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Сатурн-Р» (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) 

о взыскании неустойки  по договору строительного подряда,

 

по встречному исковому заявлению  

общества с ограниченной ответственностью «Сатурн-Р»  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Орсо Констракшн»  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>)

о взыскании задолженности, неустойки по договору подряда 

 

в судебном заседании принимали участие:

от истца по первоначальному иску: ФИО1 ( доверенность  от 05.09.2022, паспорт, диплом) 

от ответчика по первоначальному иску: ФИО2.(доверенность  от 10.01.2022, паспорт, диплом) 

У С Т А Н О В И Л:

общество с ограниченной ответственностью «Орсо Констракшн»  (Общество «Орсо-Констракшн») обратилось в Арбитражный суд Пермского края с исковым заявлением  к  обществу с ограниченной ответственностью «Сатурн-Р»  (общество «Сатурн-Р») о взыскании:

-  задолженности по договору строительного подряда №  ОК-136-2020 от 26.10.2020 в сумме 3 878 419 руб. 20 коп.,  неустойки в размере  за период с 11.08.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 20.04.2023 в сумме 1 714 897 руб. 73 коп. , с продолжением начисления неустойки  на сумму задолженности  по день фактической оплаты долга;  

- задолженности по договору строительного подряда № ОК-111-2020 от 21.09.2020 в сумме 13 884 583 руб. 53 коп., неустойки за период с 11.08.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 20.04.2023 в сумме 7 003 794 руб. 06 коп. с продолжением  начисления неустойки на сумму задолженности по день фактической оплаты долга.

Определением суда от 14.12.2022 в одно производство для совместного рассмотрения  объединены дела  №№ дела № А50-22756/2022, № А50-27926/2022 и № А50-27921/2022, присвоен  делу № А50-22756/2022.

          С учетом уточнения исковых требований увеличенных по состоянию на 11.08.2023, принятых судом в соответствии со тс. 49 АПК РФ).

По встречному исковому заявлению Общество «ОРСО Констракшн» просит взыскать с общества «Сатурн-Р» неустойку за нарушение сроков выполнения работ:

- по договору строительного подряда № ОК-136-2020 от 26.10.2020 в сумме 3 791 712 руб. 62 коп.;

- по договору строительного подряда № ОК-111-2020 от 21.09.2020 в сумме 11 454 770 руб. 74 коп. 

Уточнение исковых требований принято судом в порядке  ст. 49 АПК РФ, возражения приобщены к материалам дела.

Общество «Орсо Констракшн» с исковыми требованиями общества «Сатурн-Р» не согласно по доводам, изложенным в отзыве, считает, что в результате  произведенного зачета, начисленной неустойкой за просрочку выполнения работ,  задолженность за выполненные работы перед обществом «Сатурн – Р» отсутствует.

Общество «Сатурн-Р» с исковыми требованиями общества «Орсо-Констракшн» не согласно по доводам, изложенным в отзыве и дополнительных отзывах, считает, что  неустойка за просрочку выполненных работ согласно условий договора начислена не верно в виду отсутствия согласованных этапов выполнения работ, в связи с чем, может быть начислена только по итогам сдачи всех работ, предусмотренных договорами №ОК-111-2020, № ОК-136-2020.  

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, заслушав участников процесса, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В соответствии со статьей 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

На основании пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (пункт 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику (пункт 8 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда»).

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

Как следует из материалов дела между обществом «Орсо  Констракшн» (Генподрядчик) и обществом «Сатурн-Р» (Субподрядчик) 26.10.2020 заключен Договор строительного субподряда №ОК-136-2020 (Договор №ОУ-136-200), согласно п. 1.1 которого Субподрядчик по заданию  Генподрядчика принимает на себя обязательство своими силами и из своих материалов выполнить работы по устройству каркаса и межэтажной кладки на объекте: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями нежилого назначения и встроено - пристроенной автостоянкой по ул. Теплогорская, 24 в Индустриальном районе г. Перми. Корпус 1», а Генподрядчик обязуется принять результат работ и уплатить предусмотренную настоящим договором цену.

Порядок оплаты работ определен разделом 5 Договора, и согласно п.5.3 Договора Ответчик обязан в срок не позднее 20 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-3 произвести оплату выполненных работ.

Генподрядчиком приняты работы по акту выполненных работ КС-2 №7 от 20.07.2021  на сумму 6 435 358,08 рублей (с учетом гарантийного удержания - 5% - 321 767, 90 руб.), в том числе НДС. Генподрядчиком  произведена частичная оплата, в том числе возврат гарантийного удержания. Задолженность по оплате составляет 3 951 377 рублей 27 копеек.

Работы приняты в полном объеме без замечаний, о чем свидетельствует подписанный акт выполненных работ по форме КС-2 №7 от 20.07.2021  и уплата гарантийного удержания по всему Договору платежным поручением №587 от 26.04.2022.

Обязанность Ответчика оплатить выполненные Истцом работы наступила - 10 августа 2021 года.

Вместе с тем, в нарушение указанных норм Договора, Ответчик частично не оплатил акт выполненных работ по форме КС-2 №7 от 20.07.2021 на сумму 3 951 377  рублей 27 копеек.

Согласно п.9.2. Договора - «При нарушении Генподрядчиком сроков оплаты подрядных работ более чем на 10 рабочих дней, в том числе по выплате гарантийного удержания, Субподрядчик вправе предъявить Генподрядчику требование об уплате пени в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки с учетом предоставленной Субподрядчиком отсрочки», имеет право требовать с неустойку за нарушение сроков подрядных работ, начиная с 11 августа 2021 года по 31 марта 2022 года и с 02 октября 2022 года по 20.04.2022.

В адрес Генподрядчика направлена досудебная претензия, полученная 26.05.2022. 

Претензия не Генподрядчиком не удовлетворена, задолженность не погашена, неустойка не оплачена в связи с чем,  ООО «Сатурн-Р»  обратился настоящим иском в суд. 

Обращаясь со встречными исковыми требованиями Общество «Орсо Констракшн»  указало, что в процессе выполнения работ Ответчиком были допущены существенные нарушения в части сроков выполнения работ, установленных п. 2.1 Договора и приложением № 3 к Договору (Календарный план строительства).

Письмом исх. № 826 от 09.12.2020 Генподрядчик констатировал отставание от утвержденного плана строительства, указал на просрочку по конкретным видам работ (устройство монолитных наружных стен, устройство бетонных полов и др.). В частности, некоторые работы даже не были начаты.

Письмами № 107 от 10.02.2021 г. и № 126 от 15.02.2021  Генподрядчиком были изложены претензии по нарушению сроков выполнения работ, а также представлен расчет неустойки за срыв сроков выполнения работ по состоянию на 28.01.2021.

Письмом № 692 от 13.08.2021  в адрес Субподрядчика  была направлена претензия об уплате неустойки, рассчитанной по состоянию на 21.07.2021.

В ответ на указанную претензию Субподрядчик  письмом исх. № 45 от 27.08.2021 отрицал  как возможность начисления неустойки, так и нарушения сроков выполнения работ с его стороны.

По итогам переписки Генподрядчик направил в адрес Субподрядчика итоговую претензию письмом исх. № 318 от 24.05.2022  о начислении неустойки за нарушение сроков выполнения работ. Сумма неустойки составила 3 791 712,62 рублей.

В ответ на указанную претензию Субподрядчик  письмом исх. № 85 от 20.06.2022 повторно изложил свои доводы относительно возможности начисления неустойки.

Таким образом, Ответчик оставил без удовлетворения требования об уплате неустойки в рамках договора строительного субподрядах» ОК-136-2020 от 26.10.2020, что послужило основанием для обращения Общества «Орсо Констракшн» со встречным иском   в суд. 

Изучив первоначальные и встречные исковые требования, заслушав представителей обществ суд установил следующее.

Согласно п. 1.1 Договора Субподрядчик по заданию Генподрядчика принимает на себя обязательство своими силами и из своих материалов выполнить в установленный настоящим Договором срок работы, предусмотренные Приложением №2 (Структура затрат) на объекте: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями нежилого назначения и встроенно-пристроенной автостоянкой по ул. Теплогорская, 24 в Индустриальном районе г. Перми. Корпус 1», а Генподрядчик обязуется принять результат работ и уплатить предусмотренную настоящим договором цену.

Настоящий договор заключен во исполнение Договора генерального подряда № ОК-018-2019 от 01.04.2020, заключенного между Генподрядчиком и Застройщиком ООО «СЗ «Орсо групп».

Согласно п. 1.2 Договора работы по настоящему договору выполняются в составе и объеме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение №1), Структурой затрат (Приложение № 2).

В соответствии с п. 2.1. Сроки выполнения работ, поручаемых Субподрядчику в соответствии с настоящим договором: начало работ - с 11 ноября 2020 года, окончание срока выполнения полного комплекса работ по настоящему договору - 21 апреля 2021 г.

Сроки выполнения работ по договору согласованы Сторонами в Календарном плане строительства (Приложение №3).

2.2.    Сроки начала и окончания предусмотренных настоящим договором работ согласованы сторонами в Календарном плане строительства. Календарный план строительства определяет также промежуточные сроки выполнения основных периодов работ.

Работы, выполняемые Субподрядчиком, разделяются на периоды, определенные технической документацией и программой проведения проверок органом, осуществляющим государственный строительный надзор, и их сдача-приемка производится по мере их готовности, по утвержденному Календарному плану строительства (копию программы проверок Генподрядчик обязан предоставить Субподрядчику в течение 3-х рабочих дней с момента получения).

Приложением к настоящему договору также является Поэтапный график строительства и финансирования, в соответствии с которым подлежащие выполнению работы разделяются на этапы, продолжительность которых составляет 1 (один) календарный месяц. По каждому этапу указанным Графиком предусматривается планируемое выполнение работ в рублях от цены настоящего договора. Поэтапный график строительства и финансирования не носит обязательного характера, может не подписываться сторонами. В случае отсутствия поэтапного графика строительства и финансирования, настоящий Договор является действующим и его условия подлежат применению.

Сроки, предусмотренные Поэтапным графиком строительства и финансирования, должны соответствовать срокам, установленным Календарным планом строительства. Наименование и перечень работ в Поэтапном графике строительства и финансирования должны соответствовать наименованию статей затрат в Структуре затрат.

В соответствии с п. 15.5 Договора в  случае, если в момент подписания настоящего договора сторонами не оформлены и/или не переданы другой стороне какие-либо из перечисленных приложений, Стороны обязуются их оформить и/или передать в течение двух недель от даты подписания настоящего договора, если иные сроки не установлены настоящим договором для соответствующего приложения. Приложение №4 Поэтапный график строительства и финансирования к настоящему Договору не составляется.

Согласно пункта 3.1. Договора Генподрядчик обязан: 

Совместно с Субподрядчиком оформить Акт строительной готовности строительной площадки для ведения работ Субподрядчиком. В случае необоснованного отказа и/или уклонения Субподрядчика от подписания указанного в настоящем пункте акта Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке (пп. 3.1.2 Договора).

Предоставить Субподрядчику за свой счет точку подключения к электроэнергии, мощностью не менее предусмотренной ПОС, а также обеспечить водоснабжением производство работ. Оплачивать потребленные Субподрядчиком энергоресурсы, водоснабжение за весь период производства работ (пп. 3.1.3 Договора).

Производить оплату работ в порядке, предусмотренном условиями настоящего договора (пп. 3.1.4. Договора).

Согласно пункта 3.2 Договора Субподрядчик обязан:

Подписать Акт строительной готовности строительной площадки для ведения работ Субподрядчиком либо представить письменные замечания к строительной площадке (пп. 3.2.4 Договора).

Выполнить полный объем работ, в объеме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение №1), Структурой затрат (Приложение №2) к настоящему Договору, в соответствии с переданной технической документацией, в том числе в соответствии с переданной в производство работ проектной документацией стадии «Р», а также результатами инженерных изысканий, требованиями градостроительного плана земельного участка, техническими регламентами, сводами правил, национальными стандартами, действующими строительными нормами и правилами (СНиП), а также в соответствии с Календарным планом работ, иными условиями настоящего договора (пп. 3.2.5 Договора).

Согласно п. 4.1 Договора цена работ по настоящему договору составляет 47 275 131 руб. 86 коп., в т.ч. НДС 20% .

В Цену работ включены все затраты Субподрядчика, связанные с выполнением полного комплекса работ по настоящему договору, в том числе, но, не ограничиваясь, непредвиденные расходы Субподрядчика, его затраты на создание временных зданий и сооружений по ПОСу, необходимых для выполнения работ по договору, затраты на все необходимые для строительства материально-технические ресурсы, включая расходы на работы по осуществлению измерений, установленными нормативами для данного Объекта и прочие расходы, которые Субподрядчик произведет во исполнение условий настоящего договора, в том числе все налоги и сборы (п. 4.2 Договора).

Цена договора носит приблизительный характер и указана на основании Структуры затрат (Приложение №2 к настоящему договору) и установлена сторонами на работы и в объемах, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору. Изменение (уменьшение/увеличение) объема и вида выполняемых Субподрядчиком работ по сравнению с тем, который указан в согласованном Сторонами Приложении №2 к договору, влечет изменение (уменьшение/увеличение) Цены работ (п. 4.3. Договора).

В соответствии с п. 5.2 Договора промежуточные платежи за выполненные работы в соответствии с Поэтапным графиком строительства и финансирования осуществляются Генподрядчиком на основании подписанных сторонами и согласованных Техническим заказчиком актов выполненных работ по форме КС-2, справок КС-3, надлежащим образом оформленного счета-фактуры, а также документов, указанных в пп. 1 п. 8.3 настоящего договора, которые предоставляются Субподрядчиком Генподрядчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, в котором соответствующие этапы работ выполнялись.

Поэтапный график строительства и финансирования, при его наличии, носит ориентировочный характер. В случае, если в представленных актах выполненных работ по форме КС-2 за отчетный месяц предъявлено работ на сумму меньше, чем предусмотрено Поэтапным графиком строительства и финансирования, Генподрядчик оплачивает полностью сумму, указанную в представленном акте, независимо от суммы, указанной в Поэтапном графике строительства и финансирования работ.

В случае, если в представленных актах выполненных работ по форме КС-2 за отчетный месяц предъявлено работ на сумму больше, чем запланировано Поэтапным графиком строительства и финансирования для данного этапа работ, Генподрядчик обязан оплатить полностью сумму, указанную в представленном акте выполненных работ по форме КС-2.

Поэтапный график финансирования может быть изменен только в случае изменения Календарного плана строительства.

В случае опережения графика выполнения работ или несущественного отклонения выполнения работ относительно подписанного Календарного плана строительства Стороны не пересматривают подписанные Календарный план строительства и Поэтапный график строительства и финансирования работ, при наличии.

Расчеты за выполненные работы между Генподрядчиком и Субподрядчиком производятся ежемесячно в течение 20-ти календарных дней с момента подписания Генподрядчиком надлежащим образом оформленных акта выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-3. По соглашению Сторон возможна оплата другими способами, не запрещенными законодательством РФ, в том числе, но, не ограничиваясь, векселями, правами требования, недвижимым имуществом и т.д. (п. 5.3. Договора). 

В счет обеспечения надлежащего исполнения Субподрядчиком договорных обязательств Генподрядчик удерживает выплату 5 % Цены работ (п. 4.1) путем ежемесячного удержания 5 % стоимости, указанной в ежемесячных актах выполненных работ по форме КС-2 и справках КС-3. За счет суммы гарантийного удержания удовлетворяются требования Генподрядчика к Субподрядчику в случаях, предусмотренных настоящим договором. Отдельного документа об удержании не составляется (п. 5.4 Договора).

Днем исполнения Генподрядчиком обязательств по оплате считается день поступления денежных средств на коррсчет банка Субподрядчика (п.п. 5.6 Договора).

В соответствии  с п. 5.8 Договора любые суммы, подлежащие уплате Субподрядчиком в пользу Генподрядчика, включая, но не ограничиваясь, убытки, неустойка (штрафы, пени)), расходы на устранение недостатков, наложенные на Генподрядчика по вине Субподрядчика штрафы контрольно-надзорных органов и т.д., могут быть удержаны (зачтены) последним из любых денежных средств, причитающихся Субподрядчику по настоящему договору.

При этом Генподрядчик направляет Субподрядчику требование-претензию об уплате соответствующих сумм, а также уведомление в порядке ст.410 ГК РФ о проведении взаимозачета соответствующей суммы. При таком зачете у Генподрядчика не возникает задолженности по оплате перед Субподрядчиком зачтенной (удержанной) суммы в случае, если Субподрядчик ее не оспаривает.

Срок исполнения обязательств Субподрядчиком по уплате Генподрядчику сумм, предусмотренных абз.1 настоящего пункта и указанных в требовании-претензии, считается наступившим в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента доставки требования-претензии Субподрядчику. Требование-претензия считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Субподрядчику, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или Субподрядчик не ознакомился с ним.

В случае, если Субподрядчиком допущено ненадлежащее исполнение обязательств, за нарушение которых настоящим договором предусмотрена ответственность в виде уплаты неустойки (штраф, пени), Генподрядчик вправе направить Субподрядчику уведомление о начислении и удержании соответствующей суммы.

В соответствии с п. 8.1. Договора сдача и приемка работ по договору осуществляется по окончанию каждого этапа в соответствии с Поэтапным графиком строительства и финансирования. Субподрядчик ежемесячно, не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, в котором соответствующий этап работ выполнялся, представляет сначала Техническому заказчику, а после подписания последним, не позднее 25 числа отчетного месяца - Генеральному подрядчику, подписанные со своей стороны акты КС-2, справки КС-3, а также документы, указанные в п. 8.3 настоящего договора.

На основании документов, указанных в абз.1 настоящего пункта, Генподрядчиком производится сравнение объема и стоимости фактически выполненных работ с объемом и стоимостью планируемых к выполнению работ, указанными в Поэтапных графиках строительства и финансирования.

Скрытые работы подлежат обязательной фиксации Субподрядчиком с привязкой к чертежам (оси, номеолмста, марка чертежей), к актам на скрытые работы прилагаются все необходимые документы (паспорта, сертификаты, исполнительные съемки и т.д.). Субподрядчик вправе продолжать выполнение работ только после приемки Генподрядчиком, Техническим заказчиком, скрытых работ и оформления им соответствующих документов.

По всем видам работ, определенных нормативной и технической документацией Генподрядчик должен производить составление актов скрытых работ или промежуточной приемки и (или) испытаний. Акты готовности скрытых работ, подлежащих закрытию, акты промежуточной приемки выполненных работ составляются в 4 (четырех) экземплярах и подписываются представителями Субподрядчика, Генподрядчика, Технического заказчика.

Представитель Субподрядчика должен известить Генподрядчика посредством телефонной связи и иных, указанных в абз. 2 настоящего пункта лиц, о необходимости проведения промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию, конструкций или систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, не позднее, чем за 4 (четыре) часа до начала проведения этой приемки.

Если в течение срока, указанного в пункте, уведомленный надлежащим образом представители указанных в абз. 2 настоящего пункта лиц не явятся к проведению промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию, конструкций, то Субподрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми. Производство промежуточной приемки/испытаний без участия указанных представителей не освобождает от ответственности с Субподрядчика за качество работ.

Никакие подлежащие закрытию работы не должны закрываться без составления соответствующего акта. Если Представители Генподрядчика, Технического заказчика не были информированы о сдаче скрытых работ и производстве промежуточных испытаний или были информированы с опозданием, то Субподрядчик должен за свой счет открыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

В соответствии с п. 8. 7. Договора в течение 10 (десяти) дней от даты , установленной как окончание срока выполнения полного комплекса работ по настоящему договору, Субподрядчик представляет Генподрядчику подписанные со своей Стороны:

-  последний акт выполненных работ по форме КС-2;

-  справку по форме КС-3;

-  отчет о выполнении работ по договору;

-  реестр передаваемой исполнительной документации;

-  исполнительная документация на результаты выполненных работ в объеме, необходимом для ввода Объекта в эксплуатацию, в том числе акты о проведении испытаний;

- Журнал учета выполненных работ по форме КС-ба, подписанный Субподрядчиком и до представления Генподрядчику - согласованный с Техническим заказчиком.

Согласно п. 8.8. Договора Генподрядчик рассматривает указанные в п. 8.7 документы и в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты их получения подписывает последний акт по форме КС-2 и итоговую справку КС-3 либо направляет мотивированный отказ от их подписания при наличии замечаний к указанным документам, к результату выполненных Субподрядчиком работ, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим договором.

Согласно п. 9.2. Договора при  нарушении Генподрядчиком сроков оплаты подрядных работ более чем на 10 рабочих дней, в том числе  при выплате гарантийного удержания, Субподрядчик вправе предъявить Генподрядчику требование об уплате пени в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки с учетом предоставленной Субподрядчиком отсрочки.

В соответствии  с п. 9.3. Договора при нарушении Субподрядчиком сроков окончания выполнения работ более чем на 30 календарных дней, Генподрядчик вправе предъявить Субподрядчику требование об уплате пени в размере 0,1% от суммы неисполненных работ по договору за каждый день просрочки.

Заслушав мнения сторон о толковании условий договора, а также из буквального толкования условий  договора суд пришел к выводу, что сдача и приемка работ по договору осуществляется по окончанию каждого этапа в соответствии с Поэтапным графиком строительства и финансирования.

Судом установлено, что поэтапный график строительства и финансирования, при его наличии, носит ориентировочный характер, а кроме того, поэтапный график строительства и финансирования к настоящему Договору не составляется.

Таким образом, при рассмотрении доводов о нарушении сроков окончания работ, суд руководствуется  положениями  п. 2.1. Договора,  согласно которого сроки выполнения работ, поручаемых Субподрядчику в соответствии с настоящим договором: начало работ - с 11 ноября 2020 года, окончание срока выполнения полного комплекса работ по настоящему договору - 21 апреля 2021 г.

В соответствии со статьей 329 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов обеспечения обязательств является неустойка.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно статье 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

В силу пункта 60 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств" на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности при просрочке исполнения, законом или договором может быть предусмотрена обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму (неустойку), размер которой может быть установлен в твердой сумме - штраф или в виде периодически начисляемого платежа - пени.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 ГК РФ).

При рассмотрении исковых требований о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты выполненных работ  суд руководствуется положениями  п. 5.3 Договора, согласно которых  Генподрядчик  обязан в срок не позднее 20 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-3 произвести оплату выполненных работ.

В соответствие с частью 1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Согласно п. 9.2. Договора при  нарушении Генподрядчиком сроков оплаты подрядных работ более чем на 10 рабочих дней, в том числе  при выплате гарантийного удержания, Субподрядчик вправе предъявить Генподрядчику требование об уплате пени в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки с учетом предоставленной Субподрядчиком отсрочки.

В соответствии со статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Согласно статье 410 ГК РФ для зачета необходимо и достаточно заявления одной стороны. Для прекращения обязательств заявление о зачете должно быть доставлено соответствующей стороне или считаться доставленным по правилам статьи 165.1 ГК РФ (пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 № 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" – далее постановление от 11.06.2020 № 6).

Пунктом 15 постановления от 11.06.2020 № 6 предусмотрено, что обязательства считаются прекращенными зачетом в размере наименьшего из них не с момента получения заявления о зачете соответствующей стороной, а с момента, в который обязательства стали способными к зачету (статья 410 ГК РФ). Например, если срок исполнения активного и пассивного требований наступил до заявления о зачете, то обязательства считаются прекращенными зачетом с момента наступления срока исполнения обязательства (или возможности досрочного исполнения пассивного обязательства), который наступил позднее, независимо от дня получения заявления о зачете.

Судом установлено, что Генподрядчик направил в адрес Субподрядчика заявление о зачете требований в размере начисленной неустойки за просрок выполнения работ), которое получено Субподрядчиком 07.07.2021.

Проверив расчет исковых требований Общества «Орсо- Констракшн», согласно которого неустойка начислена за просрочку каждого вида работ, суд признает его неверным, противоречащему условиям договора.

Согласно расчету суда исходя из конечного срока выполнения работ по договору  21.04.2021 Субподрядчиком нарушен срок выполнения работ  по представленной в материалы дела КС-6 от 20.05.2021 на сумму 12 901 272 руб. 05 коп.   за период с  22.04.2021 по 20.05.2021 (29 дн.)  размер неустойки  составляет 374 136 руб. 89 коп. 

По представленной КС-7 от 20.07.2021 на сумму 6 435 358 руб. 08 коп. размер неустойки за период с 22.04.2021 по 20.07.2021 (90 дн.) составляет 579 182 руб. 23 коп., но за минусом 5 дней просрочки, подлежащих исключению обусловленных, как не по вине Субподрядчика, в связи погодными условиями), что сторонами не оспаривается (следовательно 85 дн.)  составляет 547 005 руб. 44 коп.   

Таким образом, общий размер неустойки за просрочку выполнения работ по договору составляет 894 142 руб. 33 коп.

Проверив расчеты исковых требований Общества «Сатурн – Р» суд  приходит к следующему выводу. 

Согласно представленной в материалы дела  СК-2, КС-3  от 20.07.2021 задолженность по договору № ОК-136-2020 по состоянию на 10.08.2021 (срок оплаты по договору)  составляла 3 951 377 руб. 20 коп. 

Размер неустойки исходя из 0,1 % на сумму долга за период с 11.08.2021 по 31.03.2022 составляет 920 670 руб. 90 коп.

С учетом произведенного зачета (07.07.2021) в сумме 894 142 руб. 33 коп. (3951 377, 20 – 894 142, 33) задолженность  составляет 3 057 234 руб. 87 коп.

При расчете размера неустойки в период с 01.04.2021 по 01.10.2022 судом учтен период моратория.

Таким образом, неустойка за период с 02.10.2022 по 20.04.2023 подлежит начислению на сумму долга  3 057 234,87  руб. и составляет 614 504 руб. 21 коп.

Общая сумма  неустойки за все периоды просрочки оплаты выполненных работ составляет 1 535 175 руб. 11 коп. (920670, 90 + 614504,21).

Согласно представленного в материалы дела платежного поручения Генподрядчиком 20.04.2023 произведена оплата задолженности в сумме 72 958 руб. 07 коп., в связи с чем,  сумма заложенности Генподрядчика перед Субподрядчиком составляет 2 984 279 руб. 80 коп. (3057 237,87 – 72 958,07) подлежит взысканию в пользу Общества «Сатурн – Р» на которую с 21.04.2023 подлежат начислению проценты исходя из 0,1% за каждый день просрочки до фактической оплаты задолженности.   

Довод Субподрядчика  о том, что должен быть исключен из периода просрочки еще  1 день в связи с отсутствием электроэнергии на строительной площадке, удом не принимается как не подтвержденный материалами дела.    

С учетом произведенного судом расчета неустойки за просрочку выполненных работ и состоявшегося зачета 07.07.2022 в удовлетворении исковых требований Общества «Орсо Констракшн» следует отказать.

Кроме того, между  Обществом «Сатурн-р (Субподрядчик) и Обществом «Орсо Констракшн» (Генподрядчик) заключен договор № № ОК-111-2020 от 21.09.2020 с протоколом разногласий.

Согласно указанного договора Субподрядчик по заданию Генподрядчика принимает на себя обязательство своими силами и из своих материалов выполнить работы по устройству монолитного каркаса, кладочных работ и кровли здания в установленный настоящим Договором срок, предусмотренные Приложением №2 (Структура затрат) на объекте: «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями нежилого назначения и встроенно-пристроенной автостоянкой по ул. Теплогорская, 24 в Индустриальном районе г. Перми. Корпус 4», а Генподрядчик обязуется принять результат работ и уплатить предусмотренную настоящим договором цену.

Согласно п. 4.1.Договора цена работ по договору составляет 99 100 000,00  руб., в т.ч. НДС 20% .

Согласно п. 1.2 Договора работы по настоящему договору выполняются в составе и объеме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение №1), Структурой затрат (Приложение № 2), Календарным планом строительства (Приложение № 3), Поэтапным графиком строительства и финансирования (Приложение№ 4).

В соответствии с п. 2.1. Договора  сроки выполнения работ, поручаемых Субподрядчику -  начало работ - с  21.09.2020 , окончание срока выполнения полного комплекса работ по настоящему договору – 30.04.2021.

Сроки выполнения работ по договору согласованы Сторонами в Календарном плане строительства (Приложение №3).

Сроки начала и окончания предусмотренных настоящим договором работ согласованы сторонами в Календарном плане строительства. Календарный план строительства определяет также промежуточные сроки выполнения основных периодов работ.

Работы, выполняемые Субподрядчиком, разделяются на периоды, определенные технической документацией и программой проведения проверок органом, осуществляющим государственный строительный надзор, и их сдача-приемка производится по мере их готовности, по утвержденному Календарному плану строительства (копию программы проверок Генподрядчик обязан предоставить Субподрядчику в течение 3-х рабочих дней с момента получения).

Приложением к настоящему договору также является Поэтапный график строительства и финансирования, в соответствии с которым подлежащие выполнению работы разделяются на этапы, продолжительность которых составляет 1 (один) календарный месяц. По каждому этапу указанным Графиком предусматривается планируемое выполнение работ в рублях от цены настоящего договора.

Сроки, предусмотренные Поэтапным графиком строительства и финансирования, должны соответствовать срокам, установленным Календарным планом строительства. Наименование и перечень работ в Поэтапном графике строительства и финансирования должны соответствовать наименованию статей затрат в Структуре затрат п. 2.2. Договора).

Доводы Субподрядчика  в отсутствие доказательств предъявления результата работ к приемке в более ранние даты сами по себе сведения актов освидетельствования скрытых работ не имеют доказательственного значения. Извещения ИГСН, реестры исполнительной документации так же не свидетельствуют о готовности Субподрядчика к передаче выполненных работ, так как эти документы не опровергают факт выполнения работ в соответствии с актами выполненных работ по форме № КС-2.

В соответствии с п. 5.2. Договора промежуточные платежи за выполненные работы в соответствии с Поэтапным графиком строительства и финансирования осуществляются Генподрядчиком на основании подписанных сторонами и согласованных Техническим заказчиком актов выполненных работ по форме КС-2, справок КС-3, надлежащим образом оформленного счета-фактуры, а также документов, указанных в пп. 1 п. 8.3 настоящего договора, которые предоставляются Субподрядчиком Генподрядчику не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, в котором соответствующие этапы работ выполнялись.

Поэтапный график строительства и финансирования носит ориентировочный характер. В случае, если в представленных актах выполненных работ по форме КС-2 за отчетный месяц предъявлено работ на сумму меньше, чем предусмотрено Поэтапным графиком строительства и финансирования, Генподрядчик оплачивает полностью сумму, указанную в представленном акте, независимо от суммы, указанной в Поэтапном графике строительства и финансирования работ.

В случае, если в представленных актах выполненных работ по форме КС-2 за отчетный месяц предъявлено работ на сумму больше, чем запланировано Поэтапным графиком строительства и финансирования для данного этапа работ, Генподрядчик обязан оплатить полностью сумму, указанную в представленном акте выполненных работ по форме КС-2.

Согласно п. 5.3. Договора расчеты за выполненные работы между Генподрядчиком и Субподрядчиком производятся ежемесячно в течение 20-ти календарных дней с момента подписания Генподрядчиком надлежащим образом оформленных акта выполненных работ по форме КС-2, справки по форме КС-3. По соглашению Сторон возможна оплата другими способами, не запрещенными законодательством РФ, в том числе, но, не ограничиваясь, векселями, правами требования, недвижимым имуществом и т.д.

В соответствии с п. 5.4. Договора в счет обеспечения надлежащего исполнения Субподрядчиком договорных обязательств Генподрядчик удерживает выплату 5 % Цены работ (п. 4.1) (далее - гарантийное удержание) путем ежемесячного удержания 5 % стоимости, указанной в ежемесячных актах выполненных работ по форме КС-2 и справках КС-3. За счет суммы гарантийного удержания удовлетворяются требования Генподрядчика к Субподрядчику в случаях, предусмотренных настоящим договором. Отдельного документа об удержании не составляется.

Согласно п.5.5. Договора любые суммы, подлежащие уплате Субподрядчиком в пользу Генподрядчика, включая, но не ограничиваясь, убытки, неустойка (штрафы, пени)), расходы на устранение недостатков, наложенные на Генподрядчика по вине Субподрядчика штрафы контрольно-надзорных органов и т.д., могут быть удержаны (зачтены) последним из любых денежных средств, причитающихся Субподрядчику по настоящему договору.

При этом Генподрядчик направляет Субподрядчику требование-претензию об уплате соответствующих сумм, а также уведомление в порядке ст.410 ГК РФ о проведении взаимозачета соответствующей суммы. При таком зачете у Генподрядчика не возникает задолженности по оплате перед Субподрядчиком зачтенной (удержанной) суммы в случае, если Субподрядчик ее не оспаривает.

Согласно п. 5.8. Договора в случае, если Субподрядчиком допущено ненадлежащее исполнение обязательств, за нарушение которых настоящим договором предусмотрена ответственность в виде уплаты неустойки (штраф, пени), Генподрядчик вправе направить Субподрядчику уведомление о начислении и удержании соответствующей суммы.

В соответствии с п. 8.1., Договора  сдача и приемка работ по договору осуществляется по окончанию каждого этапа в соответствии с Поэтапным графиком строительства и финансирования. Субподрядчик ежемесячно, не позднее 20 (Двадцатого) числа месяца, в котором соответствующий этап работ выполнялся, представляет сначала Техническому заказчику, а после подписания последним, не позднее 25 числа отчетного месяца - Генеральному подрядчику, подписанные со своей стороны акты КС-2, справки КС-3, а также документы, указанные в п. 8.3 настоящего договора.

На основании документов, указанных в абз.1 настоящего пункта, Генподрядчиком производится сравнение объема и стоимости фактически выполненных работ с объемом и стоимостью планируемых к выполнению работ, указанными в Поэтапных графиках строительства и финансирования.

В соответствии с п. 8.3. Договора одновременно с актами выполненных работ по форме КС-2 Субподрядчик направляет Генподрядчику:

1) исполнительную документацию в 3-х бумажных экземплярах и в электронном виде в объеме работ, предъявляемых по соответствующим актам. При этом исполнительная документация подлежит обязательному предварительному согласованию:

- с проектной организацией (далее - проектировщик), выполнившей проектную документацию на Объект, в соответствии с которой выполняются работы по настоящему договору. Если в результате отклонения от проектной документации проектировщиком выданы мероприятия по устранению несоответствий, указанные мероприятия выполняются Субподрядчиком за свой счет. Субподрядчик также компенсирует Генподрядчику расходы на оплату работ по внесению соответствующих изменений в проектную документацию;

- с Техническим заказчиком.

2)  счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями пунктов 5, 6 ст. 169 Налогового кодекса РФ.

3) Отчет о расходовании авансовых средств с приложением заверенных Субподрядчиком счетов-фактур ;

4) Журнал учета выполненных работ по форме КС-ба, подписанный Субподрядчиком и до представления Генподрядчику - согласованный с Техническим заказчиком.

5) Отчет об использовании давальческих материалов, акт приемки давальческих материалов

Согласно п. 8.6. Договора скрытые работы подлежат обязательной фиксации Субподрядчиком с привязкой к чертежам (оси, номер листа, марка чертежей), к актам на скрытые работы прилагаются все необходимые документы (паспорта, сертификаты, исполнительные съемки и т.д.). Субподрядчик вправе продолжать выполнение работ только после приемки Генподрядчиком, Техническим заказчиком, скрытых работ и оформления им соответствующих документов.

По всем видам работ, определенных нормативной и технической документацией Генподрядчик должен производить составление актов скрытых работ или промежуточной приемки и (или) испытаний. Акты готовности скрытых работ, подлежащих закрытию, акты промежуточной приемки выполненных работ составляются в 4 (четырех) экземплярах и подписываются представителями Субподрядчика, Генподрядчика, Технического заказчика.

Представитель Субподрядчика должен известить Генподрядчика посредством телефонной связи и иных, указанных в абз. 2 настоящего пункта лиц, о необходимости проведения промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию, конструкций или систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, не позднее, чем за 4 (четыре) часа до начала проведения этой приемки.

Если в течение срока, указанного в пункте, уведомленный надлежащим образом представители указанных в абз. 2 настоящего пункта лиц не явятся к проведению промежуточной приемки работ, подлежащих закрытию, конструкций, то Субподрядчик составляет односторонний акт и считает работы принятыми. Производство промежуточной приемки/испытаний без участия указанных представителей не освобождает от ответственности с Субподрядчика за качество работ.

С соответствии с п. 8.7 Договора в течение 10 (десяти) дней от даты , установленной как окончание срока выполнения полного комплекса работ по настоящему договору, Субподрядчик представляет Генподрядчику подписанные со своей Стороны:

-  последний акт выполненных работ по форме КС-2;

-  справку по форме КС-3;

-  отчет о выполнении работ по договору;

-  реестр передаваемой исполнительной документации;

-  исполнительная документация на результаты выполненных работ в объеме, необходимом для ввода Объекта в эксплуатацию, в том числе акты о проведении испытаний;

-Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а, подписанный Субподрядчиком и до представления Генподрядчику - согласованный с Техническим заказчиком.

В соответствии с п. 9.2. Договора при нарушении Генподрядчиком сроков оплаты подрядных работ более чем на 10 рабочих дней, в том числе по выплате гарантийного удержания, Субподрядчик вправе предъявить Генподрядчику требование об уплате пени в размере 0,1 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки с учетом предоставленной Субподрядчиком отсрочки.

В соответствии с п. 9.3 Договора при нарушении Субподрядчиком сроков окончания выполнения работ более чем на 30 календарных дней, Генподрядчик вправе предъявить Субподрядчику требование об уплате пени в размере 0,1% от суммы неисполненных работ по договору за каждый день просрочки.

Проанализировав условия договора, суд приходит к выводу, что договором не определены необходимые этапы и объемы работ,

Ответственность за нарушение субподрядчиком графика производства каждого вида работ положения договора  не содержат.

Оснований для начисления неустойки  за нарушение промежуточных сроков  выполнения работ не имеется.

Согласно статье 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если приведенные правила не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон.

Исходя из буквального толкования положений договора, суд приходит к выводу, что ответственность ответчика установлена только за нарушение обязательств по всему комплексу выполнению работ.

Проверив расчеты начисления неустойки Генподрядчика и Субподрядчика суд признает их неверными.

Согласно расчету суда  исходя из конечного срока выполнения работ по договору  - 30.04.2021 Субподрядчиком нарушен срок выполнения работ  по представленным в материалы дела:

- КС-7 от  20.05.2021  на сумму 18 453 247 руб. 45 коп.  за период с 01.05.2021 по 20.05.2021 (20 дн.) размер неустойки исходя из 0,1% составляет 369 064 руб. 95 коп.;

- КС-8 от 20.07.2021 на сумму 23 390 656 руб. 18 коп. за период с 01.05.2021 по 20.07.2021 (81дн) размер неустойки исходя из 0,1% составляет  1 894 643 руб. 15 коп.;

- КС-9 от 20.10.2021 на сумму 12 990 909 руб. 95 коп за период с 01.05.2021 по 20.10.2021 (173дн) размер неустойки исходя из 0,1% составляет 2 247 427 руб. 42 коп.;

- КС -10 от 20.11.2021 на сумму 2 007 969 руб. 24 коп. за период с 01.05.2021 по 20.11.2021 (204 дн) размер неустойки исходя из 0,1% составляет 409 625 руб. 72 коп.;

- КС-11 от 20.12.2021 на сумму 4 654 153 руб. 10 коп.  за период с 01.05.2021 по 20.12.2021 (234дн) размер неустойки исходя из 0,1 % составляет 1 089 071 руб.83 коп.

Сторонами не оспаривается невозможность проведения работ в феврале месяце 2021 из-за погодных условий в течение 5 дней, которые подлежат исключению из расчета неустойки за просрочку выполнения работ. Следовательно количество дней просрочки составляет 229 дн. размер неустойки составляет 1 065 801 руб. 06 коп.

Итого сумму неустойки по всем вышеперечисленным КС составляет  5 986 562 руб. 30 коп.

Довод Субподрядчика о том, что в отсутствие проектной  документации по первому и второму этажу не мог выполнять работы судом не принимается так как доказательств  того, что он приостанавливал работы на указанный период суду не представлено. Кроме того, представитель в судебном заседании пояснил, что в этот период выполнял иные работы.

Рассматривая исковые требования Общества «Сатурн-Р» и проверив расчет начисленной неустойки, суд признал его неверным, произвел свой расчет.

Так на сумму долга в размере 16 137 774 руб. 32 коп. за просрочку оплаты выполненных работ подлежит  начислению неустойка за период с 11.08.2021 по 31.03.2022 (с учетом периода моратория) которая составляет 3 760 101 руб. 42 коп.  

Затем принимая во внимание письмо Генподрядчика о зачете обязательств (07.07.2022) из суммы задолженности подлежит  исключить сумму неустойки за просрочку выполнения работ в размере 5 986 562 руб. 30 коп. (16 137 774, 32 – 5 986 562, 30) сумма долга остается 10 151 212 руб. 02 коп. , на которую подлежит начисление неустойки  за период с 02.10.2022 по 20.04.2023.

Судом установлено и сторонами не оспаривается, что согласно представленной в материалы дела платежного поручения № 208 от 21.04.2023 Генподрядчик оплатил Субподрядчику 2 253 190 руб. 79 коп.

Таким образом, размер неустойки за период с 02.10.2022 по 20.04.2023 составляет 2 040 393 руб. 62 коп.

Так общий размер начисленной неустойки за весь  период составляет   5 800 495 руб. 04 коп. (3 760 101 руб. 42 коп.  + 2 040 393 руб. 62 коп.)

Соответственно с учетом частичной оплаты в указанной сумме задолженность Генподрядчика перед Субподрядчиком составляет 7 898 021 руб. 23 коп. (10 151 212, 02 – 2253190,79). 

С учетом изложенного с Общества «Орсо Констракшн» в пользу Общества «Сатурн-Р» подлежит взысканию задолженность по договору№ ОК-111-2020 от 21.09.2020  в сумме 7 898 021 руб. 23 коп., неустойка в сумме 5 800 495 руб. 04 коп.

Соответственно с учетом частичной оплаты в указанной сумме задолженность Генподрядчика перед Субподрядчиком составляет 7 898 021 руб. 23 коп. (10 151 212, 02 – 2253190,79). 

Ходатайства сторон о применении ст. 333 Гражданского кодекса судом рассмотрены и отклонены, так как  установленный договорами  размер неустойки 0,1% является обычно применяемым в гражданском обороте, о чрезмерности санкции также не свидетельствует.

Суд считает, что сумма предъявленной ко взысканию неустойки как со стороны Генподрядчика  так и со стороны Субподрядчика соразмерна последствиям нарушения обязательств, заявление и доказательства несоразмерности предъявленной ко взысканию суммы неустойки последствиям нарушения обязательства в материалах дела отсутствуют и сторонами  не представлены, в связи с чем, оснований для их уменьшения на основании статьи 333 ГК РФ не имеется, неустойка подлежит взысканию в заявленном размере.

В соответствии с разъяснениями, данными в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения работ).

Требования Общества «Сатурн-Р» о продолжении начисления неустойки фактической оплаты  долга подлежат удовлетворению, неустойка подлежит начислению с 21.04.2023 с суммы  задолженности  7 898 021 руб. 23 коп., исходя из 0,1 % за каждый день просрочки по оплате. 

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на Общество «Орсо Констракшн» пропорционально удовлетворенным требованиям.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края 

 

Р Е Ш И Л:

в удовлетворении первоначальных исковых требований отказать.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Орсо Констракшн»  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сатурн-Р»  (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>):

- задолженности по договору строительного подряда № ОК-111-2020 от 21.09.2020 в сумме 7 898 021 руб. 23 коп., неустойку за период с 11.08.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 20.04.2023 в сумме 5 800 495 руб. 04 коп. с продолжением  начисления неустойки на сумму долга с 21.04.2023  исходя из 0,1% за каждый день просрочки исполнения обязательства по день фактической оплаты долга;

- -  задолженности по договору строительного подряда №  ОК-136-2020 от 26.10.2020 в сумме 2 984 279 руб. 80 коп.,  неустойку  за период с 11.08.2021 по 31.03.2022 и с 02.10.2022 по 20.04.2023 в сумме 1 535 175 руб. 11 коп.  с продолжением начисления неустойки на сумму долга исходя с 21.04.2023  из 0,1 %  за каждый день просрочки исполнения обязательства  по день фактической оплаты долга;  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

 

Судья                                                                   О.Н. Маркеева