АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-398/21

08 апреля 2021 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Меленчук И. С.  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску акционерного общества  "Ростовгражданпроект" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к Министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской  области (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

третьи лица Правительство Ростовской области; государственное бюджетное учреждение  Ростовской области "Ростовоблстройзаказчик"  

об обязании, 

по встречному иску Министерства строительства, архитектуры и территориального  развития Ростовской области  

к акционерному обществу "Ростовгражданпроект" о взыскании 26 593 971,69 руб. пени 

 Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить. 

Определить спорные условия дополнительного соглашения № 2 от 14.12.2020 к  государственному контракту № 41/20-ГК от 05.06.2020 «Областная инфекционная  больница г.Ростов-на-Дону», по которым у сторон договора акционерного общества  «Ростовгражданпроект» и Министерства строительства, архитектуры и территориального  развития по Ростовской области возникли разногласия в следующей редакции:  

«1. Пункт 2.1. Контракта изложить в следующей редакции:  

«2.1. Цена Контракта составляет 3 515 088 677 (три миллиарда пятьсот пятнадцать  миллионов восемьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят семь) руб., включая НДС, и  определена в соответствии с приказом Минстроя России от 30.03.2020 № 175/пр.  

2.1.1. Стоимость работ по выполнению инженерных изысканий, подготовке  проектной и рабочей документации по Объекту и получению государственной экспертизы  проектной документации и инженерных изысканий - 85 242 382рублей, включая НДС.  

2.1.2. Стоимость работ по строительству Объекта - 3 429 846 295 рублей, включая  НДС. Расчет цены Контракта произведен в соответствии с Приложением № 3 к  настоящему Контракту (Смета контракта)».  

2. Пункт 10.1. Контракта изложить в следующей редакции:  

«10.1. Подрядчик предоставляет Государственному заказчику на дату заключения  настоящего дополнительного соглашения обеспечение исполнения обязательств по  Контракту в форме: безотзывной банковской гарантии (Государственный заказчик в  качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные  банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской  Федерации (Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к  банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и  исполнения контрактов») в размере обеспечения исполнения Контракта, составляющем 15  процентов от цены Контракта - 527 263 301рублей».  

3. Пункт 11.1. Контракта изложить в следующей редакции:  

«11.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств составляет 0,1% от цены  Контракта - 3 515 088,68рублей (три миллиона пятьсот пятнадцать тысяч восемьдесят  восемь рублей шестьдесят восемь копеек)».  

4. Исключить из сводной сметы к контракту (Приложение № 3 к государственному  контракту № 41/20-ГК от 05.06.2020, Приложение № 2 к дополнительному соглашению №  2 от 14.12.2020) строку: «ВСЕГО с коэффициентом снижения, согласно Приказу  Минэкономразвития России от 02.12.2013 № 567 «Об утверждении Методических  рекомендаций по определению методов определения начальной (максимальной) цены  контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,  исполнителем)» К= 0,9765659625 всего 3 176 609 059руб., в том числе СМР 3 093 364  250руб., ПИР 83 244 809руб.»  

5. Включить в сводную смету к контракту (Приложение № 3 к государственному  контракту № 41/20-ГК от 05.06.2020, Приложение № 2 к дополнительному соглашению №  2 от 14.12.2020) следующие виды затрат: « - погрузка и перевозка грунта на 30 км 46 266  104руб., в том числе НДС; - затраты на размещение грунта 88 116164руб., в том числе  НДС; - затраты, включенные в ЛС № 08-01 на временные здания и сооружения на общую  сумму 10 926 046руб., в том числе НДС; - затраты на производство работ в зимнее время  0,9% - 24 416 922руб., в том числе НДС; - прочие затраты по ССРСС (ЛСР № 09-02) - 2 324  802руб., в том числе НДС; - непредвиденные работы и затраты по ССРСС - 68 670 708  руб., в том числе НДС; - обследование земельного участка, обладающего признаками  культурного наследия - 1 700 000руб., в том числе НДС; - затраты на банковскую  гарантию - 4 945 438руб., в том числе НДС; - затраты на содержание охраны объекта - 1  700 000руб., в том числе НДС; - авторский надзор по ССРСС - 13 186 350руб., в том числе  НДС; ВСЕГО по сводной смете контракта 3 515 088 677руб.»  

6. В Приложении № 4 «График исполнения контракта, включая график выполнения  строительно-монтажных работ» в графе «Срок выполнения этапа (вида работ)» указать:  «октябрь 2020 года - июль 2021 года.  

7. Пункт 3.3. Контракта изложить в следующей редакции:  «3.3. Окончание строительно-монтажных работ не позднее 01.07.2021». 

8. Пункт 12.1. Контракта изложить в следующей редакции:  

«12.1. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой  информационной системе предусмотренного ч. 7 ст. 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ и  подписанного государственным заказчиком. Контракт действует до 31.07.2021г., а в части  взаиморасчетов до полного исполнения обязательств сторонами».  

В удовлетворении встречного иска отказать. 

Взыскать с Министерства строительства, архитектуры и территориального  развития Ростовской области в пользу акционерного общества "Ростовгражданпроект"  6 000 руб. судебных расходов на оплату госпошлины.  

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае  подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном  порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты  принятия решения через суд, принявший решение.  

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном  порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня  вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

 Судья Меленчук И. С. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 28.10.2020 9:33:49

Кому выдана Меленчук Илья Сергеевич