1972/2020-8489(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

16 января 2020 года Дело № А65-20565/2019 

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Хисамовой Г.Р.,  при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А65-20565/2019  

по иску Общества с ограниченной ответственностью "Смежная сетевая компания  "Интеграция" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "КАРСТРОЙ" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании произвести гарантийный ремонт с участием в заседании: 

от истца – представитель ФИО2 по доверенности № 18/09/2019 от 18.09.2019  от ответчика – не явился, извещен  

руководствуясь статьями 108 – 110, 112, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить. 

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "КАРСТРОЙ" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) своими силами и за свой счет в течение 14 (четырнадцати)  календарных дней с момента вступления настоящего решения в законную силу произвести  гарантийный ремонт помещений трансформаторных подстанций ТП-7, РП-3, ТП-25, ЦРП,  расположенных по адресу: 

<

...>, а именно:  

а) в отношении ТП-7 произвести следующие работы: очистка окрасочного слоя  меловой побелки потолков и стен общей площадью 256,98 м2; частичное шпаклевание  отдельных мест до 10 % от обшей площади в количестве 25,7 м2; окраска потолков и стен  пылеотталкивающим и влагонепроницаемым покрытием общей площадью 256,98 м2;  

б) в отношении РП-3 произвести следующие работы: демонтаж металлических  фартуков парапетов в количестве 19 м.п.; демонтаж двух слоев наплавляемой кровли из  рулонных материалов с примыканиями площадью 270 м2; демонтаж металлических  карнизных отливов в количестве 47 м.п.; очистка поверхности парапетов и конструктивного  слоя крыши как оснований под устройство кровли площадью 270 м2; просушка поверхности  основания кровли площадь. 270 м2; устройство новых металлических карнизных отливов в  количестве 47 м.п.; устройство новой наплавляемой кровли из рулонных материалов  площадью 270 м2; монтаж новых металлических фартуков парапетов в количестве 19 м.п.  

в) в отношении ТП-25 произвести следующие работы: очистка окрасочного слоя  меловой побелки потолков и стен площадью 364,18 м2; частичное шпаклевание отдельных  мест до 10% от общей площади в количестве 36,4 м2; грунтовка поверхности потолков и стен  перед покраской площадью 364,18 м2; окраска потолков и стен пылеотталкивающим и  влагонепроницаемым покрытием площадью 364,18 м2;  

г) в отношении ЦРП произвести следующие работы: демонтаж металлических фартуков  парапетов в количестве 26,8 м.п.; демонтаж двух слоев наплавляемой кровли из рулонных  

в количестве 70 м.п.; частичный демонтаж цементно-песчаной стяжки (конструктивного  основания кровельного покрытия) площадью 241,2 м2; устройство цементно-песчаной стяжки  (конструктивного основания кровельного покрытия) при восстановлении уклона крыши)  площадью 241,2 м2; очистка поверхности парапетов и конструктивного слоя крыши как  оснований под устройство кровли площадью 482,4 м2; просушка поверхности основания  кровли площадью 482,4 м2; устройство новых металлических карнизных отливов в количестве  70 м.п.; устройство новой наплавляемой кровли из рулонных материалов площадью 482,4  м2; монтаж новых металлических фартуков парапетов в количестве 26,8 м.п.; восстановление  уклона водосточных желобов в количестве 70 м.п.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "КАРСТРОЙ" 

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с ограниченной  ответственностью "Смежная сетевая компания "Интеграция" (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 6 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины и  

32 000 руб. расходов по оплате судебной экспертизы. 

Выплатить по делу № А65-20565/2019 с депозитного счета Арбитражного суда  Республики Татарстан, согласно выставленному счету № 0/1000-11/19 от 18.11.2019,  денежные средства в сумме 32 000 руб. на соответствующий счет Общества с ограниченной  ответственностью "Центр Судебной Независимой оценки "Эталон" (ИНН 

<

***>) за  проведение судебной экспертизы.  

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его принятия в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путем направления апелляционной жалобы  через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья Г.Р. Хисамова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 11.04.2019 8:37:30Кому выдана Хисамова Гульсина Рашидовна