241/2023-23749(2) 

 

Пятый арбитражный апелляционный суд  ул. Светланская, 115, г. Владивосток, 690001  

http://5aas.arbitr.ru/ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А51-3735/2023

г. Владивосток

21 июня 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 19 июня 2023 года.  

Постановление в полном объеме изготовлено 21 июня 2023 года.  Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего И.С. Чижикова, судей Л.А. Мокроусовой, Д.А. Самофала, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу администрации  Партизанского городского округа,  

апелляционное производство № 05АП-2907/2023 на решение от 07.04.2023 судьи В.В. Овчинникова 

по делу № А51-3735/2023 Арбитражного суда Приморского края  

по иску общества с ограниченной ответственностью «НАРЕК» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

к Администрации Партизанского городского округа (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>)  

о взыскании при участии: 

извещенные надлежащим образом о дате, месте и времени судебного заседания лица,  участвующие в деле, в судебное заседание не явились  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Нарек» (далее – истец, общество)  обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к Администрации  Партизанского городского округа (далее – ответчик, администрация) о взыскании 18 150  рублей 60 копеек неосновательного обогащения (возврат неустойки за нарушение срока  выполнения работ по муниципальному контракту от 20.02.2021).  

Решением Арбитражного суда Приморского края от 07.04.2023 исковые  требования удовлетворены в полном объеме.  

Не согласившись с вынесенным по делу судебным актом, ответчик обжаловал его  в порядке апелляционного производства. В обоснование доводов жалобы апеллянт  обращает внимание, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от  04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но  не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или  ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом» (вместе с  «Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику  

(подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или  ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом») (далее –  Постановление № 783) списанию подлежат именно неуплаченные контрагентом суммы  неустоек. Также считает, что с добровольной уплатой неустойки обязательство по  списанию неустойки прекращается надлежащим исполнением, следовательно,  возможность списания неустойки исключается. Просит решение суда отменить и принять  по делу новый судебный акт.  

В материалы дела в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации (далее – АПК РФ) от истца поступил отзыв на апелляционную  жалобу, по тексту которого указывает на несостоятельность доводов жалобы. Просит  решение суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.  

Стороны, надлежащим образом извещенные в соответствии со статьей 123 АПК  РФ о месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, явку своих представителей в  заседание суда апелляционной инстанции не обеспечили. На основании части 1 статьи  266, части 3 статьи 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие  представителей истца и ответчика.  

Рассмотрев материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, суд  апелляционной инстанции установил следующее.  

Как следует из материалов дела, 12.11.2018 между истцом (подрядчик) и  ответчиком (заказчик) заключен муниципальный контракт №  0120300016721000003_341050, по условиям которого Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства «Ремонт автомобильных дорог по ул.Каменская (от  перекрестка с ул.Анисимова до автобусной остановки «Лесхоз»), ул. Замараева (участок  дороги от перекрестка с ул.Ленинская до ул.Анисимова), ул.Гоголевская (участок дороги  от перекрестка с ул.Кожевенная до перекрестка с ул.Московская)» в сроки,  предусмотренные контрактом, с учетом графика выполнения подрядных работ  (Приложение № 2 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить  выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта.  

Сроки выполнения работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта: начало  работ - 15.03.2021 года; окончание работ - 15.08.2021 года, в соответствии с Графиком  выполнения подрядных работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту).  

Цена Контракта, в соответствии с локальными сметными расчетами (Приложение   № 4 к Контракту), является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта,  включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных  платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по  Контракту, при котором цена Контракта составляет: 46 134 020 рублей 59 копеек (Сорок  шесть миллионов сто тридцать четыре тысячи двадцать рублей пятьдесят девять копеек),  без НДС.  

Выполненные подрядчиком работы приняты заказчиком по Актам о приемке  выполненных работ от 19.05.2021, 06.08.2021, 16.08.2021 и оплачены заказчиком, что не  оспорено.  

Рассмотрев претензионное требование заказчика № 4.1.4-05/87 от 27.08.2021 о  начислении и уплате в связи с допущенным ООО «Нарек» нарушением срока выполнения  работ неустойки в размере 18 150 рублей 60 копеек, платежным поручением № 198 от  11.10.2021 подрядчик произвел перечисление неустойки.  

Указывая, что просрочка исполнения обязательства произошла по вине Заказчика  вследствие непредвиденных обстоятельств, так как в процессе выполнения работ по  ремонту автодороги на участке по ул.Замараева и ул.Гоголевская были выполнены  дополнительные работы не предусмотренные муниципальным контрактом, а также со  ссылкой на Постановление Правительства РФ № 783 от 04.07.2018, ООО «Нарек»  претензией № 5 от 12.01.2023 потребовало заказчика вернуть понесенные подрядчиком  расходы в сумме 18 150 рублей 60 копеек при выполнении обязательств по МК  

 № 0120300016721000003-341050 от 20.02.2021. До настоящего времени понесенные  расходы не возвращены.  

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения ООО «Нарек» с  рассматриваемым иском в суд.  

Удовлетворение исковых требований в полном объеме послужило основанием  для обращения ответчика в суд с апелляционной жалобой.  

Проверив законность и обоснованность обжалуемого судебного акта в порядке  статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не установил оснований для  отмены или изменения решения по настоящему делу.  

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) в  качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания,  предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и  юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в  силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские  права и обязанности. В соответствии со статьей 307 ГК РФ обязательства возникают из  договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем  Кодексе.  

На основании статьи 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом,  иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество  (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему  неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное  обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Кодекса.  

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того,  явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя  имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.  

В силу части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно  доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и  возражений.  

По требованию о взыскании сумм, составляющих неосновательное обогащение,  на основании части 1 статьи 1102, части 2 статьи 1105 ГК РФ истец должен доказать: факт  приобретения или сбережения ответчиком денежных средств за счет истца; отсутствие  установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований для  приобретения; размер неосновательного обогащения.  

При этом для удовлетворения требований истца о взыскании неосновательного  обогащения необходима доказанность всей совокупности указанных фактов.  

Как следует из материалов дела, истец, предъявляя требование о взыскании  неосновательного обогащения, ссылается на неправомерное начисление ответчиком  неустойки за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту, и как  следствие вынужденным перечислением истцом денежных средств, в связи с чем, на  стороне ответчика образовалось неосновательное обогащение.  

В силу части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и  сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить  его.  

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных  работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или  муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и  другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и  непроизводственного характера работы и передать их государственному или  муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется  принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (часть 2 статьи 763  ГК РФ).  

Согласно части 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и  конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут  быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные  сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не  предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального  и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

Отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных  нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок  товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких  закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок,  регулирует Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее - Закон № 44-ФЗ).  

На основании части 4 статьи 34 Закона № 44-ФЗ в контракт включается  обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика,  исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,  предусмотренных контрактом.  

Частью 6 статьи 34 Закона № 44-ФЗ предусмотрено, что в случае просрочки  исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе  гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком,  исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет  поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со  дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения  обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке,  установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая  действующей на дату уплаты пени ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта,  уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных  контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (часть  7 статьи 34 Закона № 44-ФЗ).  

Аналогичный порядок начисления пени предусмотрен сторонами в пункте 7.7  контракта.  

Судом установлено, что истец не оспаривая обстоятельство наличия на стороне  общества просрочки исполнения предусмотренного муниципальным контрактом  обязательства, а также не превышающий пятипроцентный размер начисленной  заказчиком неустойки, ссылаясь на положения пункта 42.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ и  постановления Правительства РФ № 783, настаивает на наличии правовых оснований для  списания выплаченной пени, в связи с чем на стороне ответчика возникло  неосновательное обогащение в спорной сумме.  

Согласно пункту 42.1 статьи 112 Закона № 44-ФЗ в действующей редакции  начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы  неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в  2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат  списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской  Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783  утверждены Правила осуществления заказчиком списания сумм неустоек (штрафов,  пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных  заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств,  предусмотренных контрактом.  

Согласно пункту 2 Правил № 783 списание начисленных и неуплаченных сумм  неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, обязательства по которым  исполнены в полном объеме, за исключением контрактов, по которым:  

а) в 2015, 2016 и 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке  исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара, работы,  услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг, предусмотренных контрактами;  

б) в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с  возникновением не зависящих от поставщика (подрядчика, исполнителя) обстоятельств,  повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой  коронавирусной инфекции;  

в) в 2021 и 2022 годах обязательства не были исполнены в полном объеме в связи  с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы,  повлекшем невозможность исполнения контракта поставщиком (подрядчиком,  исполнителем);  

г) обязательства не были исполнены в полном объеме по причине возникновения  при исполнении контракта не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих  невозможность его исполнения без изменения условий, в связи с введением политических  или экономических санкций иностранными государствами, совершающими  недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской  Федерации или российских юридических лиц (далее - санкции), и (или) с введением  иностранными государствами, государственными объединениями и (или) союзами и (или)  государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или  государственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера (далее -  меры ограничительного характера).  

Согласно пункту 4 Постановления, списание начисленных и неуплаченных сумм  неустоек (штрафов, пеней) осуществляется на основании учетных данных заказчика,  имеющих документальное подтверждение. Заказчик в целях списания начисленных и  неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) обеспечивает сверку расчетов с  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по начисленным и неуплаченным суммам  неустоек (штрафов, пеней).  

Судом обоснованно отмечено, что на момент перечисления неустойки  действовало соответствующее требование законодательства о наличии у ответчика  обязанности по списанию неустойки.  

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 40 Обзора судебной практики  применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,  утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017,  списание, рассрочка начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю) сумм неустоек  (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением государственного  (муниципального) контракта при определенных условиях является именно обязанностью  государственного (муниципального) заказчика, поскольку данные действия призваны  быть одной из мер поддержки исполнителей по государственным (муниципальным)  контрактам. В связи с этим суд, рассматривая иск заказчика о взыскании с поставщика  (подрядчика, исполнителя) указанных штрафных санкций, обязан проверить соблюдение  истцом требований приведенного законодательства.  

В соответствии с правовой позицией Судебной коллегии по экономическим  спорам Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от  14.08.2018 № 305-ЭС18-5712, указанный порядок списания начисленных сумм неустоек  направлен на установление действительного размера задолженности и урегулирование  споров между сторонами.  

Несовершение заказчиком действий по учету возникшей задолженности не может  служить основанием для отказа в списании сумм неустоек.  

Наличие спора относительно начисленной неустойки не может трактоваться как  условие, препятствующее списанию или предоставлению отсрочки уплаты неустоек,  поскольку подобные антикризисные меры были установлены специально для защиты  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по контрактам.  

Ссылка ответчика на добровольную уплату истцом неустойки, подлежит  отклонению, поскольку добровольная уплата неустойки истцом не препятствует  применению положений Правил № 783.  

Принимая во внимание императивные положения указанной нормы Закона № 44- ФЗ, обстоятельства исполнения ООО «Нарек» обязательств по спорному контракту в  полном объеме с просрочкой в 2021 году, а также не превышающий пятипроцентный  размер начисленной заказчиком неустойки, суд первой инстанции правомерно пришел к  верному выводу, что начисленная неустойка в соответствии с вышеприведенными  положениями Правил № 783 подлежит списанию заказчиком.  

С учетом вышеизложенного, требования истца о взыскании и неосновательного  обогащения в виде уплаченной неустойки сумме 18 150 рублей 60 копеек правомерно  удовлетворено судом первой инстанции.  

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает, что подателем жалобы не  представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование  своей позиции, доводы, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов,  которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении  дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу,  влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда  первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции  несостоятельными и не могут служить основанием для отмены решения суда первой  инстанции.  

При данных обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о  том, что, удовлетворив требования истца, суд первой инстанции принял законное и  обоснованное решение.  

Нормы материального права применены арбитражным судом первой инстанции  правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи  270 АПК РФ в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом  апелляционной инстанции не установлено.  

Вопрос о распределении расходов по государственной пошлине за подачу  апелляционной жалобы судом не рассматривался, поскольку заявитель жалобы  освобожден от уплаты государственной пошлины в силу положений статьи 333.37  Налогового кодекса Российской Федерации.  

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд  

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 07.04.2023 по делу № А513735/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.  

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Дальневосточного  

округа через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев. 

Председательствующий И.С. Чижиков  

Судьи Л.А. Мокроусова  

Д.А. Самофал 

 Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 15.03.2023 21:51:00Кому выдана Чижиков Игорь Семёнович