Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-82482/2019

11 апреля 2021 года

г.Санкт-Петербург

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Косенко Т.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кассиным В.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью "МЕТРИКА" (426011, Удмуртская республика, Ижевск город, ФИО1 

<

...>, ОГРН: 

<

***>) 

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "НГ-ЭНЕРГО" (188508, Ленинградская область, район Ломоносовский, шоссе Волхонское, дом 4, квартал 2, ОГРН: 

<

***>) 

о взыскании 

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "НГ-ЭНЕРГО" к обществу с ограниченной ответственностью "МЕТРИКА"

о взыскании 

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО" (ОГРН: 

<

***>) 

при участии

- от ООО "МЕТРИКА": не явился (извещен);

- от ООО "НГ-ЭНЕРГО": ФИО2 по доверенности от 01.01.2021;

- от третьего лица: не явился (извещен);

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРИКА" (далее – ООО МЕТРИКА") обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "НГ - ЭНЕРГО" (далее – ООО "НГ-ЭНЕРГО") о взыскании 512 210,03 руб. задолженности по договору подряда от 02.09.2016 № ДЗ-55.387/330-4-5 (далее – Договор). 

ООО "НГ-ЭНЕРГО" обратилось в суд со встречным иском, уточненным в соответствии со ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к ООО "МЕТРИКА" о взыскании 346 392,17 руб. неустойки за период с 26.09.2017 по 23.08.2018 и 300 000 руб. штрафа по Договору.

Определением от 29.05.2020 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО". 

Представитель ООО "НГ-ЭНЕРГО" поддержал исковые требования по встречному иску. 

ООО МЕТРИКА" и ООО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО", извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание своих представителей не направили, что в силу части 3 статьи 156 АПК РФ не является препятствием к рассмотрению дела в их отсутствие.

Исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между ООО МЕТРИКА" (подрядчиком) и ООО "НГ - ЭНЕРГО" (генподрядчиком) заключен Договор, по условиям которого генподрядчик поручает, а подрядчик принимать на себя обязательства по выполнению комплекса строительно-монтажных работ в соответствии с «Ведомостью работ/расчетом стоимости работ» (приложение № 1), «Графиком выполнения строительно-монтажных работ» (приложение № 2) по объекту: мини ТЭС на площадке автопроизводства ПАО «Камаз», расположенного по адресу: 

<

...> Промкомзона, а генподрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную Договором цену. 

В соответствии с абз. 1 п. 3.1. Договора, в редакции п. 3 дополнительного соглашения от 13.12.2017 № 10 к Договору, общая стоимость работ по настоящему Договору является предельной и определяется на основании «Ведомости работ/расчета стоимости работ» (приложение № 1 к Договору) и составляет 16049206,25 руб. 

В силу п. 3.2.4. Договора дальнейшие расчеты производятся ежемесячно за фактически выполненные и принятые генподрядчиком в отчетном месяце строительно-монтажные работы в течение 10 (рабочих) дней после предоставления генподрядчику подрядчиком оригиналов подписанных с двух сторон актов выполненных работ (КС-2, КС-3), иной документации, предусмотренной настоящим Договором, согласно условий настоящего Договора с зачетом ранее выплаченного аванса в размере 40%, а также удержания обеспечительного платежа в размере 5% стоимости работ на основании соответствующих документов. 

Согласно п. 3.2.5 Договора генподрядчик формирует обеспечительный платеж в размере 5% от стоимости работ, в том числе НДС (18%). Целью формирования генподрядчиком обеспечительного фонда является обеспечение надлежащего исполнения обязательств подрядчика по настоящему договору. Стороны признают, что формирование генподрядчиком обеспечительного фонда не является удержанием имущества подрядчика, а представляет собой согласованный сторонами способ обеспечения исполнения подрядчиком обязательств по настоящему договору.

В случае надлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по Договору обеспечительные платежи выплачиваются генподрядчиком в полном объеме подрядчику:

- в течение 20 рабочих дней после утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14); или

- в течение 40 рабочих дней с дат расторжения настоящего Договора генподрядчиком (за исключением случая расторжения Договора генподрядчиком по вине подрядчика); 

Стороны пришли к соглашению, что в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, обеспечительные платежи выплачиваются генподрядчиком в течение 20 рабочих дней с момента утверждения акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) за вычетом сумм, направленных генподрядчиком на устранение недостатков и дефектов в выполненных подрядчиком работах, сумму неустоек, подлежащих уплате генподрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора. 

По п. 4.1. Договора работы по настоящему Договору должны быть начаты и завершены подрядчиком в соответствии с графиком выполнения работ (приложение № 2 к Договору). 

Согласно п. 7.1. Договора сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ производится ежемесячно до 25 числа текущего месяца и оформляется актами о приемке выполненных работ (форма №КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) совместно с которыми подрядчик предоставляет генподрядчику комплект исполнительной документации, а также документы, перечисленные в настоящем пункте. 

В соответствии с п. 5.1.5. Договора генподрядчику предоставляется право взыскания неустоек, пени, санкций в соответствии с локальными нормативными актами, действующими и регламентирующими вопросы обеспечения безопасности труда, сохранения жизни и здоровья персонала, противопожарной безопасности, охраны окружающей среды при производстве работ на объекте на основании письменных требований и правом одностороннего зачета соответствующих сумм при условии уведомления подрядчика о произведенных действиях, возникших по вине подрядчика в результате действий/бездействий как подрядчика так и субподрядных организаций подрядчика. 

В силу п. 12.3. Договора за несвоевременное выполнение работ, предусмотренных Договором, на основании письменной претензии генподрядчика, подрядчик при наличии его вины уплачивает генподрядчику пени в размере 0,1% от стоимости просроченных работ за каждый день просрочки.

В соответствии с п. 6 приложения Б к порядку допуска подрядных организаций на объекты ООО "НГ ЭРЕРГО" (приложение № 3 к Договору) в случае выявления ООО "НГ энерго"/заказчиком факта нахождения на объектах ООО "НГ Энерго"/заказчика, в вахтовых поселках, городках и общежитиях работника подрядчика (субподрядчика) в состоянии алкогольного опьянения, наркотических или токсических средств, проноса или нахождения на территории объекта ООО "НГ Энерго"/заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за каждый факт зафиксированный измерительными приборами устанавливающими алкогольное опьянение) установлен штраф в размере 100000 руб.   

ООО "МЕТРИКА" выполнило работы по Договору согласно актам о приемке выполненных работ от 24.11.2017 № 12 на сумму 5661949,56 руб., от 24.11.2017 № 13 на сумму 44540,68 руб., от 20.12.2017 № 14 на сумму 1239359,59 руб., справке о стоимости выполненных работ и затрат.

ООО "НГ - ЭНЕРГО" не оплатило работы стоимостью 512210,03 руб., в связи с чем ООО МЕТРИКА" обратилось с требованием оплаты задолженности.

Отказ ООО "НГ - ЭНЕРГО" удовлетворить названное требование послужил основанием для обращения ООО "МЕТРИКА" в суд с настоящим иском. 

Ссылаясь на просрочку выполнения работ согласно актам о приемке выполненных работ от 30.11.2017 № 1, от 31.05.2017 № 7, от 31.08.2017 № 9, от 15.10.2017 № 10, от 20.10.2017 № 11, от 24.11.2017 № 12, от 24.11.2017 № 13, а также на нарушение работниками подрядчика условий Договора, в том числе, стандартов организации СТО КАМАЗ, а именно: проникновение работниками подрядчика на территорию ПАО "КАМАЗ" с признаками алкогольного опьянения, а также внесение на территорию производства работ спиртосодержащей продукции 25.10.2016 и дважды 15.11.2016, ООО "НГ - ЭНЕРГО" начислило ООО "МЕТРИКА" неустойку и штраф и потребовало их оплатить.

Отказ ООО "МЕТРИКА" удовлетворить названные требования послужил основанием для обращения ООО "НГ - ЭНЕРГО" в суд со встречным иском.

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно (статья 711 ГК РФ). 

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. 

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

Выполнение работ по Договору подтверждается актами о приемке выполненных работ от 24.11.2017 № 12, от 24.11.2017 № 13, от 20.12.2017 № 14, подписанными ООО "НГ - ЭНЕРГО" без возражений.

Согласно сведениями, содержащимся на официальном сайте Росреестра, и отчету об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости объект "Мини-ТЭС на площадке автопроизводства ПАО "КАМАЗ", в отношении которого ООО "МЕТРИКА" выполняло строительно-монтажные работы по спорному Договору, 23.08.2018 поставлен на кадастровый учет с присвоением кадастрового номера: 16:52:100103:550, правообладатель – ООО "Энергетическое партнерство", в связи с чем ООО "НГ-ЭНЕРГО" полагает, что объект с 23.08.2018 фактическим введен в эксплуатацию. 

Доводы ООО "НГ-ЭНЕРГО" о том, что ООО "МЕТРИКА" выполнило работы по Договору не в полном объеме, с дефектами, не подтверждается материалами дела. 

Нарушение сроков выполнения работ и допущение ООО "МЕТРИКА" неоднократных нарушений положений Договора не является основанием для отказа оплаты выполненных и принятых генподрядчиком работ, исходя из чего требование о взыскании 512210,03 руб. задолженности по первоначальному иску подлежит удовлетворению в полном объеме.

ООО "НГ - ЭНЕРГО" заявило встречное требование о взыскании 346392,17 руб. неустойки за период с 26.09.2017 по 23.08.2018 за нарушение срока выполнения работ на основании пункта 12.3. договора.

Проверив расчет неустойки, суд признает его верным.

Требование о взыскании с ООО МЕТРИКА" 346392,17 руб. неустойки подлежит удовлетворению в заявленном размере.

ООО "НГ - ЭНЕРГО" заявило о взыскании 300000 руб. штрафа с связи с нахождением сотрудников ООО "МЕТРИКА" на территории объекта в состоянии алкогольного опьянения, что подтверждается актами о нарушении пропускного (внутриобъектного режима) от 25.10.2016, от 15.11.2016, от 15.11.2016.

Расчет штрафа признан судом верным.

Требование о взыскании 300000 руб. штрафа подлежит удовлетворению в полном объеме. 

В соответствии с частью 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

по первоначальному иску взыскать с общества с ограниченной ответственностью "НГ-ЭНЕРГО" в пользу общества с ограниченной ответственностью "МЕТРИКА" 512210,03 руб. задолженности и 13244 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

По встречному иску взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МЕТРИКА" в пользу общества с ограниченной ответственностью "НГ - ЭНЕРГО" 300000 руб. штрафа, 346392,17 руб. неустойки и 15928 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины. 

Произвести зачет денежных сумм, подлежащих взысканию по первоначальному и встречному искам, и в результате зачета первоначальных и встречных исковых требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью "МЕТРИКА" в пользу общества с ограниченной ответственностью "НГ - ЭНЕРГО" 136866,14 руб. 

Возвратить из федерального бюджета обществу с ограниченной ответственностью "МЕТРИКА" 1844 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной платежным поручением от 04.07.3019 № 361, обществу с ограниченной ответственностью "НГ - ЭНЕРГО" 1666 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной платежным поручением от 16.03.2020 № 3060.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Косенко Т.А.