132/2021-14276(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; 

http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-11308/2020

город Саратов

26 января 2021 года

Руководствуясь статьями 110,112,167-170,176-180,181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,   

РЕШИЛ:

Обязать Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в  Саратовской области (сокращенное наименование - Фонд капитального ремонта), г.Саратов,  ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> за свой счет в течение двух месяцев со дня вступления  решения суда в законную силу устранить нарушения (недостатки) допущенные в ходе  проведения капитального ремонта кровли в жилом доме по адресу: 

<

...> путем выполнения следующих работ:  

- Выполнить разборку покрытий кровель: из профилированного листа площадью 122 кв.м.  - Выполнить демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой площадью 650 кв.м.  

 - Выполнить устройство пароизоляции: прокладочной в один слой площадью 650 кв.м.  - Выполнить монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа площадью 122 кв.м.  

- Выполнить смену обделок из листовой стали, примыканий, конька - 164 м.  

- Выполнить ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление  стропильных ног расшивкой досками с двух сторон - 51 м.  

- Выполнить ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных  стропильных ног с постановкой раскосов в количестве 2 шт.  

- Выполнить очистку щетками поверхности площадью 124 кв.м. 

Выполнить огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения:  первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 площадью 489 кв.м.  

- Выполнить отбивку штукатурки с поверхностей: стен кирпичных площадью 24 кв.м.  - Выполнить оштукатуривание поверхности дымовых труб площадью 24 кв.м.  

- Выполнить смену воронок водосточных труб с люлек в количестве 7 шт.  - Выполнить смену колен водосточных труб с люлек в количестве 21 шт.  - Выполнить смену ухватов для водосточных труб: в каменных стенах в количестве  

49 шт. 

- Выполнить смену прямых звеньев водосточных труб с люлек в количестве 102 шт.  - Выполнить смену отливов (отметов) водосточных труб в количестве 6 шт.  

- Выполнить демонтаж/монтаж желобов - 120 м. 

- Выполнить демонтаж снегозадержателей, ограждения - 228,54 м.  - Выполнить устройство снегозадержателей, ограждения - 228,54 м.  

- Выполнить погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: погрузка  мусора строительного с погрузкой вручную в количестве 2,3 т. груза.  

- Выполнить перевозку грузов автаомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т  работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км, в количестве 2,3 т. груза.  

 Взыскать с Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  домах в Саратовской области области (сокращенное наименование - Фонд капитального  ремонта), г.Саратов, ОГРН 114640001351, ИНН 6450999440 в пользу Общества с ограниченной  ответственностью «УК Авиатор Заводской» (сокращенное наименование - ООО "УК Авиатор  Заводской"), г.Саратов, ОГРН 1146451002796, ИНН 6451005348 расходы по оплате услуг по  составлению технического заключения в размере 15000рублей, расходы по оплате  государственной пошлины в размере 6000рублей, расходы по оплате услуг представителя в  размере 20000рублей.  

В части взыскания судебных расходов в сумме 30000руб. отказать. 

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через суд, вынесший решение, в апелляционном  порядке в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Поволжского округа, в течение  двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу при условии, что оно было  предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную силу. 

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в  соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации.  

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1 

Электронная подпись сформирована некорректно. 

Необходимо использовать сертификат с алгоритмами ГОСТ

Данные ЭП:Удостоверяющий центр 

Дата 13.11.2020 7:37:50

 Кому выдана a57.ebobunova@arbitr.ru