АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

МОТИВИРОВАННОЕ 

РЕШЕНИЕ

Дело №А60-50540/2023

29 ноября 2023 года

г. Екатеринбург

 

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.С. Дёминой, рассмотрев дело №А60-50540/2023 по исковому заявлению Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Уральский монолит» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании  неустойки в сумме 120 604,71 руб.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства без вызова сторон после истечения сроков, установленных судом для представления доказательств и иных документов в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Лица, участвующие в деле, о принятии искового заявления, возбуждении производства по делу и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства извещены арбитражным судом надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации на сайте суда.

Отводов суду не заявлено.

 

Региональный фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратился с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Уральский монолит» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании  неустойки  за просрочку выполнения работ в части их  документального оформления  в сумме 120 604,71 руб.

Определением арбитражного суда Свердловской области от 28.09.2023 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Арбитражным судом Свердловской области дело рассмотрено в порядке упрощенного производства с подписанием резолютивной части решения от 19.11.2023.

В Арбитражный суд Свердловской области 22.11.2023 с соблюдением сроков, установленных ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, от истца поступило заявление о составлении мотивированного решения.

В силу части 2 ст. 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Согласно официальному сайту арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решение суда от 19.11.2023 размещено: 20.11.2023 г. 11:13:16 МСК.

В связи с поступлением от истца  заявления о составлении мотивированного решения, решение подлежит изготовлению в полном объеме.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд 

 

установил:

Как следует из материалов дела, между истцом (заказчик) и ответчиком (подрядчик) 16.12.2019 заключен договор № 449/СМР-20 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, согласно п. 1.1. которого по настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами за свой счет, с использованием собственных материалов, конструкций, изделий и оборудования выполнить комплекс работ по капитальному ремонту (далее – работы) общего имущества многоквартирных домов (далее – Объекты), согласно Адресному перечню (Приложение № 1) в соответствии со сметной документацией (Приложение № 2), включая выполнение строительно-монтажных работ на Объектах, поставку материалов, изделий, конструкций, оборудования, своевременное устранение недостатков, сдачу каждого Объекта по Акту сдачи-приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, выполнение обязательств в течение гарантийного срока, выполнение иных неразрывно связанных с Объектом работ. Заказчик принимает надлежащим образом выполненные Подрядчиком работы и оплачивает их в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

Согласно п. 2.1. договора, цена договора определяется согласно результатам электронного аукциона и составляет 53 634 614 руб. 40 коп., в том числе НДС 20%.

Согласно п. 4.2. договора, сроки выполнения работ по договору: 

- дата начала: с даты подписания акта передачи общего имущества многоквартирного дома для проведения работ по капитальному ремонту, предусмотренного п. 6.1.2. договора, применительно к каждому из Объектов, указанных в Приложении № 1;

- дата окончания: не позднее «25» декабря 2020 года.

Согласно п.  4.3. договора,  подрядчик обязуется выполнить работы по договору в соответствии с Графиком производства работ (далее – График).

Графиком производства работ предусмотрены отдельно дата окончания работ  (техническое выполнение) и дата окончания работ (документальное оформление).

В соответствии с п. 4.5 договора нарушение Подрядчиком любого из сроков выполнения работ, указанных в пункте 4.4. договора (начального, промежуточного, конечного), является основанием для применения Заказчиком мер ответственности, предусмотренных договором, в том числе пунктом 11.4. договора

Согласно приложению №1 к договору «Адресный перечень» объекты выполнения работ: 

1) 

<

...>, виды работ: ремонт фасада, ремонт покрытия (крыша), утепление чердачного перекрытия (крыша), ремонт подвальных помещений, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения,  ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы электроснабжения, стоимость работ 18 617 647,20 руб.

2) 

<

...>,  виды работ: ремонт покрытия (крыша), утепление чердачного перекрытия (крыша), ремонт подвальных помещений, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения,  ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы электроснабжения, стоимость работ 4 730 360,40 руб.

3) 

<

...>, виды работ: ремонт фасада, ремонт покрытия (крыша), утепление чердачного перекрытия (крыша), ремонт подвальных помещений, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы электроснабжения, стоимость работ 7 259 868,00 руб.

4) 

<

...>, виды работ: ремонт фасада, ремонт покрытия (крыша), утепление чердачного перекрытия (крыша), ремонт подвальных помещений, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы электроснабжения, стоимость работ 4 891 177,20 руб.

5) 

<

...>, виды работ: ремонт фасада, ремонт покрытия (крыша), утепление чердачного перекрытия (крыша), ремонт подвальных помещений,  ремонт системы электроснабжения, стоимость работ 3 860 910,00 руб.

6) 

<

...>, виды работ: ремонт фасада, ремонт покрытия (крыша), утепление чердачного перекрытия (крыша), ремонт подвальных помещений, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы электроснабжения, стоимость работ 4 302 771,60 руб.

7) 

<

...>, виды работ: ремонт фасада, ремонт покрытия (крыша), утепление чердачного перекрытия (крыша), ремонт подвальных помещений, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы электроснабжения стоимость работ 2 856 706,80 руб.

8) 

<

...>, виды работ: ремонт подвальных помещений, стоимость работ 552 882,00 руб.

9) п. Шабровский (

<

...>, виды работ: ремонт фасада, ремонт покрытия (крыша), утепление чердачного перекрытия (крыша), ремонт подвальных помещений, ремонт системы теплоснабжения, ремонт системы горячего водоснабжения,  ремонт системы холодного водоснабжения, ремонт системы водоотведения, ремонт системы электроснабжения, стоимость работ 6 562 291,20 руб.

Проанализировав условия представленного договора, суд пришел к выводу, что по своей правовой природе данный договор является договором строительного подряда, соответственно правоотношения сторон по указанному договору регулируются нормами параграфов 1, 3 главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно п. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

В силу п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

По смыслу пункта 1 статьи 711 и пункта 1 статьи 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплате подлежит фактически выполненный результат работ (пункт 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

Работы, предусмотренные договором, ответчиком выполнены, что подтверждается представленными в материалы дела актами КС-2 №1 от 05.10.2020 на сумму 747 025, 20 руб., №1 от 25.12.2020 на сумму 269 760 руб., №1 от 25.12.2020 на сумму 970 754,40 руб., №1 от 28.11.2020 на сумму 547136,40 руб., №1 от 25.12.2020 на сумму 498664, 80 руб., №1 от 25.12.2020 на сумму 1081570, 80 руб., №1  от 15.12.2020 на сумму 237 175, 20 руб., №3 от 16.12.2021 на сумму 62518,80 руб.,  №1 от 09.09.2020 на сумму 334 304, 40 руб., №1 от 24.11.2020 на сумму 650 106, 00 руб.

Оплата истцом выполненных ответчиком работ подтверждается представленными в материалы дела платежными поручениями №11871 от 26.10.2020, №13729 от 19.11.2021, №612 от 27.01.2021, №15253 от 22.12.2020, №790 от 01.02.2021, №715 от 29.01.2021, №16163 от 30.12.2020, №16234 от 29.12.2021, №11630 от 20.10.2020, №14833 от 14.12.2020.

Истец просит взыскать с ответчика  неустойку за просрочку в части документального  оформления результата выполненных работ в сумме 120 604, 71 руб., исходя из размера 1/130 ключевой ставки ЦБ РФ.

В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии с п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (пункт 2 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Как было указано выше, согласно п. 4.2. договора, сроки выполнения работ по договору:

- дата начала: с даты подписания акта передачи общего имущества многоквартирного дома для проведения работ по капитальному ремонту, предусмотренного п. 6.1.2. договора, применительно к каждому из Объектов, указанных в Приложении № 1;

- дата окончания: не позднее «25» декабря 2020 года.

Согласно п.  4.3. договора,  подрядчик обязуется выполнить работы по договору в соответствии с Графиком производства работ (далее – График).

Графиком производства работ предусмотрены отдельно дата окончания работ  (техническое выполнение) и дата окончания работ (документальное оформление).

Согласно п. 4.5. договора сроки начала и окончания работ по этапам (видам работ) на каждом Объекте являются исходными для применения мер ответственности, предусмотренных договором, в случае нарушения подрядчиком сроков производства работ.

Согласно п. 10.2. договора, за невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по срокам выполнения работ на Объекте в соответствии со сроками, установленными Графиком производства работ (в части сроков, предусмотренных для документального оформления результата выполненных работ), иных сроков, установленных настоящим договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере одной сто тридцатой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России от стоимости неисполненного обязательства за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.4. настоящего Договора. При этом в рамках настоящего пункта договора под днем уплаты неустойки понимается первоначальная дата, когда был произведен расчет неустойки, направленный в адрес Подрядчика.

Просрочка окончания работ в части документального оформления подтверждается представленными в материалы дела актами формы КС-2 (ст. 65 АПК РФ):

Адрес объекта

Вид работ

Сроки окончания работ по графику

Фактически выполненные работы на объекте

Акт формы КС-2

<

...>

 

теплоснабжение

 

01.10.2020

 

05.10.2020

 

№1 от 05.10.2020

 

пос. Шабровский (г. Екатеринбург), ул. Ленина, д. 19

подвальные помещения

крыша (покрытие)

теплоснабжение

фасад

крыша (утепление ЧП)

 

30.11.2020

03.09.2020

01.10.2020

30.10.2020

03.09.2020

 

25.12.2020

25.12.2020

28.11.2020

25.12.2020

25.12.2020

 

№1 от 25.12.2020

№1 от 25.12.2020

№1 от 28.11.2020

№1 от 25.12.2020

№1 от 25.12.2020

 

<

...>

подвальные помещения

фасад

29.11.2020

29.11.2020

 

15.12.2020

16.12.2021

 

№1 от 15.12.2020

№3 от 16.12.2021

 

<

...>

крыша (покрытие)

крыша (утепление ЧП)

03.09.2020

03.09.2020

09.09.2020

24.11.2020

 

№1 от 09.09.2020

№1 от 24.11.2020

 

Расчет неустойки, приложенный к иску, судом проверен, признан верным.

Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, ходатайство о снижении неустойки на основании ст. 333 ГК РФ не заявил.

Таким образом, сумма неустойки в соответствии с п. 10.2 договора составляет 120 604 руб. 71 коп. и подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст. 329, 330 ГК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Государственная пошлина в сумме в сумме 4 618 руб. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании ст. 309, 310, 330, 708, 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 110, 167-171, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

 

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Уральский монолит» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку за просрочку выполнения работ по договору №449/СМР-20 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов от 16.12.2019 в сумме 120 604 руб. 71 коп., а также в возмещение расходов по уплате госпошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме 4 618 руб.

2. По заявлению лица, участвующего в данном деле, может быть составлено мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения данной резолютивной части на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет».

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

3. Решение по настоящему делу подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы, если решение не отменено или не изменено, оно вступает в законную силу со дня принятия арбитражным судом апелляционной инстанции постановления.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда http://17aas.arbitr.ru.

4. Исполнительный лист выдается взыскателю только по его ходатайству независимо от подачи в суд заявления о составлении мотивированного решения или подачи апелляционной жалобы (абзац 2 пункта 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 18 апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»).

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел».

По заявлению взыскателя дата выдачи исполнительного листа (копии судебного акта) может быть определена (изменена) в соответствующем заявлении.

В случае неполучения  взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

 

Судья                                                                                                                      А.С. Дёмина