45_916944  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-10705/2020

г. Барнаул

06 сентября 2021 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Прохорова В.Н., при ведении  протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием  средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение»  г.Барнаула (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Барнаул,  

к обществу с ограниченной ответственностью «Система-Эксперт» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Барнаул,  

об обязании в течении месяца с момента вступления решения суда в законную  силу безвозмездно устранить недостатки работ, выполненных по договору на выполнение  работ № 19/09 от 01.10.2018 и присуждении судебной неустойки на случай не исполнения  судебного акта,  

при участии в судебном заседании: от истца – представитель ФИО2 по доверенности от 27.07.2020, 

от ответчика – представитель ФИО3 по доверенности от 10.01.2020.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 174, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

обязать общество с ограниченной ответственностью «Система-Эксперт» в течении  1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу безвозмездно устранить  недостатки работ, выполненных по договору на выполнение работ № 19/09 от 01.10.2018 в  сквере на пересечении ул. Папанинцев и пр-та Красноармейского, выполнив следующие  работы:  

1) Демонтажные работы: 

Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель  площадью 670,51 м2.  

Разборка бортовых камней: на щебеночном основании протяженностью 20,3 метра.  

Разборка выравнивающих слоев из песка объемом 67,051 м3. 2) Монтажные работы: 

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  протяженностью 20,3 метра (Камни бортовые: БР 100.20.8 бетон В22,5(М300), объем  0,016 м3/ГОСТ 6665-91 - 9 штук.).  

Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из известнякового щебня  площадью 670,51 м2 (щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции:  5-10мм - объемом 116,7 м3.).  

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка объемом  67,051 м3 (песок природный для строительных работ средний объемом 79,12 м3).  

Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1  м2.: 40 шт. площадью 670,51 м2.  

Облицовка стен плитами из естественного камня площадью 0,48 м2. 

При неисполнении решения суда в указанный срок взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «Система-Эксперт» в пользу муниципального  бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение» г. Барнаула неустойку в размере  50 000 руб. за каждый месяц просрочки исполнения решения суда, до фактического  исполнения решения суда.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Система-Эксперт» в  пользу муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство и озеленение» г.  Барнаула 6 000 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины и 50 000  руб. судебных издержек по оплате за проведение экспертизы.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в  апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца  со дня принятия решения, либо в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Западно- Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья В.Н. Прохоров 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департаментаДата 19.05.2021 6:30:41

 Кому выдана Прохоров Василий Николаевич