16_5369810  

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000 

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-4948/2023

г. Белгород

28 декабря 2023 года

Арбитражный суд Белгородской области  

в составе судьи Танделовой З. М. 

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио и  видеозаписи секретарём судебного заседания ФИО1  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску ООО "Белтехнострой"  (ИНН 

<

***>, ОГРН

<

***>)  

к ООО "РиК Строй-С" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании  6 047 827 руб. и встречному иску о взыскании 5 366 929,51 руб.  

третье лицо: ОГБУ «УКС Белгородской области» 

 при участии в судебном заседании: от истца/ответчика: руководитель ФИО2, приказ № К/1, паспорт; 

от ответчика/истца: не явился, извещен надлежащим образом;  от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск ООО "Белтехнострой" (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***> удовлетворить.  

Взыскать с ООО "РиК Строй-С" (ИНН 3128050610, ОГРН 1053109237059) в  пользу ООО "Белтехнострой" (ИНН 3123487950, ОГРН 1223100005380)  задолженность по оплате стоимости выполненных работ по договору субподряда   № 01/08-22БЛ от 01.08.2022 в размере 5 715 731, 60 руб., проценты за пользование  чужими денежными средствами за период с 15.08.2022 по 24.10.2023 в размере  332 095,40 руб. и судебные расходы по госпошлине 46 272 руб., а всего 6 094 099  руб.  

 Встречный иск ООО "РиК Строй-С" удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО "Белтехнострой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  в пользу ООО "РиК Строй-С" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку  за просрочку выполнения работ по договору субподряда № 01/08-22БЛ от  01.08.2022 за период с 16.12.2022 по 17.03.2023 в сумме 851 406,40 руб. и  судебные расходы по госпошлине 4 084,48 руб., а всего 855 490,88 руб.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

В соответствии с частью 5 статьи 170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации произвести зачет требований, удовлетворенных по  первоначальному и встречному искам, и в результате зачета:  

Взыскать с ООО "РиК Строй-С" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), в  пользу ООО "Белтехнострой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  задолженность в сумме 5 238 608,12 руб.  

 Взыскать с ООО "РиК Строй-С" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в  доход федерального бюджета госпошлину в сумме 34 858, 48 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья Танделова З. М.