АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КОСТРОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2

http://kostroma.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

Дело № А31-7956/2023

г. Кострома

07 февраля 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 23 января 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 07 февраля 2024 года.

Арбитражный суд Костромской области в составе судьи Тетерина Олега Валерьевича, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев исковое заявление федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 4 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Капитальное строительство» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 15 776 руб. 52 коп. пени за просрочку исполнения обязательств по государственным контрактам,

при участии в заседании: 

от истца: не явился, извещен,

от ответчика: не явился, извещен,

установил:

федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 4 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области» обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Капитальное строительство» 15 776 руб. 52 коп. пени за просрочку исполнения обязательств по государственным контрактам.

Стороны явку представителей в суд не обеспечили, извещены.

Ответчик отзыв не представил, требования не оспорил.

На основании частей 1 и 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие сторон по имеющимся доказательствам.

Рассмотрев материалы дела, суд считает установленными следующие обстоятельства.

02.08.2022 года между федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 4 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области» (далее – Заказчик, истец) и обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Капитальное строительство» (далее – Исполнитель, ответчик) заключен государственный контракт № 79 на оказание услуг по капитальному ремонту (далее – Контракт), по условиям которого Исполнитель обязуется по локальной смете № 1 являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №1) предоставленной Заказчиком, а также условиями настоящего Контракта, оказать услуги по капитальному ремонту: Капитальный ремонт санитарного узла общежития отряда №3 стоимостью 575 850 (Пятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей в срок до 30 сентября 2022 года. (п.1.1 Контракта)

В счет оплаты оказанных услуг Заказчик внёс Исполнителю предоплату сумма в размере 30% от общей стоимости Государственного контракта, что составило 172755,00 (Сто семьдесят две тысячи семьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, что подтверждается платежным поручением № 138 от 10.08.2022)

Согласно 3.1. Государственного контракта срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 30 сентября 2022 года. Согласно Акта о приемке выполненный работ №1 обязательство было исполнено 20.12.2022 года.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренныхГосударственнымконтрактом, виновная сторона несет

ответственность, установленную Федеральным законом от 05.04.2013 №44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 г. №570 и признании утратившим силу Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063», Постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 г. № 1011 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042», действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Согласно п. 9.3. Государственного контракта: в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п. 9.4 Государственного контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно документам (акт о приемке выполненных работ №1 от 20.12.2022), при установленном сроке до 30.09.2022, чем допустил просрочку оказания услуг по капитальному ремонту санитарного узла общежития отряда №3 по государственному контракту на 81 календарный день.

Неустойка за  просрочку исполнения обязательств по Контракту составила 11 660 руб. 96 коп., начисленных за период с 01.10.2022 по 20.12.2022.

02.08.2022 года между федеральным казенным учреждением «Исправительная колония №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области» (далее - Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «СККС» (далее - Исполнитель) был заключён государственный контракт на оказание услуг по капитальному ремонту (далее - Государственный контракт) №80, в соответствии с которым исполнитель взял на себя обязательства оказать услуги но капитальному ремонту санитарного узла общежития отряда №3 федерального казенного учреждения «Исправительная колония №4 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области» стоимостью 329 245 (Триста двадцать девять двести сорок пять) рублей 00 копеек в срок до 31 октября 2022 года.

В счет оплаты оказанных услуг Заказчик внёс Исполнителю предоплату сумма в размере 30% от общей стоимости Государственного контракта, что составило 98 773, 50 (Девяносто восемь тысяч семьсот семьдесят три) рубля 50 копеек, что подтверждается платежным поручением № 301 от 11.08.2022)

Согласно 3.1. Государственного контракта срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31 октября 2022 года. Согласно акта о приемке выполненных работ №1 обязательство было исполнено 20.12.2022 года.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренныхГосударственнымконтрактом, виновная сторона несет ответственность, установленную Федеральным законом от 05.04.2013 №44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 15.05.2017 г. №570 и признании утратившим силу Постановления Правительства РФ от 25.11.2013 г. №1063», Постановлением Правительства РФ от 02 августа 2019 г. № 1011 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 30.08.2017 г. №1042», действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Согласно п. 9.3. Государственного контракта: в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В соответствии с п.9.4 Государственного контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

Согласно документам (акт о приемке выполненных работ №1 от 20.12.2022), при установленном сроке до 31.10.2022, чем допустил просрочку оказания услуг по капитальному ремонту санитарного узла общежития отряда №3 по государственному контракту на 50 календарный день.

Неустойка за  просрочку исполнения обязательств по Контракту составила 4 115 руб. 56 коп., начисленных за период с 01.11.2022 по 20.12.2022.

17.03.2023 Истец в адрес Ответчика направил досудебную претензию от 15.03.2023 с требованием оплатить образовавшуюся задолженность в виде неустойки.

Претензия ответчиком оставлена без удовлетворения.

До настоящего времени обязательства по оплате задолженности ответчиком не исполнено.

Указанные обстоятельства послужили основанием обращения истца с настоящим иском в суд.

Оценив представленные в дело доказательства на основании статьи 71 АПК РФ, выслушав представителей сторон, арбитражный суд приходит к следующим выводам.

В силу статей 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с пункта 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить для другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.  

Согласно части 1 статьи 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно части 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно части 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполняемой работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора - требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Заказчик, получивший сообщение подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по договору строительного подряда работ либо, если это предусмотрено договором, выполненного этапа работ, обязан немедленно приступить к его приемке (часть 1 статьи 753 ГК РФ).

В соответствии с частью 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результат работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результат работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В силу статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Согласно пункту 1 статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой и другими способами, предусмотренными законом или договором. 

В соответствии со статьей 330 ГК РФ должник обязан уплатить кредитору неустойку в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

На основании пунктов 1 и 2 статьи 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (пункт 1 статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Неустойка за  просрочку исполнения обязательств по Контрактам составила  в общем 15 776 руб. 52 коп.. 

В нарушение требований статьи 65 АПК РФ в данном случае факт нарушения ответчиком предусмотренного контрактами №79, №80 обязательств, подтвержден материалами настоящего дела, а именно актами о приемке выполненных работ от 20.12.2022. Ответчиком данные обстоятельства, документально не опровергнуты.

Пунктом 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Пунктом 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Требования истца о взыскании неустойки обоснованны, подтверждены документально и подлежат удовлетворению.

Таким образом, иск является законным и обоснованным.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Капитальное строительство» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 4 Управления федеральной службы исполнения наказаний по Костромской области» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 15 776 руб. 52 коп. пени.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Капитальное строительство» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 2 000 рублей государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по истечении десяти дней после вступления решения в законную силу, при отсутствии в деле информации о том, что государственная пошлина уплачена ее плательщиком добровольно.

Решение может быть обжаловано  в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия, а со дня вступления решения в законную силу – в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в течение двух месяцев, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции  или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Костромской области.         

                      Судья                                                              О.В. Тетерин