7/2017-49235(1) 

Арбитражный суд Амурской области  

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163  тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48  

http://www.amuras.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 

резолютивная часть

Дело № А04-7472/2017

г. Благовещенск

11 сентября 2017 года

Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Н.С.Заноза, 

при ведении протокола и аудиозаписи секретарем судебного заседания ФИО1  рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление закрытого акционерного  общества «Комплексная проектная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  к государственному казенному учреждению управление автомобильных дорог Амурской  

области «Амурупрадор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о внесении изменений в государственный контракт, при участии в заседании: от истца: ФИО2 – дов. № 1 от 10.01.2017 сроком по 31.12.2017, паспорт 

от ответчика: ФИО3 – дов. № 1070 от 24.04.23017 сроком до 31.12.2017, паспорт  установил:  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

решил:

Исковые требования удовлетворить - внесении изменения в государственный контракт  от 29.03.2016г. № 3351, заключенный между закрытым акционерным обществом  «Комплексная проектная компания» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) и  государственным казенным учреждением управление автомобильных дорог Амурской  области «Амурупрадор» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), изложив пункт 4.1 в  

следующей редакции: «4.1. Сроки выполнения работ: начальный срок - со дня заключения  настоящего Контракта, срок окончания - 19 месяцев со дня заключения  

настоящего Контракта»; в Приложении № 2 «Календарный план выполнения работ» текст  графы первой пятого столбца изложить в следующей редакции: «19 месяцев с момента  заключения контракта.».  

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, может  быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой Арбитражный  апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.  

Судья Н.С.Заноза