19/2019-75153(1) 

Арбитражный суд Республики Карелия  

ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625, E-mail: info@karelia.arbitr.ru 

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-10849/2019

г. Петрозаводск

03 декабря 2019 года

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить частично.  

Продлить срок выполнения работ по государственному контракту   № 2аэф-18 от 04.07.2018 года на выполнение работ по объекту «Комплекс  причальных и волнозащитных сооружений на Онежском озере в Деревянской  бухте», установленный графиком производства работ (Приложение № 2 к  Контракту) и пунктом 9.1. Контракта, на срок по 25.12.2019 года.  

В остальной части иска отказать. 

2. Взыскать с Казенного учреждения Республики Карелия «Управление  капитального строительства Республики Карелия» (ОГРН: 

<

***>, ИНН:  

<

***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Тандем  проект» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 6000 руб. расходов по оплате  государственной пошлины.  

3. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного  месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный  апелляционный суд (191015, 

<

...>,  литер А) через Арбитражный суд Республики Карелия.  

Судья Михайлова А.В. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 24.05.2019 12:27:27

Кому выдана Михайлова Александра Викторовна