﻿477/2019-40694(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА 

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Красносельская, д. 20, тел. (843) 291-04-15  

http://faspo.arbitr.ru e-mail: info@faspo.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 арбитражного суда кассационной инстанции Ф06-51930/2019

Дело № А72-2566/2019

г. Казань

13 сентября 2019 года

Резолютивная часть постановления объявлена 12 сентября 2019 года.  

Полный текст постановления изготовлен 13 сентября 2019 года.  Арбитражный суд Поволжского округа в составе:  

председательствующего судьи Мельниковой Н.Ю., судей Хакимова И.А., Вильданова Р.А., при участии представителя: 

от общества с ограниченной ответственностью  «УльяновскЦентрГазСтрой» - Дубровиной Т.М. по доверенности  от 01.02.2019 (б/н),  

в отсутствие иных лиц, участвующих в деле, извещенных  надлежащим образом,  

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу  общества с ограниченной ответственностью «УльяновскЦентрГазСтрой»  

на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 26.04.2019  (судья Страдымова М.В.) и постановление Одиннадцатого арбитражного  

апелляционного суда от 02.07.2019 (председательствующий  судья Кузнецов С.А., судьи Балашева В.Т., Бросова Н.В.)  

по делу № А72-2566/2019 

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью  «УльяновскЦентрГазСтрой» (ОГРН 1047301330152, ИНН 7327032966)  к областному государственному казенному учреждению  «Ульяновскоблстройзаказчик» (ОГРН 1047300995169, ИНН 7325048632)  об урегулировании разногласий при заключении дополнительного  соглашения к государственному контракту,  

при участии третьих лиц: Министерство строительства и архитектуры  Ульяновской области, Министерство физической культуры и спорта  Ульяновской области,  

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью  «УльяновскЦентрГазСтрой» (далее – ООО «УльяновскЦентрГазСтрой»,  истец, заявитель) обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области  с иском к областному государственному казенному учреждению  «Ульяновскоблстройзаказчик» (далее – ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик», ответчик) об урегулировании  разногласий, возникших при заключении дополнительного соглашения  от 05.02.2019 № 6 к государственному контракту от 07.04.2017 № 7-17,  а именно, изложить пункт 2.2 государственного контракта от 07.04.2017   № 7-17 в следующей редакции: «2.2. Цена Контракта определена сметами,  сводкой затрат, приведенными в Приложении № 1 к Контракту, и  составляет 517 067 630 (пятьсот семнадцать миллионов шестьдесят семь  тысяч шестьсот тридцать) рублей 24 копеек, в том числе НДС 18 %.  Источник финансирования: Бюджет Ульяновской области на 2017 год,  2018 год, 2019 год, 2020 год, в том числе по годам:  

2017 год – 40 720 273,67 руб. (сорок миллионов семьсот двадцать  тысяч двести семьдесят три рубля 67 коп.);  

2018 год – 38 000 000,00 руб. (тридцать восемь миллионов рублей 00  копеек), в том числе: Федеральный бюджет – 10 000 000,00 (десять  миллионов рублей 00 коп.);  

Областной бюджет – 28 000 000,00 (двадцать восемь миллионов  рублей 00 коп.);  

2019 год – 112 230 000,00 (сто двадцать миллионов двести тридцать  тысяч рублей 00 коп.);  

2020 год -326 117 356,57 (триста двадцать шесть миллионов сто  семнадцать тысяч триста пятьдесят шесть рублей 57 коп.)  

В цену контракта включены причитающееся Подрядчику  вознаграждение и компенсация издержек Подрядчика, в том числе цена  контракта включает следующие расходы Подрядчика:  

собственно стоимость работ, соответствующих условиям Контракта  по качеству и объёму;  

стоимость расходных и иных материалов, необходимых для  выполнения работ;  

гарантийные обязательства; 

все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги (в том  числе налог на добавленную стоимость), сборы и другие обязательные  платежи;  

иные расходы Подрядчика, необходимые для исполнения условий  контракта и выполнения работ в полном объёме и надлежащего качества.»;  

2) пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции: 

«2.3.2. Расчёт за выполненные работы по заявкам Заказчика  осуществляется в рублях путём перечисления Заказчиком денежных  средств на расчётный счёт Подрядчика:  

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2017  год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2017,  

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2018  год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2018,  

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2019  год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2019,  

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2020  год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2020.  

На основании подписанного сторонами акта о приёмке выполненных  работ по форме КС-2 (Акта взаимосверки обязательств в случаях,  предусмотренных Контрактом), на основании представленного  Подрядчиком счета и счета-фактуры, а также справки о стоимости  выполненных работ (по форме КС-3)» (с учетом уточнения исковых  требований, принятого судом первой инстанции в порядке статьи 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –  АПК РФ).  

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих  самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены:  Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области,  Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области.  

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 26.04.2019  по делу № А72-2566/2019 в иске отказано.  

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда  от 02.07.2019 решение Арбитражного суда Ульяновской области  от 26.04.2019 оставлено без изменения.  

Не согласившись с решением арбитражного суда и постановлением  арбитражного апелляционного суда ООО «УльяновскЦентрГазСтрой»  обратилось в Арбитражный суд Поволжского округа с кассационной  жалобой, в которой просит обжалуемые судебные акты отменить, принять  по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований  в полном объеме по основаниям, изложенным в жалобе.  

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы,  проверив в соответствии с пунктом 1 статьи 286 АПК РФ правильность  применения судами первой и апелляционной инстанций норм  

материального и процессуального права, суд округа приходит к выводу  о наличии оснований для отмены обжалуемых судебных актов ввиду  следующего.  

Как следует из материалов дела и установлено арбитражными  судами первой и апелляционной инстанции, 04.07.2017 между  ОГКУ «Ульяновскоблстройзаказчик» (Заказчик) и  ООО «УльяновскЦентрГазСтрой» (Подрядчик) заключен государственный  контракт для обеспечения государственных нужд Ульяновской области,  согласно которого Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя  выполнение работ по объекту: строительство здания центра  художественной гимнастики в Засвияжском районе г. Ульяновска, далее –  работы, согласно проектной документации, локальным сметам, сводке  затрат (приложение № 1), которые являются неотъемлемой частью  государственного контракта (далее – Контракт).  

В соответствии с пунктом 2.1 Контракта цена является твердой и  определяется на весь срок выполнения контракта, за исключением случаев,  установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством  Российской Федерации.  

Пунктами 2.2 и 2.3 Контракта стороны предусмотрели, что цена  составляет 494 200 675,00, в том числе НДС 18 %.  

Источник финансирования: бюджет Ульяновской области на 2017  год, 2018 год, 2019 год, 2020 год, в том числе по годам:  

2017 год - 60 000 000,00руб. (шестьдесят миллионов рублей 00  копеек),  

2018 год - 128 000 000,00 руб. (сто двадцать восемь миллионов  рублей 00 копеек),  

2019 год - 293 571 950,00 руб. (двести девяносто три миллиона  пятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек),  

2020 год - 12 628 725,00 руб. (двенадцать миллионов шестьсот  двадцать восемь тысяч семьсот двадцать пять рублей 00 копеек).  

В цену Контракта включены причитающееся Подрядчику  вознаграждение и компенсации издержек Подрядчика, в том числе цена  Контракта включает следующие расходы Подрядчика:  

- собственно стоимость работ, соответствующих условиям Контракта  по: качеству объему;  

- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для  выполнения работ;  

- гарантийные обязательства; 

- все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги  (в том числе налог на добавленную стоимость), сборы и другие  обязательные платежи;  

- иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ  в полном объёме и надлежащего качества.  

В соответствии с пунктом 2.3 Контракта оплата производится  в следующем порядке:  

«п. 2.3.1. Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены. 

2.3.2. Расчет за выполненные по заявкам Заказчика работы  осуществляются в рублях путем перечисления заказчиком денежных  средств на расчетный счет Подрядчика:  

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2017  год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2017,  

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2018  год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2018,  

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2019  год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2019,  

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2020  год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2020,  

на основании подписанного сторонами акта о приемке выполненных  работ по форме КС-2 (Акта взаимосверки обязательств в случаях,  предусмотренных Контрактом), на основании представленного  

Подрядчиком счета и счета-фактуры, а также справки о стоимости  выполненных работ (по форме КС-3)».  

В соответствии с пунктом 9.1 Контракта изменение существенных  условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их  изменения по соглашению сторон, в том числе в следующем случае: если  по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом  количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10 % или  уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого  товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем  на 10 %. При этом по согласованию сторон допускается изменение  с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации  цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара,  дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной  в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем  на 10 % цены контракта.  

07 апреля 2018 года между сторонами также было заключено  Дополнительное соглашение № 1 к Контракту, которым стороны изменили  срок выполнения работ, пункты 2.2, 2.3.2 изложены в следующей  редакции:  

«2.2. Цена Контракта определена сметами, сводкой затрат,  приведенными в Приложении № 1 к Контракту, и составляет  494 200 675 руб. 00 коп., в том числе НДС 18 %. Источник  финансирования: Бюджет Ульяновской области на 2017 год, 2018 год,  2019 год, в том числе по годам:  

2017 год – 45 206 300 руб. 00 коп.; 2018 год – 124 445 233 руб. 00 коп.; 2019 год – 324 549 145 руб. 00 коп.» 2) пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции: 

«2.3.2. Расчёт за выполненные работы по заявкам Заказчика  осуществляется в рублях путём перечисления Заказчиком денежных  средств на расчётный счёт Подрядчика:  

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2017  год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2017,  

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2018  год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2018,  

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2019  год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2019,  

на основании подписанного Сторонами акта о приёмке выполненных  работ по форме КС-2 (Акта взаимосверки обязательств в случаях,  предусмотренных Контрактом), на основании представленного  Подрядчиком счета и счета-фактуры, а также справки о стоимости  выполненных работ (по форме КС-3)».  

Дополнительным соглашением от 24.11.2017 № 3 к Контракту  стороны внесли изменения в п. 2.2, изложив его в следующей редакции:  

«2.2. Цена Контракта определена сводкой затрат и локальными  сметами (Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 3) и  составляет 494 200 675 руб. 00 коп, в т.ч. НДС 18 %. Источник  финансирования: Бюджет Ульяновской области на 2017 год, 2018 год,  2019 год, в том числе по годам:  

2017 год – 40 720 273 руб. 67 коп.; 2018 год – 124 445 233 руб. 00 коп.; 2019 год – 329 035 171 руб. 33 коп.». 

Дополнительным соглашением от 31.07.2018 № 5 к Контракту  стороны внесли изменения в пункт 2.2, изложив его в следующей  редакции:  

«2.2. Цена Контракта определена сводкой затрат и локальными  сметами (Приложение № 1 к дополнительному соглашению № 5) и  составляет 494 200 675 руб. 00 коп, в т.ч. НДС 18 %. Источник  

финансирования: Бюджет Ульяновской области на 2017 год, 2018 год,  

2019 год, в том числе по годам: 1.1. 2017 год – 40 720 273 руб. 67 коп.; 1.2. 2018 год – 38 000 000 руб. 00 коп., в том числе: 1.2.1. федеральный бюджет – 10 000 000 руб. 00 коп.; 1.2.2. областной бюджет – 28 000 000 руб. 00 коп. 1.3. 2019 год – 415 480 401 руб. 33 коп.» 

Дополнительным соглашением от 05.02.2019 № 6 к Контракту  

стороны внесли изменения в пункт 2.2, пункт 2.3.2, изложив их  

в следующей редакции: 

«2.2. Цена Контракта определена сметами, сводкой затрат,  

приведенными в приложении № 1 к Контракту, и составляет  

494 200 675 руб. 00 коп, в т.ч. НДС 18 %. Источник финансирования:  

Бюджет Ульяновской области на 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год,  

в том числе по годам: 2017 год – 40 720 273 руб. 67 коп.; 

2018 год – 38 000 000 руб. 00 коп., в том числе:  федеральный бюджет – 10 000 000 руб. 00 коп.;  областной бюджет – 28 000 000 руб. 00 коп.  

2019 год – 112 230 000 руб. 00 коп., в том числе:  федеральный бюджет – 82 800 000 руб. 00 коп.;  областной бюджет – 29 430 000 руб. 00 коп.;  

2020 год – 303 250 401 руб. 33 коп. 

В цену контракта включены причитающееся Подрядчику  

вознаграждение и компенсация издержек Подрядчика, в том числе цена  

контракта включает следующие расходы Подрядчика:  

- собственно стоимость работ, соответствующих условиям Контракта  

по качеству и объёму; 

- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для  

выполнения работ; 

- гарантийные обязательства; 

- все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги (в  том числе налог на добавленную стоимость), сборы и другие обязательные  платежи;  

- иные расходы Подрядчика, необходимые для исполнения условий  контракта и выполнения работ в полном объёме и надлежащего качества.  

«2.3.2. Расчёт за выполненные работы по заявкам Заказчика  осуществляется в рублях путём перечисления Заказчиком денежных  средств на расчётный счёт Подрядчика:  

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2017  год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2017,  

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2018  год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2018,  

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2019  год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2019,  

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2020  год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2020,  

на основании подписанного Сторонами акта о приёмке выполненных  работ по форме КС-2 (Акта взаимосверки обязательств в случаях,  предусмотренных Контрактом), на основании представленного  Подрядчиком счета и счета-фактуры, а также справки о стоимости  выполненных работ (по форме КС-3)».  

Со стороны Подрядчика был подписан протокол разногласий  к Дополнительному соглашению от 05.02.2019 № 6 в следующей редакции:  

«2.2. Цена Контракта определена сметами, сводкой затрат,  приведенными в приложении № 1 к Контракту, и составляет  531 499 940 руб. 56 коп, в т.ч. НДС 18 %. Источник финансирования:  Бюджет Ульяновской области на 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год,  в том числе по годам:  

2017 год – 40 720 273 руб. 67 коп.; 

2018 год – 38 000 000 руб. 00 коп., в том числе: федеральный бюджет  

– 10 000 000 руб. 00 коп.; областной бюджет – 28 000 000 руб. 00 коп.; 2019 год – 112 230 000 руб. 00 коп.; 2020 год – 340 549 666 руб. 89 коп. 

В цену контракта включены причитающееся Подрядчику  

вознаграждение и компенсация издержек Подрядчика, в том числе цена  

контракта включает следующие расходы Подрядчика: 

- собственно стоимость работ, соответствующих условиям Контракта  

по качеству и объёму; 

- стоимость расходных и иных материалов, необходимых для  

выполнения работ; - гарантийные обязательства; 

- все подлежащие в связи с выполнением работ к уплате налоги (в  

том числе налог на добавленную стоимость), сборы и другие обязательные  

платежи; 

- иные расходы Подрядчика, необходимые для исполнения условий  

контракта и выполнения работ в полном объёме и надлежащего качества. 

«2.3.2. Расчёт за выполненные работы по заявкам Заказчика  

осуществляется в рублях путём перечисления Заказчиком денежных  

средств на расчётный счёт Подрядчика: 

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2017  

год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2017,  

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2018  

год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2018,  

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2019  

год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2019,  

в пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на 2020  

год в соответствии с п.п. 2.2. государственного контракта до 30.12.2020,  

на основании подписанного Сторонами акта о приёмке выполненных  

работ по форме КС-2 (Акта взаимосверки обязательств в случаях,  

предусмотренных Контрактом), на основании представленного  Подрядчиком счета и счета-фактуры, а также справки о стоимости  выполненных работ (по форме КС-3)».  

05 февраля 2019 года подрядчик направил в адрес Заказчика,  подписанные со своей стороны дополнительное соглашение № 6  с Протоколом разногласий и сводкой затрат на выполнение работ.  

Подрядчик также указал на необходимость, в связи с изменением  условий контракта, в части продления срока строительства до 2020 года,  применения индексов-дефляторов на оставшуюся сумму выполнения работ  по государственному контракту.  

Письмом за от 13.02.2019 исх. № 176  ОГКУ «Ульяновскстройзаказчик» сообщило подрядчику о невозможности  увеличения цены государственного контракта в связи с изменением сроков  выполнения работ и необходимостью применения индексов-дефляторов,  поскольку это не предусмотрено законодательством о контрактной  системе.  

В связи с указанными обстоятельствами истец обратился в суд  с настоящим иском.  

Руководствуясь положениями статей 450, 451, пунктом 2 статьи 767  Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ),  статьями 22, 34, 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон   № 44-ФЗ), арбитражные суды первой и апелляционной инстанций,  с учетом установленных обстоятельств дела, оценив поведение участников  спорных правоотношений, пришли к выводу о наличии оснований для  отказа истцу в иске.  

Между тем арбитражными судами первой и апелляционной  инстанций не учтены следующие обстоятельства.  

Из разъяснений пункта 42 постановления Пленума Верховного Суда  Российской Федерации от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах  применения общих положений Гражданского кодекса Российской  Федерации о заключении и толковании договора» следует, что при  принятии решения об обязании заключить договор или об урегулировании  разногласий, возникших при заключении договора, суд в резолютивной  части решения указывает условия этого договора, который считается  заключенным на этих условиях с момента вступления в законную силу  решения суда (пункт 4 статьи 445 ГК РФ).  

В силу положений статьи 173 АПК РФ по спору, возникшему при  заключении или изменении договора, в резолютивной части решения  указывается вывод арбитражного суда по каждому спорному условию  договора, а по спору о понуждении заключить договор указываются  условия, на которых стороны обязаны заключить договор.  

По смыслу статьи 446 ГК РФ в случаях передачи разногласий,  возникших при заключении публичного договора, на рассмотрение суда  на основании статьи 445 названного Кодекса условия договора,  по которым у сторон имелись разногласия, определяются в соответствии  с решением суда.  

Из приведенных норм следует, что требование о понуждении  заключить договор, обязательный для одной или обеих сторон,  перешедшее в спор об отдельных условиях этого договора, должно быть  рассмотрено и разрешено судом путем урегулирования разногласий  по спорным условиям.  

При рассмотрении преддоговорных споров обязанностью суда  является обеспечение защиты прав лица, обратившегося с требованием  о понуждении к заключению договора. Разрешение судом спора  о понуждении к заключению договора при уклонении от заключения  договора и при возникновении разногласий по конкретным его условиям  сводится по существу к внесению определенности в правоотношения  

сторон и установлению судом условий, не урегулированных сторонами  в досудебном порядке.  

Суд не может отказать истцу в иске, когда предложенные им  редакции условий договора не соответствуют требованиям действующего  законодательства. В этом случае при урегулировании спорного условия  суд исходит из императивной либо диспозитивной нормы  законодательства, регулирующего правоотношения сторон (статьи 421 и  422 ГК РФ).  

Также суд не может отказать истцу в иске и в том случае, когда он не  соглашается с предложенной истцом редакцией условия договора. В этом  случае разрешение судом спора сводится к внесению определенности  в правоотношения сторон и установлению судом условий, не  урегулированных сторонами в досудебном порядке, в редакции одной из  сторон либо суда. Таким образом, спор фактически судом не разрешен.  

Допущенные судом первой инстанции нарушения норм  процессуального и материального права, не устраненные судом  апелляционной инстанции, не могут быть самостоятельно устранены  судом кассационной инстанции, поскольку в силу части 2 статьи 287 АПК  РФ суд кассационной инстанции не наделен полномочиями  по установлению обстоятельств, исследованию и оценке доказательств.  

В связи с чем, обжалуемые судебные акты подлежат отмене, а дело  направлению в суд первой инстанции на новое рассмотрение.  

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить  отмеченные недостатки, разрешить спор по существу в соответствии  с требованиями действующего законодательства.  

На основании изложенного и руководствуясь статьями 286-289  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  Арбитражный суд Поволжского округа  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ульяновской области от 26.04.2019 и  постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда  от 02.07.2019 по делу № А72-2566/2019 отменить.  

Дело за указанным номером направить на новое рассмотрение  в Арбитражный суд Ульяновской области.  

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и  может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда  Российской Федерации в порядке и сроки, установленные статьями 291.1.,  291.2. Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Председательствующий судья Н.Ю. Мельникова  

Судьи И.А. Хакимов  

 Р.А. Вильданов