1462/2023-180792(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 

28 ноября 2023 года Дело № А33-19978/2023 

Красноярск 

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 21 ноября 2023 года. В полном объеме решение изготовлено 28 ноября 2023 года. 

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Нечаевой И.С., рассмотрев в  судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Расалка»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «КАТЭКстройкомплекс»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании задолженности, при участии в судебном заседании: 

от истца: ФИО1, представителя по доверенности от 01.01.2023,  представлен диплом о высшем юридическом образовании, личность удостоверена  паспортом,  

от ответчика: ФИО2, представителя по доверенности от 02.06.2023,  представлен диплом о высшем юридическом образовании, личность удостоверена  паспортом,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО3,  

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Расалка» (далее – истец, ООО  

«Расалка») обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с  

ограниченной ответственностью «КАТЭКстройкомплекс» (далее – ответчик, ООО «КСК»)  

о взыскании суммы основного долга по договору от 25.08.2020 № 25-8/2020 СП в размере  

3 654 894 рублей. 

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 07.07.2023  

возбуждено производство по делу. 

Протокольным определением от 23.08.2023 судебное заседание отложено на  

19.10.2023. 

Протокольным определением от 19.10.2023 судебное заседание отложено на  

21.11.2023. В судебное заседание 21.11.2023 явились представители истца, ответчика. Представитель истца поддержал исковые требования в полном объеме. Представитель ответчика возражал против удовлетворения исковых требований. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для  

рассмотрения спора, обстоятельства. 

25 августа 2020 года между ООО «КСК» (подрядчик) и ООО «Расалка»  

(субподрядчик) заключен договор подряда № 25-08/2020СП на выполнение работ по  

объекту: «ВЛ 10 кВ «ПС 35/10 «Север» - Куст 50» на территории Куюмбинского  

лицензионного участка» (далее – договор), в соответствии с пунктом 1.1. которого  субподрядчик обязуется своими силами выполнить по заданию подрядчика  подготовительные работы-мульчирование при строительстве Объекта: «ВЛ 10 кВ «ПС  35/10 «Север» - Куст 50», а подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы  в сроки, установленные настоящим договором.  

Согласно пункту 2.1. цена договора, в соответствии с расчетом цены договора не  превысит 14 970 472 руб. 80 коп., в том числе НДС 20% 2 495 078 руб. 80 коп.  

Стоимость работ может изменяться в сторону уменьшения после проведения  фактической таксации леса и подписания актов выполненных работ с заказчиком.  

Цена Договора является максимальной, включает все налоги и сборы, исчисляемые и  уплачиваемые Субподрядчиком на территории РФ и не подлежит пересмотру в сторону  увеличения.  

При согласовании Цены Договора Субподрядчик, являющийся профессиональным  участником рынка строительных услуг, полностью и всесторонне оценил размер затрат на  выполнение Работ по Договору, все прочие и лимитированные затраты, свое  вознаграждение и гарантирует, что указанная в п. 2.1 Цена Договора является достаточной  и не будет пересмотрена.  

Стороны также договорились о неприменении правил ст. 451 ГК РФ об изменении  цены Договора в связи с существенными изменениями обстоятельств.  

В случае уменьшения объемов работ по любой причине, цена договора подлежит  соразмерному уменьшению на стоимость работ, выполнение которых не требуется и  материально-технических ресурсов, которые не будут включены в объект.  

в соответствии с пунктами 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. договора оплата по договору  осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Подрядчиком денежных  средств по банковским реквизитам субподрядчика, указанным в настоящем договоре. В  случае изменения банковских реквизитов, субподрядчик обязан в течение одного дня с  момента изменения банковских реквизитов в письменной форме сообщить об этом  Подрядчику, с указанием новых реквизитов для осуществления расчетов. В противном  случае все риски, связанные с перечислением Подрядчиком денежных средств по  реквизитам, указанным в настоящем договоре субподрядчиком несет субподрядчик.  

Подрядчик оплачивает субподрядчику стоимость фактически выполненного объема  Работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика,  указанный в Договоре, или путем взаимозачета, или иными не противоречащими  законодательству способами на основании предоставленных Субподрядчиком,  оригиналов, надлежаще оформленных первичных учетных документов и только после  приемки Работ.  

Оплата выполненных Работ производится Подрядчиком не позднее 45 (сорока пяти)  календарных дней после предоставления Субподрядчиком оригиналов, соответствующих  первичных учетных документов и подписания Актов сдачи-приемки.  

Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета  Подрядчика или дата подписания акта зачета взаимных требований.  

В соответствии с пунктом 4.1. договора календарные сроки выполнения работ по  договору: срок начала выполнения работ - 30.08.2020, срок окончания выполнения работ30.09.2020.  

Календарные сроки должны соблюдаться Субподрядчиком строго в рамках  Календарного графика производства работ (Приложение № 2). Любые отступления  должны быть согласованы с Подрядчиком.  

Пунктом 5.1.1. договора предусмотрено, что приемка выполненных работ  производится по Актам формы КС-2, КС-3.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ после проведения  строительного контроля Подрядчика Субподрядчик направляет Подрядчику полный  комплект надлежаще оформленной исполнительной и первичной учетной документации,  

подписанный и заверенный уполномоченным представителем Субподрядчика с  официальным сопроводительным письмом для проведения приемки Работ (пункт 5.1.2.  договора).  

Как следует из пункта 5.1.3. договора, подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней  рассматривает полученную от Субподрядчика исполнительную и первичную учетную  документацию, осуществляет приемку работ и направляет подписанный со своей стороны  комплект исполнительной и первичной учетной документации Субподрядчику.  

В случае обнаружения отступлений от утвержденной к исполнению Рабочей  документации, переданной Субподрядчику или допущения Дефектов выполненных Работ  и/или в случае неправильного ведения исполнительной документации, либо ее  отсутствия/некомплектности, а также при наличии не устранённых нарушений  природоохранного законодательства на месте производства работ Подрядчик вправе  отказаться от приемки выполненных Субподрядчиком работ, до момента устранения  выявленных Дефектов/Недостатков.  

Фиксирование Дефектов/Недостатков, а также их устранение осуществляется в  порядке, установленном Договором.  

При наличии у Подрядчика замечаний к оформлению комплекта документов,  Субподрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения  письменных замечаний осуществить исправление комплекта документов и в указанный  срок возвратить Подрядчику исправленный комплект документов. Подрядчик обязан при  получении от Субподрядчика исправленного комплекта документов рассмотреть его, при  отсутствии замечаний подписать и вернуть один экземпляр комплекта документов  Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения. Подрядчик вправе  задерживать оплату по Договору в случае нарушения требований Договора по  оформлению комплекта документов и счетов-фактур до их устранения.  

Согласно пункту 5.1.4. договора при сдаче-приемке выполненных работ субподрядчик  прилагает к актам КС-2 копии первичных учетных документов, подтверждающих  стоимость выполненных работ.  

Непредставление Субподрядчиком указанных документов расценивается Сторонами  как нарушение порядка приемки Работ и является основанием отказа Подрядчика от  приемки выполненных Работ  

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты приемки Подрядчиком выполненных Работ,  Субподрядчик выставляет Подрядчику счета-фактуры. Счета-фактуры, составляемые  Субподрядчиком, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего  налогового законодательства, включая счета-фактуры на предоплату, если она  осуществлялась. Счета-фактуры, составляемые Подрядчиком и подписанные  руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с  указанием фамилий и инициалов.  

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным  распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени  организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты  уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо  иного аналога собственноручной подписи.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Субподрядчик  обязуется направить Подрядчику надлежащим образом заверенные копии документов,  подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные  соглашения к Договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о  назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера - приказа о назначении  на должность главного бухгалтера, для иных лиц - приказа (иного распорядительного  документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить  заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения  

перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Субподрядчик обязуется  незамедлительно сообщить об этом Подрядчику и предоставить указанные в настоящем  абзаце документы в отношении указанных лиц.  

В случае несоответствия Актам формы КС-2, КС-3 или счетов-фактур требованиям,  установленным действующим законодательством и/или настоящим Договором,  Подрядчик, получивший соответствующие документы, в течение 5 (Пяти) дней с даты  получения обязан проинформировать Субподрядчика об этом с указанием конкретных  допущенных нарушений, а Субподрядчик обязан незамедлительно принять меры по их  устранению.  

В декабре 2020 сторонами подписано дополнительное соглашение к договору № 1, в  соответствии с которым внесены изменения в пункт 1.1. договора, изложив его в  следующей редакции:  

«Субподрядчик обязуется своими силами выполнить по заданию подрядчика,  подготовительные работы – мульчирование при строительстве объектов:  

1.1.1. «ВЛ 10 кВ.«ПС 35/10 «Север» - Куст 50»; 

1.1.2. «ВЛ 35 кВ "т.26- Куст 49», ВЛ 35 кВ «ГТЭС ЭРУ-35 кВ-Куст № 3-т.ЗЗ» (участок  от ОП № 80А - ОП № 99)»;  

1.1.3. «ВЛ-10 кВ «ПС35/10 кВ«Восток»-Куст 123»; 1.1.4.«ПС 35/40 кВ «Восток» район куста № 116»; 1.1.5. «ПС 35/10 кВ «Север»; 

1.1.6. «ВЛ 10 кВ «ПС 35/10 «Севера - Куст 56»; «ВЛ 35 кВ заход на ПС 35/10 кБ  «Север», ВЛ 35 кВ «ГТЭС ЭРУ-35 кВ-Куст № 3-т,3-3» (участок- от ОП № 146 - ОП №  179)»;  

1.1.7. «Нефтегаэосборный трубопровод «Куст 3 - УДР ТГДС» (подводный переход  через р. Под каменная. Тунгуска)»;  

1.1.8. «Куст скважин № 56 (этап 1), Нефтегазосбарный трубопровод «Куст 56 - т.вр.  53», а подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в сроки,  установленные договором.  

Внесены изменения в п. 2.1 договора, изложив его в следующей редакции;  

«Цена договора, ориентировочно составляет 71 821 75 руб. 20 коп., в- том числе НДС  20% 11 947 029 руб. 20 коп.  

Стоимость работ по каждому объекту определяется Актом таксации с участием  кураторов.  

Цена Договора,; включает все налоги и сборы, исчисляемые и уплачиваемы г  Субподрядчиком на-территории РФ,  

При согласовании Цены Договора Субподрядчик, являющийся профессиональным  участником рынка строительных услуг, полностью и всесторонне оценил-размер затрат на  выполнение работ по договору, все прочие и лимитированные затраты, свое  вознаграждение и гарантирует, что указанная в п. 2.1. цена договора является  достаточной.  

Стороны также договорились о неприменении правил ст. 451 ГК РФ об изменении  цены договора в связи с существенными изменениями обстоятельств.  

В случае уменьшения объемов работ по любой причине, цена договора подлежит  соразмерному уменьшению на стоимость работ, выполнение которых не требуется  материально-технических ресурсов, которые не будут включены в Объект,».  

Внесены изменения в п. 4.1. договора, изложив его в следующей редакции:  «Календарные сроки выполнения работ по договору:  

-срок начала выполнения Работ -30.08.2020; - срок окончания выполнения Работ – 31.12.2020» 

19 апреля 2021 года сторонами подписано дополнительное соглашение № 2 к  договору, в соответствии с которым внесены изменения в пункт 1.1. договора, изложив  его в следующей редакции:  

«Субподрядчик обязуется своими силами выполнить по заданию подрядчика,  

подготовительные работы – мульчирование при строительстве объектов: 

1.1.1. «ВЛ10 кВ «ПС 35/10 «Север»-Куст 50»; 

1.1.2. «ВЛ 35 кВ «т.26- Куст 49», ВЛ 35 кВ «ГТЭС ЭРУ-35 кВ«Куст № 3-тЗЗ» (участок  

от ОП № 80А – ОП № 99)»; 1.1.3. «ВЛ-10 кВ «ПС 35/10 кВ «Восток» - Куст 123»; 1.1.4. «ПС 35/10 кВ «Восток» район куста № 116»; 1.1.5. «ПС 35/10 кВ «Север»;30 

1.1.6. ВЛ 10 кВ «ПС 35/10 «Север» - Кует 56»; «ВЛ 35 кВзаход на ПС 35/10 кВ  

«Север», ВЛ 35 кВ «ГТЭС ЭРУ-35 кВ-Куст № 3-т,33»(участок от ОП № 146 – ОП № 179)»  1.1.7. «Нефтегазосборный трубопровод «Куст 3 — УДР НДС» (подводный переход  

через р, Подкаменная Тунгуска)»; 

1.1.8. «Куст скважин № 56 (этап 1), Нефтегазосборный трубопровод «Куст 56 - т.вр.  

53» 

1.1.9. «Кефтегазосборный трубопровод «Куст I - УДР ЦПС», а Подрядчик обязуется  

принять и оплатить выполненные работы в. сроки, установленные настоящим договором.  Внесены изменения в п. 2.1 договора, изложив его в следующей редакции:  

«Цена договора, ориентировочно составляет, 89 401 893 руб. 94 коп., в: том: числе  

НДС 20% 14 900 315 руб. 66 коп. 

Стоимость работ по каждому объекту определяется Актом таксации с участием  

кураторов. 

Цена: Договора, включает все налоги и сборы, исчисляемые и уплачиваемые  

Субподрядчиком на территории РФ. 

При согласовании Цены Договора Субподрядчик, являющийся профессиональным  

участником рынка строительных услуг», полностью и всесторонне оценил размер затрат  

на выполнение Работ по Договору, все: прочие и лимитированные затраты, свое  

вознаграждение и гарантирует, что указанная в п. 2.1 Цена Договора является,  

достаточной. 

Стороны также договорились о: неприменении правил ст. 411 ГК РФ об изменении  

цены договора в связи с существенными изменениями обстоятельств. 

В случае уменьшения объемов. работ по любой причине, цена, договора подлежит  

соразмерному уменьшению на стоимость работ, выполнение которых не требуется и  

материально-технических ресурсов, которые не будут включены в Объект.». 

Внесены изменения в п. 4.1 договора, изложив его в следующей редакции:  

«Календарные сроки выполнения работ по договору: срок начала выполнения работ30.08.2020; срок окончания выполнения работ—30.06.2021».  

26 мая 2021 года сторонами подписано дополнительное соглашение № 3 к договору, в  

соответствии с которым внесены изменения в пункт 1.1. договора, изложив его в  

следующей редакции: 

«Субподрядчик обязуется своими силами выполнить по заданию подрядчика,  

подготовительные работы – мульчирование при строительстве объектов: 

1.1.1. «ВЛ 10 кВ «ПС30/10 «Север»-Куст 50»; 

1.1.2. «ВЛ 35 кВ «т,26- Куст 49», ВЛ 35 кВ «ГТЭС ЭРУ-35 кБ-Куст № 3-т.ЗЗ» (участок  

от ОП № 80А - ОП № 99)»; 1.1.3. «ВЛ-10 кВ «ПС 35/10 кВ «Восток» - Куст 123»; 1.1.4.«ПС 35/10 кВ «Восток» район куста № 116»; 1.1.5. «ПС 35/10 кВ«Север»;30 

1.1.6. «ВЛ 10 кВ «ПС 35/10 «Север» - Куст 56»; «ВЛ 35 кВ заход на ПС 35/10 кВ  

«Север», ВЛ 35 кВ «ГТЭС ЭРУ-35 кВ-Куст № 3-т.33» (участок от ОП № 146 - ОП № 179)»;  1.1.7. «Нефтегазосборный трубопровод «Куст 3 - УДР ППС» (подводный переход  

через р.Подкаменная Тунгуска)»; 

1.1.8. Куст скважин № 56 (этап 1), Нефтегазосборный трубопровод «Куст 56 - т.вр.  53»  

1.1.9. «Нефтещзоеборный трубопровод «Куст 3 - УДР ЦПС», 

1.1.10 ВЛ 10 кВ «Отпайка на Куст 58» (Протяженность L= 3,6 км в габаритах 35 кВ,  L= 0,120 км а габаритах 10 кВ)  

1.1.11. ВЛ 10 кВ «Отпайка на Куст 53» (Протяженность L= 4*473 км В габаритах 35  кВ, L=0,160 км в габаритах 10 кВ), а подрядчик обязуется принять и оплатить  выполненные работы в сроки, установленные настоящим договором.  

Внесены изменения в п. 2.1. договора, изложив его в следующей редакции:  

«Цена договора, ориентировочно составляет, 125 711 752 руб. 94 коп., в том числе  НДС 20% 20 951 958,82 (двадцать) рублей 66 копеек,  

Стоимость работ по каждому объекту определяется Актом таксации с участием  кураторов.  

Цена Договора, включает все налоги и сборы, исчисляемые и уплачиваемые  Субподрядчиком на территории РФ.  

При согласовании Цены Договора Субподрядчик, являющийся профессиональным  участником рынка строительных услуг, полностью и всесторонне оценил размер затрат на  выполнение; Работ по Договору, все прочие и лимитированные затраты, свое  вознаграждение гарантирует, что указанная в п. 2.1 Цена Договора является достаточной.  

Стороны также договорились о неприменении правил ст. 451 ГК РФ об изменении  цены Договора в связи с существенными изменениями обстоятельств.  

В: случае уменьшения объемов Работ по любой причине, цена договора подлежит  соразмерному уменьшению на стоимость работ, выполнение которых не требуется и  материально-технических ресурсов, которые не будут включены в Объект.»,  

Внесены изменения в п. 4.1. договора, изложив его в следующей редакции:  

«Календарные сроки выполнения Работ по Договору: срок начала выполнения работ30.08.2020, срок окончания выполнения работ -15.08.2021.».  

Истцом представлены в материалы дела счет-фактура от 27.01.2023 № 1 за  выполнение работ по объекту – обустройство Куюмбского месторождения.  Нефтегазосброный трубопровод «Куст 3-ЦПС (с переходом через р. Подкаменная  Тунгуска)» по договору субподряда от 25.08.2020 № 25-08/2020СП стоимостью  3 654 894 руб., подписанная в одностороннем порядке, справка о стоимости выполненных  работ от 17.01.2023 № 1 (отчетный период с 25.08.2020 по 17.01.2023), подписанная в  одностороннем порядке, в соответствии с которой стоимость выполненных работ и затрат  составляет 3 654 894 руб., акт за январь о приемке выполненных работ от 17.01.2023 № 1,  подписанный в одностороннем порядке, в соответствии с которым общая стоимость  выполненных работ составляет 2 607 219 руб. 60 коп., акт за январь о приемке  выполненных работ от 17.01.2023 № 2, подписанный в одностороннем порядке, в  соответствии с которым общая стоимость выполненных работ составляет  1 047 674 руб. 40 коп., акты освидетельствования скрытых работ.  

Истец числит за ответчиком задолженность в сумме 3 654 894 руб.  

Истец обращался к ответчику с претензией, в которой просил оплатить имеющуюся  задолженность по договору.  

Ответчик начисленный истцом долг не оплатил, в связи с чем истец обратился в  Арбитражный суд Красноярского края с настоящим исковым заявлением о взыскании с  ответчика суммы основного долга в размере 3 654 894 руб.  

Ответчик, возражая против удовлетворения заявленных требований, представил в  материалы дела отзыв на исковое заявление.  

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы сторон,  арбитражный суд пришел к следующим выводам.  

Согласно статье 123 Конституции Российской Федерации, статьям 7, 8, 9  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство  осуществляется на основе состязательности и равенства сторон.  

В соответствии со статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой  своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке,  установленном Кодексом.  

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации  гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и  иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя  и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла  гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.  

В статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что защита  гражданских прав осуществляется, в том числе путем восстановления положения,  существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право и  создающих угрозу его нарушения; присуждения к исполнению обязанности в натуре.  

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу  обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора)  определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и  т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от  должника исполнения его обязанности.  

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями  закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в  соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми  требованиями.  

Заключенный между сторонами договор от 25.08.2020 № 25-08/2020СП на  выполнение работ по объекту: «ВЛ 10 кВ «ПС 35/10 «Север – Куст 50» на территории  Куюмбинского лицензионного участка» по своей правовой природе является договором  подряда, отношения по которому регулируются главой 37 Гражданского кодекса  Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ).  

По договору подряда подрядчик обязуется по заданию другой стороны (заказчика)  выполнить определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик - принять  результат работ и оплатить его (статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).  

Согласно пункту 1 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в  договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее  определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в  соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.  

Истец указывает, что выполнил работы по договору в редакции дополнительного  соглашения от 26.05.2021 № 3. Так, в дополнительном соглашении № 3 от 26.05.2021 к  договору № 25-08/2020 указано, что субподрядчик выполняет по заданию подрядчика  подготовительные работы - мульчирование при строительстве Объектов (п. 1).  

В соответствии с абзацем 2 пункта 2.1. договора в редакции дополнительного  соглашения от 26.05.2021 № 3 стоимость работ по каждому объекту определяется Актом  таксации с участием кураторов.  

Срок начала выполнения работ - 30.08.2020, срок окончания выполнения работ15.08.2021 (п.4.1. договора в редакции дополнительного соглашения от 26.05.2021 № 3).  

Пунктом 5.1.1. договора предусмотрено, что приемка выполненных работ  производится по Актам формы КС-2, КС-3.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ после проведения  строительного контроля Подрядчика Субподрядчик направляет Подрядчику полный  комплект надлежаще оформленной исполнительной и первичной учетной документации,  

подписанный и заверенный уполномоченным представителем Субподрядчика с  официальным сопроводительным письмом для проведения приемки Работ (пункт 5.1.2.  договора).  

Как следует из пункта 5.1.3. договора, подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней  рассматривает полученную от Субподрядчика исполнительную и первичную учетную  документацию, осуществляет приемку работ и направляет подписанный со своей стороны  комплект исполнительной и первичной учетной документации Субподрядчику.  

В случае обнаружения отступлений от утвержденной к исполнению Рабочей  документации, переданной Субподрядчику или допущения Дефектов выполненных Работ  и/или в случае неправильного ведения исполнительной документации, либо ее  отсутствия/некомплектности, а также при наличии не устранённых нарушений  природоохранного законодательства на месте производства работ Подрядчик вправе  отказаться от приемки выполненных Субподрядчиком работ, до момента устранения  выявленных Дефектов/Недостатков.  

Фиксирование Дефектов/Недостатков, а также их устранение осуществляется в  порядке, установленном Договором.  

При наличии у Подрядчика замечаний к оформлению комплекта документов,  Субподрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения  письменных замечаний осуществить исправление комплекта документов и в указанный  срок возвратить Подрядчику исправленный комплект документов. Подрядчик обязан при  получении от Субподрядчика исправленного комплекта документов рассмотреть его, при  отсутствии замечаний подписать и вернуть один экземпляр комплекта документов  Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения. Подрядчик вправе  задерживать оплату по Договору в случае нарушения требований Договора по  оформлению комплекта документов и счетов-фактур до их устранения.  

Согласно пункту 5.1.4. договора при сдаче-приемке выполненных работ субподрядчик  прилагает к актам КС-2 копии первичных учетных документов, подтверждающих  стоимость выполненных работ.  

Непредставление Субподрядчиком указанных документов расценивается Сторонами  как нарушение порядка приемки Работ и является основанием отказа Подрядчика от  приемки выполненных Работ  

В срок не позднее 3 (трех) дней с даты приемки Подрядчиком выполненных Работ,  Субподрядчик выставляет Подрядчику счета-фактуры. Счета-фактуры, составляемые  Субподрядчиком, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего  налогового законодательства, включая счета-фактуры на предоплату, если она  осуществлялась. Счета-фактуры, составляемые Подрядчиком и подписанные  руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с  указанием фамилий и инициалов.  

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным  распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени  организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты  уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо  иного аналога собственноручной подписи.  

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Субподрядчик  обязуется направить Подрядчику надлежащим образом заверенные копии документов,  подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать дополнительные  соглашения к Договору, акты и счета-фактуры (для руководителя - документа о  назначении на должность руководителя, для главного бухгалтера - приказа о назначении  на должность главного бухгалтера, для иных лиц - приказа (иного распорядительного  документа) по организации, доверенности от организации), а также предоставить  заверенные организацией образцы подписей вышеуказанных лиц. В случае изменения  

перечня лиц, имеющих вышеуказанные полномочия, Субподрядчик обязуется  незамедлительно сообщить об этом Подрядчику и предоставить указанные в настоящем  абзаце документы в отношении указанных лиц.  

В случае несоответствия Актам формы КС-2, КС-3 или счетов-фактур требованиям,  установленным действующим законодательством и/или настоящим Договором,  Подрядчик, получивший соответствующие документы, в течение 5 (Пяти) дней с даты  получения обязан проинформировать Субподрядчика об этом с указанием конкретных  допущенных нарушений, а Субподрядчик обязан незамедлительно принять меры по их  устранению.  

Таким образом, договором установлен определенный порядок принятия работ. 

В рассматриваемом случае истец, обратившись в арбитражный суд с настоящим  иском о взыскании с ответчика стоимости не оплаченных работ, настаивал на том, что  выполнил спорные работы во исполнение подписанного сторонами дополнительного  соглашения от 26.05.2021 № 3 к договору.  

Между тем, предмет, объект, сроки выполнения работ и их цена являются  существенными условиями договора строительного подряда.  

Однако в рассматриваемом случае из материалов дела суд не усматривает  подтверждение факта согласования обеими сторонами объемов и стоимости выполненных  истцом работ.  

Истцом не доказано наличие согласованной воли сторон на проведение работ,  стоимость которых предъявлена истцом ко взысканию с ответчика.  

Судом в судебном заседании 21.11.2023 разъяснено сторонам право заявлять  ходатайство о назначении экспертизы с целью установления объемов и качества  выполненных работ, в соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации. Вместе с тем, истец указал, что не намерен заявлять такое  ходатайство.  

Как верно указано ответчиком, договор и приложения к нему не содержат условия о  предмете, стоимости работ и сроках выполнения спорных, предъявленных истцом к  оплате ответчиком работ. Само указание в договоре на обязательства по выполнению  работ на каком-либо объекте без согласования наименования работ и их объема не  является доказательством согласования предмета договора.  

Представленные истцом односторонние УПД (счет-фактура от 27.01.2023 № 1,  справка о стоимости выполненных работ от 17.01.2023 № 1(отчетный период с 25.08.2020  по 17.01.2023), акт за январь о приемке выполненных работ от 17.01.2023 № 1, акт за  январь о приемке выполненных работ от 17.01.2023 № 2 в данном случае не могут  являться надлежащими доказательствами фактического выполнения работ, поскольку из  материалов дела не следует поручение ответчиком истцу произвести указанные работы.  

Ответчик указывает, что в нарушение условий раздела 5 договора о порядке сдачи-приемки работ строительный контроль подрядчиком не проводился, отсутствовало  

официальное сопроводительное письмо, надлежаще оформленная исполнительная  документация.  

Акты о приемке выполненных работ (ф.КС-2) от 27.01.2023 №№ 1,2, справка ф.КС-3,  на которые ссылается истец, содержат указание на период выполнения работ с 25.08.2020  по 27.01.2023, наименование работ - разделка древесины мягких/твердых пород  различного диаметра ствола.  

Вместе с тем, как указывает ответчик, выполнение спорных работ в период с  25.08.2020-17/27.01.2023 не могло иметь место, поскольку дополнительное соглашение   № 3 к договору заключено сторонами только 26.05.2021, срок окончания Работ по  договору 15.08.2021.  

Истец в обосновании факта выполнения работ также ссылается на акты  освидетельствования скрытых работ №№ В/4 от 25.05.2021, Р/4 от 25.05.2021, Т/4 от  25.05.2021, Д/3 от 30.05.2021, В/3 от 30.05.2021, Р/3 от 30.05.2021, Т/3 от 30.05.2021, Д/3а  

от 30.05.2021, составленные конечным заказчиком, которыми, по мнению истца, работы  приняты в полном объеме.  

Вместе с тем, акты освидетельствования скрытых работ не подтверждают ни факт  согласования с ответчиком объема и стоимости таких работ, ни факт приемки  выполненных работ ответчиком; актами скрытых работ оформляются лишь  освидетельствование работ, которые носят скрытый характер; такие акты не являются по  своей сути первичными документами, предусмотренными сторонами, как  подтверждающие передачу работ заказчику в понимании статьи 753 ГК РФ (аналогичная  правовая позиция изложена например в Постановлении Восемнадцатого арбитражного  апелляционного суда от 29.08.2023 № 18АП-10464/2023 по делу № А07-4980/2022).  

Кроме того, акты освидетельствования скрытых работ составлены без участия  ответчика, отсутствуют сведения о его извещении об обследовании объекта и о  составлении соответствующих документов.  

Представленные истцом в материалы дела 12.10.2023 счета-фактуры от 25.04.2021,  акты от 25.04.2021, справки о стоимости выполненных работ от 25.04.2021, акты о  приемке выполненных работ от 25.04.2021 не подтверждают факт согласования спорного  объема работ и их стоимости с ответчика; кроме того, дополнительное соглашение № 3,  на которое ссылается истец в обоснование предмета иска, подписано сторонами позднее  даты составления указанных выше документов - 26.05.2021.  

Доводы ответчика о несоблюдении истцом претензионного порядка разрешения  спора, что является основанием для оставления искового заявления без рассмотрения,  также подлежат отклонению.  

Часть 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в  редакции, действующей на момент принятия обжалуемых судебных актов)  предусматривала, что если для определенной категории споров федеральным законом  установлен претензионный или иной досудебный порядок урегулирования либо он  предусмотрен договором, спор передается на разрешение арбитражного суда после  соблюдения такого порядка.  

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации (также в редакции, действовавшей до 01.06.2016)  арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия  к производству установит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный  порядок урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным  законом или договором.  

Согласно пунктам 20.2., 20.3. договора предъявление сторонами претензий  (требований) по уплате неустоек/пени и/или иных санкций за нарушение условий  Договора, а также претензий (требований) о возмещении убытков или иного ущерба по  Договору, производится письменно путем направления соответствующего требования  (претензии) об их уплате и/или возмещении.  

При этом письменное требование (претензия) считается признанной должником на 20  (двадцатый) календарный день после даты получения претензии, при отсутствии  письменных возражений.  

В качестве доказательства соблюдения претензионного порядка урегулирования  спора, истец представил в материалы дела претензию, направленную в адрес ответчика  посредством 23.05.2023 (почтовый идентификатор 66343183201274).  

При оценке доводов сторон о соблюдении претензионного порядка суд должен  учитывать, что основная задача применения досудебного порядка урегулирования спора  состоит в том, чтобы побудить стороны самостоятельно урегулировать возникший  конфликт или ликвидировать обнаружившуюся неопределенность в их отношениях. Его  использование позволяет стороне, права которой предполагаются нарушенными, довести  до сведения другой стороны (предполагаемого нарушителя) свои требования, а  

нарушителю - добровольно удовлетворить обоснованные требования, не допуская  переноса возникшего спора на рассмотрение суда.  

Под претензионным или иным досудебным порядком урегулирования спора  понимается одна из форм защиты гражданских прав, которая заключается в попытке  урегулирования возникшего спора самими спорящими сторонами до передачи этого спора  в арбитражный или иной компетентный суд. Такой порядок урегулирования спора  направлен на добровольное разрешение сторонами имеющегося гражданско-правового  конфликта без обращения за защитой в суд. При этом претензионный порядок не должен  являться препятствием для защиты лицом своих нарушенных прав в судебном порядке, в  связи с чем при решении вопроса о возможности оставления иска без рассмотрения суду,  исходя из указанных выше целей претензионного порядка, необходимо учитывать  перспективы возможного досудебного урегулирования спора.  

Из материалов настоящего дела и доводов ответчика не усматривается наличие его  воли на добровольное урегулирование спора.  

В пункте 4 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4  (2015), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2015,  по смыслу пункта 8 части 2 статьи 125, части 7 статьи 126, пункта 2 части 1 статьи 148  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, указано, что  претензионный порядок урегулирования спора в судебной практике рассматривается в  качестве способа, позволяющего добровольно без дополнительных расходов на уплату  госпошлины со значительным сокращением времени восстановить нарушенные права и  законные интересы. Такой порядок урегулирования спора направлен на его оперативное  разрешение и служит дополнительной гарантией защиты прав.  

Учитывая отсутствие доказательств реального намерения решить спор во  внесудебном порядке, непринятие ответчиком мер по урегулированию спора, в том числе  после подачи иска, суд не находит оснований для признания досудебного порядка  урегулирования споров несоблюденным. В этой связи указанные доводы ответчика  отклоняются судом.  

Таким образом, в нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации истцом не доказан факт согласования и приемка ответчиком  работ, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных  требований.  

При таких обстоятельствах с учетом недоказанности истцом факта согласования с  ответчиком объема и стоимости спорных работ суд отклоняет доводы истца и отказывает  в удовлетворении иска.  

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу  которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.  

С учетом результата рассмотрения иска и положений статьи 110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, понесенные истцом иску расходы по  уплате государственной пошлины относятся на него.  

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано  усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного  доступа (код доступа - ).   

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе  могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска отказать.  

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть  

обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в  

Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. 

Судья И.С. Нечаева