АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru 

(в соответствии со ст. 176 АПК РФ) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ  

17 октября 2019 года по результатам рассмотрения дела № А31-5964/2019 суд  первой инстанции в составе председательствующего судьи Мофа Виталия Дмитриевича в  соответствии со ст. ст. 167-170, 176 АПК РФ  

РЕШИЛ:

иск удовлетворить, в связи с чем обязать общество с ограниченной  ответственностью «Строительное управление-2» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) устранить недостатки в выполненных по контракту от 1 декабря 2014  года № 38-КВ работах, в связи с чем в течение 15 дней со дня вступления решения в  законную силу выполнить работы в результате которых:  

1. устранить просадку асфальтобетонного основания вокруг дождеприемного  колодца № 1 (нумерация по исполнительской съемке);  

2. устранить выбоину в асфальтобетонном покрытии дорожного полотна  (размером: диаметр 50 см, глубина 13 см), расположенную на обочине проезжей части (на  расстоянии около 2 метров от дождеприемного колодца № 1);  

3.  устранить наличие коррозии на металлическом перильном ограждении  сооружения моста и ограждениях спусков с моста через р. Белилка, в том числе, устранить  наличие коррозии на металлических стойках дорожных знаков и светофоров;  

4. устранить трещины в асфальтобетонном покрытии протяженностью 9  метров в местах прохождения деформационных швов между балками пролетного  строения и переходными плитами спуска;  

5. устранить просадку основания при сопряжении переходных плит с  пролетными строениями моста со стороны съезда по ул. Коммунаров г. Костромы  (глубиной до 7 см, шириной 4-5 м).  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительное  управление-2» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  6000 рублей государственной пошлины.  

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по  истечении десяти дней со дня вступления решения в законную силу при отсутствии у суда  сведений о добровольной уплате государственной пошлины в соответствии с требованиями  пункта 2 части 1 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации.  

Решение

 может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй  арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и, если решение  было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если  арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы, в кассационном порядке в Федеральный  арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления  решения в законную силу. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через  Арбитражный суд Костромской области.  

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании и приобщена к делу.  

Судья В.Д. Мофа