10/2024-15871(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Климова ул., 62 д., Курган, 640021, https://kurgan.arbitr.ru, 

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07 E-mail: info@kurgan.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е

 резолютивная часть

Дело № А34-4447/2022

г. Курган

14 февраля 2024 года

Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Останина Я.А.  

при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания  ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании дело по иску НЕКОММЕРЧЕСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная  фирма «Феникс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании устранить недостатки, взыскании штрафа,  

третье лицо: 1. Акционерное общество «Территориальный проектный  институт гражданского строительства «Кургангражданпроект» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ «КУРГАНГАЗСЕТЬ» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>),  

при участии: от истца: явки нет, извещен; от ответчика: ФИО2, доверенность № 01-2024 от 09.01.2024; от третьих лиц – явки нет, извещены, 

установил:

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

Иск удовлетворить частично.  

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА «ФЕНИКС» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок, не превышающий одного месяца с  даты вступления настоящего решения в законную силу, устранить  выявленные дефекты и недостатки после выполнения работ по договору  подряда № КР-078/16 от 10.06.2016 на выполнение работ по капитальному  ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: 

<

...>:  

- участки цоколя здания с разрушающимся отделочным слоем со  стороны рядом стоящего здания по ул. Ленина, 24, цокольная отделка  разрушена, отслаивается от поверхности фасада;  

- по всем поверхностям фасада здания - многочисленные трещины,  вздутия и отслоения окрасочного слоя;  

- отдельные участки с неоднородным окрасочным слоем; 

- разрушения отделочного и окрасочного слоя на боковых потолочных  поверхностях балконов (типа эркер) со стороны главных фасадов ул.  К.Маркса и ул. Ленина.  

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА  «ФЕНИКС» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД  КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>):  

- штраф в размере 8743 руб. 50 коп.; 

- судебные расходы на уплату государственной пошлины в размере  8000 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в  течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), а также  в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Уральского  округа в течение двух месяцев со дня его вступления в законную силу при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  Апелляционные и кассационные жалобы подаются через Арбитражный суд  Курганской области.  

Судья Я.А. Останин