АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, 

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-607/23

г. Уфа

31 мая 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 24.05.2023

Полный текст решения изготовлен 31.05.2023

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Хазиахметовой З. Р., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Щукиной Ю.О., рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к открытому акционерному обществу «Строительная компания Трест №21» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 127 895 руб. 83 коп. долга по договору от 06.02.2013 №10-511, 114 330 руб. 80 коп. пени, начисленной за период с 13.08.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 30.11.2022, 116 825 руб. 16 коп. долга по договору от 06.02.2013 №10-512, 79 631 руб. 88 коп. пени, начисленной за период с 16.09.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 30.11.2022

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1 по доверенности от 05.01.2023,

от ответчика, третьего лица – не явились, извещены.

Общество с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к открытому акционерному обществу «Строительная компания Трест №21» о взыскании 127 895 руб. 83 коп. долга по договору от 06.02.2013 №10-511, 114 330 руб. 80 коп. пени, начисленной за период с 13.08.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 30.11.2022, 116 825 руб. 16 коп. долга по договору от 06.02.2013 №10-512, 79 631 руб. 88 коп. пени, начисленной за период с 16.09.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 30.11.2022.

Определением от 13.01.2023 указанное исковое заявление принято к производству суда, дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 АПК РФ.

Определением от 10.03.2023 суд перешел к рассмотрению по общим правилам искового производства.

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв на иск не представил, каких-либо ходатайств не заявил.

Согласно части 1 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном указанным Кодексом, не позднее чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено названным Кодексом.

В соответствии с частью 4 данной статьи судебное извещение, адресованное юридическому лицу, направляется арбитражным судом по месту нахождения юридического лица, которое в свою очередь определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом арбитражным судом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта, направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем организация почтовой связи уведомила арбитражный суд.

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц местом нахождения ответчика является: 450000, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, УФА ГОРОД, МАКСИМА ГОРЬКОГО УЛИЦА, 36. 

Конверты с копиями судебных актов по делу (определениями от 13.01.2023 о принятии иска к рассмотрению в порядке упрощенного производства, от 10.03.2023 о переходе к рассмотрению дела по общим правилам искового производства и назначении предварительного судебного заседания), направленные по юридическому адресу ответчика, возвращены в суд с отметкой органов связи об истечении срока хранения. При этом основания полагать, что организацией почтовой связи нарушен порядок их доставки, у суда отсутствуют.

При таких обстоятельствах суд на основании пункта 2 части 4 статьи 123 АПК РФ признает ответчика надлежащим образом извещенным о начавшемся процессе, времени и месте рассмотрения дела.

По смыслу статей 9, 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и пункта 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" общество «СК Трест №21» несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу его регистрации, даже если оно фактически не находится по указанному адресу.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" тексты судебных актов по делу в установленный срок размещены на официальном сайте арбитражного суда в сети "Интернет".

Принимая во внимание, что ответчик получение корреспонденции по юридическому адресу не обеспечивает, почтовые отправления возвращаются за истечением срока хранения, суд рассматривает дело в отсутствие представителя ответчика в соответствии со статьей 156 АПК РФ.

При отсутствии возражений сторон относительно рассмотрения дела по существу суд, руководствуясь положениями статьи 137 АПК РФ и разъяснениями, изложенными в пункте 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству", завершил подготовку дела и перешел к судебному разбирательству.

Дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика в соответствии со статьей 156 АПК РФ.

Рассмотрев заявленные требования, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

На основании заявки ОАО «СК Трест № 21» от 12.07.2012 г. № 6544 между ООО «Башкирэнерго» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-511 от 06.02.2013 г., выданы технические условия № 146/1-5344-5290-788/СПП от 12.07.2012 г.

В соответствии с данным договором ООО «Башкирэнерго»,  приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств: жилой дом № 8 (А, Б), встроенные помещения, автостоянка литер 34, ИТП, расположенного в 

<

...> с максимальной мощностью 293,5 кВт, II категории надежности, а  ОАО «СК Трест № 21» обязалось выполнить мероприятия, предусмотренные Договором и техническими условиями, и оплатить расходы на технологическое присоединение.

Согласно п. 10 договора № 1, стоимость услуг по технологическому присоединению, выполняемому сетевой организацией по настоящему Договору, определяется в соответствии с Постановлением Государственного Комитета Республики Башкортостан по тарифам от 16.03.2011г. № 39 и составляет: 530671.07 рублей (пятьсот тридцать тысяч шестьсот семьдесят один рубль 07 копеек), включая НДС 18% -   80949.82 рублей (Восемьдесят тысяч девятьсот сорок девять рублей 82 копейки).

Пунктом 11 договора № 1 предусмотрено внесение платы за технологическое присоединение в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение размере 53067.11 рублей (Пятьдесят три тысячи шестьдесят семь рублей 11 копеек), в том числе НДС 18% -  8094.98 рублей (Восемь тысяч девяносто четыре рубля 98 копеек) вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 159201.32 рублей (Сто пятьдесят девять тысяч двести один рубль 32 копейки), включая НДС 18% - 24284.95 рублей (Двадцать четыре тысячи двести восемьдесят четыре рубля 95 копеек) вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение в размере 106134.21 рублей (Сто шесть тысяч сто тридцать четыре рубля 21 копейка), включая НДС 18% - 16189.96 рублей (Шестнадцать тысяч сто восемьдесят девять рублей 96 копеек) вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 159201.32 рублей (Сто пятьдесят девять тысяч двести один рубль 32 копейки), включая НДС 18% - 24284.95 рублей (Двадцать четыре тысячи двести восемьдесят четыре рубля 95 копеек) вносятся в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение в размере 53067.11 рублей (Пятьдесят три тысячи шестьдесят семь рублей 11 копеек), включая НДС 18% - 8094.98 рублей (Восемь тысяч девяносто четыре рубля 98 копеек) вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

01.10.2014 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № 14-10-6544-03-01 к договору об осуществлении технологического присоединения № 10-511 от 06.02.2013 г., в котором сторонами достигнута договоренность о продлении сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению до 13.08.2015 г.

13.01.2015 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № 14-10-6544-03-02 к договору об осуществлении технологического присоединения № 10-511 от 06.02.2013 г., в соответствии с которым Сетевая организация уменьшила отпуск мощности Заявителю в соответствии с письмом Заявителя №24/2098 от 19.11.2014г. (вх. № 6544 от 28.11.2014).  Всего разрешенная мощность по договору № 10-511 от 06.02.2013 г.  составила 185 кВт. Заявителю были выданы новые технические условия № 14-10-6544-04-03-Промыш от 11.12.2014 г. Стоимость услуг Сетевой организации с учетом уменьшения мощности по договору №10-511 от 06.02.2013 г. составила: 334494.54 рублей (Триста тридцать четыре тысячи четыреста девяносто четыре рубля 54 копейки), включая НДС 18% -  51024.59 рублей  (Пятьдесят одна тысяча двадцать четыре рубля 59 копеек). Оплаченная сумма по договору: 212 268,11 рублей (Двести двенадцать тысяч двести шестьдесят восемь рублей 11 копеек). Кроме того, сторонами достигнута договоренность о продлении сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению до 11.12.2015 г.

08.09.2017 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № 17-10-6544-03-05 к договору об осуществлении технологического присоединения № 10-511 от 06.02.2013 г., в котором сторонами достигнута договоренность о продлении сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению на 4 месяца со дня заключения дополнительного соглашения.

06.03.2018 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № 18-10-6544-03-07 к договору об осуществлении технологического присоединения № 10-511 от 06.02.2013 г., в котором сторонами достигнута договоренность о продлении сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению до 30.12.2018 г.

28.03.2019 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № 19-10-6544-03-09 к договору об осуществлении технологического присоединения № 10-511 от 06.02.2013 г. в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», в соответствии с которым налоговая ставка НДС, установленная п.3 ст.164 Налогового Кодекса РФ, с 01.01.2019 года составляет 20%. Учитывая вышеизложенное, стороны пришли к соглашению о том, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 16.03.2011 г. № 39 и составляет: 340 163,94 рублей (Триста сорок тысяч сто шестьдесят три рубля 94 копейки), включая НДС 20% - 56 693,99 рублей (Пятьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто три рубля 99 копеек). Кроме того, сторонами достигнута договоренность о продлении сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению до 30.12.2019 г.

20.07.2019 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № 19-10-6544-03-10 к договору об осуществлении технологического присоединения № 10-511 от 06.02.2013 г., в котором сторонами достигнута договоренность о продлении сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению до 30.12.2019 г.

30.01.2020 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № 20-10-6544-03-12 к договору об осуществлении технологического присоединения № 10-511 от 06.02.2013 г., в котором сторонами достигнута договоренность о продлении сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению до 30.09.2020 г.

09.12.2020 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № 20-10-6544-03-14 к договору об осуществлении технологического присоединения № 10-511 от 06.02.2013 г., в соответствии с которым ООО «Башкирэнерго» уведомило ОАО «СК Трест № 21» об изменении банковских реквизитов сетевой организации.

15.12.2020 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № 20-10-6544-03-15 к договору об осуществлении технологического присоединения № 10-511 от 06.02.2013 г., в котором сторонами достигнута договоренность о продлении сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению до 30.09.2021 г.

Как указывает истец, с его стороны в рамках заключенного договора и в установленные сроки мероприятия капитального характера, предусмотренные техническими условиями выполнены в полном объеме, что подтверждается подписанным актом об осуществлении технологического присоединения № 21-10-6544-16-01 от 29.07.2021 г.

По состоянию на 26.12.2022 г. сумма долга ОАО «СК Трест № 21» перед ООО «Башкирэнерго» по договору № 10-511 от 06.02.2013 г. составляет 127 895 руб. 83 коп.

На основании заявки ОАО «СК Трест № 21» от 12.07.2012 г. № 6588 между обществом «Башкирэнерго» был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 10-512 от 06.02.2013 г. (далее – договор № 2), выданы технические условия № 146/1-5344-5291-788/СПП от 27.07.2012 г.

В соответствии с данным договором ООО «Башкирэнерго»,  приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств: жилой дом № 17 (А, Б), встроенные помещения, подземная автостоянка, ИТП, расположенного в 

<

...> с максимальной мощностью 209,4 кВт, II категории надежности, а  ОАО «СК Трест № 21» обязалось выполнить мероприятия, предусмотренные Договором и техническими условиями, и оплатить расходы на технологическое присоединение.

Согласно п. 10 договора № 2, стоимость услуг по технологическому присоединению, выполняемому сетевой организацией по настоящему Договору, определяется в соответствии с Постановлением Государственного Комитета Республики Башкортостан по тарифам от 16.03.2011г. № 39 и составляет: 378 611.66 рублей (Триста семьдесят восемь тысяч шестьсот одиннадцать рублей 66 копеек), включая НДС 18% -   57 754.32 рублей (Пятьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 32 копейки).

Пунктом 11 договора № 2 предусмотрено внесение платы за технологическое присоединение в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение в размере 37861.17 рублей (Тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят один рубль 17 копеек), в том числе НДС 18% -  5775.43 рублей (Пять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 43 копейки) вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 113583.50 рублей (Сто тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят три рубля 50 копеек), включая НДС 18% - 17326.30 рублей (Семнадцать тысяч триста двадцать шесть рублей 30 копеек) вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение в размере 75722.33 рублей (Семьдесят пять тысяч семьсот двадцать два рубля 33 копейки), включая НДС 18% - 11550.86 рублей (Одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят рублей 86 копеек) вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 113583.50 рублей (Сто тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят три рубля 50 копеек), включая НДС 18% - 17326.30 рублей (Семнадцать тысяч триста двадцать шесть рублей 30 копеек) вносятся в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон;

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение в размере 37861.17 рублей (Тридцать семь тысяч восемьсот шестьдесят один рубль 17 копеек), включая НДС 18% - 5775.43 рублей (Пять тысяч семьсот семьдесят пять рублей 43 копейки) вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

01.10.2014 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № 14-10-6588-03-01 к договору об осуществлении технологического присоединения № 10-512 от 06.02.2013 г., в котором сторонами достигнута договоренность о продлении сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению до 05.01.2015 г.

13.01.2015 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № 14-10-6588-03-02 к договору об осуществлении технологического присоединения № 10-512 от 06.02.2013 г., в соответствии с которым Сетевая организация уменьшила отпуск мощности Заявителю в соответствии с письмом Заявителя № 24/2098 от 19.11.2014г. (вх.6588 от 28.11.2014). Всего разрешенная мощность по договору № 10-512 от 06.02.2013г. составит 145,9 кВт. Заявителю были выданы новые технические условия № № 14-10-6588-04-03-Промыш от 15.12.2014 г.  Стоимость услуг Сетевой организации с учетом уменьшения мощности по договору № 10-512 от 06.02.2013 г. составила: 263798.67 рублей (Двести шестьдесят три тысячи семьсот девяносто восемь рублей 67 копеек), включая НДС 18% - 40 240.48 рублей (Сорок тысяч двести сорок рублей 48 копеек). Оплаченная сумма по договору: 151 444,67 рублей (Сто пятьдесят одна тысяча четыреста сорок четыре рубля 67 копеек). Кроме того, сторонами достигнута договоренность о продлении сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению до 15.12.2015 г.

08.09.2017 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № 17-10-6588-03-05 к договору об осуществлении технологического присоединения № 10-512 от 06.02.2013 г., в котором сторонами достигнута договоренность о продлении сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению на 4 месяца со дня заключения дополнительного соглашения.

06.03.2018 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № 18-10-6588-03-07 к договору об осуществлении технологического присоединения № 10-512 от 06.02.2013 г., в котором сторонами достигнута договоренность о продлении сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению до 30.12.2018 г.

11.04.2019 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № 19-10-6588-03-09 к договору об осуществлении технологического присоединения № 10-512 от 06.02.2013 г. в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.08.2018 №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», в соответствии с которым налоговая ставка НДС, установленная п.3 ст.164 Налогового Кодекса РФ, с 01.01.2019 года составляет 20%. Учитывая вышеизложенное, стороны пришли к соглашению о том, что размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Постановлением Государственного комитета Республики Башкортостан по тарифам от 16.03.2011 г. № 39 и составляет: 268 269,83 рублей (Двести шестьдесят восемь тысяч двести шестьдесят девять рублей 83 копейки), включая НДС 20% - 44 711,64 рублей (Сорок четыре тысячи семьсот одиннадцать рублей 64 копейки). Кроме того, сторонами достигнута договоренность о продлении сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению до 30.12.2019 г.

20.07.2019 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № 19-10-6588-03-10 к договору об осуществлении технологического присоединения № 10-512 от 06.02.2013 г., в котором сторонами достигнута договоренность о продлении сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению до 30.12.2019 г.

30.01.2020 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № 20-10-6588-03-12 к договору об осуществлении технологического присоединения № 10-512 от 06.02.2013 г., в котором сторонами достигнута договоренность о продлении сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению до 30.09.2020 г.

09.12.2020 г. между сторонами заключено дополнительное соглашение № 20-10-6588-03-14 к договору об осуществлении технологического присоединения № 10-512 от 06.02.2013 г., в соответствии с которым ООО «Башкирэнерго» уведомило ОАО «СК Трест № 21» об изменении банковских реквизитов сетевой организации, а также сторонами достигнута договоренность о продлении сроков выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению до 30.09.2021 г.

Как указывает истец, с его стороны в рамках заключенного договора и в установленные сроки мероприятия капитального характера, предусмотренные техническими условиями выполнены в полном объеме, что подтверждается подписанным актом об осуществлении технологического присоединения № 21-10-6588-16-01 от 01.09.2021 г.

По состоянию на 26.12.2022 г. сумма основного долга ОАО «СК Трест № 21» перед ООО «Башкирэнерго» по договору № 10-512 от 06.02.2013 г. составляет 116 825 руб. 16 коп.

Ссылаясь на указанные обстоятельства, истец направил в адрес ответчика претензии с требованием уплаты долга, а впоследствии обратился в суд с рассматриваемым иском. 

Проанализировав условия договоров, суд приходит к выводу, что он является договором об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих (теплопринимающих) устройств, и регулируется нормами главы 39 ГК РФ, общими положениями об обязательствах и о договоре (раздел III ГК РФ), а также специальными нормативными актами, закрепляющими правила подключения к системам энергоснабжения. 

Такие нормы содержатся в статье 26 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (далее - Закон N 35-ФЗ) и Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила N 861). 

В соответствии с абзацем 15 статьи 26 Закона N 35-ФЗ по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики). 

В силу пункта 2 статьи 23.2 Закона N 35-ФЗ плата за технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии определяется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, в том числе посредством применения стандартизированных тарифных ставок. Размер платы за технологическое присоединение и (или) размер стандартизированных тарифных ставок определяются, исходя из расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению сетевой организацией в ходе технологического присоединения, включая строительство, реконструкцию объектов электросетевого хозяйства. 

В пункте 7 Правил N 861 предусмотрено, что технологическое присоединение - это состоящий из нескольких этапов процесс, целью которого является создание условий для получения электрической энергии потребителем через энергоустановки сетевой организации, завершающийся фактической подачей напряжения и составлением акта об осуществлении технологического присоединения. 

Исходя из положений пункта 16 Правил N 861, технические условия представляют собой перечень мероприятий, которые стороны договора должны выполнить в целях создания фактической возможности для присоединения энергоустановок и подачи электроэнергии потребителю. 

Согласно пункту 18 Правил N 861 мероприятия по технологическому присоединению включают в себя в том числе: 

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; 

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

В силу статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Поскольку в нарушение ст. 65 АПК РФ доказательств оплаты либо наличия обстоятельств, служащих основанием для уменьшения размера задолженности, ответчиком не представлено, доводы истца ответчиком документально не опровергнуты, требование истца о взыскании суммы затрат по исполнению обязательств в размере 244 720 руб. 99 коп. подлежит удовлетворению. 

Истец также предъявил требование о взыскании 114 330 руб. 80 коп. пени, начисленной за период с 13.08.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 30.11.2022, 79 631 руб. 88 коп. пени, начисленной за период с 16.09.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 30.11.2022 неустойки за нарушение срока оплаты мероприятий по технологическому присоединению.

Согласно пункту 1 статьи 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. 

В соответствии с пунктом 17 Договоров № 1 и № 2 в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору, такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. 

Расчет неустойки проверен судом, признан правильным. Контррасчет неустойки ответчиком не представлен, методика расчета не оспорена. 

Учитывая, что материалами дела подтверждается нарушение ответчиком сроков оплаты услуг по технологическому присоединению (мероприятия, предусмотренные техническими условиями, не выполнены), суд приходит к выводу о законности и обоснованности исковых требований в части взыскания неустойки за указанный истцом период. 

Государственная пошлина в сумме 11 774 руб. на основании статьи 110 АПК РФ подлежит возмещению истцу за счет ответчика, поскольку исковые требования удовлетворены полностью. 

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с открытого акционерного общества «Строительная компания Трест №21» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Башкирские распределительные электрические сети» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 127 895 руб. 83 коп. долга по договору от 06.02.2013 №10-511, 114 330 руб. 80 коп. пени, начисленной за период с 13.08.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 30.11.2022, 116 825 руб. 16 коп. долга по договору от 06.02.2013 №10-512, 79 631 руб. 88 коп. пени, начисленной за период с 16.09.2021 по 31.03.2022, с 02.10.2022 по 30.11.2022, а также 11 774 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан. 

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. 

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru. 

 

Судья З.Р. Хазиахметова