АРБИТРАЖНЫЙ СУД

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА

 

улица Пушкина, дом 45, Хабаровск, 680000, официальный сайт: www.fasdvo.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ Ф03-695/2019

09 апреля 2019 года

г. Хабаровск

Резолютивная часть постановления объявлена 09 апреля 2019 года.

Полный текст постановления изготовлен 09 апреля 2019 года.

Арбитражный суд Дальневосточного округа в составе:

Председательствующего судьи: В.А. Гребенщиковой

Судей: С.Н. Новиковой, О.В. Цирулик           

при участии:

от истца:  федерального государственного унитарного предприятия «Ремонтно-строительное управление» Управления делами Президента Российской Федерации – Чурганов В.В., представитель по доверенности от 29.12.2018 № 168/2018

рассмотрев в проведенном с использованием систем видеоконференц-связи судебном заседании кассационную жалобу федерального государственного унитарного предприятия «Ремонтно-строительное управление» Управления делами Президента Российской Федерации

на решение от 27.09.2018, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2018

по делу № А51-13207/2018 Арбитражного суда Приморского края

дело рассматривали: в суде первой инстанции – судья О.А. Жестилевская, в апелляционном суде – судьи В.В. Верещагина, Е.Н. Номоконова,                       И.С. Чижиков

по иску федерального государственного унитарного предприятия «Ремонтно-строительное управление» Управления делами Президента Российской Федерации  

к федеральному государственному бюджетному учреждению науки «Национальный научный центр морской биологии» Дальневосточного отделения Российской Академии наук  

о взыскании 1 417 814 руб. 88 коп.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Ремонтно-строительное управление» Управления делами Президента Российской Федерации» (ОГРН 1027739833637, ИНН 7704008538, место нахождения: 105064, г. Москва, переулок М. Казенный, д. 3; далее – ФГУП «РСУ» Управления делами Президента Российской Федерации, предприятие, истец) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском к федеральному государственному бюджетному учреждению науки «Национальный научный центр морской биологии» Дальневосточного отделения Российской академии наук в лице «Приморский океанариум» (ОГРН 1022502128538, ИНН 2539008324, место нахождения: 690041, г. Владивосток, ул. Пальчевского,             д. 17; далее – ННЦМБ ДВО РАН, учреждение, ответчик) о взыскании задолженности за фактически оказанные услуги по контракту от 29.12.2017 № 010-ЕП/18 за март 2018 года в размере 1 471 814 руб. 88 коп.

Решением Арбитражного суда Приморского края от 27.09.2018, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2018, в удовлетворении иска отказано.

В кассационной жалобе, поданной в Арбитражный суд Дальневосточного округа, ФГУП «РСУ» Управления делами Президента Российской Федерации просит указанные судебные акты отменить в связи с неправильным применением норм материального права и нарушением норм процессуального права, принять по делу новое решение. Фактически доводы заявителя жалобы сводятся к тому, что ответчик не исполнил обязательство по оплате оказанных услуг, недоплатив 1 417 814 руб. 88 коп. При этом истец указывает на то, что пункт 3.1.5 контракта, на основании которого произведен ответчиком перерасчет стоимости спорных услуг, исключен 21.03.2018 дополнительным соглашением к контракту № 1.

В отзыве на кассационную жалобу ННЦМБ ДВО РАН, возражая относительно изложенных в ней доводов, просит оставить состоявшиеся судебные акты без изменения как законные и обоснованные, а жалобу – без удовлетворения.

Судебное заседание 19.03.2019 в порядке статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) откладывалось до 16 часов 50 минут 09.04.2019.

В судебном заседании, проводимом в соответствии с положениями статьи 153.1 АПК РФ путем использования системы видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Приморского края, представитель истца поддержал свою позицию, приведенную в кассационной жалобе.

ННЦМБ ДВО РАН, надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства, явку своего представителя в судебное заседание не обеспечило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 АПК РФ не может служить препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Проверив законность принятых судебных актов с учетом доводов кассационной жалобы и возражений на неё, заслушав пояснения присутствующего в судебном заседании суда кассационной инстанции представителя предприятия, Арбитражный суд Дальневосточного округа не установил предусмотренных статьей 288 АПК РФ оснований для их отмены.

Как следует из материалов дела и установлено судами, между ФГУП «РСУ» Управления делами Президента Российской Федерации (заказчик) и Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Национальный научный центр морской биологии» Дальневосточного отделения Российской академии наук в лице «Приморский океанариум» – филиал ННЦМБ ДВО (исполнитель) заключен контракт  от 29.12.2017                     № 010-ЕП/18 «Об оказании услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию электрооборудования, распределительных подстанций и устройств, трансформаторных подстанций, электрощитовых и инженерных электрических сетей для нужд НОК «Приморский океанариум», по условиям которого  исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с условиями контракта, а заказчик - оплатить надлежащим образом оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные условиями контракта (пункт 1.1 контракта).

Пунктом 1.2 контракта сторонами установлен срок его действия с 01.01.2018 по 31.12.2018.

Заказчик оплачивает исполнителю 9 418 513 руб. 89 коп. в месяц, в том числе НДС 18 %, что составляет 1 436 722 руб. 46 коп. (пункт 3.1.2 контракта).

В соответствии техническим заданием, а также приложением № 4 к контракту, что стоимость определена, исходя из затрат истца на оплату труда непосредственно привлеченных к работе сотрудников (59 работников).

При этом пунктом 3.1.5 контракта предусмотрено, что в случае, если количество работников, непосредственно занятых выполнением услуги, отличается от указанного в расчете стоимости услуг (приложение № 4 к контракту), оплата производится из расчета количества фактически задействованного персонала.

Расчеты с исполнителем осуществляются ежемесячно в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления исполнителем счета и счета-фактуры за отчетный месяц (пункт 3.4 контракта).

В пункте 4.1 контракта указано, что оказанные услуги принимаются заказчиком по акту сдачи-приемки оказанных услуг согласно приложению № 4 ежемесячно до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. Исполнитель обязан предоставить акт с приложением отчетной документации, в том числе сведений о количестве сотрудников, непосредственно оказывающих услуги в отчетном периоде.

В пункте 4.2 контракта отражено, что по результатам проверки заказчик не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с момента предоставления исполнителем акта сдачи-приемки передает исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки оказанных услуг по контракту или мотивированный отказ от подписания акта. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней заказчик не предоставляет мотивированный отказ от подписания акта приема-передачи оказанных услуг, то оказанные услуги считаются принятыми заказчиком в полном объеме.

По акту сдачи-приемки оказанных услуг от 31.03.2018 № 41 предприятие исполнило свои обязательства по контракту на общую сумму     9 418 513 руб. 89 коп.

Услуги за март 2018 года оплачены учреждением частично в сумме        7 946 699 руб. 01 коп., о чем свидетельствует платежное поручение от 11.04.2018 № 737037.

ФГУП «РСУ» Управления делами Президента Российской Федерации в претензии от 30.05.2018 № 787, направленной в адрес ННЦМБ ДВО РАН, потребовало погасить оставшуюся задолженность в размере 1 471 814 руб. 88 коп. и начисленную на основании пунктов 7.2, 7.2.2 контракта неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 9603 руб. 59 коп., на которую поступил отказ (письмо от 04.06.2018 № 16150-268-2/6-1340), что явилось основанием для предъявления в арбитражный суд настоящего иска.

В силу положений статьей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия, осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В пункте 1 статьи 781 ГК РФ закреплено, что заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

При рассмотрении спора суды первой и апелляционной инстанций установили, что ННЦМБ ДВО РАН оплачены услуги, оказанные ФГУП «РСУ» Управления делами Президента Российской Федерации, исходя из фактически занятого в спорный период количества работников исполнителя - 41 человек, вместо предусмотренного контрактом количества сотрудников  - 59, в связи с чем стоимость услуг в соответствии с пунктом 3.1.5 контракта составила за 20 дней марта 2018 года - 4 604 645 руб. 69 коп., то есть на          1 417 814 руб. 88 коп. меньше ежемесячной суммы, определенной контрактом, таким образом, за период с 21.03.2018 по 31.03.2018 стоимость оказанных услуг - 3 342 053 руб. 32 коп.

С учетом установленного, суды пришли к обоснованному выводу о правомерности расчета учреждения за оказанные услуги с учетом фактического количества непосредственно занятого персонала предприятия.

При таких обстоятельствах оснований считать ННЦМБ ДВО РАН ненадлежаще исполнившим денежное обязательство в данном случае не имеется.

Как следствие приведенному, суды сочли заявленное исковое требование не подлежащим удовлетворению.

Довод истца о том, что пункт 3.1.5 контракта, на основании которого произведен ответчиком перерасчет стоимости спорных услуг, исключен 21.03.2018 дополнительным соглашением к контракту № 1 не принимается, поскольку данный расчет произведен за март 2018 года, исходя из периода с 01.03.2018 по 20.03.2018.

Суд кассационной инстанции считает, что судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении настоящего спора правильно определены законы, которые следовало применить в рассматриваемой ситуации, дана оценка представленным в деле доказательствам с соблюдением требований процессуального законодательства.

Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену принятых по делу судебных актов в силу части 4 статьи 288 АПК РФ, судами не допущено.

При таких обстоятельствах основания для отмены обжалуемых судебных актов и удовлетворения кассационной жалобы отсутствуют.

Руководствуясь статьями 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Дальневосточного округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 27.09.2018, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2018 по делу № А51-13207/2018 Арбитражного суда Приморского края оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, в порядке, предусмотренном статьей 291.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

 

Председательствующий судья                                       В.А. Гребенщикова

 

Судьи                                                                                С.Н. Новикова

О.В. Цирулик