АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

600005, 

<

...> Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

г. Владимир Дело № А11-11684/2024 15.04.2025  

Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи 

Петрухина М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лошкаревой Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром (602267, Владимирская область, г. Муром, площадь 1100-летия Мурома, д. 1; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Дорожник-2" (602264, 

<

...>; ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании устранить недостатки выполненных работ, выявленных в период гарантийного срока,  

Руководствуясь статьями 65, 110, 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд    

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации округа Муром, Владимирская область, г. Муром удовлетворить.  

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Дорожник-2" (ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) безвозмездно устранить в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выявленные в период гарантийного срока в рамках муниципального  

контракта № 6 от 14.12.2020 недостатки результата выполненных работ по ремонту асфальтового покрытия дворовой территории, расположенной в городе Муроме Владимирской области по адресу: ул. Мечтателей д.8, путем выполнения следующих работ:  

 № пп  

Наименование 

Ед. изм.  

Кол-во 

1 

Разборка бортовых камней: на бетонном основании (GMycop = 4*0,095 = 0,38 т)  

100 м  

0,04

2 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 мЗ, группа  

грунтов 2 

1000 мЗ  

0,00032 

3 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2  

100 мЗ  

0,00068 

4 

Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1  

100 мЗ  

0,00068 

5 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка  

100 мЗ  

0,0012 

6 

Песок природный II класс, мелкий, круглые сита 

мЗ 

0,132

7 

Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  

100 м  

0,04

8 

Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 мЗ  

шт 

4

9 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1  

100 мЗ  

0,0036 

10 

Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой  

асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 

100 м2  

0,012

11 

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III  

т 

0,08568 

12  

На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 -толщина 5 см  

100 м2  

0,012

13.  

Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III 

т 

 0,05808  

Раздел 2. Мусор 

14  

Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную  

1т груза  

0,38

15  

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью Ют работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км  

1 т груза  

0,776

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дорожник-2"  

(ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 50 000 руб.  

Выдача исполнительных листов осуществляется по правилам статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Владимирской области в течение месяца с момента принятия решения.  

 Судья М.В. Петрухин