АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Учебная, д. 51, г. Омск, 644024; тел./факс (3812) 31-56-51/53-02-05; http://omsk.arbitr.ru, http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

№ дела

А46-11471/2020

09 октября 2020 года

город Омск

Резолютивная часть решения объявлена 06 октября 2020 года, полный текст решения изготовлен 09 октября 2020 года.

Арбитражный суд Омской области в составе судьи  Баландина В.А., при ведении протокола судебного заседания секретарём Пальчиком В.В.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску бюджетного учреждения города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью "СтройСервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) об обязании совершить действия,

В заседании приняли участие:

от истца – ФИО1 по доверенности от 30.01.2020 № 18, удостоверению;

от ответчика – не явились;

УСТАНОВИЛ:

бюджетное учреждение города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "СтройСервис" об обязании за счет собственных средств выполнить работы по устранению дефектов на автомобильных дорогах в рамках гарантийных обязательств, а именно:

1)улице Машиностроительная от улицы Новокирпичная до магазина«Метро» по Черлакскому тракту:

1. Разрушение кромки а/б покрытия, отсутствие примыкания в районе перекрестка с улицей Цеховой -10 м.п.

2. Сетка трещин, разрушение покрытия, пучины на участке от ул. Гашека до въезда на АЗС «Юнигаз» - 50 кв.м.

2)улице Б. Хмельницкого от улицы Нейбута до улицы ФИО2:

1. Разрушение кромки в районе ООТ «10 лет Октября» -1,5 кв.м.

2. Продольная трещина между ул. Нейбута и ул. Омской - 10 м.п.

3)улице Блусевич от улицы Вокзальная до улицы Невского:

1. Просадка а/б покрытия в районе перекрестка с улицей Дзержинского 2 кв.м.

2. Колейность в районе дома 59 по ул. Блусевич глубиной свыше 3 см. - 10 кв.м.

3. Выбоины в районе дома 59 по улице Блусевич 6 кв.м.

4. Выбоины в районе общежития № 2 по улице Блусевич 3 кв.м.

5. Выбоины в районе домов 10, 8 по улице Блусевич - 10 кв.м.

4)улице Звездова от улицы Куйбышева до улицы Маршала Жукова:

1. Просадка а/б покрытия в районе дома 52 по улице Звездова;

2. Просадка люка свыше 3 см. в районе дома 36 по улице Звездова;

3. Разрушение а/б покрытия в районе дома 14 по улице Звездова - 6 м.кв.;

5)улице Куйбышева от улицы Маяковского до улицы 10 лет Октября:

1. Разрушение кромки в районе дома 60 по улице Куйбышева;

2. Разрушение а/б покрытия колодца в районе дома 62 по улице Куйбышева - 1,5 кв.м.;

3. Выбоины в районе перекрестка с ул. Лермонтова - 2 кв.м.

4. Продольная трещина в районе дома 64 по улице Куйбышева -12 м.п..

5. Разрушение а/б покрытия колодца в районе дома 56 по улице Куйбышева - 1,5 кв.м.;

6. Продольная трещина в районе дома 120 по улице Куйбышева - 25 м.п.

7. Выкрашивание а/б покрытия в районе дома 128 по улице Куйбышева - 20 кв.м.;

8. Выбоина а/б покрытия в районе дома 132/1 по улице Куйбышева - 0,2 кв.м.;

9. Разрушение а/б покрытия колодца в районе дома 132/1   по улице Куйбышева -1,5 кв.м.;

10. Разрушение а/б покрытия колодца в районе перекрестка улицы Куйбышева и ул. 20 лет РККА - 1,5 кв.м.;

11. Разрушение а/б покрытия колодца, просадка в районе дома 81 по улице Куйбышева -1,5 кв.м.;

12.Выбоина   а/б   покрытия  за  перекрестком   улицы   Куйбышева  с   улицейФИО2.

13. Разрушение а/б покрытия колодца в районе перекрестка улицы Куйбышева и ул. Сергея Лазо -1,5 кв.м.

14. Просадка а/б покрытия за перекрестком с ул. Лермонтова - 0,5 кв.м.

15. Разрушение а/б покрытия колодца в районе дома 69 по улице Куйбышева - 6 кв.м.;

16. Продольная трещина в районе ООТ «ДКБ» - 20 м.п.

17. Завышение люка в районе ООТ «ДКБ» свыше 3 см.

18. Выкрашивание а/б покрытия в районе дома 130/1 по улице Куйбышева - 10 кв.м.;

19. Разрушение а/б покрытия в районе дома 130/1 по улице Куйбышева -10 кв.м.;

20. Разрушение а/б покрытия колодца в районе дома 132/1 по улице Куйбышева -1,5 кв.м.;

6)улице   Новосортировочная    от   улицы   Гуртьева   до   улицы    1-я Комсомольская:

1. Выкрашивание в районе «теплотрассы» по ул. Новосортировочная - 0,5 кв.м.

7)улица Шебалдина от улицы ФИО2 до улицы 10 лет Октября:

1.Поперечная трещина на перекрестке улице Масленикова и улицы Шебалдина -20 м.п.

2.Продольные трещины на всем участке улицы Шебалдина протяженность15-30 м.п. с шагом от 20 метров.

3.Выкрашивание а/б покрытия в районе ООТ «10 лет Октября» - 0,5 кв.м.

8)Окружная дорога от улицы 10 лет Октября до просп. Космический:

1. Продольная трещина от начала участка общей протяженностью 300 м.п.

9)проспект Космический от Окружной дороги до ул. Индустриальная:

1. Разрушение кромки в районе ж/д переезда 2 м.п.

2. Разрушение кромки в районе стоянки автобусов 4 м.п.

10)Проспект Мира от улицы Нефтезаводской до улицы Доковской:

1. Участки шелушения а/б покрытия от улицы Тварковского до улицы Доковской объемом от 1 до 5 кв. м. с шагом от 5 метров.

11)улице Химиков от Проспекта Мира до улицы Энтузиастов:

1. Просадка решетки дождеприемного колодца в районе ООТ «ул. Энтузиастов» по улице Химиков -1,5 кв.м.;

2. Продольная трещина за перекрестком с ул. 22 Апреля в сторону проспекта Мира по улице Химиков 20 м.п.

3. Разрушение а/б покрытия перед перекрестком с проспектом Мира по улице Химиков -10 кв.м.

4. Разрушение а/б покрытия на перекрестке с улицей Малунцева по направлению к улице 22 Апреля по улице Химиков - 32 кв.м.

5. Сетка трещин на перекрестке с улицей Малунцева по улице Химиков -10 кв.м.

6.Разрушение а/б покрытия колодца в районе въезда к домам по улице Химиковдом 9 и проспект Мира дом 48 - 1,5 кв.м.

12)улице Дианова от улицы Лукашевича до улицы 2-я Солнечная:

1. Занижение решетки ливневой канализации   - 2 шт. перед въездом на АЗС «Топлайн» улица Дианова дом 14 В - свыше 3 см.;

2. Разрушение кромки а/б покрытия в районе ООТ «ОАЗИС» в сторону улицы 2-я Солнечная по улица Дианова - 1 м.п.

13)улице 70 лет Октября от улицы Конева до улицы Б. ФИО3:

1. Выбоина в заездном кармане в районе дома 14 по улице 70 лет Октября - 4 кв.м.

2. Разрушение кромки в районе а/б покрытия КДЦ «Фестиваль» по улице 70 лет Октября -1 м.п.

3.Колейность свыше 3,5 см. в районе ООТ «Поворотная» напротив БульвараФИО3 по улице 70 лет Октября - 3 м.п.

14)улице Комбинатская в границах проспект Губкина и до ул. Заозерная:

1. Поперечные трещины на протяжении всего участка с шагом от 15 м.

15)улице 1-я Трамвайная в границах ул. Воровского и до ул. Леонова:

1. Просадка а/б покрытия в районе дома 60 по улице 1-я Трамвайная - 2 кв.м.

2. Пучина а/б покрытия в районе дома 55 по улице 1-я Трамвайная - 0Э5 кв.м.

3. Пучина а/б покрытия в районе дома 72 А по улице 1-я Трамвайная - 0,5 кв.м.

4. Продольная трещина в районе 

<

...> м.п.

16)улице   Леонова   в   границах   ул.   1-я   Трамвайная   и   до   ул.   13-яКомсомольская:

1. Разрушение кромки в районе поворота с улицей 1 -я Трамвайная -1. мл.   

17)улице 22 Апреля в границах ул. Энергетиков и до ул. Доковская:

1. Просадка а/б покрытия в районе дома 27 по ул. 22 Апреля -10 кв.м.;

2. Разрушение а/б покрытия колодца в районе дома 30 В по ул. 22 Апреля -1,5 кв.м.;

3. Продольные трещины на участке от улицы Нефтезаводской до улицы Доковской протяженностью 5-20 м.п. с шагом от 5 м. по улице 22 Апреля.

18)улице Березовая в границах ул. Красный путь и до проспекта Королева:

1. Выбоина в районе пешеходного перехода санаторий «Омский» по улице Березовая - 0,5 кв.м.

19)проспект Мира в границах ул. Доковская и до ул. Полевая:

1. Выбоина в районе дома 187 Б по проспекту Мира- 1,2 кв.м.

2. Выбоина в районе дома 193/3 по проспекту Мира - 0,2 кв.м.

3. Выбоина в районе перекрестка с улицей Доковская по проспекту Мира -0,5 кв.м.

20) улице Авиационная от ул. 22 Декабря до ул. Транссибирской:

1. Просадка а/б покрытия в районе дома 85 по улице Авиационная - 25 кв.м.

2. Разрушение а/б покрытия в районе перекрестка с улицей Володарского по улице Авиационная -10 кв.м.

3. Шелушение а/б покрытия в районе перекрестка с улицей Володарского по улице Авиационная - 2 кв.м.

21)улице  Ватутина   от  ул.   Конева  до   Бульвара   ФИО3  и   отул. Перелета до ул. Лукашевича:

1. Разрушение кромки а/б покрытия в районе перекрестка с улицей Б. Архитекторовпо улице Ватутина 3 м.п.

2. Шелушение а/б покрытия в районе дома 4 по улице Ватутина - 20 кв.м.

3. Выбоина перед перекрестком с улицей Б. ФИО3 — 0,5 кв.м.

4. Разрушение а/б покрытия перед перекрестком с   улицей Б. ФИО3 накоммуникациями - 3 кв.м.

22)улице Суворова от круговой развязки Ленинградского моста до ул. Володарского:

1. Продольные трещины на всем участке по улице Суворова 5-20 м.п. с шагом от 10м.

2. Просадка а/б покрытия за искусственной неровностью в районе дома 95 поул. Суворова - 2 кв. м.

23)проспект Комарова от ул. Лукашевича до бульвара ФИО3:

1. Занижение решетки ливневой канализации у перекрестка с улицей Лукашевича в направлении улицы Перелета по проспекту Комарова свыше 3 см.

24)улице Мельничная от ул. Нефтебаза до ул. 3-я Казахстанская:

1. Продольная трещина в районе АЗС «Газпром» по ул. Мельничная - 80 м.п.

2. Выбоина в районе перекрестка с улицей Талалихина по ул. Мельничная - 0,2 кв.м.

25)По улице 5-я Кировская (от ул. О. Кошевого до ул. Талалихина):

1. Сетка трещин в районе дома 117 по улице 5-я Кировская — 3 кв.м.;

2. Сетка трещин - 3кв.м., разрушение а/б покрытия - 0,2 кв.м. в районе дома 119 по улице 5-я Кировская;

3. Продольная трещина в районе дома 117 по улице 5-я Кировская - 20 м.п.;

4. Поперечные трещины на всем протяжении участка по улице 5-я Кировская с шагом 20 м.

26)проспект Карла Маркса от ул. Лермонтова до ул. Лобкова:

1. Разрушение а/б покрытия вокруг колодца уд. 71 по проспекту Карла Маркса 1,5 кв.м.;

2. Занижение решетки ливневой канализации в районе КДЦ «Галактика» по проспекту Карла Маркса свыше 3 см.;

3.Разрушение а/б покрытия вокруг колодца в районе «Каскада» по проспектуКарла Маркса 1,5 кв.м.;

4.Поперечные трещины на всем участке с шагом от 20 метров.

Представитель истца уточнил исковые требования просит суд обязать общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис" за счет собственных средств выполнить работы по устранению дефектов на автомобильных дорогах в рамках гарантийных обязательств, а именно:

1) улице Машиностроительная от улицы Новокирпичная до магазина «Метро» по Черлакскому тракту:

1. Разрушение кромки а/б покрытия, отсутствие примыкания в районе перекрестка с улицей Цеховой – 10 м.п.

2) улице Б. Хмельницкого от улицы Нейбута до улицы ФИО2:

1. Разрушение кромки в районе ООТ «10 лет Октября» - 1,5 кв.м.

3) улице Блусевич от улицы  Вокзальная до улицы Невского:

1. Просадка а/б покрытия в районе перекрестка с улицей Дзержинского 2 кв.м.

2. Колейность в районе дома 59 по ул. Блусевич глубиной свыше 3 см. – 10 кв.м.

3. Выбоины в районе дома 59 по улице Блусевич 6 кв.м.

4. Выбоины в районе общежития № 2 по улице Блусевич 3 кв.м.

5. Выбоины в районе домов 10, 8 по улице Блусевич – 10 кв.м.

4) проспект Космический от Окружной дороги по ул. Индустриальная:

1. Разрушение кромки в районе ж/д переезда 2 м.п.

2. Разрушение кромки в районе стоянки автобусов 4 м.п.

5) улице Дианова от улицы Лукашевича до улицы 2-я Солнечная:

1. Занижение решетки ливневой канализации – 2 шт. перед въездом на  АЗС «Топлайн» улица Дианова дом 14 В – свыше 3см.

2. Разрушение кромки а/б покрытия в районе ООТ «ОАЗИС» в сторону улицы 2-я Солнечная по улице Дианова – 1 м.п.

6) улице 70 лет Октября от улицы Конева до улицы Б.ФИО3:

1. Разрушение кромки в районе а/б покрытия КДЦ «Фестиваль» по улице 70 лет Октября – 1 м.п.

2. Колейность свыше 3,5 см. в районе ООТ «Поворотная» напротив Бульвара ФИО3 по улице 70 лет Октября – 3 м.п.

7) улице Леонова в границах ул. 1-я Трамвайная и до ул. 13-я Комсомольская:

1. Разрушение кромки в районе поворота с улицей 1-я Трамвайная – 1 м.п.

Уточнения судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приняты.

В судебном заседании представитель истца исковые требования с учетом уточнений поддержал в полном объеме.

Ответчик, надлежащим образом извещённый о времени и месте рассмотрения дела, в том числе, путём размещения информации на сайте арбитражного суда (сервис «Картотека арбитражных дел» http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет), в судебное заседание своего представителя не направил.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика на основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителя истца, суд установил следующее.

В 2016, 2017, 2018 году между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стройсервис» были заключены следующие договоры на выполнение подрядных работ по ремонту участков дорожно-транспортной сети города Омска.

28.05.2018 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стройсервис»  был заключен договор № Ф.2018.222338 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги ул. Комбинатская в границах проспект Губкина и до ул. Заозерная.

28.05.2018 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стройсервис» был заключен договор № Ф.2018.226808 на выполнение подрядных работ по ремонту участков дорожно-транспортной сети города Омска в Ленинском административном округе автомобильных дорог ул. 1-я Трамвайная в границах ул. Воровского и до ул. Леонова, ул. Леонова в границах ул. 1-я Трамвайная и до ул. 13-я Комсомольская, ул. 13-я Комсомольская в границах ул. Леонова и до Черлакского тракта.

02.06.2017 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стройсервис» был заключен договор № Ф.2017.193832 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги ул. 22 Апреля в границах ул. Энергетиков и до ул. Доковская;

02.06.2017 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стройсервис» был заключен договор № Ф.2017.193066 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги ул. Березовая в границах ул. Красный путь и до проспекта Королева.

31.07.2017 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф.2017.315738 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги проспект Мира в границах ул. Доковская и до ул. Полевая.

26.08.2016 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф.2016.218524 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги ул. 70 лет Октября в границах ул. Конева и до Бульвара ФИО3.

16.08.2016 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф.2016.209927 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги ул. Б. Хмельницкого в границах ул. Ипподромная до ул. Нейбута.

16.08.2016 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф.2016.209804 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги ул. Блусевича в границах ул. Вокзальная до ул. Невского.

26.08.2016 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф.2016.218527 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги ул. Дианова в границах ул. Лукашевича до ул. 2-ой Солнечной.

17.08.2016 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф.2016.211706 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги ул. Звездова в границах ул. Куйбышева и ул. Маршала Жукова.

16.08.2016 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф.2016.209892 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги ул. Куйбышева в границах ул. Маяковского и ул. 10 лет Октября.

17.08.2016 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф.2016.211725 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги ул. Новосортировочная в границах ул. Гуртьева до ул. 1-я Комсомольская.

17.08.2016 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф.2016.216083 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги ул. Окружная дорога в границах ул. 10 лет Октября до проспекта Космический.

16.08.2016 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф.2016.209906 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги проспект Космический в границах ул. Индустриальная до ул. Окружная дорога.

16.08.2016 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф.2016.209880  на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги проспекта Мира в границах от проспекта Культуры до ул. Доковской.

19.08.2016 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф.2016.218533 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги ул. Шебалдина в границах ул. Масленикова до ул. 10 лет Октября.

07.06.2016 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф.2016.105547 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги ул. Химиков в границах проспект Мира до ул. Энтузиастов.

12.08.2016 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф.2016.209785 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги ул. Кирова в границах ул. Б. Хмельницкого до ул. Барабинская.

02.08.2016 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф.2016.199271 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги ул. Машиностроительная в границах ул. Новокирпичная до магазина Метро.

25.05.2017 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф. 2017.185070 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги по улице Авиационная от ул. 22 Декабря до ул. Транссибирской.

29.05.2017 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф. 2017.184763 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги по улице 5-я Кировская от ул. О. Кошевого до пересч. с ул. Талалихина;

02.06.2017 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф.2017.193555 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги по улице Ватутина от ул. Конева до Бульвара ФИО3 и от ул. Перелета до ул. Лукашевича;

26.05.2017 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор. № Ф.2017.178362 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги по улице Суворова от круговой развязки Ленинградского моста до ул. Володарского;

02.06.2018 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № 0152300011918000583-0492339-02 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги проспект Комарова от ул. Лукашевича до бульвара ФИО3;

26.05.2017 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф.2017.178380 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги по улице Мельничная от ул. Нефтебаза до ул. 3-я Казахстанская;

14.05.2018 между бюджетным учреждением города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» и обществом с ограниченной ответственностью «Стойсервис» был заключен договор № Ф.2018.190686 на выполнение подрядных работ по ремонту участка дорожно-транспортной сети города Омска автомобильной дороги проспект Карла Маркса от ул. Лермонтова до ул. Лобкова.

В соответствии условиями договоров:

Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные Договором, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным настоящим договором, законодательством РФ.

Гарантийный срок на выполненные работы с момента подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком составляет - 4 года.

Гарантии качества в течение гарантийного срока распространяются на результат выполненных Подрядчиком по Договору работ, а также на используемые материалы.

Подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки выполненных им в соответствии с договором работ, обнаруженные в течение установленного Договором гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.

Согласно Договорам стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При обнаружении Заказчиком в течение гарантийного срока дефектов и (или) недостатков, Заказчик обязан сообщить об этом Подрядчику в письменной форме, а Подрядчик обязан не позднее 5-ти дней со дня получения письменного извещения либо устранить выявленные дефекты и (или) недостатки либо направить своего полномочного представителя для составления и подписания двустороннего акта о выявленных дефектах и (или) недостатках, в котором указываются сроки их устранения.

В случае неявки представителя Подрядчика в установленный Заказчиком срок, Заказчик самостоятельно в отсутствие представителя Подрядчика составляет и подписывает акт о выявленных недостатках и (или) дефектах с указанием сроков их устранения. Один экземпляр акта направляется Подрядчику и является основанием для устранения Подрядчиком дефектов и (или) недостатков.

В марте 2020 года в ходе комиссионного обследования с участием представителя Заказчика (БУ г. Омска «УДХБ») и Подрядчика (ООО «Стройсервис») были обследованы автомобильные дороги в г. Омске на предмет выявления дефектов.

В адрес Подрядчика были направлены претензии о необходимости устранить замечания, указанные в акте, в рамках гарантийных обязательств в срок указанный в акте комиссионного обследования дорог.

В мае 2020 года было проведено повторное комиссионное обследования с участием представителя Заказчика (БУ г. Омска «УДХБ») и Подрядчика (ООО «Стройсервис»), часть дефектов были устранены по претензии, однако неустраненные дефекты послужили основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Суд, оценив материалы дела, пришел к выводу, что между сторонами сложились отношения, вытекающие из договора подряда, регулирующиеся положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В соответствии с п.1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статьей 309 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с их условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства является недопустимым, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода (п.1 ст. 721 ГК РФ).

Согласно ст. 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (п.1 ст. 721); гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока (п. 3 ст. 724 ГК РФ).

Однако таковые не были устранены, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы определена в ст. 723 ГК РФ, из которой следует, что в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (ст. 397 ГК РФ).

Данные требования могут быть заявлены заказчиком и при обнаружении некачественно выполненных работ в период гарантийного срока (ст. 724 ГК РФ).

При этом, учитывая положения ст. 401 ГК РФ, в пределах гарантийного срока действует презумпция вины подрядчика за недостатки (дефекты) выполненных работ.

Соответственно именно на ответчика, в данном случае возлагается бремя доказывания отсутствия своей вины в возникновении недостатков в выполненных по договору работах (п. 2 ст. 401 ГК РФ).

Исходя из требований ч. 1 ст. 64 и ст. 71, 168 АПК РФ, арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Принимая во внимание представленные в материалы дела доказательства в совокупности, суд считает, что истцом доказан факт ненадлежащего выполнения обязательств по договорам ответчиком. На основании вышеизложенного, суд признает обоснованными требования истца об обязании ответчика силу за счет собственных средств выполнить работы по устранению дефектов на автомобильных дорогах в рамках гарантийных обязательств.

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 174 АПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Исходя из сроков выполнения работ по контрактам, требований статьи 723 ГК РФ о необходимости применения критерия разумности при установлении сроков устранения недостатков, суд приходит к выводу об установлении срока для исполнения решения суда – 15 дней с момента вступления решения в законную силу.

В связи с удовлетворением исковых требований расходы по оплате государственной пошлины следует также отнести на ответчика по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) за счет собственных средств выполнить работы по устранению дефектов на автомобильных дорогах в рамках гарантийных обязательств в течение пятнадцати календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда, а именно:

1) улице Машиностроительная от улицы Новокирпичная до магазина «Метро» по Черлакскому тракту:

1. Разрушение кромки а/б покрытия, отсутствие примыкания в районе перекрестка с улицей Цеховой – 10 м.п.

2) улице Б. Хмельницкого от улицы Нейбута до улицы ФИО2:

1. Разрушение кромки в районе ООТ «10 лет Октября» - 1,5 кв.м.

3) улице Блусевич от улицы  Вокзальная до улицы Невского:

1. Просадка а/б покрытия в районе перекрестка с улицей Дзержинского 2 кв.м.

2. Колейность в районе дома 59 по ул. Блусевич глубиной свыше 3 см. – 10 кв.м.

3. Выбоины в районе дома 59 по улице Блусевич 6 кв.м.

4. Выбоины в районе общежития № 2 по улице Блусевич 3 кв.м.

5. Выбоины в районе домов 10, 8 по улице Блусевич – 10 кв.м.

4) проспект Космический от Окружной дороги по ул. Индустриальная:

1. Разрушение кромки в районе ж/д переезда 2 м.п.

2. Разрушение кромки в районе стоянки автобусов 4 м.п.

5) улице Дианова от улицы Лукашевича до улицы 2-я Солнечная:

1. Занижение решетки ливневой канализации – 2 шт. перед въездом на  АЗС «Топлайн» улица Дианова дом 14 В – свыше 3см.

2. Разрушение кромки а/б покрытия в районе ООТ «ОАЗИС» в сторону улицы 2-я Солнечная по улице Дианова – 1 м.п.

6) улице 70 лет Октября от улицы Конева до улицы Б.ФИО3:

1. Разрушение кромки в районе а/б покрытия КДЦ «Фестиваль» по улице 70 лет Октября – 1 м.п.

2. Колейность свыше 3,5 см. в районе ООТ «Поворотная» напротив Бульвара ФИО3 по улице 70 лет Октября – 3 м.п.

7) улице Леонова в границах ул. 1-я Трамвайная и до ул. 13-я Комсомольская:

1. Разрушение кромки в районе поворота с улицей 1-я Трамвайная – 1 м.п.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СтройСервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу бюджетного учреждения города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

 Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в порядке апелляционного производства в Восьмой арбитражный апелляционный суд (644024, 

<

...> Октября, д. 42) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Судья                                                                                                В.А. Баландин