РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № А40-22479/19-110-204

24 июня 2019 года

город Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 17 июня 2019 года 

Решение в полном объеме изготовлено 24 июня 2019 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания помощником Зайченко О.И.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦГРУППЭНЕРГОМОНТАЖ"  (625048 Тюменская область город Тюмень улица Мельникайте дом 44-а/1 офис 725, ОГРН: 1177232028137) к обществу с ограниченной ответственностью "ВОРОНЕЖ-АКВА" (394026 Воронежская область город Воронеж улица Текстильщиков 4 Б , ОГРН: 1023601581365) о взыскании 1 211 893,09руб.,

при участии:

от истца – Черевко  Д.С. по дов.  от 31.08.2019,

от ответчика- Цыганов  Е.В.  подов.  от  09.01.2019 №33, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦГРУППЭНЕРГОМОНТАЖ" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ВОРОНЕЖ-АКВА" о взыскании  766 574,45 руб. задолженности по Договору №ВА-2018/394-П от 25.06.2018, 445 318,64 руб. неустойки.

Ответчик иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, 25.06.2018 года между обществом с ограниченной ответственностью "Воронеж-Аква", ИНН 3662003954 (далее по тексту - ООО "Воронеж-Аква"; Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Спецгруппэнергомонтаж", ИНН 7203430851 (далее по тексту - ООО "СГЭМ", Подрядчик) был заключен договор № ВА-2018/394-П.

Согласно п. 1.1. договора в сроки и в порядке, предусмотренные договором, Подрядчик обязан выполнить весь объем Работ согласно Рабочей документации, приведенной в приложении № 2 (Локальная смета № 1, Локальная смета № 2) к настоящему договору и передать Заказчику результат работ, вместе со всей относящейся к ней Исполнительной документацией в объеме выполняемых Подрядчиком работ.

Пунктом 1.3 договора регламентировано, что Подрядчик обязуется выполнить работы по автоматизации систем отопления и вентиляции на объекте в соответствии с Рабочей документации (Приложение № 2 (Локальная смета № 1, Локальная смета № 2) включая устранение всех дефектов и недостатков.

Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями договора и приложениями к нему (п. 1.4.1. договора).

Местом монтажа оборудования и местом выполнения работ является объект строительства "Строительство электролизной со складскими помещениями на водозаборных сооружениях г. Якутск (далее - Объект)" (п. 1.5. Договора).

Объем работ установлен приложением № 1 от 25.06.2018 года к Договору № ВА-2018/394-П от 25.06.2018.

В соответствии с п. 2.2 Договора стоимость работ составила сумму в размере 3 792 679 рублей 30 копеек, в т.ч. НДС 18% 578 544 рубля 30 копеек.

Авансовый платеж в размере 30% от вышеуказанной суммы должен был быть перечислен в течение 5 банковских дней с даты заключения договора и получения счета Подрядчика на аванс (п. 3.1.1. Договора).

Пунктом 3.1.3 Договора регламентировано, что для расчетов за выполненные и принятые работы по договору Подрядчик не позднее 25 числа каждого отчетного месяца предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, составленные по фактическим выполненным объемам работы за отчетный месяц, а также исполнительную документацию на предъявленные к оплате работы согласно п.4.5. договора.

Заказчик производит оплату выполненных и принятых работ в течение 30 календарных дней с даты подписания Актов по форме КС-2 и КС-3, предоставленных Подрядчиком, на основании выставленного Подрядчиком счета.

Заказчик рассматривает полученную от Подрядчика документацию в течение 7 рабочих дней с момента ее предоставления, после чего Заказчик либо подписывает порученные акты по форме КС-2 и КС-3, либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от их исполнения. Для рассмотрения повторно направленных Подрядчиком актов устанавливается такой же порядок и сроки их рассмотрения Заказчиком. Без предоставления исполнительной документации, оформленной согласно п. 4.5 договора, акты по форме КС-2 и КС-3 не принимаются Заказчиком к рассмотрению и возвращаются Подрядчику без оформления. В случае, если по результатам рассмотрения полученной от Подрядчика документации Заказчик не направил мотивированный отказ от их подписания в обусловленный срок, то такая документация признается надлежаще оформленной, а работы считаются принятыми.

Дата начала работ по настоящему Договору - 17.07.2018, дата окончания 10.08.2018 (п. 4.2 Договора).

Заказчик обязан принять и оплатить результат выполненных работ в размере, в сроки и в порядке, предусмотренных настоящим Договором (п. 5.1.6 договора).

Согласно п. 8.11. Договора при нарушении Заказчиком по его вине сроков оплаты за выполненные и принятые работы, более чем на 30 календарных дней подряд, Подрядчик вправе требовать с Заказчика штрафную неустойку (пени) в размере 0,1% от общей стоимости работ по договору, за каждый день просрочки, но не более 10% от указанной суммы.

18.07.2018 года между Заказчиком и Подрядчиком было подписано дополнительное соглашение № 1 к Контракту № ВА-2018/394-П от 25.06.2018 года, которым были внесены изменения в п.1.1., п. 1.3, п. 2.1., п. 2.2, п. 2.4., п. 3.1. Договора, а также в приложение № 1 от 25.06.2018 года к договору было признано утратившем силу и изложено в новой редакции - приложение № 2 от 18.07.2018 года к настоящему соглашению, а все ссылки на приложение № 1 от 25.06.2018 к договору должны считаться ссылками на приложение № 2 от 18.07.2018 года.

В частности указанным дополнительным соглашением были увеличены объемы работ согласно рабочей документации - добавлена локальная смета № 3, а также увеличена цена договора, которая составила 5 068 623 рублей 92 копеек, в т.ч. 18% НДС.

20.08.2018 года между Подрядчиком и Заказчиком было заключено дополнительное соглашение № 2 к Контракту № ВА-2018/394-П от 25.06.2018 года,  в  соответствии с условиями которого были внесены изменения в п.1.1. договора, согласно которому в сроки и в порядке, предусмотренные договором, Подрядчик обязан выполнить весь объем работ согласно рабочей документации, приведенной в приложении № 2 от 18.07.2018 года и в Приложении № 3 от 20.08.2018 года к настоящему договору и передать Заказчику результат работ, вместе со всей относящейся к ним исполнительной документацией в объеме выполняемых Подрядчиком работ.

Пункт 2.1 договора также был изменен - стоимость контракта, складывается из общей твердой цены за работы, определенной в приложении № 2 от 18.07.2018 года и приложении № 3 от 20.08.2018 года, и составляет 6 017 819 рублей 46 копеек, в т.ч. 18% НДС.

Заказчик перечислил Подрядчику денежные средства на сумму 4 953 398 рублей 73 копейки, что подтверждается: п/п № 98624 от 28.06.2018 года - 1 200 000 рублей 00 копеек; п/п № 99531 от 13.07.2018 года - 382 783 рублей 00 копеек; п/п № 100005 от 31.07.2018 года - 633 215 рублей 73 копеек; п/п № 10752 от 17.08.2018 года - 1 500 000 рублей 00 копеек; п/п № 11286 от 31.08.2018 года - 1 237 400 рублей 00 копеек.

Подрядчик в свою очередь сдал, а Заказчик принял работы (путем подписания актов о приемке выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат) на сумму 4 853 325 рублей 72 копейки, что подтверждается: счет-фактура № 9 от 31.07.2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 31.07.2018; акт о приемке выполненных работ (за июль 2018 года) № 1 от 31.07.2018 на сумму 904 593 рубля 90 копеек; счет-фактура № 12 от 31.07.2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 31.07.2018; акт о приемке выполненных работ (за июль 2018 года) № 1 от 31.07.2018 на сумму 85 000 рублей 00 копеек; счет-фактура № 10 от 31.07.2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 31.07.2018; акт о приемке выполненных работ (за июль 2018 года) № 1 от 31.07.2018 на сумму 1 150 103 рубля 52 копеек; акт о приемке выполненных работ (за июль 2018 года) № 2 от 31.07.2018 на сумму 931 782 рубля 28 копеек; счет-фактура № 15 от 10.08.2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 10.08.2018; акт о приемке выполненных работ (за август 2018 года) № 1 от 10.08.2018 на сумму 509 391 рублей 84 копейки; счет-фактура № 13 от 10.08.2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 10.08.2018; акт о приемке выполненных работ (за июль 2018 года) № 1 от 10.08.2018 на сумму 1 220 830 рублей 36 копеек; счет-фактура № 14 от 10.08.2018 года; справка о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 10.08.2018; акт о приемке выполненных работ (за август 2018 года) № 1 от 10.08.2018 на сумму 51 623 рубля 82 копейки.

02.11.2018 года Подрядчик направил ценным письмом с описью вложения в адрес Заказчика совместно с сопроводительным письмом следующие документы: акт о приемке выполненных работ № 1 от 10.08.2018 года по форме КС-2 на сумму 122 021,44 рублей; справку о стоимости выполненных работ № 7 от 10.08.2018 года на сумму 122 021,44; счет-фактуру № 11 от 10.08.2018 года по форме КС-2 на сумму 517 146,80 рублей; справку о стоимости выполненных работ № 5 от 10.08.2018 года на сумму 517 146,80; счет-фактуру № 16 от 10.08.2018, исполнительную документацию согласно общего реестра на 425 л; исполнительную документацию на диске CD-R.

09.11.2018 года указанные документы были получены Заказчиком, срок направления мотивированного отказа истек 20.11.2018, и таким образом работы на сумму 639 168 рублей 24 копейки считаются принятыми Заказчиком.

15.11.2018 Подрядчик направил Заказчику исполнительную документацию, счет на оплату № 27 от 15.11.2018 года, счет-фактуру № 8 от 10.11.2018 года; унифицированную форму КС-3 № 6 от 10.08.2018; унифицированную форму КС-2 № 1 от 10.08.2018; сопроводительное письмо на сумму 227 479 рублей 22 копейки.

Данные документы были получены Заказчиком 19.11.2018 года, срок предоставления мотивированного отказа истек 28.11.2018 года, следовательно работы считаются принятыми.

Таким образом, общий размер задолженности ООО "Воронеж-Аква" перед "СГЭМ" составляет 766 574,45 руб.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Пункт 1 статьи 702 ГК РФ регламентирует, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с п. 1 ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно п. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда,  с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

При указанных обстоятельствах иск в этой части подлежит удовлетворению.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании п.8.11. Договора при нарушении Заказчиком по его вине сроков оплаты за выполненные и принятые Работы, более чем на 30 (тридцать) календарных дней подряд, Подрядчик вправе требовать с Заказчика штрафную неустойку (пени) в размере 0,1% от общей стоимости Работ по Договору, за каждый день просрочки, но не более 10% от указанной суммы, что по расчету истца, проверенному судом составляют 445 318,64 руб.

При этом суд считает доводы ответчика несостоятельными,  поскольку они не подтверждены документально,  доказательства направления претензий о недостатках  в адрес истца также не   представлена. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с  общества с ограниченной ответственностью "ВОРОНЕЖ-АКВА"   в пользу общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦГРУППЭНЕРГОМОНТАЖ"  766 574 руб. 45 коп. задолженности, 445 318 руб. 64 коп. неустойки,  25 119 руб.  в возмещение расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В. Мищенко