Арбитражный суд Республики Адыгея

Именем Российской Федерации

 

Р Е Ш Е Н И Е

Дело №А01-3944/2024

г. Майкоп

24 октября  2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 16 октября 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 24 октября  2024 года.

 

Арбитражный суд Республики Адыгея в составе судьи Парасюк Е.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Волосатовым А.А., рассмотрев в судебном заседании дело №А01-3944/2024 по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) к публичному акционерному обществу «Россети Кубань» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о возложении обязательств в течение двух месяцев с момента в законную силу решения по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения в электрическим сетям № 40404-22-00739722-1 от 24.06.2022 г. и выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями № 01-01/0693-22-вд – приложение №1, о взыскании судебной неустойки в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда по день фактического исполнения, при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО2 (по доверенности, личность установлена по паспорту),

от ответчика – ФИО3 (по доверенности, личность установлена по паспорту),

УСТАНОВИЛ:

в Арбитражный суд Республики Адыгея обратился индивидуальный предприниматель ФИО1  с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Россети Кубань» о возложении обязательств в течение двух месяцев с момента в законную силу решения по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения в электрическим сетям № 40404-22-00739722-1 от 24.06.2022 г. и выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями № 01-01/0693-22-вд – приложение №1, о взыскании судебной неустойки в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда по день фактического исполнения. 

Определением Арбитражного суда Республики Адыгея от 11.09.2024 г. дело  принято к производству.

Протокольным определением от 24.09.2024г. рассмотрение дела в судебном заседании назначено на  15.10.2024г. 

В судебном заседании представители истца поддержали уточненные  требования, просили  их удовлетворить в полном объеме. 

Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований в полном объеме.

Протокольным определением от 15.10.2024 г. в судебном заседании объявлен перерыв до 16.10.2024г., информация об объявленном перерыве, а также информация о движении дела № А01-3944/2024 размещена в картотеке арбитражных дел на сайте Федеральных Арбитражных Судов Российской Федерации http://kad.arbitr.ru.

После объявленного перерыва предварительное судебное заседание продолжено в отсутствие лиц, участвующих в деле, уведомленных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела в порядке статьи 156 АПК РФ.

Как следует из материалов дела, ИП ФИО1 является правообладателем земельного участка с кадастровым номером 01:04:5901001:184, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Майкопский район, п. Гузерипль, Гузерипльское лесничество, Хамышинское участковое лесничество, квартал 44, часть выдела 41.

ИП ФИО1 (Заявитель) обратился в филиал Общества Адыгейские электрические сети (далее - филиал) с заявкой № 3-04-04-040400-22-02156948 (через Портал электросетевых услуг Портал ТП РФ от 09.11.2023 № 5035887) на технологическое присоединение энергопринимающих устройств по адресу: Майкопский район, Гузерипьское лесничество, Хамышинское участковое лесничество, квартал 44, часть выдела 41, кадастровый номер: 01:04:5901001:1849 с заявленной мощностью 15 кВт по уровню напряжения - 0,4 кВ, категория надежности – III.

14.06.2022 комплектная заявка направлена в работу для подготовки документов, 22.06.2022 - потребителю в личный кабинет (ЛК) были направлены необходимые документы, для заключения договора. 

24.06.2022г. между истцом - ИП ФИО1  и  ответчиком - ПАО «Россети Кубань» в лице филиала ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, приложением к которому являются технические условия.

В рамках исполнения мероприятий по договору на технологическое присоединение, сетевой организации надлежало осуществить следующие мероприятия: 

1. Разработку схемы электроснабжения для присоединения и обеспечения передачи в сеть Заявителя величины разрешенной к использованию мощности. 

2. Установка трёхфазных средств коммерческого учёта электрической энергии (мощности) прямого включения на напряжении 0,4 кВ. 

3. Проектирование и строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 5 ВЛ-10 кВ Хм-3 до проектируемой КТП 10/0,4 кВ протяженностью 5,1 км. 4, марку. 

4. Проектирование и строительство КТП 10/0,4 кВ. 

5. Проектирование и строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП от проектируемой КТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств на расстоянии, не превышающем l5 метров от границ его земельного участка. 

6. После расчётного прибора учёта (измерительного комплекса) установить автоматический выключатель с IH=25 А.

В соответствии с пунктом 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы.

Согласно пункту 5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год с даты заключения договора. Работы, указанные в договоре, должны были быть выполнены в течение 1 года, т.е. до 24.06.2023г.

В силу пункта 6 договора технологического присоединения сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Пунктом 8 договора технологического присоединения предусмотрены обязанности потребителя по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях; по уведомлению сетевой организации о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.

В соответствии с пунктом 10 договора технологического присоединения, размер платы составляет 43 414  руб., кроме того НДС 20% 8 682.90 руб. Представленной в материалы дела копией чека подтверждается, что 24.06.2023г. указанная сумма оплачена истцом.  

Кроме того, истец выполнил обязательства, предусмотренные договором и техническими условиями, однако в установленный договором срок ПАО «Россети Кубань» работы не выполнил, тем самым нарушил условия договора.

22.09.2023г. истец направил претензию в ПАО «Россети Кубань» с требованием об исполнении обязательств по договору технологического присоединения к электрическим сетям.

19.10.2023г. истцом получен ответ на претензию, согласно которому ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети требуется больший ресурс времени, чем предусмотрено договором.

09.01.2024г. истец подал жалобу в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея с требованием о признании бездействий ПАО «Россети Кубань» незаконными и обязании исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусмотренные техническими условиями.

Постановлением о наложении штрафа по делу от 01.04.2024г. Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея признало ПАО «Россети Кубань» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 000 руб.

Кроме того, 04.04.2024г. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея вынесено представление, согласно которому ПАО «Россети Кубань» необходимо исполнить мероприятия по договору на техническое присоединение №40404-22-00739722-1 от 24.06.2022г.

Поскольку мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №40404-22-00739722-1 от 24.06.2022г. и техническими условиями 01-01/0693-22-вд ответчиком не произведены, истец вынужден обратиться в Арбитражный суд Республики Адыгея с настоящим иском для защиты своих прав и законных интересов.

При рассмотрении спора, суд руководствуется следующим. 

В соответствии со статьями 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

Помимо общих норм Гражданского кодекса Российской Федерации к спорным правоотношениям подлежат применению положения Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861).

В силу статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Правила № 861 определяют порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

Действие Правил № 861 распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Согласно пунктам 6, 7 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В силу статьи 26 Закон об электроэнергетике технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Согласно пункту 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1. 14 и 34 Правил № 861,  обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 4 Правил № 861 любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 Правил № 861).

Согласно пункту 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные названными Правилами.

Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

Последовательность действий по процедуре технологического присоединения установлена в пункте 7 Правил № 861 и включает в себя среди прочего подачу заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 названных Правил (подпункт "а"), в том числе увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств; заключение договора (подпункт "б").

Судом установлено и из материалов дела следует, что поступившая в адрес ответчика заявка истца соответствует Правилам № 861, предпринимателем представлен необходимый пакет документов. Названная заявка ответчиком аннулирована не была. 

В установленные сроки ответчиком был направлен в адрес предпринимателя проект договора, который был последним подписан. Кроме того, ответчиком в адрес предпринимателя были направления технические условия, содержащие в себе, в том числе, комплекс мероприятий, которые осуществляет сетевая организация.  Установленная плата по договору технологического присоединения была оплачена предпринимателем. 

Судом установлено и не оспаривается лицами, участвующими в деле, что ответчик является сетевой организацией, профессиональным участником рынка электроэнергетики, в силу чего заключение договора технологического присоединения к электрическим сетям, а равно и выполнение его условий,  является для ответчика обязательным. 

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Частью 1 статьи 314 ГК РФ установлено, что если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Из материалов дела усматривается, что в установленные действующим законодательством сроки ответчик не выполнил свои обязательства по договору. В указанной связи предприниматель обращался в адрес ответчика с требованием исполнить обязательна по договору технологического присоединения, а именно осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив энергоснабжение земельного участка, принадлежащего предпринимателю. 

В ответ на указанное требование, сетевая организация, ссылаясь  необходимость получения дополнительных разрешительных документов от органов государственной власти на выполнение мероприятий, указанных в технических условиях, указала на необходимость большего ресурса времени, чем было предусмотрено договором.

Однако и в разумные сроки ответчик не исполнил свои обязательства по договору, технологическое присоединение земельного участка предпринимателя к электрическим сетям не осуществлено. 

Неисполнение сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в пункте 16 Правил № 861 для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона «Об электроэнергетике».

В целях защиты своих прав предприниматель обращался в Управление Федеральной антимонопольной службы с жалобой на бездействие сетевой организации в части невыполнения обязательств по договору технологического присоединения. Антимонопольным органом установлено нарушение ответчиком сроков о осущесвтлению технологического присоединения и выполнения обязанностей субъекта естественных монополий.

Как установлено материалами дела, постановлением о наложении штрафа от 01.04.2024г. Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея признало ПАО «Россети Кубань» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 000 руб.

Кроме того, судом установлено, что 04.04.2024г. Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Адыгея вынесено представление, согласно которому ПАО «Россети Кубань» необходимо исполнить мероприятия по договору на техническое присоединение №40404-22-00739722-1 от 24.06.2022г. 

Как следует из пояснений представителя ответчика, постановление о наложении штрафа сетевой организацией не оспаривалось, штраф оплачен; представление также не оспаривалось сетевой организацией. Однако на момент рассмотрения настоящего спора в суде, обязательства по договору ответчиком не исполнены, мероприятия по технологическому присоединению не выполнены, технологическое присоединение энергопринимающих устройств предпринимателя к электрическим сетям не осуществлено. 

Таким образом, суд приходит к выводу, в материалах дела имеются доказательства невыполнения ответчиком требований законодательства по предмету настоящего иска. 

Довод ответчика на то, что спорный договор расторгнут им в одностороннем порядке и, в силу чего между сторонами отсутствуют договорные отношения, судом отклоняется, как не подтвержденный материалами дела, а также не соответствующий действующему законодательству Российской Федерации. 

Исследовав материалы дела, суд расценивает действия ответчика по невыполнению договора технологического присоединения, мероприятий по технологическому  присоединению энергопринимающих устройств ответчика к электрическим сетям в соответствии с заявкой истца как необоснованное уклонение от договорных и законных обязательств.   

В силу части 1 статьи 4 ГК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Защита гражданских прав осуществляется способами, установленными статьей 12 ГК РФ, а также иными способами, предусмотренными законом. Способ защиты должен соответствовать содержанию нарушенного права и характеру нарушения.

В рамках настоящего дела ИП ФИО1 обращается с требованием к ответчику о возложении обязательств в течение двух месяцев с момента в законную силу решения по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения в электрическим сетям № 40404-22-00739722-1 от 24.06.2022 г. и выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями № 01-01/0693-22-вд – приложение №1.

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу, что в данном случае истцом избран надлежащий способ защиты нарушенных прав, поскольку  путем подачи настоящего иска восстанавливаются нарушенные права истца.

Таким образом, суд приходит к выводу, что заявленные требования ИП ФИО1 о возложении на ПАО «Россети Кубань» обязательств в течение двух месяцев с момента в законную силу решения по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 40404-22-00739722-1 от 24.06.2022 г. и выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями № 01-01/0693-22-вд – приложение №1, законны, обоснованы и подлежат удовлетворению.

Рассматривая требования истца о взыскании судебной неустойки в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда по день фактического исполнения, суд отмечает следующее. 

Пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ установлено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта.

По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее - постановление Пленума № 7), суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 32 постановления Пленума № 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Истцом заявлено о взыскании судебной неустойки в размере 5 000 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда по день фактического исполнения. Ответчиком о снижении размера заявленной судебной неустойки не заявлено. 

Суд, исследовав материалы дела и учитывая общие принципы справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из недобросовестного поведения, необходимость соблюдения баланса интересов участвующих в деле лиц, конкретные обстоятельства дела, полагает требования истца о взыскании судебной неустойки законными и обоснованными. С учетом изложенного, суд полагает возможным определить размер неустойки в виде компенсации за ожидание исполнения решения суда из расчета 5 000  руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Разрешая вопрос о распределении судебных расходов, суд приходит к следующему. 

Пунктом 1 статьи 110 АПК РФ предусмотрено, что судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

За рассмотрение настоящего спора подлежала уплате государственная пошлина в размере 6 000 рублей, которая была уплачена истцом при подаче искового заявления, подлежит отнесению на ответчика и взысканию в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд:

Р Е Ш И Л:

возложить на публичное акционерное обществ «Россети Кубань» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обязанность в течение двух месяцев с момента в законную силу решения по настоящему делу исполнить обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 40404-22-00739722-1 от 24.06.2022 г., заключенном с индивидуальным предпринимателем ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>), и выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями № 01-01/0693-22-вд – приложение №1. 

Установить судебную неустойку в размере 5000 рублей за каждый день просрочки исполнения  настоящего решения.

Взыскать  судебную неустойку в указанном размере с ПАО «Россети Кубань» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуальным предпринимателем ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) в случае неисполнения ответчиком решения суда об  исполнения обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и выполнения мероприятий, предусмотренных техническими условиями, за каждый день  просрочки до момента его исполнения.

Взыскать  с ПАО «Россети Кубань» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу индивидуальным предпринимателем ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) расходы по уплате государственной пошлины в размере 600 рублей.

Решение направить лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в картотеке арбитражных дел на сайте Федеральных арбитражных судов Российской Федерации http://kad.arbitr.ru. По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу, если это решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции. Жалоба подается через суд, вынесший решение. 

 

Судья                                                                                               Парасюк Е. А.