АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А45-691/2024

город Новосибирск

27 марта 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при  ведении протокола секретарем судебного заседания Никоненко А.Д., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения  города Новосибирска «Управление дорожного строительства» (ОГРН  1065406101265), г. Новосибирск  

к обществу с ограниченной ответственностью «СТС-Плюс» (ОГРН 1165476085345),  г. Новосибирск,  

при участии третьего лица: общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Плюс» (ОГРН 1175476123117), г. Новосибирск,  

об обязании устранить недостатки по муниципальному контракту от 08.08.2022 №  83/22.  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

обязать общество с ограниченной ответственностью «СТС-Плюс» (ОГРН  1165476085345) при наступлении климатических условий (в сухую погоду, при  температуре окружающего воздуха не ниже 50С) в срок не позднее 01.06.2024,  устранить следующие недостатки (дефекты) в выполненных работах по  муниципальному контракту от 08.08.2022 № 83/22:  

1) на объекте «ул. Большевистская» между домами по ул. Большевистская, 21А  и ул. Большевистская, 37:  

1. выкрашивание а/б покрытия проезжей части – 2м2. (на стыке поворот на  Октябрьский мост);  

2) на объекте «ул. Березовая» от дома по ул. Березовая, 1 до дома по ул.  Березовая, 9:  

1. выкрашивание а/б покрытия вокруг колодца- 1 шт. (между домами по ул.  

Березовая, 2 и 1); 

2. выкрашивание продольного шва на а/б покрытии проезжей части – 150м.п. (от  

ул. Березовая, 9 до 7; от ул. Пришвина, 1 до ул. Березовая, 1); 3. выкрашивание а/б в месте отбора проб- 2 шт. (ул. Березовая,3 и 2/1); 3) на объекте «ул. Российская» от ул. Гнесиных до ул. Героев Труда: 1. просадка колодца – 1 шт. (пересечение ул. Российская и ул. Героев Труда). 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТС-Плюс» (ОГРН  

1165476085345) в доход федерального бюджета Российской Федерации 6000 рубля  

государственной пошлины. 

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  

арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия. 

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный  

суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения  

арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  

отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья Е.Л. Серёдкина