﻿ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65, лит. А

http://13aas.arbitr.ru

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-14463/2021

28 октября 2021 года

г. Санкт-Петербург

Резолютивная часть постановления объявлена     06 октября 2021 года

Постановление изготовлено в полном объеме  28 октября 2021 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего  Семиглазова В.А.

судей  Масенковой И.В., Пряхиной Ю.В.

при ведении протокола судебного заседания:  секретарем судебного заседания Васильевой Я.А.

при участии:  

от истца: Куликова А.А. по доверенности от 03.12.2020, Донских П.Е. по доверенности от 09.07.2021

от ответчика: не явился, извещен

от 3-го лица: не явился, извещен

 

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-27269/2021)  ООО «Н2О» на решение  Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24.06.2021 по делу № А56-14463/2021 (судья Герасимовой М.С.), принятое

по иску (заявлению)  Общества с ограниченной ответственностью "Петербургская Строительная Корпорация"

к  Обществу с ограниченной ответственностью "Н2О"

3-е лицо:  ООО "Сэтл Строй"

о взыскании долга и неустойки по договору, 

 

установил:

ООО "Петербургская Строительная Корпорация" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО "Н2О" о взыскании 358 974,37 руб. долга и 51 720,03 руб. неустойки по договору № ОКТ-ВЭО-ПАР от 24.06.2019, 54 035,27 руб. долга и 10 922,03 руб. неустойки по договору № Н16-ОВВУ/ДОО от 08.07.2019, 241 354,00 руб. долга и 161 565,64 руб. неустойки по договору № ОКТ-У/ОВВК-2 от 08.04.2019, 125 687,50 руб. долга и 46 948,49 руб. неустойки по договору № ОКТ-У/ВЭО-ПАР от 24.06.2019, 230 941,26 руб. долга и 117 166,39 руб. неустойки по договору № Н16-ОВВК/ДОО/У от 08.07.2019, а также 26 993,00 руб. расходов по оплате госпошлины. 

К участию в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора привлечено ООО «Сэтл Строй».

Решением суда от 24.06.2021 заявленные требования удовлетворены в полном объеме. 

В апелляционной жалобе ответчик, ссылаясь на неполное исследование судом материалов дела и существенное нарушение норм материального и процессуального права, просит решение отменить. В обоснование жалобы податель указывает, что судом необоснованно не применены нормы ст. 333 Гражданского кодекса РФ, в связи с чем заявляет ходатайство о снижении  неустойки в связи с ее явной несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, просит при определении размера неустойки исходить из 2-х кратной учетной ставки Банка России. Согласно проведенному Ответчиком контррасчету, размер неустойки составляет 45 351,22 руб.

Представители истца в судебном заседании возражали против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве.

От ответчика в суд поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие представителя ООО "Н2О".

Дело рассматривается в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в отсутствие неявившихся участников процесса. 

Законность и обоснованность решения суда проверены в апелляционном порядке.

Как следует из материалов дела, между ООО «ПСК» (Генеральный подрядчик), ООО «Сэтл Строй» (Подрядчик) и ООО «Н20» (Субподрядчик) заключены трехсторонние договоры Субподряда № ОКТ-ВЭО-ПАР от 24.06.2019, № Н16-ОВВК/ДОО от 08.07.2019.

В соответствии с главой 9 договоров Субподряда № ОКТ-ВЭО-ПАР от 24.06.2019, № Н16-ОВВК7ДОО от 08.07.2019 Истец обязался оказывать услуги генподряда Ответчику, а Ответчик, в соответствии с п. 5.2. Договоров Субподряда обязался оплачивать оказанные услуги не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, с момента предоставления Истцом счета-фактуры или Акта об оказанных услугах.

Согласно п. 4.5. договоров Ответчик возмещает Истцу следующие расходы:

- расходы за потребленные электроснабжение, водоснабжение, водоотведение (количество потребленных коммунальных услуг фиксируется ежемесячно в двухсторонних актах согласно показаниям прибора учета, стоимость определяется по тарифу, указанному в бухгалтерских документах поставщика коммунальных услуг (акт, счет-фактура));

- расходы по вывозу отходов в размере стоимости передачи отходов различных классов опасности на использование и размещение. Объемы фиксируются ежемесячно в двухсторонних актах. В случае немотивированного отказа Субподрядчика (Ответчика) в подписании двухстороннего акта, акт подписывается в одностороннем порядке Генподрядчиком (Истцом) и имеет полную юридическую силу.

Согласно п. 4.6. Договоров субподряда Истец оказывает следующие услуги Ответчику:

- услуги по предоставлению электроэнергии, вырабатываемой от арендуемых Ответчиком и предоставляемых Истцом ДЭС, а также от других источников электроэнергии. Стоимость оплачивается Ответчиком ежемесячно и определяется как произведение количества фактически потребленной Ответчиком электроэнергии и стоимости 1 кВт электроэнергии по тарифам АО «Петербургская сбытовая компания». Количество фактической потребленной электроэнергии фиксируется ежемесячно в двухсторонних актах согласно показаниям прибора учета, а в случае отсутствия электросчетчиков - согласно списку электрооборудования, задействованного при выполнении работ по Договору.

В соответствии с п. 4.7. Договоров расходы Истца, оказанные согласно п.п. 4.5.-4.6. оплачиваются в следующем порядке:

- оплата производится в период с даты начала выполнения работ по Договору до подписания Акта о полном выполнении обязательств по Договору;

- оплата производится ежемесячно на основании Актов об оказании услуг, подписанных Сторонами, и счетов, представляемых Истцом Ответчику. Вышеуказанных Акт об оказании услуг должен быть подписан Ответчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его получения. В случае не подписания Акта и не предоставления мотивированного отказа от подписания Ответчиком Истцу, Акт считается принятым без возражений и подписанным и подлежит оплате.

Оплата производится не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта.

Ответчик компенсирует Истцу расходы по использованию механизмов не указанных в подпунктах пункта 4.5. Договоров, а также затраты по оказанию услуг (за исключением услуг, обозначенных в п.п. 9.1.-9.18. Договоров) на основании отдельного договора, заключенного между Истцом и Ответчиком.

Услуги, перечисленные в п.п. 9.1.-9.18., 9.20. Договоров, подлежат оплате Ответчиком с момента начала выполнения работ по Договору до даты фактического окончания выполнения работ. Оплата производится ежемесячно, в размере 1,5% от стоимости выполненных работ Ответчиком, указанных в Справках о стоимости выполненных работ по форме № КС-3 за отчетный месяц (в соответствии с п. 4.8. Договоров).

Пунктами 9.1.-9.18. Договоров определен объем услуг.

Оплата  за  оказанные услуги,  перечисленные  в  п.п.  9.1.-9.18.,  9.20. Договоров производится в соответствии с п. 5.2. Договора на основании Актов об оказанных услугах, счетов-фактур и счетов, выставленных Генподрядчиком (Истцом), не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты предоставления Генподрядчиком (Истцом) счета-фактуры и Акта об оказанных услугах (в зависимости от того, какое событие наступит позднее).

Согласно Акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 09.02.2021, с учетом частичной оплаты, у Ответчика перед Истцом образовалась задолженность, по Договору Субподряда № ОКТ-ВЭО-ПАР от 24.06.2019 за оказанные генподрядные услуги, в размере: 358 974,37 (Триста пятьдесят восемь тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 37 копеек из следующих актов:

-Акт №2723 от 31.08.2020 возмещение расходов за потребленную электроэнергию по договору № ОКТ-ВЭО-ПАР от 24.06.2019 на Объекте: СПб, Октябрьская наб. 38, на 17.07.2020г.

-Акт №1820 от 30.06.2020 возмещение расходов за потребленную электроэнергию по договору № ОКТ-ВЭО-ПАР от 24.06.2019 на Объекте: СПб, Октябрьская наб. 38, на 21.05.2020г.

-Акт №2418 от 31.07.2020 генподрядные услуги за июль 2020г. по договору № ОКТ-ВЭО-ПАР от 24.06.2019 на объекте строительства: многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенными подземными гаражами, объектом дошкольного образования на 190 мест, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38, на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0633102:4248.

-Акт №2419 от 31.07.2020 услуги по договору № ОКТ-У/ВЭО-ПАР от 24.06.2019 согласно положению №1 п. 12-13 на объекте, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38, на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0633102:4248 (0,5%).

-Акт №1818 от 30.06.2020 генподрядные услуги за июнь 2020г. по договору № ОКТ-ВЭО-ПАР от 24.06.2019 на объекте строительства: многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенными подземными гаражами, объектом дошкольного образования на 190 мест, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38, на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0633102:4248.

-Акт №2353 от 31.07.2020 возмещение расходов за потребленную электроэнергию по договору № ОКТ-ВЭО-ПАР от 24.06.2019 на объекте: СПб, Октябрьская наб. 38, на 10.06.2020г.

-Акт №1819 от 30.06.2020 услуги по договору № ОКТ-У/ВЭО-ПАР от 24.06.2019 согласно приложению №1 п. 12-13 на объекте, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38, на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0633102:4248 (0,5%).

-Акт №736 от 31.03.2020 генподрядные услуги за март 2020г. по договору № ОКТ-ВЭО-ПАР от 24.06.2019 на объекте строительства: многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями   обслуживания,   встроенно-пристроенными   подземными   гаражами,   объектом дошкольного образования на 190 мест, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38, на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0633102:4248.

-Акт №734 от 31.03.2020 генподрядные услуги за февраль 2020г. по договору № ОКТ-ВЭО-ПАР от 24.06.2019 на объекте строительства: многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями обслуживания, встроенно-пристроенными подземными гаражами, объектом дошкольного образования на 190 мест, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38, на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0633102:4248.

-Акт №739 от 31.03.2020 возмещение расходов за потребленную электроэнергию по договору № ОКТ-ВЭО-ПАР от 24.06.2019 на объекте СПб, Октябрьская наб. 38, на 25.02.2020.

Пунктом 13.2.25. Договора установлена ответственность Субподрядчика за несвоевременную оплату по предоставленным Генеральным подрядчиком услугам в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Согласно вышеприведенного расчета, сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате составляет 51 720,03 руб.

Согласно Акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 09.02.2021, с учетом частичной оплаты, у Ответчика перед Истцом образовалась задолженность, по Договору Субподряда № Н16-ОВВК/ДОО от 08.07.2019 за оказанные генподрядные услуги, в размере: 54 035,27 (Пятьдесят четыре тысячи тридцать пять) рублей 27 копеек из следующих актов:

-Акт №2682 от 31.08.2020 генподрядные услуги за август 2020г. по договору № HI 6-ОВВК/ДОО от 08.07.2019 за комплекс строительных работ на Объекте: многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями, встроенно-пристроенной дошкольной образовательной организацией и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 16, на земельном участке с кадастровым номером 78:36:0005121:1223.

-Акт №1247 от 30.04.2020 генподрядные услуги за апрель 2020г по договору № Н16-ОВВК/ДОО от 08.07.2019 за комплекс строительных работ на Объекте: многоквартирного жилого дома   со   встроенно-пристроенными   помещениями,   встроенно-пристроенной   дошкольной образовательной организацией и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 16, на земельном участке с кадастровым номером 78:36:0005121:1223.

Пунктом 13.2.25. Договора установлена ответственность Субподрядчика за несвоевременную оплату по предоставленным Генеральным подрядчиком услугам в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки. 

Согласно расчета, сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств по оплате составляет 10 922,03 руб.

На основании п. 4.7. трехсторонних Договора субподряда ООО «ПСК» (Генеральный подрядчик) и ООО «Н20» (Субподрядчик) заключены Договора на оказание услуг № HI 6-ОВВК/ДОО/У от 08.07.2019, № ОКТ-У/ВЭО-ПАР от 24.06.2019, № ОКТ-У/ОВВК-2 от 08.04.2019.

В соответствии с предметом Договоров Генподрядчик (Истец) обязуется оказать услуги, указанные в разделе 3 Договора (Полный перечень в Приложении № 1 к Договору), а Субподрядчик (Ответчик) принять эти услуги и оплатить.

Пунктом 3.1. Договора определен объем услуг.

Субподрядчик производит оплату в период с начала выполнения работ на Объекте и до даты подписания Итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ по Трехстороннему Договору по ценам, указанном в Приложении № 1 к Договору на основании представленных Генподрядчиком (Истцом) счета, счет-фактуры и Акта об оказанных услугах, в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Акта оказания услуг.

Акт оказания услуг подписывается Субподрядчиком (Ответчиком) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения актов приема-сдачи оказанных услуг, а в случае несоответствия сведений Субподрядчик (Ответчик) направляет Генподрядчику (Истцу) мотивированный отказа в подписании Акта. В случае неполучения Генподрядчиком (Истцом) мотивированного отказа в срок, указанный в Договоре, Акт приема-передачи оказанных услуг считается подписанным и подлежит оплате, в соответствии с главой 5 Договора на оказание услуг.

Согласно Акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 09.02.2021 у ООО «Н20» перед ООО «ПСК» образовалась задолженность по Договору на оказание услуг № ОКТ-

У/ОВВК-2 от 08.04.2019 в размере 241 354 (Двести сорок одна тысяча триста пятьдесят четыре) рубля из следующих актов:

-Акт №149 от 31.01.2020 организация обращения отходов (бытовые отходы) по договору №ОКТ-У/ОВВК-2 от 08.04.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 38; организация обращения отходов (строительные отходы) по договору № ОКТ-У/ОВВК-2 от 08.04.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 38; услуги по обслуживанию бытового городка на объекте по адрес: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 38; услуги по договору № ОКТ-У/ОВВК-2 от 08.04.2019 согласно приложению №1 п. 12-13 на объекте расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38, на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0633102:4248 (0,5%); мойка колес на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38.

-Акт №151 от 31.01.2020 возмещение расходов за потребленную электроэнергию по договору № ОКТ-У/ОВВК-2 от 08.04.2019, на объекте: СПб, Октябрьская наб. 38, на 05.12.2019г.

-Акт №733 от 31.03.2020 услуги по договору № ОКТ-У/ОВВК-2 от 08.04.2019 согласно приложению №1 п. 12-13 на объекте, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38, на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0633102:4248 (0,5%).

-Акт №1817 от 30.06.2020 организация обращения отходов (бытовые отходы) по договору № ОКТ-У/ОВВК-2 от 08.04.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д38; организация обращения отходов (строительные отходы) по договору № ОКТ-У/ОВВК-2 от 08.04.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д38; услуги по обслуживанию бытового городка на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д 38; мойка колес по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д 38; услуги по договору № ОКТ-У/ОВВК-2 от 08.04.2019 согласно приложению №1 п. 12-13 на объекте расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38, на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0633102:4248(0,5%).

-Акт №2351 от 31.07.2020 организация обращения отходов (бытовые отходы) по договору № ОКТ-У/ОВВК-2 от 08.04.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д 38; уборка мусора по договору № ОКТ-У/ОВВК-2 от 08.04.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д 38; услуги по обслуживанию бытового городка на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д 38; мойка колес по адрес: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д 38.

-Акт №2417 от 31.07.2020 услуги по договору № ОКТ-У/ОВВК-2 от 08.04.2019 согласно приложению №1 п. 12-13 на объекте расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38, на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0633102:4248 (0,5%).

-Акт №2721 от 31.08.2020 организация обращения отходов (бытовые отходы) по договору № ОКТ-У/ОВВК-2 от 08.04.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38; организация обращения отходов (строительные отходы) по договору № ОКТ-У/ОВВК-2 от 08.04.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38; услуги по обслуживанию бытового городка на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38; мойка колес по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38; услуги по договору № ОКТ-У/ОВВК-2 от 08.04.2019 согласно приложению №1 п. 12-13 на объекте расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38, на земельном участке с кадастровым номером: 78:12:0633102:4248 (0,5%).

В соответствии с п. 7.2. Договора установлена ответственность за несвоевременную оплату оказанных Генеральным подрядчиком услуг в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате по Договору за каждый день просрочки, а в случае неоплаты более 20 календарных дней – размер пени увеличивается до 0,3 %.

Согласно расчета, сумма пени за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате составляет 161 565,64 (Сто шестьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) рублей 64 копейки.

Согласно Акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 09.02.2021 у ООО «Н20» перед ООО «ПСК» образовалась задолженность по Договору на оказание услуг № ОКТ-У/ВЭО-ПАР от 24.06.2019 в размере 125 687, 50 (Сто двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек из следующих актов:

-Акт №2352 от 31.07.2020 организация обращения отходов (бытовые отходы) по договору № ОКТ-У/ВЭО-ПАР от 24.06.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38; организация обращений отходов (строительные отходы) по договору № ОКТ-У/ВЭО-ПАР от 24.06.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 38; уборка мусора по договору № ОКТ-У/ВЭО-ПАР от 24.06.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38; услуги по обслуживанию бытового городка на объекте по адресу : г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38; мойка колес по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб. д. 38.

-Акт №735 от 31.03.2020 услуги по договору № ОКТ-У/ВЭО-ПАР от 24.06.2019 согласно приложению №1 п. 12-13 на объекте, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38, на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0633102:4248 (0,5%)

-Акт №737 от 31.03.2020 организация обращения отходов (бытовые отходы) по договору № ОКТ-У/ВЭО-ПАР от 24.06.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38; уборка мусора по договору № ОКТ-У/ВЭО-ПАР от 24.06.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38; услуги по обслуживанию бытового городка на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 38; услуги по договору № ОКТ-У/ВЭО-ПАР от 24.06.2019 согласно приложению №1 п.12-13 на объекте расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.38, на земельном участке с кадастровым номером 78:12:0633102:4248 (0,5%).

В соответствии с п. 7.2. Договора установлена ответственность за несвоевременную оплату оказанных Генеральным подрядчиком услуг в размере 0,1 % от суммы, подлежащей оплате по Договору за каждый день просрочки, а в случае неоплаты более 20 календарных дней - размер пени увеличивается до 0,3% от суммы за каждый день просрочки.

Согласно расчета, сумма пени за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате составляет 46 948,49 (Сорок шесть тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 49 копеек.

Согласно Акта сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2020 по 09.02.2021 у ООО «Н20» перед ООО «ПСК» образовалась задолженность по Договору на оказание услуг № HI 6-ОВВК/ДОО/У от 08.07.2019 в размере 230 941,26 (Двести тридцать тысяч девятьсот сорок один) рубль, 26 копеек из следующих актов:

-Акт №1152 от 30.04.2020 изготовление пропуска на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 16; перекодировка пропуска на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 16; организация обращения отходов (бытовые отходы) по договору № HI 6-ОВВК/ДОО/У от 08.07.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 16; организация обращения отходов (строительные отходы) по договору № Н16-ОВВК/ДОО/У от 08.07.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 16; услуга трактора по договору № Н16-ОВВК/ДОО/У от 08.07.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская дом 16; уборка мусора по договору № Н16-ОВВК/ДОО/У от 08.07.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, улш. Новолитовская, дом 16; услуги по обслуживанию бытового городка на объекте по адресу: н. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом. 16; услуги по договору № Н16-ОВВК/ДОО/У от 08.07.2019 согласно приложению №1 п.12-13 на объекте расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 16, на земельном участке с кадастровым номером 78:36:0005121:1223 (0,5%).

-Акт №1484 от 29.05.2020 возмещение расходов за потребленную электроэнергию по договору № Н16-ОВВК/ДОО/У от 08.07.2019 на объекте: г. Санкт-Петербург, Новолитовская на 30.04.2020.

-Акт №2683 от 31.08.2020 организация обращения отходов (бытовые отходы) по договору № Н16-ОВВК/ДОО/У от 08.07.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 16; организация обращения отходов (строительные отходы) по договору № HI 6-ОВВК/ДОО/У от 08.07.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 16; услуги трактора по договору № Н16-ОВВК/ДОО/У от 08.07.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 16; уборка мусора по договору № Н16-ОВВК/ДОО/У от 08.07.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 16; восстановление порядка по ОТ и ТБ по договору № Н16-ОВВК/ДОО/У от 08.07.2019 на объекте по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 16; услуги по договору № Н16-ОВВК/ДОО/У от 08.07.2019 согласно приложению №1 п. 13.14 на объекте расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Новолитовская, дом 16, на земельном участке с кадастровым номером 78:36:0005121:1223 (0,5%).

-Акт №2684 от 31.08.2020 возмещение расходов за потребленную электроэнергию по договору 78:36:0005121:1223 (0,5%). На объекте: г. Санкт-Петербург, Новолитовская на 31.07.2020.

В соответствии с п. 7.2. Договора установлена ответственность за несвоевременную оплату оказанных Генеральным подрядчиком услуг в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате по Договору за каждый день просрочки, а в случае неоплаты более 20 календарных дней - размер пени увеличивается до 0,3% от суммы за каждый день просрочки.

Согласно расчета, сумма пени за ненадлежащее исполнение обязательств по оплате составляет 117 166,39 (Сто семнадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 39 копеек.

В связи с нарушением ответчиком обязательств по договору и оставлением претензии без удовлетворения, истец обратился в суд с настоящим иском.

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, признал их обоснованными по праву и размеру. 

Изучив материалы дела, проверив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта, в связи со следующим.

Согласно пункту 1 статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

В соответствии со статьями 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Согласно пункту 2 статьи 747 ГК РФ заказчик обязан в случаях и в порядке, предусмотренных договором строительного подряда, оказывать услуги, связанные с обеспечением технической документации для выполнения работ, другие услуги, связанные с координацией работы субподрядчика. Оплата предоставленных заказчиком услуг, указанных в пункте 2 названной статьи, осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных договором строительного подряда.

Отношения оказания услуг генподряда является отношениями возмездного оказания услуг.

В соответствии со статьей 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Подрядчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (статья 781 ГК РФ).

Материалами дела подтверждается факт выполнения истцом условий договоров, заключенных путем их подписания электронной подписью, в связи с чем, у ответчика возникла обязанность по оплате.

Согласно п. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Расчет суммы долга судом проверен и признан обоснованным.

Сведений о наличии у ответчика аргументированных  возражений  в деле не имеется, и материалами дела, подтверждается наличие задолженности, доказательств погашения предъявленной ко взысканию суммы задолженности ответчиком не представлено.

Согласно п.1 ст.330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Проверив расчет начисления неустойки, суд признал его обоснованным.

Ответчик, в жалобе указывает на то, что судом первой инстанции не применены нормы ст. 333 ГК РФ, приведены доводы о несоразмерности суммы неустойки по отношению к последствиям нарушенного обязательства по оплате за оказанные услуги.

В соответствии со статьей 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

В пункте 72 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 №7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что заявление ответчика о применении положений статьи 333 ГК РФ может быть сделано исключительно при рассмотрении дела судом первой инстанции или судом апелляционной инстанции в случае, если он перешел к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции (часть 5 статьи 330, статья 387 ГПК РФ, часть 6.1 статьи 268, часть 1 статьи 286 АПК РФ).

Из материалов дела усматривается, что ответчиком о несоразмерности неустойки при рассмотрении дела в суде первой инстанции не заявлялось, в связи с чем у суда апелляционной инстанции отсутствуют правовые основания для снижения размера неустойки.

Вместе с тем, судебная коллегия суда апелляционной инстанции отмечает, что степень несоразмерности заявленной истцом неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу закона только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела. В каждом конкретном случае суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом обстоятельств спора и взаимоотношений сторон.

В конкретном случае, такая несоразмерность не установлена.

Само по себе превышение договорной неустойки над размером банковского процента применительно к рассматриваемому делу в данном конкретном случае не является основанием для снижения пени в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При этом, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 421 ГК РФ).

Ответчик в соответствии с принципом свободы договора подписал его на изложенных в договоре условиях относительно размера ответственности сторон.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции.

На основании изложенного, апелляционная коллегия полагает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства, имеющие значение для дела, оценил в совокупности и взаимосвязи представленные сторонами доказательства, правильно применив нормы материального и процессуального права принял законное и обоснованное решение. Оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции апелляционным судом не установлено.

В силу части 1 статьи 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. Копии решения на бумажном носителе могут быть направлены лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда  города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  от 24.06.2021 по делу №  А56-14463/2021  оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление  может быть  обжаловано  в  Арбитражный  суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

 

Председательствующий

В.А. Семиглазов

Судьи

И.В. Масенкова

 Ю.В. Пряхина