Арбитражный суд Пензенской области ФИО1 ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: 

<

***>, факс: 

<

***>, http://www.penza.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

Дело № А49-9559/2025

город Пенза

22 января 2026 г.

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Удавихиной В.К. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Агеевой Ю.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по заявлению ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> (440000 

<

...>/ФИО2, д. 1/2)

к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области (440000, 

<

...>)

о признании незаконными и отмене постановления о назначении административного наказания и представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (440047, 

<

...>),

при участии:

от заявителя – представителя ФИО4 по доверенности от 25.06.2025 № 25062520 (паспорт, диплом),

от ответчика – представителя ФИО5 по доверенности от 15.01.2026 № ЕД/117/26 (паспорт, диплом),

от третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, – ФИО3 – не явились, надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания,

установил:

ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» (далее – заявитель, ПАО «Россети Волга», общество, сетевая компания) 04.09.2025 обратилось в арбитражный суд с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области о признании незаконными и отмене постановления о назначении административного наказания по делу № 058/04/9.21-498/2025 об административном правонарушении от 28.08.2025 и представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по делу от 28.08.2025 № 058/04/9.21-498/2025, принятых Управлением Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области в отношении ПАО «Россети Волга».

Определением суда от 25.09.2025 после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, заявление принято к производству.

Определением суда от 30.10.2025 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена ФИО3.

Судебное заседание по делу, назначенное на 18.12.2025, отложено на 22.01.2026.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о дате, времени и месте судебного заседания по делу с его участием в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ, Кодекс), явку представителя в судебное заседание не обеспечило.

Информация о принятии заявления к производству, о времени и месте судебного заседания размещена арбитражным судом на официальном сайте Арбитражного суда Пензенской области в сети Интернет по адресу: www.penza.arbitr.ru в соответствии с порядком, установленным статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ, Кодекс).

С учетом положительного мнения присутствующих в заседании суда участников дела, в соответствии с нормами статей 156, 210 АПК РФ суд проводит судебное разбирательство в отсутствие неявившегося указанного выше лица.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования по основаниям, изложенным в заявлении (т. 1, л. д. 5-7), настаивал на признании постановления о назначении административного наказания по делу № 058/04/9.21-498/2025 об административном правонарушении от 28.08.2025 Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области и представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 28.08.2025 по делу № 058/04/9.21-498/2025 незаконными и отменить, также указал, что общество нарушило срок технологического присоединения по не зависящим от него причинам, оплатило административный штраф в размере половины суммы наложенного административного штрафа в соответствии с частями 1.3-3 статьи 32.2 КоАП РФ (т. 1, л. д. 129). В обоснование соей позиции привел следующие доводы.

Постановлением УФАС России по Пензенской области от 28.08.2025 о назначении административного наказания по делу № 058/04/9.21-498/2025 об административном правонарушении по обращению ФИО3 (т. 1, л. д. 8-11) ПАО «Россети Волга» привлечено к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 600 000 руб. 28.08.2025 в отношении заявителя антимонопольным органом вынесено представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по делу № 058/04/9.21-498/2025 (т. 1, л. д. 12-13). Между ПАО «Россети Волга» и ФИО3 заключен договор от 05.03.2024 № 2440-001199 на технологическое присоединение малоэтажной жилой застройки (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом), которая будет располагаться на земельном участке с кадастровым номером 58:05:0701101:4846 по адресу: 

<

...> максимальной мощностью 10 кВт, категория надежности – 3, класс напряжения – 0,4 кВ (т. 1, л. д. 14). Согласно техническим условиям № ПЭ0032197 сетевой организации необходимо выполнить мероприятия по строительству объектов электросетевого хозяйства для подключения энергопринимающих устройств

заявителя. В соответствии с пунктом 1.7 договора от 05.03.2024 № 2440-001199 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (т. 1, л. д. 17). С целью исполнения данного договора со стороны сетевой организации проведены закупочные и конкурентно-конкурсные процедуры, заключен договор подряда от 14.08.2025 № 2540-005300 на выполнение работ «под ключ» с ООО «Электриксервис» (т. 1, л. д. 18-35). В связи с длительным согласованием условий договора подряда № 2540-005300 выполнение мероприятий в сроки, определенные договором об осуществлении технологического присоединения, заключенного с ФИО3, не представлялось возможным по независящим от общества обстоятельствам. Согласно п. 3.2.3. договора подряда срок завершения работ – 25.12.2025. Такж пояснил, что в настоящее время ведутся переговоры с собственником земельного участка с кадастровым номером 58:05:0701101:570, на котором находится ТП 10/0,4 кВ № 3115 мощностью 160 кВА, с целью подключения энергопринимающих устройств ФИО3

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области (далее – ответчик, УФАС России по Пензенской области, антимонопольный орган) был представлен письменный отзыв на заявление ПАО «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» (т. 1, л. д. 61-62) и копии материалов по делу № 058/04/9.21-498/2025 (т. 1, л. д. 65-129), а также дополнения к отзыву (Т. 2, л. д. 26). В судебном заседании представитель антимонопольного органа поддержал позицию по основаниям и доводам, изложенным в отзыве и дополнениях к нему, просил отказать заявителю в удовлетворении заявленных требований в полном объеме. Антимонопольный орган полагает, что основания для признания незаконными постановления об административном правонарушении и представления по делу об административном правонарушении № 058/04/9.21-498/2025 отсутствуют в связи со следующим.

В рамках рассмотрения дела об административном правонарушении № 058/04/9.21-498/2025 установлено, что ПАО «Россети Волга» не исполнило обязанность по осуществлению технологического присоединения малоэтажной жилой застройки (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом), расположенной по адресу: 

<

...> (кадастровый номер 58:05:0701101:4846), принадлежащей ФИО3, к электрическим сетям в установленный срок, предусмотренный Правилами № 861. Постановлением от 28.08.2025 по делу об административном правонарушении 058/04/9.21-498/2025 ПАО «Россети Волга» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 600 000 руб., а также внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершения административного правонарушения по делу № 058/04/9.21-498/2025.

Довод заявителя о том, что при вынесении оспариваемых постановления и представления не учтено отсутствие вины, не исследованы причины и условия, делающие невозможным исполнение условий принятого обязательства в установленный срок, ответчик считает подлежащими отклонению ввиду следующего. В рамках рассмотрения административного дела сведения о прекращении противоправного поведения ПАО «Россети Волга» не представило. Как указано ранее, договор № 2440-001199 между ПАО «Россети Волга» и ФИО3 заключен 05.03.2024. В соответствии с пунктом 1.7 договора от 05.03.2024 № 2440-001199 срок выполнения мероприятий по технологическому

присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения договора (то есть до 05.09.2024). Нарушение срока выполнения мероприятий по договору технологического присоединения связано с длительным сроком согласования условий договора подряда от 14.08.2025 № 2540-005300 на выполнение работ «под ключ», заключенного с ООО «Электриксервис». Только спустя 11 месяцев (14.08.2025) с момента истечения установленных договором технологического присоединения от 05.03.2024 № 2440-001199 сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта заявителя Сетевая организация заключила договор подряда № 2540-005300 с ООО «Электросервис». По мнению антимонопольного органа, указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Сетевой организацией в установленные сроки не принимались необходимые меры по исполнению договора от 05.03.2024 № 2440-001199. Более того, сетевая организация не представила доказательств невозможности исполнения данного договора в установленный срок, в связи с чем в целях устранения причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по делу № 058/04/9.21-498/2025, Пензенское УФАС России вынесло обществу представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения: ПАО «Россети Волга» выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств по договору от 05.03.2024 № 2440-001199 с ФИО3 в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Технологическое присоединении осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами № 861. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих правил и наличии технической возможности технологического присоединения (пункт 3 Правил № 861). Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что сетевой организацией в установленные сроки не принимались необходимые меры по исполнению договора от 05.03.2024 № 2440-001199. Более того, сетевая организация не представила доказательств невозможности исполнения данного договора.

Представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, – ФИО3 (далее – третье лицо, ФИО3), поддержал позицию, изложенную в письменном отзыве (т. 1, л. д. 140), просил в удовлетворении заявленных требований заявителю отказать, свою позицию обосновывал следующим.

С момента окончания срока выполнения мероприятий по договору от 05.03.2024 № 2440-001199 на технологическое присоединение малоэтажной жилой застройки, которая будет располагаться на земельном участке с кадастровым номером 58:05:0701101:4846 по адресу: 

<

...> максимальной мощностью 10 кВт, категория надежности – 3, класс напряжения – 0.4 кВ, прошло 445 дней. Всего с момента заключения договора прошло 625 дней, что, по мнению третьего лица, является

достаточным сроком для того, чтобы согласовать условия и выполнить мероприятия по подключению. На день поступления заявления в суд работы по выполнению обязательств по договору еще не начаты, что не позволяет надеяться на их завершение в установленный договором подряда между ПАО «Россети Волга» и ООО «Электриксервис» срок (до 25.12.2025). Также полагает, что происходит нарушение принципа добросовестности (ст. 1, ст. 10 ГК РФ), получение оплаты и последующее полное бездействие, это злоупотребление правом и умышленное причинением вреда контрагенту.

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, явившихся в судебное заседание, оценив представленные доказательства в их совокупности на основании статьи 71 АПК РФ, арбитражный суд установил следующие обстоятельства.

В УФАС по Пензенской области 11.07.2025 поступило обращение ФИО3 в отношении филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» по вопросу нарушения сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 05.03.2024 № 2440-001199 (т. 1, л. д. 66).

ФИО3 14.02.2024 с учетом недостающих данных – 19.02.2024 подала в ПАО «Россети Волга» № ПЭ00000935/ЛК9998532 заявку на технологическое присоединение малоэтажной жилой застройки (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом) физического лица по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) (т. 1, л. д. 14).

На основании указанной заявки согласно договору от 05.03.2024 № 2440-001199 сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО3 – электрооборудования малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом) по адресу: 

<

...> (кадастровый номер объекта 58:05:0701101:4846), со следующими характеристиками: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 15 кВт, категория надежности – 3, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,4 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств – 0 кВ (т. 1, л. 

<

...>).

Перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределение обязанностей между сторонами по их выполнению определены в технических условиях № ПЭ0032197 (приложение № 1 к договору от 05.03.2024 № 2440-001199) (т. 1, л. 

<

...>), следовательно, договор об осуществлении технологического присоединения № 2440-001199 между ПАО «Россети Волга» и ФИО3 считается заключенным (далее – договор).

В соответствии с пунктом 12 технических условий срок действия технических условий – 2 года со дня заключения договора об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям.

Согласно пунктам 10.4, 10.7 технических условий № ПЭ0032197 сетевой организации необходимо выполнить проектирование и строительство ВЛ (КЛ)-10 кВ от вновь построенной ТП-10/0,4 кВ по яч. № 26 «Мастиновка» до указанной в пункте 7 точки присоединения, а также установку прибора учета электроэнергии

класса точности 2,0 и выше в соответствии с требованиями раздела 10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 и пунктом 80 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

В соответствии с пунктом 1.7 договора от 05.03.2024 № 2440-001199 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения договора.

В установленный срок мероприятия, предусмотренные вышеназванным договором, ПАО «Россети Волга» не выполнены.

14.08.2025 между ПАО «Россети Волга» (заказчик) и ООО «Электриксервис» (подрядчик) заключен договор подряда от № 2540-005300 на выполнение работ «под ключ» (т. 1, л. д. 18-35).

В соответствии с пунктом 2.1 указанного договора подряда подрядчик обязуется в соответствии с техническими заданиями (приложение № 1а; приложение № 16; приложение № 1в; приложение № 1г) осуществить разработку проектной и рабочей документации, выполнить изыскательские работы, работы по описанию границ охранных зон и кадастровые работы, строительно-монтажные и пусконаладочные работы в том числе по объекту «Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 3201 в с. Бессоновка Бессоновского района (ФИО3) (под ключ)» и сдать результаты заказчику, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке, предусмотренном договором. На I этапе выполнить предпроектное обследование и сбор исходных данных, проведение необходимых инженерно-геодезических изысканий (геодезическая съемка в масштабе М 1:500 (1:1000)), кадастровые работы и работы по описанию границ охранных зон, разработку, обоснование и согласование с заказчиком проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативных документов. На II этапе выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы. Работы по данному этапу должны выполняться в полном соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией, разработанной в рамках I этапа выполнения работ.

Согласно пункту 3.3.3 договора подряда по объекту «Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ № 3201 в с. Бессоновка Бессоновского района (ФИО3) срок завершения работ – 25.12.2025.

Указанные обстоятельства послужили поводом для возбуждения в отношении общества дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ (определение от 1807.2025) (т. 1, л. д. 94-97), составления 06.08.2025 в отношении общества протокола № 058/04/9.21-498/2025 об административном правонарушении (т. 1, л. д. 99-101), по результатам рассмотрения которого антимонопольным органом вынесено постановление от 28.08.2025 о назначении административного наказания по делу № 058/04/9.21-498/2025 об административном правонарушении, в соответствии с которым ПАО «Россети Волга» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 600 000 руб. (т. 1, л. 

<

...>). В связи с тем, что ПАО «Россети Волга» в рамках рассмотрения административного дела сведения о прекращении

противоправного поведения не представило, антимонопольным органом 28.08.2025 вынесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по делу № 058/04/9.21-498/2025 (т. 1, л. 

<

...>).

Не согласившись в вынесенными антимонопольным органом постановлением и представлением, общество оспаривает их в настоящем деле.

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. По смыслу приведенной нормы, необходимым условием для признания ненормативного правового акта, действий (бездействия) недействительными является одновременно несоответствие оспариваемого акта, действия (бездействия) закону или иному нормативному акту и нарушение прав и законных интересов организации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 5 статьи 200 АПК РФ обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

В соответствии с частью 6 статьи 210 АПК РФ при рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании проверяет законность и обоснованность оспариваемого решения, устанавливает наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего

оспариваемое решение, устанавливает, имелись ли законные основания для привлечения к административной ответственности, соблюден ли установленный порядок привлечения к ответственности, не истекли ли сроки давности привлечения к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

При рассмотрении дела об оспаривании решения административного органа арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении, и проверяет оспариваемое решение в полном объеме (часть 7 статьи 210 АПК РФ).

При этом при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Обязанность государственного органа по доказыванию соответствия оспариваемых действий (бездействий) закону или иному нормативному правовому акту не освобождает заявителя от доказывания нарушения прав и законных интересов лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности оспариваемыми действиями (бездействиями).

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ).

Судом проверено и установлено, что срок, предусмотренный частью 4 статьи 198 АПК РФ для обращения в суд, соблюден заявителем.

В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 30.6 КоАП РФ при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении в числе других проверяются на основании имеющихся в деле и дополнительно представленных материалов законность и обоснованность вынесенного постановления.

С учетом положений статей 28.3, 23.48 КоАП РФ, Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331, Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 23.07.2015 № 649/15, Перечня должностных лиц территориальных органов Федеральной антимонопольной службы, управомоченных составлять протокол об административном правонарушении, утвержденного приказом Федеральной антимонопольной службы от 19.11.2004 № 180, протокол об административном правонарушении составлен, дело об административном правонарушении рассмотрено и оспариваемое постановление принято должностным лицом антимонопольного органа в пределах предоставленных полномочий.

Полномочия антимонопольного органа заявителем не оспариваются.

Процессуальных нарушений при составлении протокола об административном правонарушении и рассмотрении дела об административном правонарушении судом не установлено.

Частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ определено: нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного

доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, магистральным газопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи,

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

Объектом данного правонарушения являются общественные отношения, возникающие в сфере эксплуатации сетей и систем энергоснабжения.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения заключается в несоблюдении виновным лицом при технологическом присоединении энергопринимающих устройств требований соответствующих нормативных актов.

Субъектами ответственности по данной статье являются субъекты естественной монополии, собственники или иные законные владельцы, в частности объектов электросетевого хозяйства.

В качестве квалифицирующего признака в части 2 статьи 9.21 КоАП РФ закреплена повторность совершения предусмотренного частью 1 состава административного правонарушения в течение одного календарного года с момента первого привлечения к ответственности за аналогичное правонарушение. Возможность привлечения лица к административной ответственности обусловлена обязательным наличием всех элементов состава правонарушения.

В силу статьи 3 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» субъектом естественной монополии является хозяйствующий субъект, занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии. В соответствии с частью 1 статьи 4 указанного Федерального закона услуги по передаче электрической энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественных монополий.

Приказом Федеральной службы по тарифам России от 27.06.2008 № 237-э ПАО «Россети Волга» включено в Реестр субъектов естественных монополий в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль, в топливно-энергетическом комплексе по передаче электрической энергии под регистрационным номером № 64.1.50.

ПАО «Россети Волга» является владельцем объектов электросетевого хозяйства, с использованием которых оказывает услуги по передаче электрической

энергии, и в силу положений статьи 3 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» является сетевой организацией.

Таким, образом, ПАО «Россетти Волга», оказывая услуги по передаче электрической энергии в границах присоединенных электрических сетей, в том числе на территории Пензенской области, является сетевой организацией, имеет установленный тариф на передачу электрической энергии и на технологическое присоединение к электрическим сетям, выступает субъектом естественной монополии.

Основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической и тепловой энергии устанавливает Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике).

В статье 3 Закона об электроэнергетике установлено, что услугой по передаче электрической энергии признается комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе, по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями. Следовательно, технологическое присоединение является обязательной составной частью единого технологического процесса по оказанию услуг по передаче электрической энергии.

Согласно части 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

При этом если для обеспечения технической возможности технологического присоединения и недопущения ухудшения условий электроснабжения присоединенных ранее энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики необходимы развитие (модернизация) объектов электросетевого хозяйства и (или) строительство, реконструкция объектов по производству электрической энергии, сроки технологического присоединения определяются исходя из инвестиционных программ сетевых организаций и обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям

(далее – Правила № 861), определяющие порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям (пункт 1 Правил № 861).

Пунктом 2 Правил № 861 установлено, что действие указанных Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств, увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, изменения категории надежности электроснабжения, точек присоединения, видов производственной деятельности, не влекущих пересмотра величины максимальной мощности, но изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

В соответствии с пунктом 3 Правил № 861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее – заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

На основании пункта 6 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В соответствие с пунктом 103 Правил № 861 наличие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному пунктом 105 настоящих Правил. Документ об оплате должен содержать наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также реквизиты счета на оплату технологического присоединения. Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных Правилами № 861 со дня оплаты заявителем счета, предусмотренного пунктом 103 указанных Правил (пункт 104 Правил № 861). Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению исчисляется со дня заключения договора и составляет 4 месяца – для заявителей (в том числе указанных в пунктах 13(3), 13(5) и 13(6) настоящих Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет 670 кВт включительно (пункт 16 Правил № 861).

Согласно пункту 12 Правил № 861 в рамках договора сетевая организация обязуется осуществить комплекс организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей (в том числе с привлечением иных сетевых организаций в случае заключения договора с системообразующей территориальной сетевой организацией), а потребитель услуг – оплатить их.

В соответствии с пунктом 14 Правил № 861 указанное условие осуществления технологического присоединения распространяется на заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривает по одному источнику.

Сроки осуществления технологического присоединения, предусмотренные пунктом 16 Правил № 861, являются существенным условием договоров об осуществлении технологического присоединения, и не могут быть пропущены со стороны организации.

В соответствии с пунктом 16 Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд и иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков.

Из материалов дела следует, что между ПАО «Россети Волга» и ФИО3 05.03.2024 заключен договор № № 2440-001199 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Предметом договора является осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств – электрооборудования малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом) по адресу: 

<

...> (кадастровый номер объекта 58:05:0701101:4846), в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) (пункт 1.1 договора).

Перечень мероприятий по технологическому присоединению и распределение обязанностей между сторонами по их выполнению определены в технических условиях № ПЭ0032197 (приложение № 1 к договору от 05.03.2024 № 2440-001199).

В соответствии с пунктом 12 технических условий срок действия технических условий – 2 года со дня заключения договора об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям.

Согласно пунктам 10.4, 10.7 технических условий № ПЭ0032197 сетевой организации необходимо выполнить проектирование и строительство ВЛ (КЛ)-10

кВ от вновь построенной ТП-10/0,4 кВ по яч. № 26 «Мастиновка» до указанной в пункте 7 точки присоединения, а также установку прибора учета электроэнергии класса точности 2,0 и выше в соответствии с требованиями раздела 10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии», утвержденных Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 и пунктом 80 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

В соответствии с пунктом 1.7 договора от 05.03.2024 № 2440-001199 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения договора.

Однако работы в установленные сроки сетевой организацией не были выполнены.

При этом сетевая организация полагает, что ею были предприняты необходимые действия для выполнения условий договора.

ПАО «Россети Волга» указывает, что с целью исполнения данного договора со стороны сетевой организации проведены закупочные и конкурентно-конкурсные процедуры, заключен договор подряда от 14.08.2025 № 2540-005300 на выполнение работ «под ключ» с ООО «Электриксервис», нарушение срока выполнения мероприятий по вышеуказанному договору технологического присоединения связано с длительным сроком согласования указанного договора подряда, срок завершения работ в соответствии с пунктом 3.3.3 договора подряда – 25.12.2025.

При этом доказательства того, что сетевой организацией предпринимались меры для выполнения работ по договору от 05.03.2024 № 2440-001199 в течение шести месяцев со дня его заключения (договор подряда заключен лишь 14.08.2025, сроки выполнения работ на объекте, принадлежащем ФИО3, заведомо превышают вышеуказанный срок), урегулированию взаимоотношений с подрядной организацией в материалы дела не представлено.

Таким образом, неисполнение сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в установленный Правилами № 861 и заключенным договором нарушает положения Правил № 861 и свидетельствует о совершении ПАО «Россети Волга» административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.21 КоАП РФ.

Суд приходит к выводу, что указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что сетевой организацией в установленные сроки не принимались необходимые меры по исполнению договора от 05.03.2024 № 2440-001199.

Доказательства невозможности исполнения вышеуказанного договора в материалы дела не представлены.

Согласно части 1 статьи 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные на основании части 2 статьи 26.2 КоАП РФ устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными КоАП РФ, объяснениями лица, в отношении которого ведется

производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Таким образом, событие и объективная сторона вменяемого заявителю административного правонарушения, подтверждается представленными доказательствами: договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, пояснениями ПАО «Россети-Волга», а также иными материалами административного дела.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 4.3 КоАП РФ повторное совершение однородного административного правонарушения – совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного административного правонарушения.

Лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления (статья 4.6 КоАП РФ).

Установленное в рамках настоящего дела правонарушение совершалось ПАО «Россети Волга» в период времени, когда лицо считалось подвергнутым административному наказанию.

Антимонопольным органом установлено, что ранее ПАО «Россети Волга» привлекалось к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ: постановлением УФАС России по Пензенской области от 19.02.2024 по делу об административном правонарушении № 058/04/9.21-8/2024, которое вступило в законную силу 01.06.2024.

В связи с вышеизложенным суд приходит к выводу о правомерности выводов УФАС по Пензенской области о наличии в действиях (бездействии) ПАО «Россети Волга» объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

Согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых этим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В пункте 16.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» разъяснено, что понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 КоАП РФ. При этом в отличие от физических лиц в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины не выделяет.

Следовательно, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Обстоятельства, указанные в части или части 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

Учитывая, что доказательств, подтверждающих факт принятия ПАО «Россети Волга» исчерпывающих мер, направленных на соблюдение требований действующего законодательства, наличия объективной невозможности соблюдения установленных требований Правил № 861, в материалы дела не представлено, суд приходит к выводу о наличии в деянии общества вины в совершении вменяемого административного правонарушения.

С учетом изложенного суд считает, что материалы дела содержат совокупность допустимых и относимых доказательств, достаточных для установления в деянии состава правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

Таким образом, антимонопольным органом сделан обоснованный вывод о том, что рассматриваемое деяние общества образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ.

Нарушений процессуальных требований КоАП РФ при производстве по делу об административном правонарушении в отношении заявителя. Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, судом не установлено.

О времени и месте составления протокола об административном правонарушении и рассмотрении дела об административном правонарушении заявитель был извещен надлежащим образом, его уполномоченные представители участвовали при составлении протокола и вынесении постановления.

Установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности на момент вынесения постановления о привлечении к административной ответственности не истек.

Исключительные обстоятельства, свидетельствующие о наличии оснований для применения положений статьи 2.9 КоАП РФ и освобождения заявителя от административной ответственности, судом не установлены. Обществом данные обстоятельства не обозначены, какие-либо доказательства не представлены.

Из доказательств, имеющихся в материалах дела, основания для применения положений статьи 2.9 КоАП РФ не усматриваются.

Основания для замены административного штрафа на предупреждение, указанные в статье 4.1.1 КоАП РФ, отсутствуют.

Согласно части 2 статьи 9.21 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

В силу части 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

УФАС по Пензенской области при рассмотрении дела об административном правонарушении в качестве обстоятельств смягчающих

административную ответственность, согласно статье 4.2 КоАП РФ учтены следующие обстоятельства: оказание лицом, совершившим административное правонарушение, содействия органу, уполномоченному осуществлять производство по делу об административном правонарушении, в установлении обстоятельств, подлежащих установлению по делу об административном правонарушении.

В качестве обстоятельства, отягчающего административную ответственность, согласно статье 4.3 КоАП РФ, антимонопольным органом не установлено.

При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей (часть 3.2).

При рассмотрении дела антимонопольным органом было учтено финансовое положение общества с учетом поступивших сведений и документов об имущественном и финансовом положении юридического лица, из которых следовало, что за 2024 год у ПАО «Россети Волга» согласно представленной финансовой отчетности наблюдается положительный финансовый результат, исключительных обстоятельств, связанных с финансовым положением правонарушителя, при рассмотрении дела об административном правонарушении не установлено.

Учитывая вышеизложенное, оспариваемым постановлением антимонопольным органом обществу назначено административное наказание в виде взыскания административного штрафа в размере 600 000,00 руб.

Согласно имеющемуся с материалах дела платежному поручению от 15.09.2025 № 14530 в соответствии с частями 1.3-3 КоАП РФ сетевой компанией оплачен административный штраф по делу № 058/04/9.21-498/2025 в сумме 300 000,00 руб. (т. 1, л. д. 129).

Кроме того, ПАО «Россети Волга» заявлены требования о признании незаконным и отмене представления административного органа от 28.08.2025 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по делу № 058/04/9.21-498/2025 (л. 

<

...>).

В обоснование указанного требования заявитель ссылается на нарушение своих прав и законных интересов в сфере предпринимательской деятельности путем возложения на общество обязанностей, исполнение которых не представляется возможным в установленный представлением срок.

Согласно абзацу 3 пункта 20.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" предусмотренные статьей 29.13 КоАП РФ представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению

административного правонарушения, в случае, если они вынесены на основании обстоятельств, отраженных в постановлении по делу об административном правонарушении, могут быть обжалованы вместе с таким постановлением по правилам, определенным параграфом 2 главы 25 АПК РФ.

В силу статьи 29.13 КоАП РФ должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий. Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление.

Обжалуемое представление вынесено уполномоченным должностным лицом в пределах предоставленных ему полномочий на основании результатов проведенной проверки при наличии для этого соответствующих оснований.

Поскольку оснований для признания незаконным постановления антимонопольного органа от 28.08.2025 о назначении административного наказания в виде штрафа по делу об административном правонарушении не установлено, сведений о прекращении противоправного поведения ПАО «Россети Волга» в ходе рассмотрения административного дела не представлено, то представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, является законным, оснований для его отмены не имеется.

Представление является мерой предупреждения новых правонарушений, совершение которых обусловлено теми же причинами и условиями, что и выявленное. Установление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, является одной из задач производства по делам об административных правонарушениях.

Суд отклоняет довод ПАО «Россети Волга» о невозможности исполнения оспариваемого представления в связи с тем, что доказательств невозможности исполнения представления в материалы дела не представлено.

Более того, согласно материалам дела сетевой организации проведены закупочные и конкурентно-конкурсные процедуры, заключен договор подряда от 14.08.2025 № 2540-005300 на выполнение работ «под ключ» с ООО «Электриксервис». Сетевая организация планировала осуществить технологическое присоединение объекта подателя жалобы в срок до 25.12.2025, в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении сетевой организацией осуществлялись мероприятия для строительства объектов электроснабжения и подключения объекта потерпевшего, договор об осуществлении технологического присоединения от 05.03.2024 № 2440-001199 является действующим.

Соответственно, в целях исполнения оспариваемого представления ПАО «Россети Волга» необходимо направить в адрес УФАС России по Пензенской области информацию об исполнении мероприятий по технологическому присоединению.

С учетом положений приведенных норм законодательства, оценив обстоятельства дела в их совокупности, исследовав представленные доказательства

в соответствии со статьей 71 АПК РФ, суд признает постановление УФАС России по Пензенской области о назначении административного наказания по делу об административном правонарушении от 28.08.2025 № 058/04/9.21-498/2025 и представление от 28.08.2025 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по делу № 058/04/9.21-498/2025, законными и обоснованными.

Согласно части 3 статьи 211 АПК РФ в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что решение административного органа о привлечении к административной ответственности является законным и обоснованным, суд принимает решение об отказе в удовлетворении требования заявителя.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что заявленное обществом требование не подлежит удовлетворению.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины не подлежат распределению, поскольку в силу части 4 статьи 208 АПК РФ заявление об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности государственной пошлиной не облагается.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

отказать публичному акционерному обществу «Россети Волга» в лице филиала «Пензаэнерго» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в удовлетворении требований о признании незаконным постановления Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области от 28.08.2025 о назначении административного наказания по делу № 058/04/9.21-498/2025 об административном правонарушении и представления от 28.08.2025 об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по делу № 058/04/9.21-498/2025.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения путем подачи жалобы через Арбитражный суд Пензенской области.

Судья В.К. Удавихина